дело №2-227/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

29 ноября 2019 года пгт.Троицко-Печорск

Троицко-Печорский районный суд Республики Коми в составе:

председательствующего судьи Чулкова Р.В., 

при секретаре Задорожной О.А.,

с участием ответчика Ласки В.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» к Ласка В.И. о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании понесенных расходов, неустойки, расходов по оплате государственной пошлины,

установил:

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее истец, ПАО «МРСК») обратилось в суд с иском к Ласке В.И. о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании понесенных расходов, неустойки, расходов по оплате государственной пошлины. Требования мотивированы тем, что 19.11.2018 между сторонами заключен договор №Ц/18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составил 6 месяцев со дня заключения договора. Со своей стороны истец выполнил условия заключенного договора, произвел мероприятия по технологическому присоединению в полном объеме 26.04.2019, однако, ответчик принятые на себя обязательств не исполнил. В адрес ответчика истцом неоднократно направлялись претензионные письма, ответов на которые не последовало. Истец обращался к Ласке В.И. с соглашением о расторжении договора, которое ответчиком подписано не было. Истец полагает, что не проявляя инициативы в продлении срока действия договора Ласка В.И. утратил интерес в дальнейшем исполнении договора. Размер задолженности ответчика перед истцом в рамках оплаты заключенного договора с учетом, внесенных Ласка В.И. денежных средств составил 31833,05 рублей. По условиям договора стороны предусмотрели взыскание неустойки в размере 0,25% от общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, но не более чем за год просрочки. По расчету истца размер неустойки, подлежащей взысканию с ответчика на 22.08.2019, составил 8964,05 рублей. ПАО «МРСК» просит суд расторгнуть договор, заключенный с ответчиком 19.11.2018, взыскать с Ласки В.И. в пользу истца 31833,05 рублей в счет оплаты задолженности понесенных фактических расходов, 8964,05 рублей неустойку, которую взыскать по день вынесения решения, расходы по оплате государственной пошлины.

В судебное заседание представитель истца, извещенный о времени и месте рассмотрения дела, не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела без его участия. В порядке ст.167 ГПК РФ дело рассмотрено судом в отсутствие представителя истца.

В судебном заседании ответчик с иском не согласился, просил в его удовлетворении отказать. Обстоятельства заключения договора с истцом не оспаривал, однако, указал, что обязательства по договору ПАО «МРСК» в полном объеме не выполнило, поскольку не произвело подключение проводов от высоковольтной линии к принимающему устройству ответчика. Ему пришлось самостоятельно, за счет собственных денежных средств наращивать провода, чтобы имелась возможность их подключения. Отметил, что уведомил истца о готовности к технологическому присоединению, но по проекту имелись замечания, предоставлен срок их устранения, в течение которого Ласка В.И. планирует произвести работы в целях устранения выявленных нарушений, либо внести изменения в существующий проект. Не оспаривал того, что кроме первоначального взноса, платежи в установленные договором сроки истцу не вносил, ссылаясь на материальные трудности, однако, заверил, что до 15.12.2019 погасит всю задолженность. Просил не расторгать договор, поскольку полагал, что тем самым будут причинены убытки не только ему, но и истцу. В ходе рассмотрения дела по существу, неоднократно заявлял ходатайства об отложении в связи с предоставлением времени для возможности заключения мирового соглашения с истцом, которое на момент вынесения данного решения не заключено.

Выслушав пояснения ответчика, исследовав и проанализировав материалы дела, суд приходит к следующему.

Судом установлено и не оспаривается сторонами, что 19.11.2018 между ПАО «МРСК» в лице директора производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК» «Комиэнерго» и ФИО1 заключен договор осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства №Ц/18. 

Предметом договора являлось принятие сетевой организацией на себя обязательств по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – щит учета, в т.ч. по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом установленных договором характеристик. Заявитель принял на себя обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения лесоперерабатывающей базы, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Точка (точки) присоединения указаны в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагаются на расстоянии не далее 25 м. от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. Технические условия являются неотъемлемой частью договора. 

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. 

Из обязательств сторон по договору следует, что сетевая организация должна надлежащим образом исполнить обязательства, в т.ч. по выполнению возложенных на нее мероприятий по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. В течение 10 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении им технических условий в случае выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, в также допуск в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442. Принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя с должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору. Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением установленного договором срока, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю. При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий, при этом, дополнительная плата не взимается.

По условиям договора заявитель обязался: надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в т.ч. по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; принять участие в согласованный сторонами срок в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом сетевой организации и должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в проверке выполнения технических условий заявителем, а также в допуске к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающем составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442; получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения, либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации; надлежащим образом исполнять установленные договором обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; вправе при невыполнении технологических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с приказом Минстроя Республики Коми от 28.12.2017 №75/1-Т с учетом изменений внесенных приказом Министерства ЖКХ Республики Коми от 10.50.2018 №14/1-Т «Об установлении ставок для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям на территории Республики Коми» и составил 31452,80 рублей, кроме того НДС. До 31.12.2018 стоимость договора увеличивается на сумму НДС по ставке 18%, с 01.01.2019 стоимость договора увеличивается на сумму НДС по ставке 20%. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: первая доля в размере 10% платы составляет 3145,28 рублей, кроме того НДС, вносится в течение 15 дней со дня заключения договора; вторая доля в размере 30% платы составляет 9435,84 рублей, кроме того НДС, вносится в течение 60 дней со дня заключения договора; третья доля в размере 20% платы составляет 6290,56 рублей, кроме того НДС, вносится в течение 180 дней со дня заключения договора; четвертая доля в размере 30% платы составляет 9435,84 рублей, кроме того НДС, вносится в течение 15 дней со дня фактического присоединения; пятая доля в размере 10% платы составляет 3145,28 рублей, кроме того НДС, вносится в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным ГК РФ. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки, совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном договором порядке за год просрочки. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, установленный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере определенном в судебном порядке, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты. Заявитель, в случае нарушения срока внесения платы за технологическое присоединение, установленного договором, обязуется уплатить сетевой организации неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом, совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном договором порядке за год просрочки.

К ненадлежащему исполнению заявителем своих обязательств относится в т.ч.: не направление в адрес сетевой организации уведомления о выполнении мероприятий, предусмотренных техническим условиями, в т.ч. уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий; уклонение от проведения проверки выполнения технических условий, в т.ч. от проведения повторного осмотра энергопринимающих устройств после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий; не устранение замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий; ненадлежащее исполнение обязательств по внесению платы за технологическое присоединение.

29.10.2018 ПАО «МРСК» ответчику выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям, из которых следует, что точкой присоединения установлена ф.«новый» РУ-0,4 кВ ТП-«новая». Ласка В.И. должен был смонтировать на границе земельного участка приемное и вводное устройство с коммутационным аппаратом с защитой отходящих линий от токов короткого замыкания и перегрузки для приема провода ЛЭП-0,4 кВ от ф.«новый» РУ-0,4 кВ ТП-«новая»; выполнить монтаж электропроводки от коммутационного аппарата для подключения к линейному ответвлению, тип и технические характеристики коммутационного аппарата определить проектом, сечение кабеля (провода) определить проектом. Прибор учета электроэнергии (мощности) подлежит установке на границе балансовой принадлежности электросетей; точку учета электроэнергии определить на границе балансовой принадлежности электросетей; выполнить проект электроснабжения, проект согласовать с ПО «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго».

30.04.2019 истцом в адрес ответчик направлялось уведомление о готовности сетевой организации к осуществлению технологического присоединения объекта «Лесоперерабатывающая база», где разъяснялось о необходимости информирования о выполнении со стороны заказчика технических условий от 29.10.2018 с целью организации проверки и дальнейшего фактического технологического присоединения объекта к электрическим сетям. 

20.05.2019 истцом в адрес ответчика направлена претензия, в которой сообщалось о нарушении сроков внесения платежей за технологическое присоединение. Сообщалось, что по состоянию на 20.05.2019 задолженность по авансовым платежам составляла 18871,68 рублей, в т.ч. НДС 3145,28 рублей, размер неустойки за нарушение сроков оплаты 11889,17 рублей. Также обращалось внимание на необходимость в течение 30 дней с момента направления претензии письменно уведомить сетевую организацию о выполнении заказчиком технических условий. 

19.06.2019 ПО «МРСК» уведомляло Ласку В.И. о приостановлении исполнения обязательств по договор об осуществлении технологического присоединения, в связи с исполнением сетевой организацией своих обязательств и не направлении со стороны заказчика уведомления о выполнении технических условий в адрес истца. 20.06.2019 истец повторно направил ответчику претензию, в которой требовал в семидневный срок перечислить неустойку по договору в сумме 2969,28 рублей, а также соглашение о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения с актом выполненных работ.

Указанные уведомления, претензии, а также не подписанные ФИО1 соглашение и акт, ответчиком не получены, возвращены почтой в адрес истца.

Указанные обстоятельства подтверждены представленными доказательствами, оценив которые в соответствии со ст.67 ГПК РФ, суд находит требования истца основанными на законе и договоре.

Взаимоотношения сторон спора урегулированы нормами Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее Федеральный закон), постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 «Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в электрическим сетям» (далее Правила технологического присоединения), нормами Гражданского кодекса РФ об обязательствах, а также положениями главы 39 ГК РФ.

В соответствии с п.1 ст.26 Федерального закона №35-ФЗ от 26.03.2003 технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством РФ или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий. Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством РФ, устанавливает: правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора; процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам; правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора; состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики; ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством РФ об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

В развитие данных положений Федерального закона Правительством РФ принято постановление №861, которым утверждены Правила технологического присоединения.

Так, в п.16, 16(5), 16 (6), 17, 18, 24 данных Правил установлено, что договор должен содержать следующие существенные условия: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению. Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, внесение платы за технологическое присоединение (за исключением случаев, урегулированных п.16.2 настоящих Правил) осуществляется в следующем порядке: 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора; 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора; 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора; 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий; заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение. 

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

Из материалов дела усматривается, что свои обязательства по заключенному с ответчиком договору технологического присоединения ПАО «МРСК» в установленные сроки выполнило, уведомив об этом ответчика. Приведенные в суде ФИО2 в обоснование не согласия с иском доводы о ненадлежащем исполнении истцом обязательств полностью опровергаются доказательствами, представленными суду стороной истца, оснований не доверять которым не имеется. Кроме того, суд отмечает, что до 18.11.2019 ответчик не обращался к истцу с уведомлениями о выполнении им технических условий, а по итогам проведенной истцом проверки выявлены нарушения.

Таким образом, принимая во внимание, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по условиям договора составлял 6 месяцев с даты подписания договора и закончился 19.05.2019 и к моменту окончания данного срока со стороны ответчика в адрес ПАО «МРСК» не поступило уведомлений о выполнении технических условий, с заявлениями о продлении указанного срока, как то предполагают условия договора ответчик к истцу не обращался, хотя такой возможности лишен не был, суд приходит к выводу о существенном нарушении ФИО1 принятых на себя обязательств, что противоречит условиям договора, а также положениям ст.309, 310 ГК РФ.

Кроме того, на момент вынесения решения оплата по договору в полном объеме, в соответствии с условиями заключенного сторонами договора, ответчиком истцу не произведена, что применительно к обстоятельствам дела, условиям договора, а также положениям ст.450 ГК РФ позволяет суду прийти к выводам о существенном нарушении ФИО1 принятых на себя обязательств, вследствие чего, договор от 19.11.2018 подлежит расторжению в судебном порядке по требованию истца.

Определяя размер понесенных истцом расходов по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, суд соглашается с его расчетом, приведенным в заявлении ПАО «МРСК», поскольку он сделан на основании приказа Минстроя Республики Коми от 28.12.2017 №75/1-Т с учетом изменений внесенных приказом Министерства ЖКХ Республики Коми от 10.50.2018 №14/1-Т «Об установлении ставок для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям на территории Республики Коми». При производстве расчета истцом учтены денежные средства, поступившие от ответчика по первому взносу в сумме 3711,43 рубля. При этом, суд отмечает, что включение в расходы НДС не противоречит нормативно-правовому регулированию.

Рассматривая требования истца о взыскании с ответчика неустойки, суд также находит их обоснованными и подлежащими удовлетворению, поскольку это условие сторонами согласовано и включено в договор, не противоречит положениям ст.393 ГК РФ.

При определении размера неустойки, суд исходит из положений п.19 договора, заключенного сторонами, из которого следует, что при определении размера неустойки она начисляется на общий размер платы за каждый день просрочки. Проверив представленный истцом расчет неустойки, суд принимает его за основу при вынесении решения, поскольку он является арифметически верным, произведен с учетом условий договора. Возражений от ответчика относительно иного размера неустойки, нежели тот, что указан истцом в заявлении, в ходе рассмотрения дела не поступало. При определении размера неустойки, также суд исходит из необходимости ее начисления на дату вынесения данного решения. 

Таким образом, размер неустойки, подлежащий взысканию с ответчика в пользу истца за период с 20.05.2019 по 29.11.2019 составит 18305,53 рубля (37743,36 х 193 х 0,25%), где 37743,36 – общий размер платы за технологическое подключение, 193 – количество дней с даты, следующей за датой окончания срока договора по дату вынесения данного решения, 0,25% - неустойка, установленная п.19 договора.

Обстоятельства, приведенные ответчиком в ходе рассмотрения дела, по существу сводятся к наличию возможности продолжения взаимодействия с истцом в рамках заключенного 19.11.2018 договора, в целом не опровергают доводов ПАО «МРСК», в связи с чем, обоснованными признаны быть не могут. Относимых и допустимых доказательств нарушений условий договора со стороны истца, влекущих основания к отказу в удовлетворении иска, ответчиком суду не представлено. В виду существенных нарушений ответчиком условий договора, повлекших для истца такой ущерб, что он в значительной степени лишился того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, оснований для сохранении действия договора суд не усматривает. 

Суд отмечает, что в рамках рассмотрения настоящего гражданского дела, сторонам предоставлялось время для возможности заключения мирового соглашения, однако, данным правом истец не воспользовался, что в свою очередь не лишает ответчика права на заключение мирового соглашения на стадии исполнения решения. 

Поскольку решение состоялось в пользу истца, в соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, оплаченная истцом при подаче иска. 

Руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Иск ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» к Ласка В.И. о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании понесенных расходов, неустойки, расходов по оплате государственной пошлины удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №Ц/18 заключенный 19.11.2018 между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» и ФИО1. 

Взыскать с Ласки В.И. в пользу ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» понесенные расходы по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №Ц/18 в размере 31833 рублей 05 копеек.

Взыскать с Ласки В.И. в пользу ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» неустойку по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №Ц/18 за период с 20.05.2019 по 29.11.2019 в размере 18305 рублей 53 копейки.

Взыскать с Ласки В.И. в пользу ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» расходы по уплате государственной пошлины 11578 рублей.

Резолютивная часть решения изготовлена на компьютере и подписана судьей в совещательной комнате. 

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Коми через Троицко-Печорский районный суд РК в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме. 

Мотивированное решение изготовлено судьей 04 декабря 2019.

Судья Р.В.Чулков