Уникальный идентификатор дела № 92RS0002-01-2023-000542-59производство № 2-1875/2023 

Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

29 мая 2023 года город Севастополь

Гагаринский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего судьи Власенко Ф.В.

при секретаре судебного заседания Васильевой В.В.

с участием:

представителя истцов ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2, ФИО3, ФИО4 к ООО "Севастопольэнерго", третье лицо Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя, ООО "ЭнергоСтрой" о защите прав потребителей

установил:

ФИО2, ФИО3, ФИО4 обратились в суд с иском к ООО "Севастопольэнерго", третье лицо Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя, ООО "ЭнергоСтрой" о защите прав потребителей.

Ссылаясь на обстоятельства, изложенные в иске, ФИО2, ФИО3, ФИО4 просят суд обязать общество с ограниченной ответственностью «Севаетопольшерго» в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда в полном объеме выполнить обязательства по осуществлению технологического присоединения земельного участка ФИО2, расположенного по адресу: 

<

адрес> кадастровый №, в соответствии с Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям № 2884-18 от 07.12.2018 г. к договору № 25018-2884, обязать общество с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда в полном объеме выполнить обязательства по осуществлению технологического присоединения земельного участка ФИО3 расположенного по адресу: 

<

адрес> кадастровый №, в соответствии с Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям №2132-18 от 19.09.2018 г. к договору № 25018-2132, обязать общество с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда в полном объеме выполнить обязательства по осуществлению технологического присоединения земельного участка ФИО4, расположенного по адресу: 

<

адрес> кадастровый номер №, в соответствии с Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям № 1454-19 от 08.07.2019 г. к договору № 25019-1454, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» в пользу ФИО2 договорную неустойку в размере 27,5 руб. (двадцать семь рублей пятьдесят коп.) в день за каждый день просрочки за период с 25.12.2020 года по дату исполнения ответчиком обязательств в натуре об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям №2884-18 от 07.12.2018 г., но не более 10037,50 руб. (десяти тысяч тридцати семи рублей пятидесяти коп.), взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» в пользу ФИО3 договорную неустойку в размере 27,5 руб. (двадцать семь рублей пятьдесят коп.) в день за каждый день просрочки за период с 16.04.2019 года по дату исполнения ответчиком обязательств в натуре об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям №2132-18 от 19.09.2018 г., но не более 10037,50 руб. (десяти тысяч тридцати семи рублей пятидесяти коп.), взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» в пользу ФИО4 договорную неустойку в размере 27,5 руб. (двадцать семь рублей пятьдесят коп.) в день за каждый день просрочки за период с 16.01.2020 года по дату исполнения ответчиком обязательств в натуре об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям №1454-19 от 08,07.2019 г., но не более 10037,50 руб. (десяти тысяч тридцати семи рублей пятидесяти коп.), взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» в пользу ФИО2 денежные средства на случай неисполнения судебного акта в размере 1000 руб. (одна тысяча рублей 00 коп.) в день за каждый день просрочки исполнения обязательства в натуре, начиная с 11-го (одиннадцатого) дня после даты вступления в законную силу решения суда по настоящему делу по дату исполнения ответчиком обязательств в натуре об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям №2884-18 от 07.12.2018, взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» в пользу ФИО3 денежные средства на случай неисполнения судебного акта в размере 1000 руб. (одна тысяча рублей 00 коп.) в день за каждый день просрочки исполнения обязательства в натуре, начиная с 11-го (одиннадцатого) дня после даты вступления в законную силу решения суда по настоящему делу по дату исполнения ответчиком обязательств в натуре об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям №2132-18 от 19.09.2018 г., взыскать с Общество с ограниченной ответственностью «Севастонольэнерго» в пользу ФИО4 денежные средства на случай неисполнения судебного акта в размере 1000 руб. (одна тысяча рублей 00 коп.) в день за каждый день просрочки исполнения обязательства в натуре, начиная с 11-го (одиннадцатого) дня после даты вступления в законную силу решения суда по настоящему делу по дату исполнения ответчиком обязательств в натуре об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям №1454-19 от 08.07.2019 г., взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Севастонольэнерго» в пользу ФИО2 компенсацию причиненного морального вреда вследствие невыполнения ответчиком своих обязательств по осуществлению технологического присоединения земельного участка в размере 20 000 руб. (двадцать тысяч рублей 00 коп.), взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» в пользу ФИО3 компенсацию причиненного морального вреда вследствие невыполнения ответчиком своих обязательств по осуществлению технологического присоединения земельного участка в размере 20 000 руб. (двадцать тысяч рублей 00 коп.), взыскать с общество с ограниченной ответственностью «Севастонольэнерго» в пользу ФИО4 компенсацию причиненного морального вреда вследствие невыполнения ответчиком своих обязательств по осуществлению технологического присоединения земельного участка в размере 20 000 руб. (двадцать тысяч рублей 00 коп.).

В обоснование иска указано, что между ФИО3 и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №. Приложением № 1 к договору являются технические условия для присоединения к электрическим сетям №2132-18 от 19.09.2018 г. Указанным договором определены обязанности заявителя по установке вводно-учетного устройства и организации учета электроэнергии, и обязательства сетевой организации — по строительству трансформаторной подстанции и линии 0,4 кВ. и подключению электроустановок заявителя.

На указанном земельном участке находится жилой дом, нахождение жилого дома площадью 157,4 кв.м. кадастровый № подтверждается выписками из ЕГРН.

Между ФИО2 и ответчиком заключен договор № 25018-2884 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> кадастровый №. Приложением № 1 к названному договору являются технические условия для присоединения к электрическим сетям №2884-18 от 07.12.2018 г. Указанным договором определены обязанности заявителя по установке вводно-учетного устройства и организации учета электроэнергии, и обязательства сетевой организации — по строительству трансформаторной подстанции и линии 0,4 кВ и подключению электроустановок заявителя.

Между ФИО4 и ответчиком заключен договор № 2503 9-1454 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям земельного участка, расположенного но адресу: 

<

адрес> кадастровый №. Приложением № к названному договору являются технические условия для присоединения к электрическим сетям №1454-19 от 08.07.2019 г. Указанным договором определены обязанности заявителя по установке вводно-учетного устройства и организации учета электроэнергии, и обязательства сетевой организации по строительству трансформаторной подстанции и линии 0.4 кВ и подключению электроустановок заявителя.

17.02.2020 года на вх. № 262/1 ФИО4 получено письмо от ООО «Севэнергосбыт» с предложением подписать дополнительное соглашение о продлении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №25019-1454 от 15.07.2019 г., которое ФИО4 не подписано.

ФИО2, ФИО3, ФИО4 выполнены свои обязательства по указанным договорам, ООО "Севастопольэнерго" в установленный договорами срок свои обязательства не выполнила.

Указанными обстоятельствами мотивировано обращение ФИО2, ФИО3, ФИО4 в суд с иском.

Истцы ФИО2, ФИО3, ФИО4 в судебное заседание не явились, извещены о дате, времени, месте судебного заседания надлежащим образом посредством извещения их представителя ФИО1, что усматривается из расписки о судебном заседании на 29.05.2023, что по смыслу подпункта 3 части 2 статьи 117 ГПК РФ является надлежащим извещением истцов о рассмотрении дела. ФИО2, ФИО3, ФИО4 воспользовались правом вести дело с помощью представителя.

Представитель ФИО2, ФИО3, ФИО4 – ФИО1, действующая на основании доверенности, явилась в судебное заседание, исковые требования поддержала, просила исковые требования удовлетворить.

Представитель ответчика ООО "Севастопольэнерго" в судебное заседание не явился, о причинах неявки в судебное заседание не сообщил, о дате, времени, месте судебного заседания ответчик извещен надлежащим образом, что усматривается из расписки о судебном заседании на 29.05.2023.

Представитель третьего лица Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя в судебное заседание не явился, о причинах неявки в судебное заседание не сообщил, третье лицо о дате, времени, месте судебного заседания извещено надлежащим образом 12.04.2023.

Представитель третьего лица ООО "ЭнергоСтрой" в судебное заседание не явился, о причинах неявки в судебное заседание не сообщил, о дате, времени, месте судебного заседания третье лицо извещено надлежащим образом 20.04.2023, поскольку судебная корреспонденция возвращена отправителю из-за истечения срока хранения, что по смыслу п.п. 34, 35 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 г. N 234, ч. 2 ст. 117 ГПК РФ, п. п. 67, 68 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" является надлежащим извещением третьего лица о судебном заседании.

Руководствуясь положениями статей 113, 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле, поскольку они извещались о дате, времени и месте судебного заседания в установленном законом порядке.

Заслушав пояснения участников судебного разбирательства, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 

Согласно части 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В соответствии с пунктом 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 (далее - Правила), в редакции, действующей на момент обращения истца (здесь и далее редакция Правил от 29.10.2021), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Истец относится к категории лиц, указанных в пункте 14 Правила, - физическое лицо, обратившееся в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Пунктом 2(2) Правил установлено, что действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые завершенных строительством, ранее присоединенных энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, относящихся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества либо принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, и иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, максимальная мощность которых изменяется.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (п. 6).

В соответствии с пунктом 8 Правил для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8(1) настоящих Правил. Заявка направляется по формам согласно приложениям N 4 - 7 любым способом ее подачи (очно, почтой, с использованием официального сайта сетевой организации или в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, возникающих в ходе осуществления процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал).

Пунктом 8(5) Правил в редакции Постановления Правительства РФ от 21.12.2018 N 1622, действующей с 01.01.2019, предусмотрено, в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, а также энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом (при наличии).

Судом при рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства.

19.09.2018 на основании поданной ФИО3 заявки ООО «Севастопольэнерго» выданы технические условия № 2132-18 для присоединения к электрическим сетям объекта ФИО3

07.12.2018 на основании поданной ФИО2 заявки ООО «Севастопольэнерго» выданы технические условия № 2884-18 для присоединения к электрическим сетям объекта ФИО2

на основании поданной ФИО5 заявки ООО «Севастопольэнерго» выданы технические условия № 1454-19 для присоединения к электрическим сетям объекта ФИО5

Между ООО «Севастопольэнерго» и истцами посредством оплаты счета заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрически сетям", утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 86 (далее-Правила № 861).

В соответствии с Правилами № 861, п. 4 указанного договора об осуществлении технологического присоединения технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с условиями указанного договора (п. 1), ООО «Севастопольэнерго» приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (увеличение мощности) которые располагается на земельных участках по адресу 

<

адрес>, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов элетросетевого хозяйства (энергоприиимающих устройств, объектов электроэнергетики) с учетом следующих характеристики указанных в технических условиях.

Техническими условиями установлен перечень мероприятий, которые стороны по договору должны выполнить в соответствии с заключенным договором (п. 10 и 11 технических условий).

Основной источник питания: ПС-110/6кВ «Омега». Резервный источник питания отсутствует.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня поступления подтверждающих документов об оплате счета.

В соответствии со статьёй 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-Ф3 «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

В соответствии ст. 10 технических условий ООО «Севастопольэнерго» необходимо выполнить мероприятия: установить транзитную КТП -6/ 0,4 кВ., с силовым трансформатором, предусмотреть узел технического учета электрической энергии в проектируемой КТП с применением прибора учета электроэнергии класса точности, соответствующего требованиям постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, с функцией передачи данных открытым протоколом через интерфейс связи RS- 485 и установить устройство сбора и передачи данных (УСПД) с возможностью передачи данных на сервер ООО «Севастопольэнерго», запитать проектируемую транзитную КТП.

Из материалов дела следует, что ООО «Севастопольэнерго» во исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения заключило договор подряда с ООО «Союз-Спепсвязьстрой» от 01.10.2019 № 536-92/19, согласно которого подрядчик обязан выполнить комплекс работ по объекту «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от КПТ - 956 до опоры подключения дачных и жилых домов на земельных участках в районе Фиолентовского шоссе, а именно: выполнить проектно-изыскательские работы, разработать и согласовать со всеми заинтересованными организациями техническую документацию, выполнить комплекс строительно-монтажных, пусконаладочных работ.

Из дела усматривается, что при проведении проектно-изыскательных работ по договору подряда было выявлено, что земельный участок, на котором необходимо проводить работы, расположен на земле ГКУ «Севастопольское лесничество». На этапе согласования со всеми заинтересованными лицами проектной документации, подрядной организацией получен отказ Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя в связи с тем, что органом исполнительной власти города Севастополя направлены в суд иски по причине выявлений кадастровых ошибок.

В соответствии с требованием постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2015 № 522 «Об утверждении Порядка и условий размещения на территории города Севастополя объектов, которые могут быть размещены на землях и земельных участках, находящихся в государственной собственности» выполнение строительно- монтажных работ возможно после получения разрешения на размещение линейных объектов.

Таким образом, выполнение мероприятий по строительству сетей невозможно без получения от Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) согласования схем размещения линейных объектов.

При рассмотрении дела судом установлено, что по независящим от ООО «Севастопольэнерго» обстоятельствам, подрядная организация не выполнила свои обязательства в установленные договором подряда сроки. ООО «Севастопольэнерго» в адрес подрядной организации направлены соответствующие требования о немедленном исполнении условий договора.

В отношении подрядчика применены соответствующие финансовые санкции, предусмотренные условиями договора подряда, направлено уведомление от 02.02.2022г о расторжении договора подряда № 536-92/19 от 01.10.2019, договор расторгнут.

Из дела следует, что заключен новый договор подряда с ООО «ЭнергоСтрой» № 964-62.2/22 от 29.07.2022 на «Строительство ЛЭП -0, 4 кв от КТП-1541, ТЗ 3543-22». 

Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя в ответ на заявление об утверждении схемы расположения земельного участка от 02.03.2023 вх. № 1619/01-22-01-65/01/23 выдано и направлено в адрес ООО «Севастопольэнерго» исх. № 1373/01-22-01-65/02/23 приказ № ПР/90 от 27.03.2023 «Об утверждении схемы расположения части земельного (лесного) участка на кадастровом плане территории, (условный номер части земельного (лесного) участка 91:01:000000:89:чз 1(1) и 91:01:000000:89:чз1(2), площадь части земельного (лесного) участка 910 кв.м), расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Севастополь. Балаклавский район, Севастопольское лесничество, Севастопольское участковое лесничество, квартал 20, часть выдела 38, квартал 19, часть выдела 21, квартал 19;% части выделов 19, 18, 13» (далее - приказ).

Установив указанные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что ООО «Севастопольэнерго» не имело возможности осуществить в установленные сроки технологическое присоединение объектов ФИО2, ФИО3, ФИО4, для присоединения которых требуется строительство (реконструкция) объектов электроэнергетики (капитальные затраты).

Таким образом, со стороны ООО «Севастопольэнерго» отсутствует намеренное бездействие при выполнении своих обязательств.

Проанализировав закон, подлежащий применению, установленные по делу обстоятельства, оценив относимость, допустимость, достоверность представленных суду доказательств, а также достаточность и взаимную связь этих доказательств в их совокупности, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле суд приходит к выводу об отсутствии установленных законом оснований для удовлетворения требований истцов по обязанию ООО «Севастопольэнерго» в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда в полном объеме выполнить обязательства по осуществлению технологического присоединения земельных участков истцов.

Следовательно, суд не находит оснований для взыскания с ООО «Севастопольэнерго» в пользу каждого истца договорной неустойки, денежных средств на случай неисполнения решения суда, компенсации морального вреда.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований ФИО2, ФИО3, ФИО4 в полном объеме.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил:

В удовлетворении исковых требований ФИО2, ФИО3, ФИО4 отказать.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Севастопольский городской суд через Гагаринский районный суд города Севастополя в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированный текст решения суда изготовлен 01 июня 2023 года.

Судья Гагаринского 

районного суда г. Севастополя Ф.В. Власенко