Дело № 2-2302/2021

УИД 91RS0024-01-2021-002518-39

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 июля 2021 года г. Ялта

Ялтинский городской суд Республики Крым в составе председательствующего судьи Синицыной О.В., при секретаре судебного заседания Морозове В.Л., с участием истца Томило О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым "Крымэнерго", Ялтинскому РЭС ГУП РК "Крымэнерго" о защите прав потребителя, возложении обязанности исполнить условия договора, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Истец Томило О.А. обратился с требованиями к ответчикам ГУП РК «Крымэнерго», Ялтинскому РЭС ГУП РК "Крымэнерго" о возложении обязанности исполнить договор № 86-06-249-350-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 12 октября 2018 года, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение электроустановки малоэтажной жилой застройки расположенной по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым №

<

номер>. Просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 10 037 руб. 50 коп., штраф в сумме 30 018 руб. 75 коп., компенсацию морального вреда 50 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины 300 руб.. Мотивирует тем, что обязательства, предусмотренные договором и технологическими условиями присоединения выполнил, при этом ответчик технологическое присоединение принадлежащего ему объекта недвижимости к электрическим сетям не произвел (л.д.1-7)

В судебное заседание истец Томило О.А. явился, исковые требования поддержал в полном объеме, по основаниям, изложенным в иске, против рассмотрения дела в порядке заочного производства не возражал.

Ответчики ГУП РК «Крымэнерго», Ялтинское РЭС ГУП РК "Крымэнерго" в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом в связи с чем суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного судопроизводства, уточнил, что неустойку просит взыскать за период с 01.04.2019 по день подачи иска.

Суд, заслушав объяснения истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

На основании ч. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу части 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.01.1996 г. № 15- ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», в случаях, когда одна из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, заказывающий либо имеющий намерение заказать услуги для личных нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации от 07.02.1992№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей) и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

Согласно ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила)

В соответствии с пунктом 6 Правил, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Приложением № 1 Правил утверждена типовая форма договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВТ включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности). Договор технологического присоединения, заключенные между мной и ГУП РК «Крымэнерго» соответствует форме Приложения № 1 Правил.

Процедура технологического присоединения установлена пунктом 7 Правил и включает в себя: подачу заявки; заключение договора; выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; фактический прием (подача) напряжения и мощности; составление акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно пункту 15 Правил договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 6 месяцев - для заявителей. Указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

К заявителям, указанным в пункте 14 Правил, относятся физические лица, направляющие заявки в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергоприйймающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Согласно пункту 18 Правил, мероприятия по технологическому присоединению включает в себя: подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласие с системным оператором; разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией; проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий; осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.

Судом установлено, что 12 октября 2018 года между ФИО1 и ГУП РК «Крымэнерго» заключен договор № 86-06249-350-18 б осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого ГУП РК «Крымэнерго» в лице Ялтинского РЭС ГУП РК "Крымэнерго" приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения малоэтажной жилой застройки, по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №

<

номер> (л.д. 9-12). 

В соответствии с п. 10 договора технологического присоединения, размер платы составляет 550 руб..

Факт оплаты за технологическое подключение в сумме 550 руб. подтверждается материалами дела (л.д. 40).

В соответствии с п. 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «электроустановки индивидуального жилищного строительства», а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. 

Согласно п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. 

В силу п. 6 договора технологического присоединения сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договора, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. 

В соответствии с п.п. 6.2, 6.3 договора технологического присоединения, ответчик обязался в течение 10 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения ТУ заказчиком, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации - не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра, указанного в п. 6.2 договора, с соблюдением срока, установленного п. 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности.

Пунктом 8 договора технологического присоединения, предусмотрены обязанности потребителя по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях; по уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Доказательств того, что в срок, указанный в договоре технологического подключения ответчик исполнил свои обязательства, материалы гражданского дела не содержат, по состоянию на день рассмотрения дела технологическое присоединение к электрическим сетям не осуществлено, доказательств иного нет.

При этом истец 08.01.2019 г. уведомил о выполнении технических условий для присоединения к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» (л.д. 13, 14). 

Ответчик произвел проверку выполнения технических условий и 11.05.2021 сообщил истцу о том, что технологическое присоединение будет осуществлено после выполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями со стороны ГУП РК «Крымэнерго» (л.д. 41).

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Согласно п.п. «в» п. 16 Правил, п. 17 договора технологического присоединения, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 % от указанного общего размера платы за технологическое присоединения по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Истец просит взыскать неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 10 037 руб. 50 коп. за период с 01.04.2019 по 20.04.2021.

Расчет суммы неустойки судом проверен, признан арифметически правильным, соответствующим требованиями закона и условиям договора, в связи с чем, указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

Исходя из п. 1 ст. 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года № 2300-1, - моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем 

<

 исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Учитывая длительный период неисполнения обязательств ответчиком, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.

Согласно с ч. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом с ответчик в пользу истца надлежит взыскать штраф в сумме 30 018 руб. 75 коп. (10037,5+50000)/2

На основании ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца также подлежат взысканию судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-235 ГПК РФ, 

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым "Крымэнерго", Ялтинскому РЭС ГУП РК "Крымэнерго" о защите прав потребителя, возложении обязанности исполнить условия договора, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда удовлетворить.

Обязать ГУП РК "Крымэнерго" в лице Ялтинского РЭС ГУП РК "Крымэнерго" исполнить договор № 86-06-249-350-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 12 октября 2018 года в течении 14 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение электроустановки малоэтажной жилой застройки, по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №

<

номер>.

Взыскать с ГУП РК "Крымэнерго" в пользу ФИО1 неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору за период с 01.04.2019 по 20.04.2021 в сумме 10 037 руб. 50 коп., компенсацию морального вреда 50 000 руб., штраф 30 018 руб. 75 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 руб., всего взыскать 90 356 (девяносто тысяч триста пятьдесят шесть) руб. 25 коп.

Ответчики вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения им копии этого решения.

Ответчиками заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья:

Решение суда в окончательной форме изготовлено 27 июля 2021 года