№ 2-22/2024

УИД 24RS0038-01-2023-000483-28

Решение

Именем Российской Федерации

25 января 2024 г. п. Нижний Ингаш

Нижнеингашский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Смольской Т.С.,

при секретаре Парчевской О.В., 

с участием истца ФИО1, представителя истца ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей,

установил:

истец обратился в суд с иском к ответчику ПАО «Россети Сибирь», в котором просит: обязать ответчика осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям дома по адресу: 

<

адрес> в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу; взыскать с ответчика компенсацию морального вреда (физические или нравственные страдания) в размере 200 000 рублей, причиненных потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителей, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей»; взыскать с ответчика сумму штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Требования мотивированы тем, что 17.12.2021 между истцом и ПАО «Россети Сибири» был заключен договор № 20.2400.8272.21. Согласно указанного ПАО «Россети Сибири» обязалось выполнить мероприятия по технологическому присоединению к своей электрической сети напряжением 15 кВт энергопринимающих устройств. Присоединение энергопринимающих устройств необходимо было для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. По условиям вышеуказанного договора ПАО «Россети Сибири» обязалось в течение 6 месяцев со дня оплаты за технологическое присоединение в соответствии с разделом 3 договора выполнить в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению. Плата за технологическое присоединение составляла в 541,75 руб., истцом условия договора были исполнены в полном объеме в предусмотренный договором срок. Платежным поручением № 46174 указанная сумма перечислена в пользу ответчика. Кроме того, 20.10.2022 истцом и «Россети Сибири» было заключено дополнительное соглашение № 1 к указанному выше договору № 20.2400.8272.21 от 17.12.2001. Согласно условий дополнительного соглашения, срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению, указанный в пункте 6 договора и п.13 Технических условий, при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, устанавливается до 17 июня 2023 г.. Истец, как заявитель, все обязательства по вышеуказанному договору исполнил в полном объеме в предусмотренный срок. Исполнителем нарушены права истца как потребителя, так как нарушены сроки выполнения работы, мероприятий по технологическому присоединению к своей электрической сети по состоянию на 11.09.2023 не исполнены. 10.08.2023 в адрес ответчика направлена претензия с требованием выполнения работ по договору № 20.2400.8272.21. Из ответа ответчика на претензию от 28.09.2023 следует, что указанный договор включен в план мероприятий на 2023 г., подготовлены технические решения для подключения электроустановки, осталось осуществить только строительно-монтажные работы (в т.ч. приобретение материалов и оборудования). Из-за неисполнения ответчиком своих обязательств, истец и его семья, состоящая из 4 человек, двое из которых малолетние вынуждены проживать у родителей истца, претерпели моральные страдания, связанные с безысходностью, неуверенностью, незащищенностью, отрываться от других своих дел и т.д., компенсацию которых истец оценивает в 200 000 рублей, а согласно правилам ст.15 ФЗ «О защите прав потребителя», возмещению подлежит и причиненный продавцом (исполнителем) потребителю моральный вред. Истец считает данные бездействия являются нарушением условий заключенного договора технологического присоединения к электрическим сетям энергоснабжения индивидуального жилого дома, а также нарушения норм ГК РФ, Закона РФ «О защите прав потребителей» и законодательства о энергоснабжении. 

На исковое заявление представителем ответчика ПАО «Россети Сибирь» - ФИО3 представлены письменные возражения (л.д. 32-35), в которых просит в случае удовлетворения иска установить размер морального вреда до разумного предела, но не более 1000 рублей, установить срок исполнения обязательств не менее 12 месяцев с момента вступления в силу решения суда. В обоснование своих доводов указывает, что при выполнении сетевой организацией требуемых мероприятий необходимо разработать проект для строительства новых объектов, оформить правоустанавливающие документы на земельные участки под строительство, получить разрешительные документы на строительство и реконструкцию, изыскать денежные средства, необходимые для строительства и др. Затраты, которые несет сетевая организация в рамках выполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, компенсируются организации в рамках тарифного регулирования, следовательно затраты должны быть экономически целесообразны. Для обоснования расходов, связанных с разработкой проектной документации, сетевая организация должна организовать проведение внутрикорпоративных процедур для выбора подрядной организации. Укрупненные затраты в соответствии с техническими условиями для сетевой организации – 728 061,27 руб. без НДС. Размер внесенной истцом платы не компенсирует производимых затрат Общества при строительстве объектов электросетевого хозяйства по договору с истцом. С учетом недостатка собственных финансовых средств на реализацию обязательств по договору технологического присоединения, а также размера платы за технологическое присоединение по договору, осуществить строительство объектов электросетевого хозяйства в установленные сроки не представляется возможным. ПАО «Россети Сибирь» осуществляет все необходимые и возможные действия по исполнению договора и не имеет цели как-либо нарушить права и законные интересы истца. Задержка исполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно договору вызвана недостатком финансирования, а также высокой фактической стоимостью выполнения мероприятий по договору. К тому же, истец не представил в дело документов, обосновывающих степень его физических и нравственных страданий, и соответственно, суммы компенсации морального вреда. В совокупности требования истца о возмещении морального вреда являются недоказанными и необоснованными. Также указывает, что объект электросетевого хозяйства еще не введен в эксплуатацию, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств истца в течение менее чем 12 месяцев, как и осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям в срок менее чем 12 месяцев время не представляется возможным.

Истец ФИО1, представитель истца Небесный А.В. в судебном заседании заявленные исковые требования поддержали в полном объеме, по основаниям изложенным в иске.

Представитель ответчика в судебное заседание не прибыл, о времени и месте судебного заседания извещён надлежащим образом, суду представлен отзыв на исковое заявление.

Представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, о чем в материалах дела имеется почтовое уведомление; представили в суд письменное заключение.

Дело рассмотрено при имеющейся явке, по правилам ст. 167 ГПК РФ.

Исследовав материалы дела, выслушав сторону истца, оценив представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам:

В силу положений ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Согласно п. 1 ст. 38 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставку электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

Передача электрической энергии неразрывно связана технологическим присоединением к электрическим сетям, мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям осуществляются с целью последующей передачей электрической энергии потребителю.

Во исполнение приведенного ФЗ 35-ФЗ 26 марта 2003 г. «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 утверждены «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», а также «Правила технологического присоединения электропринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее – Правила ТП).

Пунктом 3 Правил ТП предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдений им настоящих Правил и наличие технической возможности технологического присоединения.

Статьей 9 Федерального закона № 15-ФЗ от 26.01.1996 «О введении в действие части второй ГК РФ» установлено, что в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретавший, заказывающий либо имеющей намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с ГК РФ, а также правами, предоставленными потребителю Законом РФ «о защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

В силу п.1 ст.27 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленными правилами.

В судебном заседании установлено, что 17.12.2021 г. между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор № 20.2400.8272.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому ПАО «Россети Сибирь» обязалось осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя ФИО1, максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 15,00 кВт, третьей категории надежности, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,40 кВ, для электроснабжения объекта «малоэтажная жилая застройка» (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п. 6 договора).

Согласно пункту 11 договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 29.12.2020г. № 70-эс изменениями, внесенными Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 28.01.2021 № 3-э и составляет 550 рублей, в том числе НДС 20% в сумме 91,67 рубль.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем путем оплаты счета в течение 5 рабочих дней со дня его выставления сетевой организацией (п.12 договора) в следующем порядке: 10 % платы за технологическое присоединение в размере 55 руб., в том числе НДС 20% в сумме 9,17 руб. – вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета Сетевой организацией; 30 % платы за технологическое присоединение в размере 165 руб., в том числе НДС 20 % в сумме 27,50 руб. – вносится в течение 60 календарных дней со дня заключения договора; 20 % платы за технологическое присоединение в размере 110 руб., в том числе НДС 20% в сумме 18,33 руб. – вносятся в течение 180 календарных дней со дня заключения договора; 30 % платы за технологическое присоединение в размере 165 руб., в том числе НДС 20 % в сумме 27,50 руб. – вносятся в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения; 10 % платы за технологическое присоединение в размере 55 руб. в том числе НДС 20 % в сумме 9,17 руб. – вносятся в течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения (п. 13 договора).

16.12.2021 ФИО1 оплатил сумму за технологическое присоединение в размере 541,75 рубль, что подтверждается платежным поручением № 46174 (л.д.22), и не опровергается стороной ответчика.

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п. 24 договора).

20.10.2022 между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение № 1 к договору № 20.2400.8272.21 от 17.12.2021. Согласно условий данного дополнительного соглашения, срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению, указанный в п. 6 договора и п.13 Технических условий, при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, устанавливаются до 17.06.2023.

Таким образом, судом установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению ПАО «Россети Сибирь» истек 17.06.2023 года, при этом ответчик свои обязательства по договору не исполнил.

Данные обстоятельства не оспариваются ответчиком.

10.08.2023 истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием о немедленном устранении причин неосуществления технологического присоединения к электрическим сетям дома истца по адресу: 

<

адрес>; а также о возмещении морального вреда, причиненных потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» и выплате неустойки, предусмотренной п.20 договора № 20.2400.8272.21 от 17.12.2021 (л.д. 17-18).

Установлено, что претензия истца до настоящего времени не удовлетворена. 

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает, в числе прочего, процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения); правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора; состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Названные Правила определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

Исходя из норм действующего законодательства, технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем), по условиям которого сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Федерального закона "Об электроэнергетике", подпункт "е" пункта 16, пункты 16 (2), 16 (4), 17, 18 Правил технологического присоединения).

Под однократностью понимается разовое осуществление процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также построенных линий электропередачи, в объеме максимальной мощности таких энергопринимающих устройств, указанной в документах, подтверждающих технологическое присоединение, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

При осуществлении первичного технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя все технические параметры такого присоединения закрепляются за присоединенными энергопринимающими устройствами и фиксируются в документах о технологическом присоединении, в частности в акте об осуществлении технологического присоединения. Такими техническими параметрами являются: максимальная мощность энергопринимающих устройств, категория надежности, количество точек присоединения, уровень напряжения, на котором присоединены энергопринимающие устройства.

Пунктом 3 Правил технологического присоединения закреплено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им указанных Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (пункт 6 Правил технологического присоединения).

Из вышеизложенного следует, что потребитель электрической энергии имеет право обратиться напрямую в сетевую организацию для заключения договора технологического присоединения своих энергопринимающих устройств, с разграничением балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон в границах своего земельного участка, а сетевая организация, в свою очередь, обязана выполнить мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

При этом отсутствие у сетевой организации технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, определяется с учетом критериев и обстоятельств, предусмотренных в пунктах 28 и 29 названных Правил, и в таком случае технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту в порядке, установленном Правилами, с учетом особенностей, установленных разделом III Правил (пункт 30 Правил технологического присоединения).

Пунктом 7 поименованных Правил установлена процедура технологического присоединения, которая состоит из: а) подачи заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил; б) заключения договора; в) выполнения сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором; г) получения разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя; д) осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности; е) составления акта об осуществлении технологического присоединения.

Судом с достоверностью установлено, что обязательства в срок, определенный договором, а также дополнительным соглашением, ответчиком до настоящего времени не исполнены, подключение объекта истца сетевой организацией не производилось. Технические условия к договору об осуществлении технологического присоединения, сетевой организацией выполнены не были.

Согласно заключению ТО Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске исковые требования ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» могут быть законны и подлежать удовлетворению.

Проанализировав вышеизложенные обстоятельства в их совокупности, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований ФИО1 в части возложения обязанности на ПАО «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям дома истца по адресу: 

<

адрес>.

При этом срок исполнения обязанности суд считает возможным установить в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда, учитывая при этом обстоятельства дела, давность заключения договора между сторонами.

Согласно ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, допущенное нарушение ответчиком прав истца как потребителя, а также учитывая требования разумности и справедливости, суд полагает возможным взыскать компенсацию морального вреда в сумме 5 000 руб. в пользу истца. В остальной части заявленных исковых требований о взыскании компенсации морального вреда в сумме 195 000 рублей следует отказть.

В соответствии с ч. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с продавца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку требования истца в добровольном порядке удовлетворены не были, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания штрафа в пользу истца, в размере 2500 рублей из расчета: 5 000 руб. х 50%.

В силу ст.103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела и государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Поскольку на основании ст. 333.36 НК РФ истец был освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче иска в суд, с ответчика подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина, исчисленная в соответствии со ст.333.19 НК РФ в размере 600 рублей (300 рублей – по требованию о технологическом присоединении, 300 рублей – по требованиям о компенсации морального вреда).

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.98,194-198 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей - удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить в полном объеме обязательства по договору № 20.2400.8272.21 от 17.12.2021 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям электроснабжения объекта «малоэтажная жилая застройка» (индивидуальный жилой дом), расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка 24:28:3401001:390.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1, "дата" года рождения (паспорт серии 04 18 №) компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 2 500 рублей, а всего взыскать 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований, о взыскании компенсации морального вреда, отказать.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 600 (шестьсот) рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Нижнеингашский районный суд Красноярского края в течение месяца со дня составления мотивированного решения суда.

Председательствующий

Мотивированное решение суда составлено 01.02.2024.