дело № 2-3329/23

61RS0007-01-2023-002548-80

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

29 июня 2023 г. г. Ростов-на-Дону

Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе

председательствующего С.Г. Черникова,

при секретаре Близнюк В.А.,

с участием:

-от истца: представителя по доверенности ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 ФИО5 к Обществу с ограниченной ответственностью «БрикБраер» о взыскании неустойки по договору, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратилась в Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону с исковым заявлением к ООО «БрикБраер», в котором просит:

«Взыскать Общества с ограниченной ответственностью «БрикБраер» (ИНН: №) в пользу ФИО2 ФИО6 (паспорт: №) неустойку в размере 1554 151 рублей, штраф в размере 777075,50 рублей».

Свою просьбу заявитель объясняет следующим.

ДД.ММ.ГГГГ г., между сторонами заключён Договор подряда на строительство индивидуального жилого №№

В соответствии с п.1 Договора Подрядчик обязуется в соответствии с Проектом индивидуального жилого дома (приложение №1 к Договору), выполнить работы по строительству индивидуального жилого одноэтажного дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер: №, а Заказчик принять и оплатить указанные работы.

В соответствии с п. 1.3. Договора виды и объемы работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, согласованы Сторонами в Ведомости работ по строительству дома (Приложение №2 к Договору).

В соответствии с п.2.1 Договора Работы выполняются поэтапно с использованием материалов, оборудования конструкций, предоставленных 

Подрядчиком или Заказчиком, перед оплатой каждого этапа уточняется и отображается в смете и приложения.

В соответствии с п.3.2. Договора Стоимость каждого отдельного этапа Работ, а также порядок оплаты Работ предусмотрен Графиком финансирования (Приложение №3 к Договору). Стоимость работ может изменяться в случае корректировки объемов и(или) вида работ.

В соответствии с п.3.5 Договора оплата Работ по Договору производится Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика либо путём предоставления наличных денежных средств в его кассу.

В соответствии с п.4.1.и 4.2 Договора Сроки выполнения Работ по каждому этапу предусмотрены Графиком производства работ (Приложение №4 к Договору).

В соответствии с п.6.1. Договора по завершении работ по каждому этапу в соответствии с Договором Подрядчик передаёт Заказчику Акт приемки-передачи выполненных работ.

В соответствии с п.5.1.2 Договора Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ Подрядчиком Работ по строительству Объекта в соответствии с условиями Договора.

Истцом в кассу юридического лица внесены следующие денежные суммы.

Чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 211563 рубля;

Чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 82390 рубля;

Квитанция к приходному кассовому ордеру №№ на сумму 600000 рублей;

Чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 500411 рубля;

Квитанция к приходному кассовому ордеру №№ на сумму 452860 рубля;

Чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 171370 рубля;

Чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 706210 рубля;

Квитанция к приходному кассовому ордеру №№ на сумму 468500 рубля;

Чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 134800 рубля;

Всего: 3328 104 руб.

В соответствии с Графиком производства работ (Приложение №4 к Договору) определены этапы работ: Этап №1. Начало работ - в срок не позднее 6 (шести) дней, с момента получения аванса по этапу №1, а также подписания Акта приёма-передачи строительной площадки. Окончание работ: не позднее ДД.ММ.ГГГГ.) рабочих дней, с момента начала выполнения Работ по Этапу № 1.

Этап №2. Начало работ - в срок не позднее 6 (шести) дней, с момента получения аванса по этапу №2. Окончание работ: не позднее ДД.ММ.ГГГГ.) рабочих дней, с момента начала выполнения Работ по Этапу № 1.

Стоимость услуги за второй этап составляет 1554151 руб.

В соответствии с Графиком финансирования (Приложение №3 к Договору) общая стоимость работ составляет 3196884 рублей. Однако фактически истцом произведена оплата на сумму 3 328 104 руб.

Однако ответчик до настоящего времени работу не окончил, акты выполненных работ не предоставил. Более того, в ходе осмотра частично выполненных работ, выяснилось, что наружная несущая стена на южной стороне второго этажа Объекта пришла в движение и отклонилась на 7 градусов по всей длине стены дома, наблюдается отхождение капитальной несущей стены от межкомнатных стен; несущая балка кровельного пространства имеет повреждение в виде трещины в точке описания на стену, что подтверждается Актом осмотра жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании от 29.06.2023г. представитель истца ФИО1 поддержал заявленные требования, повторил доводы искового заявления. Он же показал, что первый этап строительства окончен в срок. Второй этап должен был быть окончен до ДД.ММ.ГГГГ. При выполнении второго этапа было обнаружено отклонение несущей стены на 7 градусов, истец согласилась продлить выполнение данного этапа до ДД.ММ.ГГГГ. (устно), поскольку гендиректор юридического лица обещал исправить недостатки. Однако в ДД.ММ.ГГГГ. стройка остановилась. Истец просит взыскать неустойку на сумму 1554151 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ (202 дня).

Дело рассмотрено в отсутствие истца, ответчика по ст. 233 ГПК РФ.

Рассмотрев гр.дело, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 56 ГПК РФ, – каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих требований и возражений.

В соответствии с п.1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей», - исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором о выполнении работ.

В соответствии со ст. 740 ГК РФ, - по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с ч.5 ст.28 ФЗ «О защите прав потребителя» В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

В соответствии с п.6 ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителя» При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Из материалов дела известно, что истец обратилась в суд в связи с тем, что ответчик, заключив договор строительного подряда, уклонился от выполнения работ по возведению жилого дома в установленный срок.

При таком положении исковые требования о взыскании неустойки подлежат удовлетворению.

Расчет: 1554151*202*3 = 9418155.06 руб.

Однако, в соответствии с п.3 ст.28 Закона РФ, сумма взысканной неустойки не может превышать цену отдельного вида выполненной работы (оказания услуги) или общую цену заказа.

Расчет штрафа: 1554151*50% = 777075.5 руб.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета подлежит взысканию госпошлина.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199,237 ГПК РФ, 

РЕШИЛ:

Взыскать Общества с ограниченной ответственностью «БрикБраер» (ИНН: №) в пользу ФИО2 ФИО7 (паспорт: №) неустойку в размере 1554 151 рублей, штраф в размере 777075,50 рублей.

Взыскать Общества с ограниченной ответственностью «БрикБраер» (ИНН: №) госпошлину в доход местного бюджета в размере – 15970.76 руб.

Заявление об отмене заочного решения суда может быть подано ответчиком в течение семи дней со дня вручения копии этого решения, после чего решение может быть обжаловано сторонами в Ростовский областной суд через Пролетарский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение месяца.

Судья С.Г. Черников

полный текст

составлен: 30.06.2023.