Р Е Ш Е Н И Е

 № 2-556/17

Именем Российской Федерации

Г. Волоколамск 9 июня 2017 г.

Волоколамский городской суд Московской области в составе

Председательствующего судьи Е.Н. Касаткиной,

При секретаре О.Н. Тепляковой,

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Медиа Групп» к ФИО1 о взыскании денежных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами,

У с т а н о в и л :

С учетом уточнений представитель истца по доверенности ФИО2 просит взыскать с ответчика ФИО1 денежные средства в размере 159000 рублей, выплаченных ему в качестве аванса, 5 706 рублей 47 копеек проценты за пользование чужими денежными средствами, 29 150 рублей пени за просрочку исполнения обязательства, возврат госпошлины в размере 4 668 рублей. В обоснование требований указано, что27.10.16 года между ООО «Медиа Групп» и ФИО1 был заключен договор строительного подряда. Ответчик принял на себя обязательства по выполнению и сдаче комплекса работ- строительно-ремонтные работы задания Центра культуры и искусств МУК «Центр культуры и искусств г.

<

адрес>» по адресу 

<

адрес>. Заказчик принял на себя обязательства оплатить услуги в размере 530 000 рублей, в том числе оплата аванса 159 000 рублей.

ФИО1 получил аванс в размере 159000 рублей ДД.ММ.ГГГГ по кассовому ордеру №.

Согласно п. 3.1 договора подрядчик обязался начать работы ДД.ММ.ГГГГ, сдать работы ДД.ММ.ГГГГ. Однако подрядчик к выполнению работ не приступил. Полученные денежные средства в качестве аванса не возвратил.

Истцом представлен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 5 706 рублей 47 копеек.

В соответствии с п. 9.1 договора за несоблюдение сроков выполнения работ заказчик имеет право начислить и взыскать с подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки. Ответчик должен был приступить к работе ДД.ММ.ГГГГ. Истец произвел расчет пени до дня расторжения договора ДД.ММ.ГГГГ, 530 000 рублей х 0,1% х 55 дней просрочки = 29150 рублей.

Представитель истца по доверенности ФИО2 в судебном заседании уточненные исковые требования поддержал, просил их удовлетворить.

Ответчик ФИО1 сообщил суду, что он является гражданином Украины, не имеет регистрации на территории Российской Федерации.

Последним известным местом жительства ФИО1 на территории Российской Федерации является место жительства, указанное в договоре, 

<

адрес>. Место жительства ответчика неизвестно.

В судебном заседании установлено, что 27.10.2016 года между ООО «Медиа Групп» (заказчик) и ФИО1 (подрядчик) был заключен договор строительного подряда. Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче заказчику комплекса работ по строительству «Строительно- ремонтные работы здания Центра культуры и искусств МУК «Центр культуры и искусств г.

<

адрес>» по адресу 

<

адрес>, стоимость работ по договору 530 000 рублей. По договору предусмотрено авансирование 30%, что составляет 159 000 рублей ( п. 2.1).

П. 2.4.1 договора- оплата производится в два этапа, после подписания договора заказчик передает подрядчику денежную сумму в 159 000 рублей. Оставшаяся сумма за выполненные работы оплачивается только в случае надлежащего выполнения подрядчиком условий раздела 6 договора в части заключения договора страхования строительно- монтажных работ.

П.3.1 начало работ ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с разделом 9 договора за несоблюдение сроков выполнения работ, установленных графиком производства этапов работ, заказчик имеет право начислить и взыскать с подрядчика пени в размере 0,1 % от стоимости работ по договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства ( п. 9.1). Подрядчик за нарушение заказчиком сроков платежей, установленных настоящим договором, имеет право начислить и взыскать с заказчика пени в размере 0,5% от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости работ по договору ( п. 9.2).

ФИО1 не приступил к выполнению работ по договору.

ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру ФИО1 получил от ФИО3- генерального директора ООО «Медиа Групп» денежные средства в размере 159 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Медиа Групп» направило ФИО1 уведомление о необходимости возвратить денежные средства в размере 159 000 рублей в течение десяти дней.

Рассмотрев заявленные требования, исследовав доказательства по делу, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона. Не допускается односторонний отказ от исполнения обязательства.

По договору строительного подряда ст. 740 ГК РФ подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.

Получение ответчиком денежной суммы в размере 159 000 рублей подтверждено расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 

Ст. 330 ГК РФ определяет, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства- ст. 331 ГК РФ.

Расчет пени произведен с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, когда договор был расторгнут. То есть, просрочка составила 55 дней.

Цена по договору 530 000 рублей х 0,1% п. 9.1 договора х 55 дней просрочки = 29 150 рублей.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате, подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действующей в соответствующие периоды, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 10%, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 10%, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 9,75%, с ДД.ММ.ГГГГ 9,25%.

Договором установлен срок ( абз. 5 п. 11.2) 15 дней, когда договор считается расторгнутым, то есть ДД.ММ.ГГГГ, поскольку ДД.ММ.ГГГГ ответчику было направлено соответствующее уведомление. То есть, с ДД.ММ.ГГГГ договор считается расторгнутым. 

В силу п. 1 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами:

- с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (10 дней) 159 000 рублей х 10% : 366 дней х 10 дней = 434 рубля 43 копейки,

- с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ( 85 дней) 159 000 рублей х 10% : 365 дней х 85 дней = 3 702 рубля 74 копейки,

- с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (36 дней) 159 000 рублей х 9,75% : 365 дней х 36 дней = 1 529 рублей 01 копейка,

- с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ( 1 день) 159 000 рублей х 9,25% : 365 дней х 1 день = 40 рублей 29 копеек.

Всего 5 706 рублей 47 копеек.

Таким образом, всего в ответчика в пользу ООО «Медиа Групп» подлежит взысканию 193 856 рублей 47 копеек.

При подаче искового заявления истец уплатил в доход государства государственную пошлину в размере 4 668 рублей, подлежало уплате 5 077 рублей 12 копеек. В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца суд взыскивает возврат госпошлины 4 668 рублей. А с ответчика в доход государства госпошлину в размере 409 рублей 12 копеек.

Руководствуясь ст. 194- 198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать в пользу ООО «Медиа Групп» с ФИО1, гр. Украины, не имеющего регистрации на территории Российской Федерации,

- 159 000 рублей задолженность по договору,

- 29 150 рублей неустойку по договору,

- 5 706 рублей 47 копеек проценты за пользование чужими денежными средствами,

- 4 668 рублей госпошлину,

ИТОГО- 199 562 рубля 94 копейки.

Взыскать с ФИО1 госпошлину в доход государства в размере 409 рублей 12 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение месяца со дня вынесения.

Председательствующий: