№ 2-431/2025

03RS0004-01-2024-008054-28

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 февраля 2025 года город Уфа

Ленинский районный суд города Уфы Республики Башкортостан в составе

председательствующего судьи Касимова А.В.

при помощнике судьи Ахмедьяновой Д.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1, ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Некрасовский» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2 обратились в суд иском к Обществу с ограниченной ответственностью у "Специализированный застройщик "Некрасовский" (далее ООО "СЗ "Некрасовский") о защите прав потребителей.

В обоснование иска указано на то, что 28.11.2023 года между ФИО1, ФИО2 и ООО "Специализированный застройщик "Некрасовский" был заключен договор участия в долевом строительстве N №

Согласно предмету договора, Застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Дома передать Объект долевого строительства (Квартиру) Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства (Квартиру) при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

Согласно п. 1.1.2 договора, общая приведённая проектная площадь квартиры (с учётом коэффициентов балконов и/или лоджий) 72,71 кв.м., общая проектная площадь квартиры (без учёта ) коэффициентов балконов и/или лоджий) 71,13 кв.м., жилая проектная площадь 51,10 кв.м.

Согласно п. 3.1 Цена договора составляет 7 414 238,70 рублей и является произведением цены одного квадратного метра Квартиры, равной 101 970 рублей и общей приведённой площади Квартиры, равной 72, 71 кв.м.

Согласно п. 3.2 договора, стоимость Квартиры является фиксированной и не подлежит изменению в течении всего периода действия договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.3 договора.

Участники долевого строительства произвели оплату по Договору участия в долевом строительстве жилого дома N№ от 28.11.2023г. сумму в размере 7 414 238,70 рублей, своевременно и в полном объёме.

22.03.2024г. между Застройщиком и Участниками долевого строительства подписан Акт приёма - передачи квартиры по Договору участия в долевом строительстве жилого дома N№ от 28.11.2023г. Во исполнение обязательств по договору Застройщик передал, а Участники долевого строительства приняли в общую совместную собственность квартиру N№, общей площадью 71,6 кв.м., общей жилой площадью 70,1 кв.м., жилой площадью 41,5 кв.м., на 16 этаже, в жилом доме. находящийся по адресу: 

<

адрес>, расположенный на земельном участке по адресу: 

<

адрес> рядом с домом 24, с кадастровым номером №).

Согласно п. 3.3.3 договора, в случае если проектная площадь Квартиры превысит фактическую площадь Квартиры на 1 кв.м. и более, Застройщик обязуется осуществить возврат у частнику долевого строительства излишне уплаченных денежных средств. Возврату подлежит разница между проектной и фактической площадью Квартиры в полном объёме. Возврат производится исходя из стоимости одного квадратного метра, указанной в п. 3.1 договора. Возврат производится по заявлению Участника долевого строительства в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Застройщиком заявления.

25.03.2024г. Участниками долевого строительства было подано заявление о возврате разницы стоимости проектной и фактической площади Квартиры, в связи с тем, что площадь квартиры уменьшилась на 1,11 кв.м. (72,71 кв.м (проектная площадь) - 71,6 кв.м. (фактическая площадь) = 1,11 кв.м.) на, что Застройщик не дал мотивированного ответа.

Расчёт разницы стоимости площади Квартиры: Цена одного квадратного метра Квартиры, равна 101 970 рублей. 1,11 кв.м. х 101970 рублей = 113 186,70 рублей.

С учетом изложенного, истцы просят взыскать с ООО "СЗ "Некрасовский" в пользу ФИО1: разницу стоимости проектной и фактической площади квартиры денежную сумму в размере 56593 руб.; неустойку за период с 05.04.2024 по 25.11.2024 в размере 132993 руб., штраф в размере 50% от суммы, от присужденной судом в пользу истца, компенсацию морального вреда 5 000 рублей; расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 руб., за составление претензии в размере 1500 руб., за услуги курьера в размере 600 руб., нотариальные расходы в размере 1300 руб.; 

в пользу ФИО2: разницу стоимости проектной и фактической площади квартиры денежную сумму в размере 56593 руб.; неустойку за период с 05.04.2024 по 25.11.2024 в размере 132993 руб., штраф в размере 50% от суммы, от присужденной судом в пользу истца, компенсацию морального вреда 5 000 рублей; расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 руб., за составление претензии в размере 1500 руб., за услуги курьера в размере 600 руб., нотариальные расходы в размере 1300 руб.

Истцы в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены должным образом, имеется ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие. Представитель истцов по доверенности ФИО3 исковые требования поддержал в полном объёме.

Ответчик в судебное заседание своего представителя не направил, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены должным образом, причина неявки неизвестна, письменные возражения на иск и ходатайства о применении положения ст. 333 ГПК РФ ко взысканию неустойки и штрафа не представил.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие не явившихся лиц.

Выслушав представителя истца, изучив и оценив материалы гражданского дела, дав оценку всем добытым по делу доказательствам, как в отдельности, так и в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о передаче.

В силу части 4 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ договор участия в долевом строительстве должен содержать определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в том числе план объекта долевого строительства, отображающий в графической форме (схема, чертеж) расположение по отношению друг к другу частей являющегося объектом долевого строительства жилого помещения (комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов, террас) или частей являющегося объектом долевого строительства нежилого помещения, местоположение объекта долевого строительства на этаже строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, с указанием сведений в соответствии с проектной документацией о виде, назначении, об этажности, общей площади многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, о материале наружных стен и поэтажных перекрытий, классе энергоэффективности, сейсмостойкости (далее - основные характеристики многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости), назначении объекта долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение), об этаже, на котором расположен такой объект долевого строительства, о его общей площади (для жилого помещения) или площади (для нежилого помещения), количестве и площади комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов, террас в жилом помещении, наличии и площади частей нежилого помещения (далее - основные характеристики жилого или нежилого помещения); цену договора, сроки и порядок ее уплаты.

Данная норма предусматривает, что предмет договора долевого участия в строительстве должен быть строго определен с учетом всех параметров объекта, которые также указываются в прилагаемой проектной документации (проектном решении). В частности, должна быть определена площадь квартиры с указанием всех помещений, поскольку именно площадью квартиры в основном определяется ее цена, которая, в свою очередь, является существенным условием договора.

Статьей 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ предусмотрено, что застройщик обязан предоставлять информацию о проекте строительства, а также о фактах внесения изменений в проектную документацию.

Покупателю должна быть предоставлена полная и достоверная информация об объекте долевого строительства, подлежащем передаче участнику долевого строительства, а переданный объект должен полностью соответствовать условиям договора и проектной документации.

Таким образом, передача застройщиком участнику долевого строительства квартиры меньшей площади свидетельствует о несоответствии площади передаваемого объекта предмету договора и является отступлением от условий договора, предусматривающих характеристики объекта долевого строительства, в частности его размер.

Статьей 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ предусмотрено, что застройщик обязан предоставлять информацию о проекте строительства, а также о фактах внесения изменений в проектную документацию.

Покупателю должна быть предоставлена полная и достоверная информация об объекте долевого строительства, подлежащем передаче участнику долевого строительства, а переданный объект должен полностью соответствовать условиям договора и проектной документации.

Таким образом, передача застройщиком участнику долевого строительства квартиры меньшей площади свидетельствует о несоответствии площади передаваемого объекта предмету договора и является отступлением от условий договора, предусматривающих характеристики объекта долевого строительства, в частности его размер.

Пунктами 1 и 2 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 555 Гражданского кодекса Российской Федерации договор продажи недвижимости должен предусматривать цену этого имущества.

В случаях, когда цена недвижимости в договоре продажи недвижимости установлена на единицу ее площади или иного показателя ее размера, общая цена такого недвижимого имущества, подлежащая уплате, определяется исходя из фактического размера переданного покупателю недвижимого имущества.

Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ в договоре указывается цена договора, то есть размер денежных средств, подлежащих уплате участником долевого строительства для строительства (создания) объекта долевого строительства. Цена договора может быть определена как произведение цены единицы общей площади жилого помещения или площади нежилого помещения, являющихся объектом долевого строительства, и соответствующей общей площади или площади объекта долевого строительства. В случае, если частью жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, являются лоджия, веранда, балкон, терраса, цена договора может быть определена как произведение цены единицы общей приведенной площади такого жилого помещения и общей приведенной площади такого жилого помещения. Общая приведенная площадь жилого помещения состоит из суммы общей площади жилого помещения и площади лоджии, веранды, балкона, террасы с понижающими коэффициентами, установленными федеральным органом исполнительной власти, указанным в части 1 статьи 23 данного федерального закона.

По соглашению сторон цена договора может быть изменена после его заключения, если договором предусмотрены возможности изменения цены, случаи и условия ее изменения (часть 2 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ).

Из содержания приведенных норм права в их взаимосвязи следует, что стороны вправе предусмотреть в договоре как условие о твердой цене объекта договора - жилого помещения - с указанием его параметров и допустимых отступлений от них, так и условие о цене жилого помещения, определенной исходя из цены единицы общей площади жилого помещения, с учетом возможного изменения этой площади при определенных условиях.

В силу части 1 статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

В случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в части 1 данной статьи обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика в том числе соразмерного уменьшения цены договора (подпункт 2 части 2 статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ).

По смыслу указанной нормы, отступление застройщика от условий договора (которое может выражаться в том числе в передаче участнику долевого строительства объекта меньшей площади, чем это предусмотрено договором) само по себе является основанием для соразмерного уменьшения цены договора. При этом, по смыслу статей 5 и 7 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ, договором могут быть установлены лишь определенные пределы изменения (погрешности) размера площади объекта долевого строительства, которые не влекут за собой соразмерного изменения цены при передаче объекта участнику долевого строительства.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что 28.11.2023 года между ФИО1, ФИО2 и ООО "Специализированный застройщик "Некрасовский" был заключен договор участия в долевом строительстве N 729/Ж-1572/Н.

Согласно п. 1.1.2 договора, общая приведённая проектная площадь квартиры (с учётом коэффициентов балконов и/или лоджий) 72,71 кв.м., общая проектная площадь квартиры (без учёта ) коэффициентов балконов и/или лоджий) 71,13 кв.м., жилая проектная площадь 51,10 кв.м.

Согласно п. 3.1 Цена договора составляет 7 414 238,70 рублей и является произведением цены одного квадратного метра Квартиры, равной 101 970 рублей и общей приведённой площади Квартиры, равной 72, 71 кв.м.

Договором определено, что Стоимость квартиры является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего периода действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.3 Договора.

Пунктом 3.3.3 Договора предусмотрено, что в случае если проектная площадь квартиры превысит фактическую площадь Квартиры на 1 кв. м и более, Застройщик обязуется осуществить возврат Участнику долевого строительства излишне уплаченных денежных средств. Возврату подлежит разница между проектной и фактической площадью Квартиры в полном объеме. Возврат производится исходя из стоимости одного квадратного метра, указанной в п. 3.1 Договора. Возврат производится по заявлению Участника долевого строительства в течение 30 рабочих дней со дня получения Застройщиком заявления.

Согласно данным государственного кадастрового учета Квартира № № расположенная в жилом доме. находящимся по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером № имеет площадь 71,6 кв. м.

В силу акта приема-передачи квартиры от 22.03.2024 г. общая площадь квартиры равна 71,6 кв. м.

Таким образом, фактическая площадь Квартиры меньше проектной на 1,11 кв. м (72,71 кв. м -71,6 кв. м).

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что требования истцов являются обоснованными и в пользу каждого истца с ответчика подлежит взысканию в качестве соразмерного уменьшения цены договора участия в долевом строительстве N № от 28.11.2023 г., денежной суммы в размере 113 186 рублей (1,11 кв. м х 101970 руб. за 1 кв. м), т.е. по 56593 рублей каждому (113 186 руб. х 1/2 (доля в праве собственности каждого истца).

25.03.2024 г. года истцы обратились с заявлением к Застройщику с просьбой провести перерасчет по Договору в связи с фактической площадью переданной квартиры с приложением банковских реквизитов для перечисления денежных средств.

В качестве соразмерного уменьшения цены договора участия в долевом строительстве N № от 28.11.2023 г. Застройщик обязан был перечислить истцам денежную сумму в размере 113 186 рублей (1,11 кв. м х 101970 руб. за 1 кв. м) не позднее 08 мая 2024 года.

До настоящего времени денежные средства Застройщиком не возвращены, ответа на заявление истцы не получили.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2024 года N 326 "Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве" (далее - Постановление N 326) установлены особенности применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве.

Постановление N 326 вступило в силу 22 марта 2024 года.

Как следствие, заявленная истцами неустойка, начиная с 05.04.2024 по 25.11.2024 года, взысканию не подлежит.

Пунктом 1 Постановления N 326 установлено следующее:

- в период начисления неустойки (пени) по договорам участия в долевом строительстве, предусмотренной частью 6 статьи 5 и частью 2 статьи 6 Закона N 214-ФЗ, не включается период, исчисляемый со дня вступления в силу настоящего постановления до 30 июня 2025 г. включительно;

- при определении размера убытков, предусмотренных статьей 10 Закона N 214-ФЗ, не учитываются убытки, причиненные в период со дня вступления в силу настоящего постановления до 30 июня 2025 г. включительно;

- проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства в соответствии с частями 2 и 6 статьи 9 Закона N 214-ФЗ за период со дня вступления в силу настоящего постановления до 30 июня 2025 г. включительно, не начисляются;

- неустойка (штраф, пени), иные финансовые санкции, подлежащие с учетом части 9 статьи 4 Закона N 214-ФЗ уплате гражданину - участнику долевого строительства за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, заключенным исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, не начисляются за период со дня вступления в силу настоящего постановления до 30 июня 2025 г. включительно.

В отношении применения неустойки (штрафа, пени), процентов, возмещения убытков и иных финансовых санкций к застройщику в части их уплаты, предусмотренных настоящим пунктом, требования о которых были предъявлены к исполнению застройщику до дня вступления в силу настоящего постановления, предоставляется отсрочка до 30 июня 2025 г. включительно. Указанные требования, содержащиеся в исполнительном документе, предъявленном к исполнению со дня вступления в силу настоящего постановления, в период отсрочки не исполняются банками или иными кредитными организациями, осуществляющими обслуживание счетов застройщика.

Особенности, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления, применяются в том числе к правоотношениям, возникшим из договоров участия в долевом строительстве, заключенных до дня вступления в силу настоящего постановления.

Таким образом, согласно приведенным выше положениям Постановления N 326 за период с 22 марта 2024 г. по 30 июня 2025 г. неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции по договорам участия в долевом строительстве, в том числе указанные в части 9 статьи 4 Закона N 214-ФЗ, не начисляются и, соответственно, не взыскиваются.

В соответствии с частью 9 статьи 4 Закона N 214-ФЗ, на которую имеется ссылка в пунктах 1 и 2 Постановления N 326, к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной Законом N 214-ФЗ.

К числу названных финансовых санкций относится предусмотренные пунктом 6 статьи 13, статьями 22 и 23 Закона о защите прав потребителей неустойка за просрочку выполнения требований потребителя и штраф, на применение которых указано в части 9 статьи 4 Закона N 214-ФЗ.

Суд отмечает, что применение правовых норм об ответственности к правонарушителю является вопросом права, что относится к исключительной компетенции суда (пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Таким образом, поскольку требования истца к застройщику предъявлены после вступления в законную силу указанного нормативного правового акта (Постановления N 326), штраф не подлежит взысканию.

Согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.09.2024) моральный вред, причиненный гражданину - участнику долевого строительства, заключившему договор исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, вследствие нарушения застройщиком прав гражданина - участника долевого строительства, предусмотренных настоящим Федеральным законом и договором, подлежит компенсации застройщиком при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных гражданином - участником долевого строительства убытков.

Поскольку судом установлено, что ответчик нарушил права истца, как участника долевого строительства, требования о взыскании компенсации морального вреда подлежат удовлетворению в размере 4000 руб. в пользу каждого истца, исходя из конкретных обстоятельств дела, с учетом принципов разумности и справедливости. Тем самым, законодатель освободил истца от необходимости доказывания в суде факта своих физических и нравственных страданий.

В порядке ст. ст. 94, 98, 100 Гражданского процессуального кодекса РФ, с ответчика в пользу истцов подлежат взысканию расходы по оплате услуг представителя в общем размере 30 000 руб. по 15 000 руб. (30 000 руб. х 1/2) в пользу каждого из истцов, расходы за составление претензии в общем размере 3000 руб., по 1500 руб. (1500 руб. х 1/2) в пользу каждого из истцов расходы за услуги курьера в общем размере 1200 руб., по 600 руб. (600 руб. х 1/2) в пользу каждого из истцов.

Относительно требований о взыскании нотариальных расходов, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении данного требования. Отказывая в удовлетворении требований о взыскании расходов на оформление нотариальной доверенности, суд руководствуется положениями п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 г. N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" и исходит из того, что представленная суду доверенность не подтверждает право представителя на участие в конкретном деле и в конкретном судебном заседании.

В силу ст. 103 Гражданского процессуального кодекса РФ, с ответчика подлежит взысканию госпошлина в размере 10659 руб. в доход местного бюджета, за удовлетворенные имущественные и неимущественные требования.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194 - 198 ГПК РФ суд

решил:

исковые требования ФИО1, ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Некрасовский» о защите прав потребителей удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Некрасовский» (ОГРН 

<

***>/ ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 стоимость устранения недостатков в размере 56593 руб., компенсацию морального вреда в размере 4 000 руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 руб., за составление претензии в размере 1500 руб., за услуги курьера в размере 600 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Некрасовский» (ОГРН 

<

***>/ ИНН 

<

***>) в пользу ФИО2 стоимость устранения недостатков в размере 56593 руб., компенсацию морального вреда в размере 4 000 руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 руб., за составление претензии в размере 1500 руб., за услуги курьера в размере 600 руб.

В удовлетворении остальной части заявленных требований, в том числе о взыскании неустойки и штрафа отказать.

Взыскать с общества ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Некрасовский» (ОГРН 

<

***>/ ИНН 

<

***>) в доход бюджета государственную пошлину в размере 10659 руб.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд города Уфы Республики Башкортостан

Судья Касимов А.В.

Решение в окончательной форме изготовлено 18 февраля 2025 года.