Дело № 2-4010/2024

УИД 35RS0010-01-2024-003160-12

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Вологда 10 июня 2024 года 

Резолютивная часть решения объявлена 10 июня 2024 года.

Мотивированное решение изготовлено 18 июня 2024 года.

Вологодский городской суд Вологодской области в составе судьи Беловой Е.А., при ведении протокола помощником судьи Пятовской И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску закрытого акционерного общества «СаровГидроМонтаж» к ФИО1 о взыскании денежных средств по договору подряда,

установил:

ЗАО «СаровГидроМонтаж» обратилось в суд с иском к ФИО1, о взыскании задолженности по договору подряда. 

В обосновании своих требований указало, что 17 апреля 2023 года между ЗАО «СаровГидроМонтаж» и ФИО1 заключен договор подряда № с самозанятым физическим лицом, согласно которому ФИО1 обязался выполнить работы по устройству оклеечной гидроизоляции с нанесением праймера резервуаров на объекте заказчика, в сроки, установленные договором, а истец обязался принять и оплатить результат работ. В нарушение требований договора обязательства по вышеуказанному договору ФИО1 не исполнены в полном объеме.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, просит взыскать с ФИО1 пени за просрочку исполнения обязательств по договору подряда за период с 30.09.2023 по 06.02.2024 в размере 336 623 рубля 71 копейку, задолженность в виде неосвоенного авансового платежа в размере 234 396 рублей 32 копейки, неустойку за несвоевременный возврат задолженности в виде неосвоенного авансового платежа за период 06.02.2024 по 09.02.2024 в размере 409 рублей 87 копеек, а также неустойку с 10.02.2024 по день фактической уплаты задолженности, расходы по госпошлине в размере 8 914 рублей 00 копеек.

Представитель истца ЗАО «СаровГидроМонтаж» в судебном заседании не участвовал, ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие. 

Ответчик ФИО1 в судебном заседании исковые требования не признал.

Суд, заслушав ответчика, исследовав материалы гражданского дела, приходит к следующему.

В соответствии пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 703 Гражданского кодекса Российской Федерации договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Согласно статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Таким образом, начальный и конечный сроки выполнения работ являются существенными условиями договора подряда. 

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса (пункт 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (пункт 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Материалами дела установлено, что 17 апреля 2023 года между ЗАО «СаровГидроМонтаж» и ФИО1 заключен договор подряда №, согласно которому ФИО1 обязался выполнить работы по устройству оклеечной гидроизоляции с нанесением праймера резервуаров на объекте заказчика «Строительство ТК...» в соответствии с проектом № и расчетом цены договора (приложение №), а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы.

Согласно п. 2.1. договора стоимость работ составляет 2 599 792 рубля.

Сроки выполнения работ: начало – с 17.04.2023, окончание – 30.06.2023 (пункт 3.2. договора).

Согласно приложению № к договору № от 17.04.2023 цена договора равняется 2 599 792 рублям. 

06 июля 2023 года между ЗАО «СаровГидроМонтаж» и ФИО1 заключено дополнительное соглашение № к договору № от 17 апреля 2023 года.

Пунктом 1.1 предусмотрено, что пункт 2.1. изложен в следующей редакции: «стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с расчетом цены договора (приложение №) составляет 4 449580 рублей без учета НДС. Стоимость работ не может быть изменена исполнителем в одностороннем порядке. 

Согласно пункту 1.2 дополнительного соглашения пункт 3.2. изложен в следующей редакции: «сроки выполнения работ: начало – с 17.04.2023, окончание – 31.08.2023. 

Согласно приложению № к дополнительному соглашению № от 06.07.2023 цена договора равняется 4 449 580 рублям.

09 августа 2023 года между ЗАО «СаровГидроМонтаж» и ФИО1 заключено дополнительное соглашение № к договору № от 17 апреля 2023 года, согласно пункту 1 которого пункт 2.8 в следующей редакции: «по настоящему договору исполнителю выплачивается аванс в размере 300 000 рублей 00 коп. без учета НДС (20%) в течение 5 банковских дней с момента заключения настоящего дополнительного соглашения. Размер аванса зачитывается при оплате счетов за выполненные работы пропорционально сумме фактически выполненных исполнителем и принятых заказчиком к оплате работ. После получения исполнитель обязуется предоставить заказчику чек на выплату аванса».

30 августа 2023 года между ЗАО «СаровГидроМонтаж» и ФИО1 заключено дополнительное соглашение № к договору № от 17 апреля 2023 года, согласно пункту 1 которого пункт 2.1 изложен в следующей редакции: «стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с расчетом цены договора (приложение № к договору) и составляет 4 550 740 рублей без учета НДС. Стоимость работ не может быть изменена исполнителем в одностороннем порядке. 

Согласно пункту 1.2 дополнительного соглашения пункт 3.2 изложен в следующей редакции: «сроки выполнения работ: начало – с 17.04.2023, окончание – 29.09.2023».

За время действия договорных обязательств ЗАО «СаровГидроМонтаж» (заказчик) оплатило ФИО1 (исполнителю) за выполненные работы с учетом авансового платежа 2 370 289 рублей 15 копеек, что подтверждается платежными поручениями № от 10.05.2023 на сумму 144 302 рубля 00 копеек; № от 05.06.2023 на сумму 200 000 рублей 00 копеек; № от 06.06.2023 на сумму 106 611 рублей 36 копеек; № от 14.07.2023 на сумму 313 547 рублей 10 копеек; № от 10.08.2023 на сумму 300 000 рублей 00 копеек; № от 28.08.2023 г. на сумму 377 280 рублей 66 копеек; № от 02.10.2023 на сумму 101 160 рублей 00 копеек; № 26.10.2023 на сумму 542 796 рублей 03 копейки; № от 10.11.2023 на сумму 284 892 рубля 00 копеек.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. По общему правилу односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

За время действия договорных обязательств ЗАО «СаровГидроМонтаж» (заказчик) оплатил ФИО1 (исполнитель) стоимость выполненных работ с учетом авансового платежа в размере 2 370 589 рублей, что подтверждается платежными поручениями № от 10 мая 2023 года на сумму 144 302 рубля; № от 05 июня 2023 года на сумму 200 000 рублей; № от 06 июня 2023 года на сумму 106 611 рублей 36 копеек; № от 14 июля 2023 года на сумму 313 547 рублей 10 копеек; № от 10 августа 2023 года на сумму 300 000 рублей; № от 28 августа 2023 года на сумму 377 280 рублей; № от 02 октября 2023 года на сумму 101 160 рублей; № от 26 октября 2023 года на сумму 542 796 рублей 03 копейки; № от 10 ноября 2023 года на сумму 284 892 рубля.

Во исполнение обязательств по договору № от 17 апреля 2023 года (с учетом дополнительных соглашений) ФИО1 выполнил, а ЗАО «СаровГидроМонтаж» приняло работы на общую сумму 2 136 192 рубля 83 копейки, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 30.04.2023, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30.04.2023 на сумму 144 302 рубля, актом о приемке выполненных работ от 31.05.2023, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 31.05.2023 на сумму 306 611 рублей 36 копеек; актом о приемке выполненных работ от 30.06.2023, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30.06.2023 на сумм 313 547 рублей 10 копеек, актом о приемке выполненных работ от 17.08.2023, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 17.08.2023 на сумму 404 590 рублей 52 копейки, актом о приемке выполненных работ от 25.09.2023, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 25.09.2023 на сумму 101 160 рублей, актом о приемке выполненных работ от 19.10.2023, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 19.10.2023 на сумму 581 089 рублей 85 копеек, актом о приемке выполненных работ от 07.11.2023, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 07.11.2023 на сумму 284 892 рубля.

Таким образом, задолженность ФИО1 по указанному договору составляет 234 396 рублей 32 копейки (2 370 589 рублей 15 копеек – 2 136 192 рубля 83 копейки).

Расчет задолженности, представленный истцом, судом проверен, является арифметически верным, контррасчет ответчиком не представлен. 

ФИО1 в полном объеме не исполнил своего обязательства по выполнению работ по договору подряда, в связи, с чем с него подлежит взысканию денежная сумма в размере 234 396 рублей 32 копейки в пользу ЗАО «СаровГидроМонтаж».

Ссылка ответчика на те обстоятельства, что на резервуарах отсутствовали вентиляционная колонка, световой люк и люк лази, в связи, с чем было невозможно выполнить работы в установленные договором сроки является несостоятельной, поскольку после заключения спорного договора ФИО1 была передана строительная площадка (резервуары) для производств работ, после чего ответчик приступил к выполнению работ, что подтверждается первоначальными актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме № от 30.04.2023. 

Довод о невозможности производства работ на двух резервуарах из-за наличия трещин на внешней поверхности стен является необоснованным, поскольку их наличие было выявлено и устранено ЗАО «СаровГидроМонтаж», 06.07.2023 были завершены и приняты работы по заделке трещин на внешней поверхности стен резервуаров объемом 1000 кв.м № и №. Кроме того, наличие трещин не мешало ФИО1 продолжать выполнение работ, что подтверждается актами по форме № справкой по форме № со сроком до 07.11.2023. 

Ссылка ответчика о необходимости приостановления работ в связи с внесением изменений в проект строительства резервуаров (добавлением работ по выкружке) документально не подтверждена, является голословной. Каких-либо письменных заявлений в адрес истца ответчиком по данному факту не направлялось. 

Доказательств выполнения работ ФИО1 на сумму 443 723 рубля 44 копейки материалы дела не содержат. 

На основании п. 7.2 Договора за нарушение исполнителем срока окончания работ по Договору исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает последнему пеню в размере 0,1% от стоимости выполняемых работ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Пени за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № от 17 апреля 2023 года за период с 30 сентября 2023 года по 06 февраля 2024 года составляет 336 623 рубля 71 копейка, в связи с чем подлежат взысканию с ответчика. 

Вопреки доводам ответчика 25 декабря 2023 года истец направил в его адрес претензию с требования возврата денежных средств, которая была оставлена без удовлетворения. 

На основании части 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумм долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно расчет истца по состоянию на 09 февраля 2024 года срок просрочки обязательства за период с 06.02.2024 по 09.02.2024 по договору составляет 4 дня. 

Таким образом, размер неустойки за несвоевременный возврат неосвоенного авансового платежа составляет 409 рублей 87 копеек (234 396 рублей 32 копейки *4 дней*16 %) и подлежит взысканию с ответчика. 

В силу пункта 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

В связи с чем, требования о взыскании неустойки с 10.02.2024 по день фактической уплаты задолженности подлежат удовлетворению.

На основании статьи 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины, понесенные истцом при подаче иска в размере 8 914 рублей.

Руководствуясь статьями 194-197 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования закрытого акционерного общества «СаровГидроМонтаж» к ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии №, 

<

данные изъяты>, в пользу закрытого акционерного общества «СаровГидроМонтаж», ИНН 

<

***>, пени за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № с самозанятым физическим лицом от 17 апреля 2023 года за период с 30 сентября 2023 года по 06 февраля 2024 года в размере 336 623 рубля 71 копейку, неосвоенный авансовый платеж в размере 234 396 рублей 32 копейки, неустойку за несвоевременный возврат неосвоенного платежа за период с 06 февраля по 09 февраля 2024 года в размере 409 рублей 87 копеек, неустойку с 10 февраля 2024 года с продолжением ее начисления по дату фактической уплаты задолженности по договору подряда № с самозанятым физическим лицом от 17 апреля 2023 года, государственную пошлину в размере 8 914 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд Вологодской области в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья Е.А. Белова