Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

30.05.2018г Красногорский городской суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Кавериной О.В.

при секретаре ФИО2 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Реал-Сервис» о защите прав потребителя

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 предъявил к ООО «Реал-Сервис» о защите прав потребителя. В обоснование требований представитель указывает, что 19.11.2013г между сторонами заключен договор №-П участия в долевом строительстве, по условиям которого ответчик обязался не позднее 30.06.2015г. передать истцу объект долевого строительства, - квартиру с условным номером 281 по строительному адресу: 

<

адрес>.. Однако сроки исполнения обязательства ответчиком нарушены, квартира передана истцу только 10.06.2016г.

Неустойка за период с 30.06.2016г по 24.05.2016г составила 998 129 руб.

Указанную сумму, а также 80 000 руб в счет компенсации морального вреда и штраф в соответствии с п.6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителе» просит взыскать с ответчика. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился. О дне слушания дела извещен надлежащим образом, в связи с чем суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Выслушав объяснения представителя истца, изучив материалы дела, исследовав и оценив доказательства в совокупности, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению. 

В соответствии со ст. 6 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства застройщик уплачивает дольщику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, такая неустойка уплачивается застройщиком в двойном размере. 

Судом установлено, что 19.11.2013г между сторонами заключен договор №-П участия в долевом строительстве, по условиям которого ответчик обязался не позднее 30.06.2015г. передать истцу объект долевого строительства, - квартиру с условным номером 281 по строительному адресу: 

<

адрес>.. Однако сроки исполнения обязательства ответчиком нарушены, квартира передана истцу только 10.06.2016г.

Неустойка за период с 30.06.2016г по 24.05.2016г составит 998 129 руб и в силу закона подлежит взысканию с ответчика.. 

В силу ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» в счет компенсации морального вреда в пользу истца следует взыскать 10 000 руб, а также штраф, предусмотренный п.6 ст.13 того же Закона.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.193-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с ООО «Реал-Сервис» в пользу ФИО1 неустойку за период с 30.06.2015г по 24.05.2016г 998 129 руб, компенсацию морального вреда -10 000 руб, штраф – 504 064 руб 50 коп, а всего 1 512 193 руб 50 коп.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд в течение одного месяца с момента принятия судом решения в окончательной форме.

Судья: О.В. Каверина