дело №

66RS0№-05

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

29 августа 2025 года Ленинский районный суд города Екатеринбурга 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Васильковой О.М., при секретаре Малышевой К.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению АО «Екатеринбурггаз» к ФИО1 о взыскании платы за подключение (технологическое присоединение) и неустойки за нарушение заявителем срока осуществления мероприятий по подключению,

У С Т А Н О В И Л:

АО «Екатеринбурггаз» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании платы за подключение (технологическое присоединение) по договору № от 

 – 43 865 рублей 53 коп., неустойки за нарушение заявителем срока осуществления мероприятий по подключению за период с 

 по 

 – 101 240 рублей 06 коп., с начислением неустойки по день вынесения судебного решения.

В обоснование заявленного иска указано, что между сторонами был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения № от 

. В соответствии с условиями договора размер платы за подключение составил 145 105 рублей 59 коп., и поскольку исполнительно выполнил мероприятия по технологическому присоединению в части создания сети газораспределения для границ земельного участка заявителя, а последний оплату не произвел, Общество обратилось в суд с настоящим иском.

В судебном заседании представитель истца на иске настаивала.

В судебное заседание ответчик не явилась, о рассмотрении дела извещена в соответствии с требованиями ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела и оценив представленные суду доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 

По общим правилам и требованиям гражданского судопроизводства истец самостоятельно определяет соответствующий его интересам способ судебной защиты, в том числе предмет и основания заявляемого им иска.

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства (ст.ст. 309, 310 Кодекса).

В соответствии с ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 

 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" к полномочиям Правительства Российской Федерации в области газоснабжения отнесено утверждение правил технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.

Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

 N 1314 (далее - Правила N 1314), которые действовали в период возникновения спорных правоотношений, определен порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (п. 1 Правил N 1314).

Подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении, по которому исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) (п. п. 59, 60 Правил N 1314).

Исполнитель обязан, в частности, осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения (пп. "а" п. 98 Правил N 1314).Договор о технологическом присоединении объектов капитального строительства к сетям газораспределения по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг, в связи с чем к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения гл. 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (разд. III Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Судом установлено, что 

 АО "Екатеринбурггаз" (Исполнитель) и ФИО1 (Заявитель) заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, согласно которому Исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства Индивидуальный жилой дом к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, а Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: г.Екатеринбург, 

<

адрес>, кадастровый № в соответствии с условиями договора, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) (п. 1 Договора).

 между сторонами заключено дополнительное соглашение к Договору присоединения от 

 об установлении срока подключения – до 

.

Стоимость услуг составила 88 865 рублей 53 коп.

Согласно п. 10 сторонами согласовано, что внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке (с учетом оплаты заявителем на дату подписания настоящего дополнительного соглашения части стоимости за подключение в размере 88 8654 рублей 53 коп., в том числе НДС 18 % в сумме 1 433 рубля 90 коп.): 50 % платы (44 432 рубля 77 коп.) за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора, 50 % процентов платы (44 432 рубля 77 коп.) в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Исполнитель выполнил мероприятия по технологическому присоединению в части создания сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, что подтверждается Актом приемки законного строительством объекта сети газораспределения от 

.

Оплата работ ответчиком не произведена.

Исходя из представленных суду документов, установив факт исполнения истцом обязательств по договору в полном объеме и факт неисполнения ответчиком встречной обязанности по оплате услуги, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца АО "Екатеринбурггаз" задолженности по оплате в сумме 43 865 рублей 53 коп. и неустойки.

При этом суд исходит из того, что ответчик принял выполненные работы по договору, что подтверждается имеющимся в деле и подписанным ответчиком актом о подключении, присоединение жилого дома ответчика к сети газораспределения осуществлено, ответчик в настоящее время является абонентом и оплачивает потребляемый от сети газораспределения ресурс, что подтверждается дополнительно представленной стороной истца карточкой абонента и свидетельствует о принятии результата выполненных истцом работ.

В соответствии с п. 81 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

 N 1314 (Далее по тексту - Правил подключения) договор о подключении считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора о подключении.

В соответствии с п. 18 Договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального Банка России, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки.

По состоянию на 

 размер неустойки составил 

По основаниям ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в доход местного бюджета с ответчика следует взыскать 5 353 рубля.

На основании изложенного и руководствуясь требованиями ст. 12, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 (паспорт №) в пользу АО «Екатеринбурггаз» плату по договору о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения № от 

 – 43 865 рублей 53 коп., неустойку с 

 по 

 -, в счет возмещения расходов оп оплате государственной пошлины – 5 353 рубля 00 коп.

Ответчик вправе подать заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца в Свердловский областной суд с подачей апелляционной жалобы через Ленинский районный суд г.Екатеринбурга по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья: подпись О.М.Василькова

Копия верна

Судья:

Секретарь:

Заочное решение на __________2025 г.

в законную силу не вступило.

Судья:

Секретарь: