УИД: 35RS0006-01-2025-000486-17 2-459/2025

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Великий Устюг 04 июня 2025 года

Великоустюгский районный суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Казариновой Т.В.,

при секретаре Суровцевой О.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в лице Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» к ФИО1 о взыскании неустойки за просрочку выполнения мероприятий по технологическому присоединению,

УСТАНОВИЛ :

Публичное акционерное обществе «Россети Северо-Запад» в лице Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (далее - ПАО «Россети Северо-Запад») обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании неустойки за просрочку выполнения мероприятий по технологическому присоединению. 

В обоснование иска указало, что между ПАО «Россети Северо-Запад» (далее - сетевая организация, истец) и ФИО1 (далее - ответчик, заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 11.01.2024 №ВОЛ-06123-Э-У/23 (далее -договор). В соответствии с п.1.1. договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: ЛЭП 10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетью объекта заявителя для электроснабжения складского здания, расположенного по адресу: ..., кадастровый № участка №. Размер платы за услуги сетевой организации определен пунктом 3.1. договора в соответствии с Приказом ДТЭКиТР Вологодской области от 25.11.2022 № 472-р и составляет 1 332 843,24 руб. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, с учетом заключения дополнительного соглашения, истек 13.01.2025 (с учетом переноса последнего дня срока, выпавшего на выходной день). Истец письмом от 03.05.2024 №ВОЛ-06123-Э-У/23-02 уведомил заявителя о том, что сетевая организация готова осуществить технологическое присоединение. Уведомление заявителя о выполнении мероприятий по технологическому присоединению на текущий момент в адрес сетевой организации не поступило. Допущенная ответчиком просрочка является основанием для начисления неустойки согласно п.4.2. договора и пп.«в» п.16 Правил. Неустойка за просрочку выполнения ответчиком мероприятий по технологическому присоединению за период с 14.01.2025 по 21.03.2025 составляет 223 251,24 руб. Сумма неустойки за год просрочки составляет 1 216 219,46 руб. Истцом начислена неустойка за период с 14.01.2025 по 21.03.2025 в сумме 223 251,24 руб. Таким образом, предельная сумма неустойки, которая может быть взыскана с ответчика за период с 22.03.2025 до фактического исполнения обязательства, составляет 992 968,22 руб. (1 216 219,46 руб. - 223 251,24 руб.).

Просит суд взыскать с ФИО1 неустойку в размере 223 251 рубль 24 копейки, начисленную за просрочку выполнения мероприятий по технологическому присоединению (в части выполнения технических условий) по договору от 11.01.2024 № ВОЛ-06123-Э-У/23 за период с 14.01.2025 по 21.03.2025; неустойку за просрочку выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору от 11.01.2024 № ВОЛ-06123-Э-У/23, начисленную за период с 22.03.2025 по день фактического исполнения обязательств (получения ПАО «Россети Северо-Запад» уведомления ФИО1 о выполнении мероприятий по технологическому присоединению) в размере 0,25% от суммы 1 332 843,24 руб. за каждый день просрочки, но не более 992 968 рублей 22 копейки. 

В судебном заседании представитель истца ПАО «Россетти Северо-Запад» ФИО2 требования поддержала в полном объеме, сославшись на доводы, изложенные в иске. 

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, извещался судом надлежащим образом. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке ч. 4 ст. 167 ГПК РФ. 

Выслушав объяснения представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Положениями статьи 126 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (в том числе, по энергоснабжению). 

На основании ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Согласно п.65 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 №7 (ред. от 22.06.2021) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

При этом законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограничена.

Из материалов гражданского дела следует, что 11 января 2024 года между ПАО «Россети Северо-Запад» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ВОЛ-06123-Э-У/23.

Вышеуказанный договор заключен в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (далее по тексту - Правила).

Согласно п.1.1. договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ВОЛ-06123-Э-У/23 от 11.01.2024, ПАО «Россети Северо-Запад» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО1: ЛЭП 10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетью объекта заявителя для электроснабжения складского здания, расположенного по адресу: ..., кадастровый номер участка №.

Пунктом 18 Правил определен перечень мероприятий по технологическому присоединению, включающий в себя: 

- подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий;

- разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

- разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 

- выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий;

- проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IХ Правил;

- выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем. 

Согласно п.1.2 вышеуказанного договора, перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределение между сторонами обязанностей по их выполнению определены в Технических условиях.

В соответствии с п.1.3 вышеуказанного договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год с даты заключения договора.

Согласно п.2.3.5 вышеназванного договора заявитель не позднее, чем за 10 дней до истечения срока, указанного в п.1.3. договора, должен направить в адрес сетевой организации уведомление о выполнении Технических условий.

Порядок проведения проверки выполнения технических условий регламентирован разделом IХ Правил.

В соответствии с п.19 Правил, по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения.

Согласно п.3.1 вышеназванного договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом ДТЭКиТР Вологодской области №472-р от 25.11.2022 и составляет 1 332 843 рубля 24 копейки.

Разделом 11 Технических условий определен перечень мероприятий по технологическому присоединению, который подлежит выполнению заявителем. 

Разделом 10 Технических условий определены обязанности сетевой организации. 

Судом установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению с учетом заключения дополнительного соглашения истек 13.01.2025.

Письмом №ВОЛ-06123-Э-У/23-02 от 03.05.2024 истец уведомил ответчика ФИО1 о том, что сетевая организация готова осуществить технологическое присоединение.

Уведомление заявителя ФИО1 о выполнении мероприятий по технологическому присоединению на текущий момент в адрес сетевой организации не поступило.

В силу положений пункта 4.2. договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ВОЛ-06123-Э-У/23 от 11.01.2024 и пп.«в» п.16 Правил установлено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом, совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в указанном порядке за год просрочки.

Согласно расчету истца, размер неустойки за просрочку выполнения ответчиком ФИО1 мероприятий по технологическому присоединению за период с 14.01.2025 по 21.03.2025 составляет 223 251 рубль 24 копейки.

Согласно расчету истца, размер неустойки за год просрочки составляет 1 216 219 рублей 46 копеек. 

Поскольку истцом начислена неустойка за период с 14.01.2025 по 21.03.2025 в размере 223 251 рубль 24 копейки, предельная сумма неустойки, которая может быть взыскана с ответчика ФИО1 за период с 22.03.2025 до фактического исполнения обязательства, составляет 992 968 рублей 22 копейки (1 216 219,46 руб. - 223 251,24 руб.).

Расчет задолженности судом проверен, признан верным, ответчиком не оспорен. 

Доказательств, опровергающих расчеты истца, ответчиком не представлено.

Также истцом заявлены требования о взыскании неустойки за просрочку выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору от 11.01.2024 № ВОЛ-06123-Э-У/23, начисленную за период с 22.03.2025 по день фактического исполнения обязательств (получения ПАО «Россети Северо-Запад» уведомления ФИО1 о выполнении мероприятий по технологическому присоединению) в размере 0,25% от суммы 1 332 843 рубля 24 копейки за каждый день просрочки.

Учитывая, что до настоящего периода времени в адрес ПАО «Россети Северо-Запад» не поступало уведомление ФИО1 о выполнении мероприятий по технологическому присоединению, суд находит заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению. 

На момент вынесения решения расчет неустойки за просрочку выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору от 11.01.2024 № ВОЛ-06123-Э-У/23, начисленной за период с 22.03.2025 по 04.06.2025 года следующий: 1332843,24 руб.*0,25%*75 дней = 249908 рублей 11 копеек.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере рубля 7 698 рублей 00 копеек.

На основании изложенного, руководствуясь ст.198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ :

Взыскать с ФИО1 (ИНН №) в пользу публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН №, ОГРН №):

- неустойку в размере 223 251 рубль 24 копейки, начисленную за просрочку выполнения мероприятий по технологическому присоединению (в части выполнения технических условий) по договору от 11.01.2024 №ВОЛ-06123-Э-У/23 за период с 14.01.2025 по 21.03.2025; 

- неустойку за просрочку выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору от 11.01.2024 № ВОЛ-06123-Э-У/23, начисленную за период с 22.03.2025 по 04.06.2025 года – в размере 249908 рублей 11 копеек;

- неустойку за просрочку выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору от 11.01.2024 № ВОЛ-06123-Э-У/23, начисленную за период с 05.06.2025 по день фактического исполнения обязательств (получения ПАО «Россети Северо-Запад» уведомления ФИО1 о выполнении мероприятий по технологическому присоединению) в размере 0,25% от суммы 1 332 843 рубля 24 копейки за каждый день просрочки, но не более 743060 рублей 11 копеек;

- расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 698 рублей 00 копеек.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Великоустюгский райсуд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья - Казаринова Т.В.

копия верна: судья - 

Мотивированное решение изготовлено 11 июня 2025 года.