ОПРЕДЕЛЕНИЕ

р.п. Тугулым ДД.ММ.ГГГГ

Тугулымский районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Носковой А.А.

при секретаре Сауковой Н.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № года по иску ФИО1 ФИО5 к ООО «Тюменьгазстрой» о взыскании неустойки за нарушение передачи объекта долевого строительства, компенсации морального вреда, вытекающего из Закона «О защите прав потребителей», штрафа, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО «Тюменьгазстрой» о взыскании неустойки за нарушение передачи объекта долевого строительства, компенсации морального вреда, вытекающего из Закона «О защите прав потребителей», штрафа. 

Указав в заявлении, что в соответствии с Договором №Д участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, установлена обязанность ответчика ввести многоквартирный дом в эксплуатацию в ДД.ММ.ГГГГ и передать объект дольщику не позднее двух месяцев с ввода дома в эксплуатацию, а согласно акту приема-передачи квартиры в собственность, данная обязанность исполнена ответчиком ДД.ММ.ГГГГ, то есть, с нарушением сроков ввода в эксплуатацию (ДД.ММ.ГГГГ по договору). 

Она является правопреемником по Договору об уступке прав и обязанностей участника долевого строительства, по Договору № Д участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым обладает правами и обязанностями участника долевого строительства. Предусмотренная договором сумма инвестирования полностью оплачена застройщику в установленный договором срок.

В связи с чем просит взыскать с ответчика неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере (ч. 2 ст. 6 Федерального закона).

Ставка рефинансирования на ДД.ММ.ГГГГ составляет 8.25%

Цена договора 1 900 000 рублей. Дней просрочки 446.

8.25%/300* 1900000*446=23303 рубля 50 копеек*2=46607 рублей.

Общая сумма неустойки составляет 46607 рублей.

Так же просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда за причиненные ей нравственные страдания в размере 25 000 рублей и штраф, на основании п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей", в размере 50% от суммы, взысканной в пользу потребителя, то есть, 35803,50 (46607+25000):2)). 

В судебном заседании истец ФИО1 представила суду заявление, в котором отказывается от заявленных требований к ООО «Тюменьгазстрой» в связи с добровольным исполнением, просит производство по делу прекратить. 

Последствия принятия отказа от иска и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст. 173, 220, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации истцу понятны, о чем имеется запись в представленном в суд заявлении.

Представитель ответчика ООО «Тюменьгазстрой» ФИО3, действующая на основании доверенности, в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, причины неявки суду не сообщила. 

В соответствии со ст. ст. 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает отказ истца от заявленных исковых требований, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом.

Выслушав истца ФИО1, исследовав материалы дела, суд считает, что отказ от иска, заявленный истцом, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, поэтому принимается судом. В связи, с чем производство по гражданскому делу подлежит прекращению.

Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Принять от истца ФИО1 ФИО6 отказ от иска к ООО «Тюменьгазстрой» о взыскании неустойки за нарушение передачи объекта долевого строительства, компенсации морального вреда, вытекающего из Закона «О защите прав потребителей», штрафа. 

Разъяснить истцу, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. 

Производство по делу № года по иску ФИО1 ФИО7 к ООО «Тюменьгазстрой» о взыскании неустойки за нарушение передачи объекта долевого строительства, компенсации морального вреда, вытекающего из Закона «О защите прав потребителей», штрафа - прекратить.

Определение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Тугулымский районный суд 

<

адрес> в течение 15 дней со дня его вынесения.

Председательствующий судья А.А. Носкова