РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 июня 2017 года г.Самара

Октябрьский районный суд г. Самары в составе:

председательствующего судьи Лобановой Ю.В.,

при секретаре судебного заседания Нахапетян И.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1881/17 по иску ООО «Окна Рассвет» к ФИО1 о взыскании задолженности по договору подряда,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Окна Рассвет» обратились в суд с иском, указав, дата. между ООО «Окна Рассвет» и ФИО1 был заключен Договор на поставку окон ПВХ №.... Согласно п. 1.1 раздела 1. «Предмет договора» истец обязуется изготовить согласно листу замера демонтировать и установить окна пластиковые (алюминиевые решетки, металлоконструкции, внутреннюю отделку) в помещении, расположенном по адресу: адрес. Работы выполняются из собственных материалов и своими силами. При этом лист замера к договору №... от дата. является неотъемлемой частью договора. Как следует из п. 2.3 раздела 2 «Права и обязанности сторон» Договора обязательства принятые на себя «Исполнителем» по Договору, должны быть исполнены в течение двух недель со дня поступления авансового платежа, предусмотренного п. 3.2 данного договора. Пунктами 3.1 и 3.2 раздела 3 «Стоимость договора» предусмотрено, что общая сумма по договору составляет *** руб. Из которых *** руб. являются предоплатой от стоимости договора, а оплата *** руб. в качестве окончательного расчета, осуществляется по окончанию работ. Обязанность заказчика принять результат работ при отсутствии в нем явных недостатков и оплатить выполненные работы, предусмотренные п.2.2 раздела 2 договора. Как следует из п. 4.1.и 4.2 раздела 4 приемка окон по качеству осуществляется по месту установки с актом выполненных работ. При обнаружении дефектов в акте делается отметка об этом. дата. по месту регистрации заказчика ответчику с сопроводительным письмом были направлены акты выполненных работ №... от дата. с целью приемки выполненных работ по договору и листу замера №... от дата. По смыслу положений пункта 4.1. раздела 4. «Порядок приёмки (результата) работ» Договора, место оформления акта выполненных работ определяется местом установки окон, а потому должен был быть подписан и направлен по месту нахождения – «Исполнителя» именно Акт выполненных работ №... от дата.Акты, согласно почтовым уведомлениям о вручении ценного письма (почтовые идентификаторы №... и №...) получены ответчиком дата.Согласно сопроводительным письмам, один экземпляр подписанного акта выполненных работ должен быть выслан по месту нахождения ООО «Окна Рассвет» в течение 3 дней с момента получения. дата. в отделение почтовой связи адрес поступили претензии от ответчика. дата. в адрес ФИО1 направлены ответы на претензию. Однако акт выполненных работ не подписан.Вместе с этим ООО «Окна Рассвет» сообщило, что в статье 12 «Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии» Федерального закона от дата №...- ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» перечислены все виды деятельности, подлежащие лицензированию.Однако ни производство оконных и балконных конструкций из полимерных материалов, ни монтаж данных конструкций также не входит в перечень лицензируемых видов деятельности.Также ООО «Окна Рассвет» сообщило, что оснований для перерасчёта стоимости объёма работ предусмотренного Договором и «Листом замера к договору №... от дата года» не имеется, поскольку условия Договора по объёму работ и по цене Договора согласованы сторонами.ООО «Окна Рассвет» исполнило все принятые на себя обязательства, от оплаты которых в свою очередь уклоняется ФИО1 В то же время, ООО «Окна Рассвет» признало обоснованной претензию ФИО1 в требовании выплатить неустойку из расчёта 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки исполнения обязательства со стороны «Исполнителя».Период просрочки исполнения обязательства со стороны истца по Договору составил 9 (девять) дней, поскольку окончательный этап работ (отделка балкона, вывод электрики, изготовление шкафа) проведен дата, и согласно произведенным расчётам, неустойки составит *** *** руб.).В этой связи, ООО «Окна Рассвет» предложило исполнить требование ФИО1 заявленное в претензии о выплате неустойки в размере *** руб. зачётом встречного однородного требования ООО «Окна Рассвет» к ФИО1 о взыскании суммы долга в размере *** руб. (неполученного окончательного расчёта) в порядке статьи 410 «Прекращение обязательства зачетом» Гражданского кодекса Российской Федерации оформив данное исполнение соответствующим соглашением.При удовлетворении данного предложения обязательство ФИО1 перед ООО «Окна Рассвет» составило бы ***). дата. от ФИО2 поступило уведомление об отказе от договора на поставку окон ПВХ №... от дата. ООО «Окна Рассвет» повторно сообщило, что дата в адрес ответчика с сопроводительным письмом №... от дата был направлен Акт выполненных работ №... от дата и от дата с целью приёмки выполненных работ соответствующих условиям Договора и «Листу замера к договору №... от дата».Акты, согласно почтовым уведомлениям о вручении ценного письма (почтовые идентификаторы №... и №...) получены ФИО1 дата, которые она должна была подписать не позднее дата.Следовательно, после дата ответчик не вправе отказаться от Договора.Таким образом, уведомление о расторжении Договора, после выполнения обществом объема работ на 100 % и получения ФИО1 Акта выполненных работ свидетельствуют о том, что таким способом ответчик уклоняется от принятия результата и оплаты выполненных работ.По вопросу не составления сметы при заключении Договора, общество сообщило что, пунктом 1.1. раздела 1. «Предмет договора» названного Договора. ООО «Окна Рассвет» выступающее по договору «Исполнителем», обязуется изготовить согласно листу замера, демонтировать и установить окна пластиковые (алюминиевые жалюзи, решетки, металлоконструкции, внутреннюю отделку) в помещении, расположенном по адресу: адрес.При этом в «Листе замера к договору №... от дата года», который в соответствии с пунктом 1.1. вышеназванного Договора является неотъемлемой частью данного договора, предусмотрены дополнительные условия, согласно которым «Исполнитель» выполняют также работы связанные с обшивкой, отделкой и утеплением балкона, установкой шкафа, выводом электрики (розетка, светильники) и установкой айсблока. Следовательно, неопределенность в отношении предмета договора, объеме и характере выполняемых работ, цене и сроков выполнения работ отсутствует.Стоимость и объем необходимых работ в полном объеме нашли свое отражение вусловиях договора.Фактическое выполнение работ подрядчиком и частичная оплата выполненных работ заказчиком, свидетельствует о согласованности сторонами предмета договораподряда.Из данной нормы права следует, что смета составляется в обязательном порядке лишь по требованию сторон договора. Каких-либо требований о составлении сметы на момент заключения договора либо в период его исполнения со стороны ответчика не заявлялось. Таким образом, отсутствуют законные основания для составления сметы выполненных работ после направления ФИО1 Акта выполненных работ.По третьему Доводу вышеназванного уведомления «Об отказе от договора на поставку окон ПВХ №... от дата года» о том что: «направленные ".. ." акты выполненных работ от дата не могли быть ".. .” подписаны, поскольку выполненные работы не соответствовали условиям заключенного Договора» ООО «Окна Рассвет» также сообщило, что какое бы то ни было несоответствие по качеству и объёму работ, в силу положений изложенных пунктов 4.1. и 4.2. раздела 4. «Порядок приёмки» (результата) работ» Договора, подлежало отражению в Акте выполненных работ, направленному в ответ обществу с подписью ответчика и его замечаниями по объему и качеству выполненных работ и с соответствующими доказательствами о наличии таких обстоятельств. Сумму долга в размере *** руб. (неполученного окончательного расчёта) истец просил оплатить в течение трёх календарных дней с момента получения ответа за исх. №... от дата на уведомление «Об отказе от договора на поставку окон ГТВХ №... от дата года».Согласно уведомлению о вручении, ответ за исх. №... от дата на уведомление «Об отказе от договора на поставку окон ПВХ №... от дата года» получен ответчиком дата. При этом, обязательства ответчика по оплате оставшейся задолженности по Договору на поставку окон ПВХ №... от дата в размере *** рублей до настоящего момента остались не исполненными, что и послужило основанием оформить настоящее исковое заявление. В адрес ответчика неоднократно направлялись акты выполненных работ. Просят взыскать с ФИО1 задолженность по договору на поставку окон ПВХ №... от дата. в размере *** руб. проценты за пользование чужими денежными средствами в размере *** руб. госпошлину в размере *** руб.

В судебном заседании представитель истца ФИО3,поддержал исковое заявление в полном объеме, просил удовлетворить. 

Представитель ответчика ФИО4, действующий на основании доверенности от дата. в судебном заседании исковые требования не признал по основаниям, изложенным в письменных возражениях.

Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В судебном заседании установлено, что дата. между ООО «Окна Рассвет» и ФИО1 был заключен Договор на поставку окон ПВХ №.... 

Согласно п. 1.1 раздела 1. «Предмет договора» истец обязуется изготовить согласно листу замера демонтировать и установить окна пластиковые (алюминиевые решетки, металлоконструкции, внутреннюю отделку) в помещении, расположенном по адресу: адрес. 

Пунктом 1.2. Договора предусмотрено, что работы выполняются из собственных материалов и своими силами.

Как следует из п. 2.3 раздела 2 «Права и обязанности сторон» Договора обязательства принятые на себя «Исполнителем» по Договору, должны быть исполнены в течение двух недель со дня поступления авансового платежа, предусмотренного п. 3.2 данного договора. 

Пунктами 3.1 и 3.2 раздела 3 «Стоимость договора» предусмотрено, что общая сумма по договору составляет *** руб. Из которых *** руб. являются предоплатой от стоимости договора, а оплата *** руб. в качестве окончательного расчета, осуществляется по окончанию работ. 

Обязанность заказчика принять результат работ при отсутствии в нем явных недостатков и оплатить выполненные работы, предусмотренные п.2.2 раздела 2 договора. 

Как следует из п. 4.1.и 4.2 раздела 4 приемка окон по качеству осуществляется по месту установки с актом выполненных работ. При обнаружении дефектов в акте делается отметка об этом. 

дата. по месту регистрации заказчика ответчику с сопроводительным письмом были направлены акты выполненных работ №... от дата. с целью приемки выполненных работ по договору и листу замера №... от дата. 

Акты, согласно почтовым уведомлениям о вручении ценного письма (почтовые идентификаторы №... и №...) получены ответчиком дата. Согласно сопроводительным письмам, один экземпляр подписанного акта выполненных работ должен быть выслан по месту нахождения ООО «Окна Рассвет» в течение 3 дней с момента получения. 

дата. в отделение почтовой связи адрес поступили претензии от ответчика. 

дата. в адрес ФИО1 направлены ответы на претензию. Однако акт выполненных работ не подписан.

Со стороны истца обязательства по выполнению работ были исполнены своевременно в сроки и на условиях договора, что подтверждается актом о выполнении работ №... от дата., от дата.

В соответствии с положениями статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

На основании статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании пункта 1 статьи 703 Гражданского кодекса Российской Федерации договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Согласно статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Согласно п. 1 ст. 711, п. 2 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

П. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В силу п. 6 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

В судебном заседании представитель ответчика ходатайствовал о назначение судебной экспертизы.

Определением суда от дата. по делу была назначена судебная экспертиза.

Согласно выводам, изложенным в заключение эксперта ООО «Самарское бюро экспертиз и исследований» №... от дата.следует, что вынос балкона «по плите» вперед осуществлен. Недостатки в фактически произведенных работах, выполненных ООО «Окна Рассвет» в рамках договора имеются. Недостатки, образованные при производстве монтажных работ по установке конструкций, имеют производственный характер. Фактические выполненные работы соответствуют объему работ, определенному сторонами в «Договоре на поставку окон ПВХ №...» от дата. и «Листе замера к договору №... от дата. Выявленные недостатки работ являются устранимыми недостатками. Оценивая заключение ООО «Самарское бюро экспертиз и исследований» №... от дата., суд полагает, что оно содержит подробное описание проведенного исследования, расчет произведен с учетом всего перечня дефектов и необходимого ремонта для их устранения в соответствии с методическими указаниями, территориальными сметными нормативами, расценками на работы и ценами на материалы, незаинтересованным в исходе дела экспертом, имеющим соответствующую квалификацию, в соответствии с требованиями гражданского процессуального законодательства, заинтересованности эксперта по делу не установлено. Оснований сомневаться в компетентности эксперта у суда не имеется. 

Учитывая вышеизложенное, суд признает полным, обоснованным заключение ООО «Самарское бюро экспертиз и исследований» №... от дата. принимает его в качестве доказательства. 

В процессе судебного разбирательства ответчиком встречных требований по качеству изготовленных окон и имеющихся в них недостатках суду не заявлено. Кроме того, ответчик не представил доказательств выполнения ООО "Окна рассвет" спорных работ в объеме и стоимостью меньшей, нежели указано в акте о приемке выполненных работ №... от дата. Ответчиком не представлено доказательств выполнения спорных работ своими силами или силами других подрядных организаций, свой расчет выполненных работ..

При таких обстоятельствах, требования истца о взыскании с ответчика задолженности по договору подряда №... от дата. в размере *** рублей подлежат удовлетворению. 

В случае, когда покупатель не исполняет обязанность по оплате переданного товара в установленный договором срок и иное не предусмотрено настоящим Кодексом, на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса со дня, когда по договору товар должен был быть оплачен, до дня оплаты товара покупателем.

Согласно ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Поскольку со стороны ответчика допущено неправомерное уклонение от обязанности по оплате стоимости по договору подряда, он обязан уплатить истцу, надлежащим образом, исполнившим свои обязательства, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с дата по дата в размере *** руб.

К размеру процентов, взыскиваемых по пункту 1 статьи 395 ГК РФ, по общему правилу, положения статьи 333 ГК РФ не применяются (пункт 6 статьи 395 ГК РФ).

Оснований для применения ст. 333 ГК РФ суд не усматривает.

В силу ст. 333.19 НК РФ, ст. 98 ГПК РФ, с ответчика в доход государства подлежит взысканию госпошлина в сумме *** руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, 

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО «Окна Рассвет» удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Окна Рассвет» задолженность по договору на поставку окон в размере *** руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с дата по дата в размере *** руб., возврат госпошлины в сумме *** руб., а всего *** руб.

Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд, через Октябрьский районный суд в порядке ст. 321 ГПК РФ в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

В окончательном виде решение суда принято дата.

Судья Ю.В. Лобанова