Копия

Гр.дело №2-440/2024 УИД 24RS0049-01-2024-000463-06 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 июля 2024 года г. Сосновоборск

Сосновоборский городской суд Красноярского края в составе: 

председательствующего судьи Белькевич О.В.,

при секретаре Гончаровой Е.М.,

с участием представителя истца ФИО1, действующей на основании доверенности от 04.03.2024,

представителя ответчика ПАО «Россети Сибирь» ФИО2, действующего на основании доверенности от 15.04.2022, в порядке передоверия по доверенности от 05.06.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 к ПАО "Россети Сибирь" о защите прав потребителей, 

У С Т А Н О В И Л :

Истец ФИО3 обратился в суд с иском, в последующем уточненным, о защите прав потребителей, ссылаясь на то, что между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО3 заключен договор № от 26.04.2023. В соответствии с пунктом 21 Договора, последний считается заключённым со дня оплаты заявителем счёта на оплату технологического присоединения по Договору. Пунктом 10 Договора установлено, что размер платы за технологическое присоединение составляет 47880,00 руб. Обязанность по оплате исполнена истцом, что подтверждает копия чека на сумму 47880 рублей от 26.04.2023. В соответствии с пунктом 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения Договора, то есть до 26.10.2023. Условиями договора предусмотрена ответственность сторон за нарушение сроков исполнения обязательств в разделе V договора. Согласно пункту 17 договора «Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определённой в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.» Расчет неустойки производится по следующей формуле: стоимость технологического присоединения умножается на 0,25 процента и умножается на количество дней просрочки (в данном случае не более 365 дней). Истец неоднократно обращался к ответчику с претензиями, заявлениями обращениями. Истец полагает, что своим бездействием ответчик нарушил его права как потребителя. После обращения в суд с иском о понуждении к совершению действий, ответчик осуществил технологическое присоединение 06.06.2024 года. В связи с чем, неустойка будет составлять 26813 рублей (47880*0,25%*224 дня (период с 27.10.2023 по 06.06.2024)). Просит взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО3 неустойку за просрочку исполнения обязательств по день вынесения решения суда в размере 16758 руб., штраф в рамках закона о защите прав потребителей.

Истец ФИО3 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, обеспечил явку своего представителя. 

Представитель истца ФИО1, действующая на основании доверенности от 04.03.2024, в судебном заседании уточненные исковые требования поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить. 

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» ФИО2 в судебном заседании исковые требования не признал, просил применить правила ст.333 ГК РФ в случае удовлетворения уточненных исковых требований. Кроме того, указал, что неустойка должна быть рассчитана только до 29.05.2024

Заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно положениям п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным (пункт 3 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ).

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Согласно ст.ст. 307, 309, 310 Гражданского кодекса РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела ФИО3 является собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, что подтверждается выпиской из ЕГРН. 

26.04.2023 между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО3 заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям объекта. По настоящему договору ПАО «Россети Сибирь» принимает на себя обязательства по оказанию услуги по технологическому присоединению малоэтажной жилой застройки, принадлежащей ФИО3 и расположенной по адресу: 

<

адрес>

В соответствии с п. 5 договора № срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

По условиям договора № от 26.04.2023 ПАО «Россети Сибирь» обязалось надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе, по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в предыдущем абзаце, с соблюдением срока осуществления технологического присоединения, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности.

Согласно техническим условиям № к договору, максимальная мощность присоединяемых устройств заявителя составляет 15 кВт.

Согласно п. 10.2.3 технических условий, ПАО «Россети Сибирь» обязано выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442).

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.11.2022 №82-э с изменениями, внесенными Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 02.12.2022 №113-э и составляет 47880 рублей (п.10 Договора). 

В соответствии с пунктом 21 договора, договор считается заключённым со дня оплаты ФИО3 счета. 

Судом также установлено и не оспаривается ответчиком, что внесение платы за технологическое присоединение было оплачено истцом в полном объеме, в размере 47880 руб., что подтверждается чеком по операции от 26.04.2023. 

На дату обращения с настоящим иском в суд – 14.03.2024, обязательства по договору №20.2400.2690.23 от 26.04.2023 ПАО «Россети Сибирь» исполнены не были.

Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии № 524-5-260 подписан 28.05.2024. Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям №12000712012 от 29.05.2024.

Таким образом, требования истца о возложении обязанности на ПАО «Россети Сибирь» исполнить обязательства по технологическому присоединению в соответствии с условиями договора № от 26.04.2023 о технологическом присоединении, исполнены после принятия иска к производству судом.

Таким образом, в суде нашел подтверждение факт нарушения прав потребителя ФИО3, требования которого были удовлетворены ответчиком после подачи искового заявления в суд.

Рассматривая требования истца о взыскании неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению за период с 27.10.2023 по дату фактического исполнения обязательств - 06.06.2024, суд приходит к следующим выводам.

В силу п. 1 ч. 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п. 17 договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и выданных технических условий для присоединения к электрическим сетям от 26.04.2023, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящем абзаце порядке за год просрочки.

Пунктом 10 договора № от 26.04.2023 определен размер платы за техническое присоединение и составляет 47880 руб. 00 коп.

Принимая во внимание то, что ПАО «Россети Сибирь» по договору № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и техническим условиям для присоединения к электрическим сетям от 26.04.2023 обязалось осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, в течение 6 месяцев с момента заключения договора - 26.10.2023, однако принятые на себя обязательства в установленный срок не исполнило, суд находит обоснованными требования истца о взыскании с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО3 неустойки.

Истцом заявлена ко взысканию договорная неустойка за период с 27.10.2023 по 06.06.2024 (дату фактического исполнения обязательства) на сумму 26813 рублей 00 копеек, из расчета: 47880 руб. (плата по договору) *224 дня *0,25%, вместе с тем, суд не может признать верным расчет неустойки, предложенный истцом, кроме того, 

датой фактического исполнения обязательства следует признать 29.05.2024, с даты уведомления.

Таким образом, с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО3 подлежит взысканию неустойка за период с 27.10.2023 по 29.05.2024 (дату фактического исполнения обязательства) в размер 25855 руб. 20 коп. из расчета: 47880 руб. 00 коп. (размер платы за технологическое присоединение) х 216 дней х 0,25%.

Согласно п.6 ст.13 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Пункт 46 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28.06.2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» устанавливает, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Следовательно, на основании п.6 ст.13 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1, суд определяет размер подлежащего взысканию с ответчика в пользу истца штрафа в размере 12927,60 рублей: 25855,20 руб. / 2. Оснований для снижения размера штрафа не имеется.

Согласно п.4 ч.2 ст.333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции освобождаются истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей.

В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ, п.8 ч.1 ст.333.20 НК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. 

Имущественные исковые требования удовлетворены в размере 25855,20 рублей, следовательно, применяя положения п.п.1,3 ч.1 ст.333.19 НК РФ, п.1 ч.1 ст.333.20 НК РФ с ответчика подлежит взысканию госпошлина в доход местного бюджета в сумме 975 рублей 66 копеек.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 233-237 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ФИО3 к ПАО "Россети Сибирь" о защите прав потребителей удовлетворить частично.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО3 (

<

данные изъяты> неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению за период с 27 октября 2023 года по 29 мая 2024 в размере 25855 рублей 20 копеек, штраф в размере 12927 рублей 60 копеек, а всего 38782 (Тридцать восемь тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 28 копеек.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» госпошлину в доход местного бюджета в размере 975 (Девятьсот семьдесят пять) рублей 66 копеек.

Решение может быть обжаловано сторонами в Красноярский краевой суд в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи жалобы через Сосновоборский городской суд.

Председательствующий: -подпись- О.В. Белькевич

Мотивированное решение изготовлено 22 июля 2024 года.

Копия верна.

Решение не вступило в законную силу.

Судья: О.В. Белькевич