дело №

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

«08» ноября 2018 года г.Тамбов 

Тамбовский районный суд Тамбовской области в составе:

председательствующего судьи: Дробышевой Е.В.,

при секретаре: Мачехиной Л.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Метр-Строй» о защите прав потребителей,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «Метр-Строй» о взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения обязательства по договору о долевом участии в строительстве в размере 194 900 руб. и штрафа в размере 50% от взыскиваемой суммы.

В судебном заседании истец ФИО1 свои исковые требования поддержал и суду пояснил, что между ним и ООО «Метр-Строй» 20.10.2016 года был заключен договор № участия в долевом строительстве 10-этажного многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже по адресу: 

<

адрес> условиям договора ответчик должен передать истцу однокомнатную 

<

адрес>, расположенную во втором подъезде на 10 этаже в осях 9-12 А-В, справа от лифта, общей проектной площадью 40,3 кв.м, в том числе площадью 

<

адрес> кв.м, площадь лоджий (и/или балконов) 1,1 кв.м и доли в праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Тамбовской области. По договору долевого участия истцом обязательства были выполнены в полном объеме, стоимость квартиры в размере 1 067 950 руб. была оплачена. Однако ответчик обязательства по передаче истцу объекта долевого строительства нарушил, квартира до сих пор ему не передана. В связи с этим ФИО1 просит взыскать неустойку с ответчика в соответствии с положениями ст.6 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 194 900 руб., исходя из размера ключевой ставки ЦБ РФ на день предъявления иска – 7,5% и штраф в размере 50% от взыскиваемой суммы, предусмотренный Законом о защите прав потребителей.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, судом были приняты меры к его извещению о дате, времени и месте рассмотрения заявления, однако судебное извещение отделением почтовой связи по месту его регистрации возвращено без вручения в связи с истечением срока хранения, поскольку адресат не являлся для получения судебной корреспонденции. 

Поскольку ответчик не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил о рассмотрении дела в его отсутствие, дело рассмотрено в порядке заочного производства.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Статья 309 ГК РФ определяет, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст.311 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Как следует из материалов дела, между ФИО1 и ООО «Метр-Строй» 20.10.2016 года был заключен договор № участия в долевом строительстве 10-этажного многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже по адресу: 

<

адрес> условиям договора ответчик должен передать истцу однокомнатную 

<

адрес>, расположенную во втором подъезде на 10 этаже в осях 9-12 А-В, справа от лифта, общей проектной площадью 40,3 кв.м, в том числе площадью квартиры 39,2 кв.м, площадь лоджий (и/или балконов) 1,1 кв.м и доли в праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме не позднее 30 сентября 2017 года. По договору долевого участия истцом обязательства были выполнены, в полном объеме, стоимость квартиры в размере 1 067 950 руб. оплачена полностью и своевременно. Однако до настоящего времени жилое помещение не передано истцу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004г. N214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Названный Федеральный закон к участникам долевого строительства относит граждан, чьи денежные средства привлекаются для долевого строительства многоквартирных домов, которые при заключении соответствующего договора имеют намерение заказать или приобрести либо заказывают, приобретают товар (квартиру) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В силу пункта 9 статьи 4 указанного Федерального закона к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в части, не урегулированной этим Федеральным законом, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей.

В п.1 ст.6 Федерального закона от 30 декабря 2004г. N214-ФЗ указано, что застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере (п.2).

При этом п.3 данной статьи предусмотрено, что в случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, квартира по договору долевого участия истцу не передана. Срок передачи квартиры истцу по договору 30.09.2017. Изменения в договор долевого участия об изменении срока сдачи дома сторонами не вносились, следовательно, ответчиком допущено нарушение предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства.

Согласно п.3 ст.107 ГПК РФ течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий день после даты или наступления события, которыми определено его начало.

Таким образом, в соответствии с вышеприведенными нормами закона с ООО «Метр-Строй» подлежит взысканию в пользу истца неустойка за нарушение сроков исполнения обязательства исходя из размера ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день предъявления иска – 7,5 % за период не с 30.09.2017 как указано в исковом заявлении, а с 01.10.2017 до 30.09.2018. Исходя из расчета ((1 067 950 – цена договора х (7,5%/300 – 1/300 ставки рефинансирования) х 365 количество дней просрочки) х2) сумма неустойки составит 194 900 руб.

Согласно разъяснениям в п.46 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012г. №17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Отсюда, в пользу ФИО1 подлежит взысканию с ООО «Метр-Строй» штраф в размере 50% от взыскиваемой суммы неустойки - в размере 97450 руб. 

В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина соразмерно взысканной сумме в размере 6 123,5 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ

решил:

Исковые требования ФИО1 к ООО «Метр-Строй» о защите прав потребителей удовлетворить. 

Взыскать с ООО «Метр-Строй» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение сроков исполнения обязательства в сумме 194 900 рублей, штраф в размере 97 450 рублей.

Взыскать с ООО «Метр-Строй» госпошлину в доход местного бюджета в размере 6 123,5 рублей.

Разъяснить, что ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд через Тамбовский районный суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Решение вынесено в окончательной форме 13 ноября 2018 года

Судья: Е.В.Дробышева

Копия верна. Судья: