Дело № 2-1722/2025 (УИД 50RS0050-01-2025-002476-70)

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

г. Шатура Московской области 03 декабря 2025 г.

Шатурский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Фадиной А.А.,

при секретаре Шаметько Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к акционерному обществу «Мособлгаз» филиалу «Восток» о взыскании неустойки, убытков, штрафа, судебных расходов, компенсации морального вреда,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к АО «Мособлгаз» филиалу «Восток», в обоснование заявленных требований ссылаясь на следующее.

15.11.2022 между сторонами был заключен договор о подключении к системе газоснабжения дома по адресу: 

<

адрес>, по условиям которого ответчик принял на себя обязательства осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения установленной максимальной нагрузки (часового расхода газа). Дополнительным соглашением срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения установлен до 30.12.2024. В связи с тем, что в установленный срок обязательства ответчиком исполнены не были, просит с учетом принятых к рассмотрению уточнений обязать АО «Мособлгаз» филиал «Восток» исполнить договор о подключении к системе газоснабжения, взыскать в его пользу неустойку за период с 01.01.2025 по 21.11.2025 в размере 280930 руб., убытки за период с 01.01.2025 по 21.11.2025 в размере 88718,05 руб., штраф в размере 198499,87 руб., компенсацию морального вреда в размере 30000 руб., а также судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 50000 руб.

Определением суда от 03.12.2025 прекращено производство по делу в части требований о возложении на АО «Мособлгаз» «Восток» обязанности исполнить договор о подключении к системе газоснабжения в связи с отказом истца от иска.

Истец ФИО1, его представитель ФИО2, допущенный к участию в деле на основании п. 6 ст. 53 ГПК РФ, в судебном заседании поддержали изложенное в исковом заявлении, просили заявленные требования удовлетворить с учетом их уточнения.

Представитель ответчика АО «Мособлгаз» по доверенности ФИО3 просила в иске отказать по основаниям, изложенным в письменных возражениях на исковое заявление.

Выслушав объяснения сторон, исследовав представленные доказательства, оценив их в совокупности по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд находит требования истца не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В статье 2 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» дано понятие газоснабжения, которое представляет собой одну из форм энергоснабжения, представляющую собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа.

Согласно статье 4 Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» одним из принципов государственной политики в области газоснабжения в Российской Федерации является государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Российской Федерации с учетом промышленной и экологической безопасности.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» единый оператор газификации, региональный оператор газификации на федеральной территории и территории соответствующего субъекта Российской Федерации обеспечивают технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям. Порядок подачи разными категориями заявителей заявок на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, рассмотрения этих заявок и принятия по ним решений утверждается Правительством Российской Федерации.

Согласно части 10 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения, определен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 (далее также Правила подключения от 13 сентября 2021 г. № 1547).

В соответствии с пунктом 5 Правил подключения от 13 сентября 2021 г. № 1547 подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Согласно пункту 2 Правил подключения от 13 сентября 2021 г. № 1547 «догазификация» - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 15.11.2022 между АО «Мособлгаз» и ФИО1 заключен договор о поставке природного газа и подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации № объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, к сети газораспределения (л.д. 12-16).

В силу п. 2 Договора подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по форме согласно приложению (далее - технические условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 1 год со дня заключения настоящего договор (п. 3 Договора).

Разделом 3 Договора регламентирована плата за подключение (технологическое присоединение), согласно которому плата за подключение (технологическое присоединение) состоит из платы за установку газоиспользующего оборудования, и (или) проектирование сети газопотребления, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (или) поставку газоиспользующего оборудования, и (или) поставку прибора учета газа. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (далее - плата) определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок, установленных Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 15.12.2021 № 260-Р, и составляет 0 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 процентов 0 рублей 00 копеек (п.п. 9, 10).

Порядок расчетов установлен п. 11 Договора.

Дополнительным соглашением от 26.07.2024 размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства определен в сумме 86440,11 руб., в том числе НДС 20 % - 14406 руб. 69 коп., в том числе:

проектирование сети газопотребления - 23028 руб. 20 коп., в том числе НДС 20 % - 3838 руб. 03 коп.;

строительство сети газопотребления - 63411 руб. 91 коп., в том числе НДС 20 % - 10568 руб. 65 коп. (л.д. 17).

Факт исполнения истцом ФИО1 своих обязательств по договору в части оплаты суммы в размере 86440,11 руб. подтвержден материалами дела (л.д. 21-23, 25, 27), ответчиком не оспаривался.

В силу пункта 61 Правил подключения мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем.

Согласно пункту 12 Правил заявитель вправе обратиться к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка. При этом Правила подключения не ограничивают заявителя в выборе подрядчика для выполнения работ внутри границ его земельного участка, заявитель вправе обратиться в любую специализированную организацию по данному вопросу.

Таким образом, в рамках заключенного договора мероприятия по подключению до границ принадлежащего заявителю земельного участка, в частности, проектирование и строительство сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, а также врезка построенной сети газораспределения к построенной сети газопотребления, осуществляются на безвозмездной основе.

В силу пункта 53 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547, для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 78 Правил № 1547 изменение условий договора о подключении осуществляется при согласии сторон договора о подключении и оформляется дополнительным соглашением.

26.07.2024 между АО «Мособлгаз» и ФИО1 заключено дополнительное соглашение к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации № от 15.11.2022, которым определено считать сроком выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа 30.12.2024 (л.д. 18). Оригинал указанного дополнительного соглашения представлен истцом на обозрение суда, не оспорен ответчиком и не вызывает сомнений в его подлинности.

Представителем АО «Мособлгаз» в материалы дела представлено дополнительное соглашение к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации № от 15.11.2022, которым определено считать сроком выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа 30.12.2025 (л.д. 73).

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

Для устранения разночтений в датах окончания срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения истца и пуску газа судом в АО «Мособлгаз» истребован оригинал дополнительного соглашения к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации № от 15.11.2022.

Согласно служебной записке начальника отдела ФИО4 дополнительного соглашения со сроком исполнения мероприятий до 30.12.2025 по договору № от 15.11.2022, заключенного с ФИО1, в архиве не найдено, установление местонахождения оригинала дополнительного соглашения не представляется возможным (л.д. 172).

Согласно п. 121 Правил № 1547 срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Пунктом 122 Правил № 1547 устанавливаются сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя. Названным пунктом предусмотрено, что в этом случае срок устанавливается в зависимости от удаленности газораспределительной сети до подключаемого объекта капитального строительства и протяженности газопровода до границы земельного участка заявителя, подлежащего строительству. В частности, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров - срок не может превышать один год.

В пункте 123 Правил № 1547 предусмотрено, что в случае, если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем), в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.

В соответствии с п. 124 Правил № 1547 в случае, если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий, указанных в пункте 121 настоящих Правил, исполнитель направляет в орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган публичной власти федеральной территории), уполномоченный утверждать программу газификации, предложения по включению указанных мероприятий в программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций с указанием сроков их осуществления (за исключением указания срока для осуществления мероприятий по строительству и (или) реконструкции газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газотранспортных систем). Одновременно исполнитель направляет заявителю уведомление о направлении указанных предложений в орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган публичной власти федеральной территории), уполномоченный утверждать программу газификации. Для определения подлежащего включению в программу газификации срока осуществления мероприятий по строительству и (или) реконструкции газотранспортных систем (в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газотранспортных систем) исполнитель направляет предложения по включению указанных мероприятий в программу газификации организациям - собственникам систем газоснабжения. Организация - собственник систем газоснабжения в течение 7 рабочих дней с даты получения от исполнителя предложения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, направляет в орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган публичной власти федеральной территории), в полномочия которого входит утверждение программы газификации, предложение по сроку осуществления мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган публичной власти федеральной территории), в полномочия которого входит утверждение программы газификации, обязан включить указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта предложения исполнителя и организации - собственника систем газоснабжения в программу газификации. После включения необходимых для подключения заявителя мероприятий в программу газификации исполнитель в соответствии с настоящими Правилами направляет заявителю подписанный со своей стороны проект договора о подключении. При этом срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяется в соответствии с пунктом 123 настоящих Правил.

Из приведенных положений законодательства следует, что договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации является публичным договором, особенности заключения которого, а также определения его условий, устанавливаются нормами законодательства. При этом, ряд условий договора, в том числе о сроках технологического подключения, подлежат определению именно исходя из требований законодательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется на основании перспективного баланса добычи и потребления газа, а также принятых в установленном порядке федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. Порядок разработки и реализации указанных федеральных программ устанавливается Правительством Российской Федерации. Финансирование федеральных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций может осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

В силу пунктов 3 и 7 Правил разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903, разработку программ газификации осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации (органы публичной власти федеральной территории) совместно с единым оператором газификации (региональным оператором газификации). Программы газификации формируются на 10 лет и утверждаются руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (руководителями исполнительно-распорядительного органа федеральной территории). При необходимости в программы газификации вносятся изменения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Программы газификации содержат, в том числе сводный план-график догазификации по форме согласно приложению № 2, пообъектный план-график догазификации по форме.

При этом, сводный план-график догазификации (приложение № 5 к Правилам разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года № 903) включает в себя, в том числе, общее количество домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения (без указания адреса домовладения), с указанием сроков догазификации. В свою очередь, пообъектный план газификации (приложение № 6 к Правилам разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года № 903) содержит адреса домовладений, для которых реализуются мероприятия по догазификации.

Как установлено судом, срок газификации определен Постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» (далее - Программа).

В связи с согласованием ООО «Газпром газификация» новых редакций сводного и пообъектного планов-графиков догазификации, сформированных исходя из установленного ПАО «Газпром» лимита финансирования мероприятий по социальной газификации на текущий год, в Программу вносились изменения, в том числе, в части сроков выполнения работ, предусмотренных пообъектным планом-графиком догазификации.

Согласно пообъектному плану-графику догазификации (порядковый номер 68209), являющемуся приложением к Программе Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» (в редакции постановления Правительства Московской области от 31 июля 2024 года № 783-ПП), срок выполнения мероприятий по догазификации объекта заявителя ФИО1 запланирован на март 2025 года.

Пунктом 77741 пообъектного плана-графика догазификации, являющегося приложением к разделу 2 Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» в редакции постановления Правительства Московской области от 07 июля 2025 года № 784-ПП) рок выполнения мероприятий в отношении объекта ФИО1 запланирован на декабрь 2025 года.

В данном случае, при заключении 15.11.2022 договора с ФИО1 срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению был определен исходя из отсутствия объекта истца в пообъектном плане-графике программы газификации. Вместе с тем, после заключения договора исполнительным органом власти такой пообъектный план-график программы газификации был утвержден. В соответствии с изменениями перечня мероприятий программы газификации изменилось финансирование выполнения этих мероприятий, вследствие чего у АО «Мособлгаз» отсутствовала возможность исполнения договора о подключении в первоначальный срок.

30.07.2025 в адрес ФИО1 было направлено информационное письмо, из содержания которого следует, что новая редакция Программы № 784-ПП от 07.07.2025 вступила в законную силу и включает в себя мероприятия по догазификации мкр. Керва ул. Озерная, в том числе принадлежащего ему объекта капитального строительства. Выполнение указанных мероприятий запланировано не позднее декабря 2025 г. Строительно-монтажные работы по созданию сети газораспределения, а также ввод газопровода в эксплуатацию планируется выполнить не позднее 30.10.2025 (л.д. 26).

21.11.2025 ответчиком произведено подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю, о чем свидетельствует акт о подключении (технологическом присоединении), подписанный сторонами.

В данной связи суд приходит к выводу о том, что срок выполнения мероприятий по подключению объекта истца к сети газораспределения и пуску газа в рамках догазификации 21.11.2025 соответствовал требованиям законодательства.

Объективные условия для изменения сроков выполнения социальной газификации и утверждения новой редакции Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» возникли после заключения договора о поставке природного газа и подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации № 08/6814-Д26200-22 от 15.11.2022 и дополнительного соглашения к нему от 26.07.2024.

При этом государственным заказчиком и разработчиком программы газификации является Министерство энергетики Московской области, а АО «Мособлгаз» является исполнителем и обязано соблюдать предусмотренные Министерством энергетики Московской области сроки выполнения мероприятий по газификации населенных пунктов, расположенных на территории Московской области.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что АО «Мособлгаз» не нарушило срок догазификации, установленный пообъектным планом-графиком догазификации.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В соответствии со ст. 27 Закона о защите прав потребителей исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Положениями Закона РФ «О защите прав потребителей» (п. 5 ст. 28) установлена неустойка на случай нарушения исполнителем установленных сроков выполнения работы в размере трех процентов цены выполнения работы.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Поскольку права истца не являются нарушенными, то правовые основания для удовлетворения иска к АО «Мособлгаз» о взыскании неустойки отсутствуют.

Истцом заявлены требования о взыскании убытков в связи с несвоевременным исполнением договора № от 15.11.2022 за период с 01.01.2025 по 21.11.2025, выразившиеся в оплате электроэнергии, затраченной на отопление жилого дома, подогрев воды и освещение, а именно за период с января по ноябрь 2025 г.: январь 31392,26 руб.; февраль 36417,04 руб.; март 17848,04 руб.; апрель 15479,20 руб.; май 5843,10 руб.; июнь 6332,96 руб.; июль 20662,80 руб.; август 5937,50 руб.; сентябрь 1490,66 руб.; октябрь 14158,38 руб.; ноябрь 34414,22 руб.

Итого расходы за отопление, подогрев воды и освещение за период с января по ноябрь 2025 года составили 189076,16 руб. / 335 дней, т.е. среднесуточный расход составлял 564,40 руб. в день.

Расходы с 21.11.2025 по 30.11.2025 за отопление, подогрев воды составили в сумме 995,73 руб., с 01.11.2025 по 30.11.2025 за освещение составили 34414,22 руб. + 995,73 руб. = 35409,95 руб.

В летний период расходы истца на подогрев воды и освещение дома максимально составляли 6000,00 руб. (май, июнь, август 2025 года).

Согласно представленному в материалы дела расчету расходы за отопление, подогрев воды и освещение за период с 01.11.2025 по 30.11.2025 должны были составить в сумме 6000,00 + 2987,19 = 8987,19 руб., т.е. 299,57 руб. в сутки., т.е. среднесуточные расчетные убытки составляли 564,40 руб. - 299,57 руб. = 264,83 руб. в сутки умножить на 325 дней (срок просрочки) = 86069,75 рублей.

Возмещение убытков является одним из способов защиты гражданских прав, предусмотренных статьей 12 ГК РФ и мерой ответственности за нарушение обязательств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу пункта 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Исходя из указанных норм, в предмет судебного исследования входит совокупность следующих юридически значимых фактов: факт причинения вреда; противоправность поведения ответчика; причинная связь между таким поведением и наступившим вредом; вина причинителя вреда; размер понесенных убытков. При этом отсутствие хотя бы одного из элементов является основанием для отказа в иске.

Под причинно-следственной связью понимается объективно существующая связь между явлениями, при которой одно явление (причина) предшествует во времени другому (следствию) и с необходимостью порождает его. Причинная связь между фактом причинения вреда (убытков) и действием (бездействием) причинителя вреда должна быть прямой (непосредственной).

В порядке п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса РФ).

Бремя доказывания наличия и размера вреда, причинно-следственной связи между возникшим вредом (убытками) и действиями причинителем вреда лежит на истце, который в силу ст. 56 ГПК РФ должен доказать наличие вышеперечисленных условий для возмещения убытков.

Размер убытков должен быть с достоверностью подтвержден и определяться на основании предоставленных в дело доказательств.

Истцом в обоснование заявленного требования о взыскании убытков суду представлены сведения о размере денежных переводов в счет оплаты услуги электроснабжения, которые не могут быть приняты в качестве допустимых доказательств, так как представленные документы не отражают прямую связь расходов по отоплению, как и то обстоятельство, что объем потребленной электроэнергии в полной мере потреблен исключительно для отопления дома и подогрева воды. Плата начислена за электроэнергию, потребленную всеми бытовыми устройствами, в том числе устройствами, которые не использовались для отопления жилого дома истца. Таким образом, доводы истца о несении им убытков в виде оплаты за электроснабжение в виду несвоевременного подключения к системе газоснабжения, своего подтверждения не нашли.

Кроме того, несение расходов по оплате потребленной электроэнергии не могло носить непредвиденный характер, данные расходы относимы с расходами по оплате газоснабжения.

Ввиду отсутствия доказательств, подтверждающих противоправность поведения ответчика, его вину и причинно-следственную связь между поведением ответчика и наступившими у истца последствиями, заявленные требования в указанной части не подлежат удовлетворению.

Поскольку каких-либо нарушений в действиях ответчика по исполнению взятых на себя обязательств по договору судом не установлено, производные требования о компенсации морального вреда, взыскании штрафа удовлетворению не подлежат.

В связи с отказом в иске, в силу ст. 98 ГПК РФ расходы истца на оплату услуг представителя не подлежат возмещению за счет ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования ФИО1 к акционерному обществу «Мособлгаз» филиалу «Восток» о взыскании неустойки, убытков, штрафа, судебных расходов, компенсации морального вреда оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Шатурский городской суд в течение месяца со дня его вынесения в окончательном виде.

Судья А.А. Фадина

Мотивированное решение изготовлено 04.12.2025

Судья А.А. Фадина