Дело № 2-1672/2020

УИД: 42RS0009-01-2020-001990-38

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Центральный районный суд г. Кемерово Кемеровской области

в составе председательствующего судьи Гапанцовой А.А.

при секретаре Каменской А.В.,

помощник судьи Тараненко Ю.Д.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кемерово

20 апреля 2020 года

гражданское дело по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «СПИК» о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратилась в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «СПИК» о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов.

Требования мотивированы тем, что «**.**.**** между ООО «СПИК» (застройщик) в лице генерального директора ЛИЦО_1, с одной стороны, и ФИО1 (участник долевого строительства), с другой стороны, был заключен договор № ### участия в долевом строительстве.

В соответствии с условиями указанного договора, застройщик обязался построить многоквартирный жилой дом № ### по строительному адресу: ...

Согласно пункту 1.7 договора, «застройщик обязуется обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома не позднее **.**.**** года».

В соответствии с пунктами 2.1.1 и 2.1.2 договора, «начало передачи объекта осуществляется не позднее 4 месяцев, окончание передачи объекта осуществляется в срок не позднее 6 месяцев с даты разрешения на ввод в эксплуатацию». Таким образом, срок передачи объекта по договору не позднее **.**.****.

Застройщик был обязан не позднее **.**.**** передать истцу объект долевого строительства - ..., общей площадью ... кв. м., площадь лоджии ... кв. м., этаж 2, в жилом доме по строительному адресу: ....

Согласно пункту 3.1. договора, «цена договора составляет сумму в размере ... рублей.

Согласно пункту 3.4.1. договора, «денежная сумма ... рублей оплачивается участником долевого строительства после регистрации настоящего договора в срок не позднее **.**.**** года».

Согласно пункту 3.4.2. договора, «денежная сумма ... рублей оплачивается после регистрации настоящего договора до **.**.**** за счет кредитных средств, предоставленных участнику долевого строительства Банка ВТБ, находящегося по адресу: ..., ИНН ..., ОГРН ..., кор. Счет ### в ГУ Банка России по ЦФО, БИК ###, в соответствии с кредитным договором ### от **.**.****, заключенным в городе Кемерово».

**.**.**** между ООО «СПИК» и ФИО1 было заключено соглашение о прекращении обязательств зачетом.

Так, согласно пункту 2.1. соглашения, «по настоящему соглашению прекращается обязательство стороны -1 (ООО «СПИК»), перед стороной -2 (ФИО1) по компенсации первоначального взноса в размере ... рублей, в соответствии с заключенным между сторонами 1 и 2 соглашением от **.**.**** года».

В соответствии с пунктом 2.2. соглашения, «по настоящему соглашению частично прекращается обязательство стороны - 2 (ФИО1) перед стороной-1 (ООО «СПИК») по уплате цены договора участия в долевом строительстве N ### от **.**.**** в размере ... рублей, в соответствии с заключенным между стороной -1 и стороной-2 договором участия в долевом строительстве N ### от **.**.**** года».

Со стороны истца договорные обязательства были исполнены своевременно и в полном объеме. Данное обстоятельство подтверждается платежным поручением ### от **.**.**** на сумму ... рублей.

При этом, ответчиком были нарушены условия договора долевого участия в строительстве в части срока передачи объекта долевого строительства. 

Истец направил ответчику претензию с требованием уплатить неустойку, однако претензия была оставлена без ответа, (входящий ###-П от **.**.****).

Согласно пункта 1 акта приема-передачи объекта недвижимости в собственность от **.**.****, «застройщик, исполняя обязательства по договору № ### участия в долевом строительстве от **.**.****, передал участнику долевого строительства, а участник долевого строительства принял в собственность квартиру ###, общей площадью ... кв.м., площадь лоджии ... кв.м, расположенную на ... этаже, многоквартирного жилого дома по адресу: ....

С учётом изложенного, истец просит суд взыскать с ООО «СПИК» в свою пользу неустойку в размере 128 826,75 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 20 000 рублей; штраф в размере 50% от суммы, присуждённой судом в пользу истца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований истца; судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме 6 200 рублей.

В судебное заседание стороны не явились, о дне, месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, просили рассмотреть дело в их отсутствие. Представителем ответчика ФИО2, действующей на основании доверенности от **.**.****, помимо ходатайства о рассмотрении дела в её отсутствие представлены письменные возражения на заявленные требования, в которых представитель просит в случае удовлетворения заявленных требований применить положения ст. 333 ГК РФ, снизив размер неустойки, штрафа и компенсации морального вреда до разумных пределов. 

Руководствуясь положениями ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Изучив письменные материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению частично.

Согласно требованиям статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от **.**.**** № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.

Согласно части 2 статьи 6 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная данной частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Как следует из материалов дела, **.**.**** между ООО «СПИК» и ФИО1 был заключен договор № ### участия в долевом строительстве, по условиям которого «застройщик» обязуется в предусмотренный настоящим договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) жилой дом ###, расположенный на земельном участке с кадастровым номером ###, находящийся по строительному адресу: ... и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома передать обозначенный в настоящем договоре объект долевого строительства «участнику долевого строительства», а «участник долевого строительства» обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома.

Согласно п. 1.3 договора № ###, «участник долевого строительства» обязуется инвестировать строительство жилого дома в части объекта долевого строительства, который составляет стоимость жилого помещения (квартиры): строительный номер ###, в соответствии со схемой здания ### (приложение ###), находится: Блок-секция ###, Этаж ###, общей проектной площадью ... кв.м., площадь лоджии с учётом коэффициента ... кв.м. в строящемся жилом доме по строительному адресу: ... в размере и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

Согласно п. 3.1 договора № ###, цена договора составляет сумму в размере ... рублей.

**.**.**** между ООО «СПИК» и ФИО1 было заключено соглашение о прекращении обязательств зачетом.

Согласно пункту 2.1. соглашения от **.**.****, «по настоящему соглашению прекращается обязательство стороны -1 (ООО «СПИК»), перед стороной -2 (ФИО1) по компенсации первоначального взноса в размере ... рублей, в соответствии с заключенным между сторонами 1 и 2 соглашением от **.**.**** года».

В соответствии с пунктом 2.2. соглашения от **.**.****, «по настоящему соглашению частично прекращается обязательство стороны - 2 (ФИО1) перед стороной-1 (ООО «СПИК») по уплате цены договора участия в долевом строительстве N ### от **.**.**** в размере ... рублей, в соответствии с заключенным между стороной -1 и стороной-2 договором участия в долевом строительстве N ### от **.**.**** года».

Обязательства по оплате цены договора в размере ... рублей исполнены ФИО1 полностью, что подтверждается платежным поручением ### от **.**.**** на сумму ... рублей, и не оспаривается ответчиком.

В соответствии с п. 1.7 договора № ### от **.**.****, «застройщик» обязуется обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома не позднее **.**.****. Согласно п. 2.1.1 п. 2.1.2 договора № ### от **.**.****, начало передачи «застройщиком» «квартиры» в срок не позднее 4 месяцев с даты разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию, окончание передачи «застройщиком» «квартиры» в срок не позднее 6 месяцев с даты разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию. Таким образом, срок передачи объекта по договору - не позднее **.**.****.

Согласно акту приема-передачи объекта недвижимости в собственность, ООО «Спик» передал истцу **.**.**** квартиру № 6, расположенную на 2 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: .... 

Таким образом, поскольку со стороны застройщика – ООО «Спик» допущено нарушение обязательства по передаче объекта долевого строительства, истец имеет право требовать взыскания с ответчика неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого участия за период с **.**.****.

Законом установлено, что в случае нарушения застройщиком сроков передачи объекта долевого строительства гражданин-участник долевого строительства вправе отказаться от исполнения договора, либо требовать взыскания неустойки. При этом выбор способа защиты нарушенного права принадлежит истцу. 

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании неустойки за нарушение срока передачи квартиры за период с **.**.**** по **.**.**** в размере ... рублей.

На основании п. 22 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, утв. Президиумом ВС РФ от 04.12.2013г., размер неустойки, уплачиваемой застройщиком участнику долевого строительства в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства, определяется исходя из цены договора - размера денежных средств, подлежащих уплате участником долевого строительства для строительства (создания) объекта долевого строительства.

Следовательно, размер неустойки подлежит расчёту исходя из стоимости объекта по договору участия в долевом строительстве.

Согласно п. 3.1 договора № ###, цена договора составляет сумму в размере ... рублей.

**.**.**** между ООО «СПИК» и ФИО1 было заключено соглашение о прекращении обязательств зачетом.

В соответствии с пунктом 2.2. соглашения от **.**.****, «по настоящему соглашению частично прекращается обязательство стороны - 2 (ФИО1) перед стороной-1 (ООО «СПИК») по уплате цены договора участия в долевом строительстве N ### от **.**.**** в размере ... рублей, в соответствии с заключенным между стороной -1 и стороной-2 договором участия в долевом строительстве N ### от **.**.**** года».

Соответственно, в данном случае стоимость объекта по договору участия в долевом строительстве составляет ... рублей.

В силу прямого указания закона для расчета неустойки применяется размер ставки рефинансирования, действующей на день исполнения обязательства. В связи с чем, расчет, представленный истцом, является неверным.

Срок исполнения обязательства определен не позднее **.**.****, согласно акту приема-передачи объекта недвижимости в собственность, ООО «Спик» передал истцу квартиру **.**.****, следовательно, для расчета неустойки применяется ставка на день исполнения обязательства – **.**.****, в размере 6,25% согласно информации Банка России от **.**.****. 

Следовательно, за период с **.**.**** по **.**.**** сумма неустойки составляет ... руб., из расчета: ..., где

... руб. - цена договора № ### участия в долевом строительстве от **.**.**** с учётом соглашения от **.**.****,

181 - количество дней просрочки за период с **.**.**** по **.**.****,

6,25 % - ключевая ставка, действующая на **.**.****.

Между тем, в соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Таким образом, положения п.1 ст. 333 ГК РФ содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ ###, Пленума ВАС РФ ### от **.**.**** «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», при решении вопроса об уменьшении неустойки (статья 333) необходимо иметь в виду, что размер неустойки может быть уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. При оценке таких последствий судом могут приниматься во внимание в том числе обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения обязательства (цена товаров, работ, услуг; сумма договора и т.п.).

Таким образом, степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела.

Суд считает, что истцом обоснованно заявлено требование о взыскании неустойки, однако суд считает, что размер неустойки в сумме 107 355,63 руб. явно несоразмерен периоду и степени нарушенных обязательств. С учетом принципов соразмерности и разумности, суд считает необходимым удовлетворить заявленное ходатайство представителя ответчика ООО «Спик» - ФИО2 и применить правила ст. 333 ГК РФ, снизив размер неустойки за заявленный период до 60 000 рублей. Следовательно, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 60 000 рублей.

В соответствии с п. 9 ст. 4 Федерального закона от **.**.**** № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

При решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Истцом заявлено о взыскании компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей.

Принимая во внимание длительность неисполнения обязательства по передаче объекта недвижимости истцу, суд считает необходимым взыскать компенсацию морального вреда в пользу истца в размере 2 000 руб.

Согласно ч. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В соответствии с разъяснениями Пленума ВС РФ от **.**.**** ### «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 Закона).

Настоящим решением суда с ответчика в пользу истца взыскана неустойка в размере 60 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 2 000 рублей, соответственно, сумма штрафа, подлежащего взысканию с ответчика в пользу истца, составляет 31 000 руб., из расчета: ((60 000 руб. + 2 000 руб.) х 50% = 31 000 руб.)).

Исходя из анализа всех обстоятельств дела (отсутствие тяжелых последствий для истца в результате нарушения его прав), с учетом положений ст. 333 ГК РФ и позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в пункте 2.2 Определения от **.**.**** ###-О, принимая во внимание отсутствие у истца убытков, вызванных нарушением обязательства, в силу требований части 1 статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации о состязательности и равноправии сторон в процессе, ходатайства представителя ответчика о снижении размера штрафа до разумных пределов, суд считает возможным снизить размер штрафа на основании ст. 333 ГК РФ до 30 000 рублей и взыскать указанную сумму с ответчика в пользу истца.

Также истцом заявлено требование о взыскании с ответчика судебных расходов по оплате услуг представителя и за составление нотариальной доверенности в общей сумме 6 200 рублей.

Согласно ч. 1 ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

В соответствии с положениями п. 11 Постановления Пленума Верховного суда РФ от **.**.**** ### «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ). Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.

Согласно п. 12 вышеназванного Постановления Пленума ВС РФ, расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (часть 1 статьи 100 ГПК РФ, статья 112 КАС РФ, часть 2 статьи 110 АПК РФ).

При этом, согласно п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от **.**.****, разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

В обоснование заявленных требований о взыскании судебных расходов суду представлены копия договора ### о юридическом обслуживании от **.**.****, заключенного между ООО «Юридическая фирма «ЛЕКС-ИНФОРМ» в лице директора ЛИЦО_2 и ФИО1, копия квитанции к приходному ... 1 700 рублей, копия доверенности.

Согласно условиям договора ### о юридическом обслуживании от **.**.****, исполнитель принимает на себя обязанности оказать следующие юридические услуги: правовая защита интересов заказчика в отношениях с ООО «Спик» по вопросу взыскания с Общества неустойки, компенсации морального вреда, штрафа за нарушение сроков передачи квартиры по договору долевого участия № ### от **.**.****. 

В соответствии с п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от **.**.**** ### «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

Статьёй 67 ГПК РФ предусмотрено, что суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал документа, и представленные каждой из спорящих сторон копии этого документа не тождественны между собой, и невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с помощью других доказательств.

Учитывая приведенные положения действующего законодательства, а также то обстоятельство, что оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру ### от **.**.**** на сумму ... рублей не был представлен истцом, суд полагает недоказанным факт несения истцом судебных расходов по оплате услуг представителя в размере ... рублей.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от **.**.**** ### «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», расходы на оформление доверенности представителя также могут быть признаны судебными издержками, если такая доверенность выдана для участия представителя в конкретном деле или конкретном судебном заседании по делу.

В представленной суду копии доверенности от **.**.**** не содержится указание на то обстоятельство, что данная доверенность выдана для участия представителя в конкретном деле или конкретном судебном заседании по делу. 

Кроме того, оригинал указанной доверенности, а также оригинал квитанции от **.**.**** на сумму ... рублей, суду также не представлены.

Таким образом, требования истца о взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя и за составление нотариальной доверенности не подлежат удовлетворению в полном объёме.

Принимая во внимание, что истец при подаче иска в соответствии со ст. 333.36 НК РФ и ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» освобожден от уплаты государственной пошлины, с учетом существа постановленного решения, положений ст. 103 ГПК РФ и ст. 333.19 НК РФ с ООО «СПИК» в доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина, исчисленная пропорционально удовлетворенным требованиям имущественного и неимущественного характера в размере 3 647,11 руб., из расчета: (107 355,63 руб. – 100 000 руб.) х 2% + 3 200 руб. + 300 руб. = 3 647,11 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Спик» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение срока передачи квартиры за период с **.**.**** по **.**.**** в размере 60 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей, штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке в размере 30 000 рублей, а всего 92 000 (девяносто две тысячи) рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Спик» в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 3 647 (три тысячи шестьсот сорок семь тысяч) рублей 11 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд подачей апелляционной жалобы через Центральный районный суд г. Кемерово в течение месяца с момента изготовления решения в мотивированной форме.

В мотивированной форме решение изготовлено 24.04.2020 года.

Судья Гапанцова А.А.

11