Дело № 2-959/2021

УИД 91RS0019-01-2021-000558-73

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 марта 2021 г. г.Симферополь

Симферопольский районный суд Республики Крым в составе: председательствующего судьи – Быховец М.А., при секретаре судебного заседания – Коноваловой А.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о возложении обязанности осуществить определенные действия,

УСТАНОВИЛ:

В апреле 2021 ФИО1 обратилась в суд с иском к ГУП РК «Крымэнерго» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств и электроснабжение установки индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый № к электрическим сетям в соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям №440/45/005-2253-18 от 19.10.2018, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 12 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, 0,38 кВ; проектируемая ЛЭП 0,4 кВ от Ррез РУ-0,4 кВ ТП-1302; основной источник питания: ПС 35/10 Перевальное ВЛ -10кВ Л-7. 

Требования мотивированы тем, что между сторонами заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, однако ответчик, в нарушение условий заключенного между сторонами договора, своих обязательств в надлежащие сроки не выполнил.

В судебном заседании представитель истца ФИО2, действующая на основании доверенности, поддержала заявленные требования и дала пояснения по сути спора.

Представитель ответчика ФИО3 в судебном заседании пояснила, что ГУП РК «Крымэнерго» не отказывается выполнить условия договора от 19.10.2018, однако в связи с нехваткой времени, на сегодняшний день выполнить обязанности по условиям договора не представляется возможным, в связи с чем просила предоставить ГУП РК «Крымэнерго» два месяца для выполнения требований по условиям договора от 19.10.2018. 

Заслушав явившихся участников, исследовав материалы гражданского дела, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что между ГУП РК «Крымэнерго» и ФИО1 заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ №, по условиям которого ответчик принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения электроустановки индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №.

Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому подключению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Пунктами 6.2 и 6.3 договора предусмотрено, что фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям осуществляется в течение 15 дней со дня проведения осмотра (обследования) принимающих устройств заявителя. При этом такой осмотр (обследование) проводятся в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий.

ФИО1 уведомила ответчика о выполнении технических условий 08.07.2020.

Судом установлено, что ответчик не выполнил обязательств по вышеуказанному договору ни в части проведения проверки выполнения технических условий и осмотра принимающих устройств заявителя, ни в части технологического присоединения энергопринимающих устройств.

В соответствии со ст.799 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с ч.1 ст.26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Указанный порядок утвержден Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".

В соответствии с п.3 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с п. 16(3) Правил обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Учитывая изложенное, требования истца о возложении на ГУП РК «Крымэнерго» обязанности исполнить обязательства по договору, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств и электроснабжение электроустановки индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, подлежат удовлетворению.

По правилам части первой статьи 103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика судебные расходы, от уплаты которых истец был освобожден, в доход государства. Согласно положениям статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации размер подлежащей взысканию государственной пошлины составляет 300,00 рублей (требования нематериального характера).

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд, -

РЕШИЛ:

Иск ФИО1 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о возложении обязанности осуществить определенные действия- удовлетворить. 

Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» в срок не позднее одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение для электроснабжения индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 90:12:140102:3931, расположенного по адресу: 

<

адрес>, к электрическим сетям, по условиям договора №440/45/005-2253-18 от 19.10.2018 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного между Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго» и ФИО1.

Взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» в доход бюджета муниципального образования «Симферопольский район» судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 300 (триста) рублей.

Решение может быть обжаловано сторонами путем подачи апелляционной жалобы в Верховный суд Республики Крым через Симферопольский районный суд Республики Крым в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья М.А. Быховец

Решение в окончательной форме принято 16.03.2021.

Судья М.А. Быховец