дело № 2-361/2017

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

11 августа 2017 года п. Новоорск 

Новоорский районный суд Оренбургской области в составе:

председательствующего судьи Левченкова А.И., 

при секретаре Шульге Н.С., 

с участием истца ФИО1, представителя истца Башкисер Ю.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Новоорского района в интересах ФИО1 к ООО «СтройКапитал» об обязании исполнить договор, взыскании неустойки, 

у с т а н о в и л:

Прокурор Новоорского района обратился в суд с иском в интересах ФИО1 к ООО «СтройКапитал» об обязании исполнить договор, взыскании неустойки, указывая, что ими проведена проверка, которой установлено следующее. ФИО1 участвовала в программе «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями названной программы ей был выдан жилищный сертификат и предоставлена социальная выплата в размере 

<

данные изъяты> руб. на приобретение (строительство) жилого дома. 

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО «СтройКапитал» в лице ФИО2 был заключен договор подряда на строительство жилья. Согласно условиям договора ответчик обязался произвести работы по строительству индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Срок исполнения договора 2 года. 

В соответствии с п. 3.2 договора, стоимость работ составила 

<

данные изъяты> руб. Заказчик исполнил свои обязательства по договору, перечислив подрядчику сумму в размере 

<

данные изъяты> руб., что подтверждается платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ 

Между тем, ответчиком обязательства по договору подряда в полном объеме не выполнены. 

Согласно акту визуального осмотра от ДД.ММ.ГГГГ выявлены следующие недостатки недостроенного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>: снаружи дом обложен силикатным кирпичом толщиной 120 мм, перемычки под обкладку над оконными проемами выполнены из металлического уголка, между силикатным кирпичом и пеноблоком имеется зазор толщиной 5 мм; внутренние стены не оштукатурены; перегородки выполнены из пеноблока толщиной 200 мм., перегородки не оштукатурены; перемычки над оконными и дверными проемами выполнены из б/у железнодорожных шпал; полы отсутствуют; кровля стропильная, двускатная, по деревянной обрешетке материал покрытия – профилированный лист коричневого цвета, на фронтонах отсутствует ветровая планка; окна, двери, отопление отсутствует; площадка крыльца залита бетоном, ступени выполнены из силикатного кирпича, не оштукатурены. Комиссией установлено, что жилой дом простроен с нарушением проектно-сметной документации. 

Просит обязать ответчика исполнить п. 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ; обязать ответчика в месячный срок с момента вступления решения в законную силу выполнить следующие работы в недостроенном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, произвести штукатурку поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; произвести теплоизоляцию из стекловолокна URSA; установить перемычки над оконными и дверными проемами согласно разделу 6 сметы; установить окна и двери; установить полы (устройство подстилающих слоев щебеночных, устройство подстилающих слоев бетонных); установить отопление; установить водоснабжение; установить канализацию; установить электроснабжение; взыскать с ООО «СтройКапитал» неустойку в размере 

<

данные изъяты> руб. 

Определением Новоорского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ приняты уточненные исковые требования, согласно которым истец просит обязать ООО «СтройКапитал» в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу выполнить следующие работы согласно проектно-сметной документации:

- раздел 3 п.12 установку в жилых и общественных зданиях оконных блоков и ПВХ профилей поворотных (откидных, отворотно-откидных) с площадью проема более 2 м 2 двухстворчатых;

- раздел 4 п. 19, п. 20, п. 21, п. 22, п. 23 укладку перемычек массой до 0,3 т; перемычка брусковая 2ПБ-25-3-п/бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 2,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1); перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п/бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1); перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п/бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1); перемычка брусковая 2ПБ-17-3-п/бетон В15 (М200), объем 0,028 м3, расход арматуры 0,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1);

- раздел 5 п.25 маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-11-9000-1200-100;

- раздел 6 п.27, п.28, п.29, п. 30 установку в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м 2 двухстворчатых; установку подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м; установку металлических дверных блоков в готовые проемы; дверь противопожарную металлическую однопольную ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм;

- раздел 7 п. 33, п. 34 устройство пароизоляции прокладочной в один слой; утепление покрытий матами теплоизоляционными;

- раздел 8 п.38 штукатурку поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен;

- раздел 9 п. 46, п. 47 устройство подстилающих слоев щебеночных; устройство подстилающих слоев бетонных;

- раздел 10 п.53-71 установку водонагревателей проточных, стоимость котла, прокладку трубопровода отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм, установку вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, установку фильтров диаметром 25 мм, установка кранов воздушных, краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ и ВВ с размером резьбы ?, установку полотенцесушителей из латунных хромированных труб, установку радиаторов стальных, радиаторы биметаллические, марка Rifar-A500 количество секций 10 мощность 1650 Вт, количество секций 8 мощность 1320 Вт, количество секций 6 мощность 990 Вт, количество секций 4 мощность 660 Вт, угольник полипропиленовый комбинированный с внутренней резьбой диаметром 20х1/2, диаметром 25х1/2, угольник 90 град.полипропиленовый диаметром 25 мм, тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, тройник полипропиленовый комбинированный с наружной резьбой диаметром 20х1/2;

-раздел 13 п.91-105 выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по перекрытиям, заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм, автомат одно-, двух- трехполюсный, щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями масса щитка до 6 кг, счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, устройства защитного отключения, выключатели автоматические, щитки квартирные. Также просит взыскать с ответчика неустойку в сумме 378 840,71 руб., компенсацию морального вреда в сумме 50 000 руб. 

Истец ФИО1 и ее представитель старший помощник прокурора Новоорского района ФИО3, в судебном заседании поддержали исковые требования на вышеизложенных основаниях. Пояснили, что дом в срок не сдан. Истец вынуждена снимать жилье, проживать с тремя детьми в стесненных условиях. Это причиняет истцу нравственные страдания. Ответчик в добровольном порядке требования истца и условия договора не выполняет. 

Представитель ответчика ООО «СтройКапитал» в судебное заседание не явился, о причинах неявки суду не сообщил, надлежащее извещение подтверждается почтовым уведомлением. 

Представитель третьего лица администрации МО Новоорский район в судебное заседание не явился, представил в суд заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. 

Выслушав истца и его представителя, проверив материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Из содержания ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ (ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия. которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с ч. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

В судебном заседании было установлено и подтверждается материалами дела, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с одной стороны, именуемая «Заказчик» и ООО «СтройКапитал», именуемое «Подрядчик» в лице директора ФИО2, действующего на основании Устава и свидетельства о допуске к определенному виду работ, заключили договор, по условиям которого: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по строительству индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>, с использованием материалов, оборудования и механизмов Подрядчика согласно проектно-сметной документации, составленного Подрядчиком и утвержденного Заказчиком. Размер общей площади индивидуального жилого дома составляет 75,8 кв.м. Дата начала работ в течение 7-ми дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Срок выполнения работ 2 года с момента заключения договора. Работы считаются выполненными с момента подписания акта выполненных работ. 

В соответствии с п. 3.1 договора подряда стоимость работ, перечень и количество которых согласовано сторонами составляет 

<

данные изъяты> руб. и является неизменной на весь срок действия договора. 

Согласно п. 3.2 договора подряда Заказчиком производится предоплата в размере 100 %. Подрядчику за счет средств единовременного свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> руб., выданный МО «

<

адрес>», которые будут перечислены с целевого блокированного счета владельца ФИО1 № на расчетный счет подрядчика ООО «СтройКапитал», 462800, 

<

адрес>, пер. Молодежный, 

<

адрес>, ОГРН 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

данные изъяты>, КПП 

<

данные изъяты>, № в филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» 

<

адрес> в течение 10 банковских дней после сдачи полного пакета документов. 

Разницу между общей стоимостью объекта строительства и денежными средствами, перечисленными посредством свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб. заказчик перечисляет подрядчику посредством государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 

<

данные изъяты> руб. серия МК-3 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на основании решения ГУ-УПФ РФ в Новоорском районе Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ №, не позднее двух месяцев с момента регистрации полного перечня документов в территориальном органе Пенсионного фонда РФ, предусмотренный ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № –ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18.10.2011 г. № 1180 «Об утверждении правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и формы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал», на расчетный счет подрядчика № в филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк».

В соответствии с п. 4.1 договора подряда, стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

В силу ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Из платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО1 перечислила в ООО «СтройКапитал» по договору от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> руб. 

Согласно платежным поручениям №, № от ДД.ММ.ГГГГ УФК по 

<

адрес> (Финансовый отдел администрации Новоорского района Оренбургской области) перечислило ФИО1 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. на счет №

Из платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО1 перечислила в ООО «СтройКапитал» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. 

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1 исполнила свои обязанности по договору подряда в полном объеме, перечислив заказчику денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Актом визуального обследования недостроенного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлено следующее: 

недостроенный жилой 

<

адрес> года постройки, фундамент – ленточный из сборных фундаментных блоков, основные стены выполнены из пеноблока толщиной 300 мм. Кладка выполнена не качественно, местами пеноблок выступает, местами западает. Снаружи дом обложен силикатным кирпичом толщиной 120 мм., перемычки под обкладку над оконными проемами выполнены из металлического уголка. Между силикатным кирпичом и пеноблоком имеется зазор толщиной 5 мм. Внутренние стены не оштукатурены. Перекрытие - дощатый настил по деревянным балкам, утеплитель отсутствует. Перемычки над оконными и дверными проемами выполнены из б/у железнодорожных шпал. Полы отсутствуют. Кровля стропильная, двускатная, по деревянной обрешетке материал покрытия - профилированный лист коричневого цвета. На фронтонах отсутствует ветровая планка. Окна, двери, отопление отсутствует. Площадка крыльца залита бетоном, ступени выполнены из силикатного кирпича, не оштукатурены. 

Заключением комиссии в составе старшего помощника прокурора Новоорского района Башкисер Ю.А., начальника отдела архитектуры и градостроительства С.С.В., начальника проектной группы ООО СПМК «Новоорская» К.Т.Г., собственника недостроенного жилого дома ФИО1 установлено, что недостроенный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, построен с нарушением проектно-сметной документации. 

В судебном заседании установлено, что подрядчиком не выполнены следующие работы, предусмотренные локальным сметным расчетом на строительство индивидуального жилого дома ФИО1: раздел 3 п. 12 на сумму 10 141, 84 руб., раздел 4 п. 19 на сумму 2 414,37 руб., п. 20 на сумму 6 831,52 руб., п. 21 на сумму 2152 руб., п. 22 на сумму 6 014,28 руб., п. 23 на сумму 2 240, 52 руб., раздел 5 п. 25 на сумму 28 168,6 руб., раздел 6 п. 27 на сумму 52 737,59 руб., п. 28 на сумму 1213,86 руб., п. 29 на сумму 11 550,37 руб., п. 30 на сумму 21 040,76 руб., раздел 7 п. 33 на сумму 3 403,32 руб., п. 34 на сумму 10 327,2 руб., раздел 8 п. 38 на сумму 33 211,19 руб., раздел 9 п. 46 на сумму 14 683,80 руб., п. 47 на сумму 30 327,44 руб., раздел 10 п. 53-71 на сумму 81 740,88 руб., раздел 13 п. 91-105 на сумму 60 641,17 руб. 

Таким образом, в судебном заседании установлено, что подрядчиком ООО «СтройКапитал» по договору подряда на строительство жилья от ДД.ММ.ГГГГ не выполнено работ на сумму 

<

данные изъяты> руб. 

В соответствии с пп. б п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при рассмотрении требований потребителей о взыскании неустойки, предусмотренной Законом о защите прав потребителей, необходимо иметь в виду, что неустойка (пеня) в размере, предусмотренном п. 5 ст. 28 Закона, за нарушение установленных сроков начала и окончания выполнения работы (оказания услуги) взыскивается за каждый день просрочки вплоть до начала исполнения работы (оказания услуги), ее этапа либо окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа. Если исполнителем были одновременно нарушены установленные сроки начала и окончания работы (оказания услуги), ее этапа, неустойка (пеня) взыскивается за каждое нарушение, однако ее сумма, не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общей цены заказа, если цена отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) не определена договором.

Пунктом 5 статьи 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" предусмотрена ответственность за нарушение сроков оказания услуги потребителю в виде уплаты неустойки, начисляемой за каждый день просрочки в размере трех процентов цены оказания услуги, а если цена оказания услуги договором об оказании услуг не определена, - общей цены заказа.

Сумма неустойки, подлежащая начислению на стоимость невыполненных работ, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (день обращения в суд), составляет 

<

данные изъяты> руб., (

<

данные изъяты>), что значительно превышает стоимость невыполненных работ. 

Таким образом, подлежит взысканию с ООО «СтройКапитал» неустойка в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Статья 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" устанавливает, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 17 от 28.06.2012 года "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем, размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Таким образом, суд с учетом характера причиненных потребителю нравственных страданий, продолжительности неисполнения условий договора, исходя из принципа разумности и справедливости, полагает подлежащим взысканию с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в размере 

<

данные изъяты> рублей.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В связи с тем, что ответчик в добровольном порядке не исполнил условия договора строительного подряда, с него подлежит также взысканию штраф за неисполнение условий договора в размере 204 420,35 руб. (378 840,71+30 000) : 2).

В силу ст. 103 ГПК РФ с ООО «СтройКапитал» подлежит взысканию госпошлина, от уплаты которой освобожден истец.

В силу абз. 5 пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 5 200 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 

<

данные изъяты> рублей.

В соответствии с абз. 2 пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, при подаче в суд искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера, государственная пошлина уплачивается физическими лицами в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Следовательно, с ответчика подлежит взысканию госпошлина в сумме 

<

данные изъяты> руб. 

Руководствуясь ст. ст. 194, 197, 198 ГПК РФ, суд

решил:

Иск прокурора Новоорского района Оренбургской области в интересах ФИО1 удовлетворить. 

Обязать ООО «СтройКапитал» в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу выполнить следующие работы согласно проектно-сметной документации:

- по разделу 3 п.12 установить оконные блоки и ПВХ профилей поворотных (откидных, отворотно-откидных) с площадью проема более 2 м 2 двухстворчатых;

- по разделу 4 п.19, п.20, п.21, п.22, п.23 произвести укладку перемычек массой до 0,3 т; перемычек брусковых: 2ПБ-25-3-п/бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 2,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1); 2ПБ-13-1-п/бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1); 2ПБ-16-2-п/бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1); 2ПБ-17-3-п/бетон В15 (М200), объем 0,028 м3, расход арматуры 0,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1);

- по разделу 5 п.25 уложить маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-11-9000-1200-100;

- по разделу 6 п.27, п.28, п.29, п.30 установить оконные блоки из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м. 2 двухстворчатых; подоконные доски из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м; металлические дверные блоки в готовые проемы; дверь противопожарную металлическую однопольную ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм;

- по разделу 7 п.33, п.34 выполнить устройство пароизоляции прокладочной в один слой; утепление покрытий матами теплоизоляционными;

- по разделу 8 п.38 выполнить штукатурку поверхностей стен внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, улучшенную;

- по разделу 9 п.46, п.47 выполнить устройство подстилающих слоев щебеночных; устройство подстилающих слоев бетонных;

- по разделу 10 п. п. 53-71 произвести установку водонагревателей проточных, котла, прокладку трубопровода отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм, установку вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, установку фильтров диаметром 25 мм, установку кранов воздушных, кранов шаровых BUGATTI для воды и пара стандартные НВ и ВВ с размером резьбы ?, установку полотенцесушителей из латунных хромированных труб, установку радиаторов стальных, радиаторы биметаллические, марка Rifar-A500 количество секций 10 мощность 1650 Вт, количество секций 8 мощность 1320 Вт, количество секций 6 мощность 990 Вт, количество секций 4 мощность 660 Вт, угольник полипропиленовый комбинированный с внутренней резьбой диаметром 20х1/2, диаметром 25х1/2, угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, тройник полипропиленовый комбинированный с наружной резьбой диаметром 20х1/2;

-по разделу 13 п. п. 91-105 установить: выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по перекрытиям, заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм, автомат одно-, двух- трехполюсный, щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями масса щитка до 6 кг, счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, устройства защитного отключения, выключатели автоматические, щитки квартирные.

Взыскать с ООО «СтройКапитал» в пользу ФИО1 неустойку в размере 

<

данные изъяты> руб., компенсацию морального вреда в сумме 

<

данные изъяты> рублей, штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке в размере 

<

данные изъяты> руб.. 

Взыскать с ООО «СтройКапитал» в доход государства госпошлину в сумме 

<

данные изъяты> руб. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Оренбургский областной суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме через Новоорский районный суд.

Судья А.И. Левченков 

Мотивированное решение изготовлено 16 августа 2017 года.

Судья А.И. Левченков