Дело №2-6628/2017

ЗАОЧНОЕ 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

21 августа 2017 года город Казань

Советский районный суд города Казани в составе

председательствующего судьи Р.М.Шарифуллина

при секретаре судебного заседания Л.Н.Ивановой

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Грань ЖилСтрой» (далее по тексту ООО «Грань ЖилСтрой») к ФИО1 о взыскании задолженности по договору подряда,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Грань ЖилСтрой» (далее также истец) обратился в суд с иском к ФИО1, указав, что 25.01.2016 между ООО «Грань ЖилСтрой» (далее - истец) и ООО «СК Реаль» заключен договор субподряда № 05-02/01-16/Д6/ГЖС (далее - договор 1) на строительно-монтажные работы: устройство монолитного каркаса ниже отм.0.000 БС - 5, 6; кирпичная кладка ниже отм. 0.000 БС - 5,6; устройство кирпичной кладки армирование; перебазировка техники, монтаж крана и подкрановых путей на объекте: «Жилой дом №6 со встроенными нежилыми помещениями (4-ая очередь строительства, 1-й пусковой комплекс) комплекса жилых домов и объектов инфраструктуры»

25.01.2016 г. между ФИО1 (далее - ответчик) и ООО «Грань ЖилСтрой» был заключен договор поручительства № 40-10/03-16/П, по условиям которого поручитель ФИО1 отвечает по Договору 1 перед Кредитором (ООО «Грань ЖилСтрой») солидарно в том же объеме, что и Должник (ООО «СК Реаль»), включая уплату процентов, гарантийные обязательства, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств.

Согласно п.п. 2.6.,2.7., договора поручительства при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником основного договора кредитор вправе требовать исполнения обязательств по основному договору, как от должника и поручителя совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части. Для предъявления требования к поручителю достаточно факта неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по основному договору должником, при этом кредитор не обязан доказывать, что он предпринимал попытки получить исполнение обязательств от должника.

Согласно п. 3.1., п. 3.2., п. 3.3. договора 1 сммтоимость работ по настоящему договору составляет 15 077 055 рублей 89 копеек, в том числе НДС 18% - 2 299 889 рублей 89 копеек, согласно протоколу согласования договорной цены (Приложение № 2.1.) и локально-сметным расчетам (Приложение № 2.2. - № 2.5.). В стоимость договорной цены включены все затраты субподрядчика, связанные с выполнением им работ по договору и исправлением дефектов в период гарантийного срока.

Стоимость работ и эксплуатация механизмов по договору составляет - 6 032 895 рублей 70 копеек, в том числе НДС 18% - 920 272 рублей 23 копеек, стоимость материалов составляет - 9 044 160 рублей 19 копеек, в том числе НДС 18% - 1 379 617 рублей 66 копеек. На объект материалы поставляются генподрядчиком. Поставленные генподрядчиком материалы оформляются товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счетом-фактурой.

Расходы по охране материалов, оборудования, механизмов и выполненных работ во время строительства несёт субподрядчик.

Согласно пунктам 2.6.1, 2.6.2. договора 1 сроки начала и завершения работ - с 25.01.2016 до 31.07.2016. 

Согласно п. 3.13 договора 1 субподрядчик выплачивает генподрядчику вознаграждение за генподрядные услуги в размере 4% от договорной цены, указанной в п.3.1. договора, в течение 2 банковских дней с момента получения денежных средств за выполненные работы.

Согласно п. 3.6. договора 1 расчет за выполненный объем работ производится ежемесячно при условии соблюдения сроков строительства по графику производства работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания генподрядчиком актов о приемке выполненных работ (форма № КС - 2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и сдачи генподрядчику исполнительной документации, согласно действующим СНиП на очередной этап работ. При не соблюдении сроков выполнения этапов работ по графику производства работ оплата принятых работ производится после ликвидации отставания.

Согласно п. 3.8. не позднее 20 числа отчетного месяца, субподрядчик обязуется предоставить генподрядчику акты выполненных работ в первоначальной редакции (КС-2) и исполнительно-техническую документацию. Генподрядчик в срок не позднее 3 календарных дней с момента получения вышеуказанной документации обязан либо утвердить акт приёмки выполненных работ, либо вернуть его с письменным обоснованным отказом. Оформленные акты выполненных работ по форме № КС — 2, в окончательной редакции со справкой по форме № КС-3 и исполнительной документацией субподрядчик предоставляет не позднее 25 числа отчетного месяца. Подписанный акт выполненных работ по форме КС-2 считается принятым после проверки генподрядчиком, в том числе, после согласования актов взЗастройщика, и подписания справки по форме КС-3 не позднее 30 числа отчетного месяца.

По договору 1 были проведены следующие операции:

а) истцом в адрес ООО «СК Реаль» выставлены претензии исх. № 087 от 12.05.2016 на сумму 50 000 руб. (нарушение ОТ и ТБ), исх. № 095 от 25.05.2016 на сумму 50 000 руб. (нарушение ОТ и ТБ).

б) между сторонами были подписаны:

- соглашение о зачете взаимных требований от 04.05.2016 на сумму 5 032 115,74 руб.

- соглашение о зачете взаимных требований от 31.12.2016 на сумму 1 179 947, 56 руб.

в) истцом в адрес ООО «СК Реаль» отгружены материалы всего на сумму 5 899 790,46 руб., согласно нижеприведенной таблице № 1:

№ ТН Дата отгрузки Сумма, руб.

1. 00000324 10.02.2016 4516,5

2. 00000323 15.02.2016 9 033 руб.

3. 00000349 15.02.2016 128 225,51 руб.

4. 00000350 16.02.2016 121 025

5. 00000255 19.02.2016 22 029,84

6. 00000294 19.02.2016 431 270,76

7. 00000301 19.02.2016 235 826,44

8. 00000254 20.02.2016 20 069,44

9. 00000300 20.02.2016 129 222

10. 00000340 27.02.2016 2 811

11.00000346 02.03.2016 141 192,14

12.00000347 02.03.2016 99 092,86

13.00000413 03.03.2016 278 100

14.00000420 03.03.2016 4 216,5

15.00000423 03.03.2016 6 800

16.00000422 04.03.2016 4 216,5

17.00000410 07.03.2016 136 475

18.00000376 09.03.2016 156 426,6

19.00000544 09.03.2016 65 340

20.00000444 10.03.2016 10 323,46

21.00000370 11.03.2016 14 763

22.00000403 11.03.2016 86 350,59 23.00000409 14.03.2016 364 875 

25.00000399 15.03.2016 10 323,46

26. 00000443 15.03.2016 10 323,46

27.00000415 16.03.2016 99 750

28.00000506 19.03.2016 467 250

29.00000606 31.03.2016 5 622

30.00000445 01.04.2016 527 326,58

31.00000531 01.04.2016 254 625

32.00000372 01.04.2016 493 096,69

33.00000436 01.04.2016 527 032,09

34.00000397 01.04.2016 498 745

35.00000437 01.04.2016 520 295,04

г) истцом на расчетный счет ООО «СК Реаль» были перечислены денежные средства (авансовые платежи) в размере 2 500 000, 00 руб., согласно платежных поручений за №: 179 (от 08.02.16) на сумму 1 000 000 руб., 1 (от 27.06.16) на сумму 500 000 руб., 630 (от 20.04.16) на сумму 700 000 руб., 650 (от 22.04.16) на сумму 300 000 руб.

д) истцом были оказаны ООО «СК Реаль» генподрядные услуги на общую сумму 310 743, 40 руб., согласно:

акту № 00000056 (29.02.16) на сумму 49 961,13 руб. 

акту № 00000380 (30.11.16) на сумму 13 181,06 руб. 

акту № 00000154 (30.04.16) на сумму 247 601,21 руб.

е) истцом были приняты работы от ООО «СК Реаль» на общую сумму 7 768 584,95 руб., согласно:

акту по форме КС 2 № 1 от 29.02.16 на сумму 1 249 028,30 руб. 

акту по форме КС 2 № 2 от 30.04.16 на сумму 6 190 030,19 руб. 

акту по форме КС 2 № 5 от 30.11.2016 г. на сумму 329 526, 46 руб.

ё) истцом были оказаны услуги ООО «СК Реаль» по электроэнергии на общую сумму 15 921, 91 руб., согласно:

акту № 00000230 от 31.05.2016 г. на сумму 612 руб. 

акту № 00000171 от 30.04.2016 г. на сумму 599, 41 руб.

акту № 00000127 от 31.03.2016 г. на сумму 6 456, 29 руб.

акту № 00000076 от 29.02.2016 г. на сумму 8 254,21 руб.

Согласно бухгалтерским данным в рамках заключенного договора 1 у ООО «СК Реаль» перед истцом - ООО «Грань ЖилСтрой» образовалась задолженность в размере 114 392,47 руб., из которых:

- долг за электроэнергию, в размере 1 211,41 руб.,

- долг за ген. услуги, в размере 13 181,06 руб.,

- долг по выставленным и неоплаченным претензиям (штрафные санкции), на общую сумму 100 000 руб.

16.11.2015 между ООО «Грань ЖилСтрой» и ООО «СК Реаль» был заключен договор субподряда № 05-02/11-15/Д7/ГЖС (далее - Договор 2) на строительно-монтажные работы: устройство монолитного каркаса ниже отм.0.000 БС-5,6; кирпичная кладка ниже 0.000 БС-5,6; перебазировка техники, монтаж крана и подкрановых путей на объекте: Жилой дом № 7 со встроенными нежилыми помещениями (4-ая очередь строительства, 2-й пусковой комплекс). Комплекс жилых домов и объектов инфраструктуры» 

16.11.2015 между ФИО1 и ООО «Грань ЖилСтрой» заключен договор поручительства № 40-10/11-15/П, по условиям которого поручитель ФИО1 отвечает по договору 2 перед кредитором (ООО «Грань ЖилСтрой») солидарно в том же объеме, что и должник (ООО «СК Реаль»), включая уплату процентов, гарантийные обязательства, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств.

Согласно п.п. 2.6.,2.7., договора поручительства при неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником основного договора кредитор вправе требовать исполнения обязательств по основному договору, как от должника и поручителя совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части. Для предъявления требования к поручителю достаточно факта неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по основному договору должником, при этом кредитор не обязан доказывать, что он предпринимал попытки получить исполнение обязательств от должника. Согласно п. 3.1., п. 3.2., п. 3.3. договора 2 стоимость работ по настоящему договору составляет 16 753 638 рублей 43 копеек, в том числе НДС 18% - 2 555 639 рублей 76 копеек, согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение № 2.1.) и локально-сметным расчетам (Приложение №2.2.-№2.5.).

В стоимость договорной цены включены все затраты субподрядчика, связанные с выполнением им работ по договору и исправлением дефектов в период гарантийного срока. Стоимость работ и эксплуатация механизмов по договору составляет - 6 640 594 рублей 95 копеек в том числе НДС 18% - 1 012 972 рублей 12 копеек, стоимость материалов составляет - 10 113 043 рублей 48 копеек, в том числе НДС 18% - 1 542 667 рублей 65 копеек. На объект материалы поставляются генподрядчиком. Поставленные генподрядчиком материалы оформляются товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счетом- фактурой.

Расходы по охране материалов, оборудования, механизмов и выполненных работ во время строительства несёт субподрядчик. Согласно пунктам 2.5.1, 2.5.2. договора 2 сроки начала и завершения работ - с 16.11. 2015 до 30.01.2016.

Согласно п. 3.13 договора 2 субподрядчик выплачивает генподрядчику вознаграждение за генподрядные услуги в размере 4% от договорной цены, указанной в п.3.1. договора, в течение 2 банковских дней с момента получения денежных средств за выполненные работы.

Согласно п. 3.6. договора 2 расчет за выполненный объем работ производится ежемесячно при условии соблюдения сроков строительства по Графику производства работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания генподрядчиком актов о приемке выполненных работ (форма № КС - 2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и сдачи Генподрядчику исполнительной документации, согласно действующим СНиП на очередной этап работ. При не соблюдении сроков выполнения этапов работ по графику производства работ оплата принятых работ производится после ликвидации отставания.

Согласно п. 3.8. договора 2 не позднее 20 числа отчетного месяца, субподрядчик обязуется предоставить генподрядчику акты выполненных работ в первоначальной редакции (КС-2) и исполнительно-техническую документацию. Генподрядчик в срок не позднее 3 календарных дней с момента получения вышеуказанной документации обязан либо утвердить акт приёмки выполненных работ, либо вернуть его с письменным обоснованным отказом. Оформленные акты выполненных работ по форме № КС - 2, в окончательной редакции со справкой по форме № КС-3 и исполнительной документацией субподрядчик предоставляет не позднее 25 числа отчетного месяца. Подписанный акт выполненных работ по форме КС-2 считается принятым после проверки генподрядчиком, в том числе, после согласования актов выполненных работ по форме КС-2 строительным контролем Заказчика-Застройщика, и подписания справки по форме КС-3 не позднее 30 числа отчетного месяца.

Между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 1 от 29.01.2016 г., по условиям которого:

- стоимость работ по договору 2 увеличилась на 60 631 738 рублей 11 копеек, в том числе НДС 18% ~ 9 248 909 рублей. 21 копеек. Из них СМР составляет - 19 669 186 рублей 49 копеек, в том числе НДС 18 % - 3 000 384 рублей 38 копеек стоимость материалов - 40 962 551 рублей 62 копеек, в том числе НДС 18 % - 6 248 524 рублей 83 копеек.

- в п.3.1. договора 2 внести изменения, читать данный пункт в новой редакции: «Стоимость работ по настоящему договору составляет 77 385 376 рублей 54 копеек, в том числе НДС 18% - 11 804 548 рублей 97 копеек, согласно Протоколу согласования договорной цены и локальным сметным расчетам. В стоимость договорной цены включены все затраты субподрядчика, связанные с выполнением им работ по договору и исправлением дефектов в период гарантийного срока.».

- в п. 3.2. договора 2 внести изменения, читать данный пункт в новой редакции: «Стоимость работ и эксплуатация механизмов по договору составляет - 26 309 781 рублей 44 копеек в том числе НДС 18% - 4 013 356 рублей 49 копеек, стоимость материалов составляет - 51 075 595 рублей 10 копеек, в том числе НДС 18% - 7 791 192 рублей 48 копеек. На объект материалы поставляются генподрядчиком. Поставленные генподрядчиком материалы оформляются товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счетом-фактурой.».

По Договору 2 были проведены следующие операции:

а) истцом в адрес ООО «СК Реаль» выставлена претензия исх. № 104 от 09.06.2016 г. на сумму 50 000 руб. (нарушение ОТ и ТБ).

б) между сторонами были подписаны:

- соглашение о зачете взаимных требований от 31.12.2016 на сумму 2 619 340, 68 руб.

- соглашение о зачете взаимных требований от 04.05.2016 на сумму 1 250 577, 67 руб.

- соглашение о зачете взаимных требований от 31.12.2016 на сумму 29 772 748,18 руб.

в) истцом в адрес ООО «СК Реаль» отгружены материалы всего на сумму 37 832 459,32 рублей, согласно нижеприведенной таблице № 2:

№ ТН Дата отгрузки Сумма, руб.

00003906 11.11.2015 62 900

00003576 13.11.2015 193168,36

00003577 13.11.2015 34268,64

00003574 14.11.2015 282000

00003575 17.11.2015 94350

00003578 17.11.2015 558642,11

00003579 17.11.2015 558078,11

00003580 17.11.2015 342135,07

00003635 18.11.2015 456934,75

00003767 27.11.2015 24000

00003757 30.11.2015 240840,04

00003795 30.11.2015 12505,97

00003837 01.12.2015 278100

00003695 02.12.2015 550432,09

00003697 03.12.2015 73579,62

00003743 03.12.2015 1300

00003758 03.12.2015 543856,77

00003759 04.12.2015 530137,93

00003907 05.12.2015 244125

00003905 10.12.2015 262500

00003953 17.12.2015 179225

00003954 22.12.2015 580125

00003952 25.12.2015 190389,96

00003955 28.12.2015 58860

00000097 05.01.2016 144425

00000098 09.01.2016 126000 1

00000099 09.01.2016 4516,50

000000100 11.01.2016 4516,50

000000101 12.01.2016 6622

00000036 13.01.2016 43164

000000102 13.01.2016 4816,50

00000038 14.01.2016 46560

000000104 15.01.2016 441000

000000121 15.01.2016 7742,59

000000105 16.01.2016 4816,50

000000118 17.01.2016 168000

000000106 18.01.2017 90022

00000039 21.01.2016 522267,02

00000037 22.01.2016 66708

000000107 22.01.2016 6422

000000176 23.01.2016 6022

000000145 27.01.2016 10323,46

000000154 29.01.2016 353400

000000157 02.02.2016 503395,15

000000158 02.02.2016 503647,15

000000159 02.02.2016 516091,99

000000160 02.02.2016 332377,97

000000175 02.02.2016 141750

000000155 05.02.2016 506091,01

000000178 05.02.2016 173622

000000177 08.02.2016 522375

000000156 09.02.2016 516365,93

000000223 09.02.2016 10323,46

000000224 09.02.2016 12505,97

000000218 10.02.2016 141000

000000220 11.02.2016 15000

000000216 12.02.2016 21150

000000351 12.02.2016 133875

000000352 12.02.2016 189000

000000348 13.02.2016 551250

000000225 15.02.2016 25011,95

000000228 19.02.2016 60480

000000256 19.02.2016 514842,06

000000295 19.02.2016 88905,59

000000321 29.02.2016 630000

000000330 29.02.2016 413944,16

000000320 01.03.2016 510244,29

000000322 02.03.2016 351750

000000344 02.03.2016 546009,99

000000359 02.03.2016 18590

000000417 07.03.2016 525300

000000374 11.03.2016 545726,94

000000412 11.03.2016 236900

000000408 14.03.2016 396375

000000414 16.03.2016 215250

000000604 17.03.2016 54361,11

000000507 19.03.2016 84000

000000528 23.03.2016 21885,45

000000479 25.03.2016 39287

00000605 25.03.2016 412000

00000579 26.03.2016 262500

00000532 27.03.2016 216300

00000543 28.03.2016 77920

00000548 29.03.2016 553645

00000549 29.03.2016 533577,57

00000620 30.03.2016 483166,5

00000612 31.03.2016 26204,85

00000613 31.03.2016 33623,42

00000614 31.03.2016 65005,29

00000624 31.03.2016 52499,99

00000607 01.04.2016 669865,52

00000644 01.04.2016 15800

00000774 01.04.2016 2911

00000778 02.04.2016 250111

00000608 04.04.2016 667112,99

00000779 04.04.2016 5822

00000634 05.04.2016 36013,6

00000780 05.04.2016 435511

00000672 06.04.2016 595652,5

00000676 06.04.2016 187550,05

00000677 06.04.2016 97432,69

00000769 06.04.2016 5822

00000770 07.04.2016 227832,5

00000763 08.04.2016 2911

00000660 14.04.2016 36305,06

00000791 14.04.2016 463500

00000728 19.04.2016 17195,72

00000789 19.04.2016 249600

00000806 19.04.2016 22950

00000726 20.04.2016 19356,48

00000790 20.04.2016 362400

00000819 22.04.2016 153600

00000816 26.04.2016 451200

00000849 28.04.2016 678006,03

00000929 29.04.2016 670400

00000915 30.04.2016 24518,21

00000928 04.05.2016 225000

00000850 05.05.2016 871596,55

00000851 05.05.2016 744686,33

00000918 05.05.2016 453600

00000921 06.05.2016 14840

00000950 06.05.2016 826882,04

00001019 10.05.2016 232800

00001050 11.05.2016 921468,36

00000979 12.05.2016 893507,94

00001024 21.05.2016 30749,55

00001036 23.05.2016 352750

00001040 26.05.2016 875529,54

00001041 26.05.2016 851472,38

00001085 30.05.2016 178450

00001086 30.05.2016 381800

00001094 02.06.2016 17050

100001140 02.06.2016 1 70550

00001162 07.06.2016 448200

00001159 10.06.2016 851275,02

00001212 10.06.2016 16359,81

00001217 21.06.2016 853212,17

00001249 22.06.2016 176375

г) истцом на расчетный счет ООО «СК Реаль» были перечислены денежные средства (авансовые платежи) в размере 11 850 000 руб., согласно платежных поручений за №:

1900 от 23.11.15 на сумму 1 25000 руб. 

2065 от 16.12.2015 г. на сумму 1 600 000 руб. 

121 от 28.01.2016 г. на сумму 1 000 000 руб.

199 от 09.02.2016 г. на сумму 1 400 000 руб. 

401 от 11.03.2016 г. на сумму 479 000 руб. 

777 от 19.05.2016 г. на сумму 2 000 000 руб.

945 от 16.06.2016 г. на сумму 2 000 000 руб.

404 от 14.03.2016 г. на сумму 1 621 000 руб. 

513 от 30.03.2016 г. на сумму 500 000 руб.

д) истцом были оказаны ООО «СК Реаль» генподрядные услуги на общую сумму 1 865 712,50 руб., согласно:

акту № 904 от 31.12.15 г. на сумму 120 412,07 руб. 

акту № 00000014 от 31.01.16 г. на сумму 224 578,22 руб.

акту № 00000055 от 29.02.16 г. на сумму 138 088,38 руб.

акту № 00000109 от 30.03.16 г. на сумму 204 444,63 руб.

акту № 00000137 от 30.04.16 г. на сумму 475 547,51 руб.

акту № 00000200 от 31.05.16 г. на сумму 351 958 руб. 

акту № 00000346 от 31.10.16 г. на сумму 766 954,68 руб. 

акту № 00000356 от 30.11.16г. на сумму 237 386,23 руб.

акту № 00000412 от 31.12.16 на сумму 46 342,78 руб.

е) истцом были приняты работы от ООО «СК Реаль» на общую сумму 7 768 584,95 руб., согласно:

акту по форме КС 2 № 22 от 31.12.16 на сумму 1 158 569,51 руб.

акту по форме КС 2 № 22 от 30.11.16 на сумму 5 934 655,86 руб.

акту по форме КС 2 № 20 от 31.10.2016 г. на сумму 1 464 626,17 руб.

акту по форме КС 2 № 18 от 31.05.2016 г. на сумму 7 802 553,79 руб. 

акту по форме КС 2 № 20 от 31.10.2016 г. на сумму 1 464 626,17 руб. 

акту по форме КС 2 № 11 от 30.04.2016 г. на сумму 2 426 558, 50 руб., акту по форме КС 2 № 12 от 30.04.2016 г. на сумму 1 282 419, 63 руб., акту по форме КС 2 № 13 от 30.04.2016 г. на сумму 494 289, 39 руб., 

акту по форме КС 2 № 14 от 30.04.2016 г. на сумму 7 064 275, 32 руб., акту по форме КС 2 № 15 от 30.04.2016 г. на сумму 438 294,21 руб.,

акту по форме КС 2 № 16 от 30.04.2016 г. на сумму 182 850, 68 руб.

акту по форме КС 2 № 10 от 31.03.2016 г. на сумму 5 111 115,68 руб. 

акту по форме КС 2 № 7 от 29.02.2016 г. на сумму 25 057,09 руб.

акту по форме КС 2 № 8 от 29.02.2016 г. на сумму 382 542,16 руб.,

акту по форме КС 2 № 9 от 29.02.2016 г. на сумму 3 044 610,30 руб. 

акту по форме КС 2 № 5 от 31.01.2016 г. на сумму 155 010,17 руб.,

акту по форме КС 2 № 6 от 31.01.2016 г. на сумму 1 104 593,96 руб.,

акту по форме КС 2 № 4 от 31.01.2016 г. на сумму 2 710 973, 82 руб.,

акту по форме КС 2 № 2 от 31.01.2016 г. на сумму 1 628 801,99 руб.,

акту по форме КС 2 № 3 от 31.01.2016 г. на сумму 15 075,61 руб.

акту по форме КС 2 № 20 от 31.10.2016 г. на сумму 1 464 626,17 руб. акту по форме КС 2 № 1 от 31.12.2016 г. на сумму 3 010 301,75 руб. 

ё) истцом были оказаны ООО «СК Реаль» услуги по электроэнергии на общую сумму 116 749,47руб., согласно:

акту № 852 от 30.11.15 г. на сумму 1 327,77 руб.

акту № 00000929 от 31.12.15 г на сумму 16 918,62 руб. 

акту № 00000036 от 31.01.16 г. на сумму 34 842,25 руб. 

акту № 00000078 от 29.02.16 г. на сумму 8577,14 руб.

акту № 00000128 от 31.03.16 г. на сумму 25841,08 руб.

акту № 00000173 от 30.04.16 г. на сумму 24636,28 руб.

акту № 00000232 от 31.05.16 г. на сумму 2050,16 руб. 

акту № 00000282 от 30.06.16 г. на сумму 997,64 руб. 

акту № 00000297 от 31.07.16 г. на сумму 1558,53 руб.

Согласно бухгалтерским данным истца в рамках заключенного договора 2 у ООО «СК Реаль» перед истцом - ООО «Грань ЖилСтрой» образовалась задолженность в размере 6 222 254, 76 руб., из которых:

- долг за электроэнергию, в размере 29 242,61 руб.,

- долг за ген. услуги, в размере 702 641, 69 руб.,

- долг по выставленной и неоплаченной претензии (штрафные санкции), на общую сумму 50 000 руб.,

- долг по переданному, но неиспользованному материалу, в размере 5 440 370,46 руб.

Стоимость неизрасходованного материала определена ООО «Грань ЖилСтрой» по актам выполненных работ, подписанными сторонами. На текущую дату наличие данного материала, пригодного для дальнейшего использования и имеющего для ООО «Грань ЖилСтрой» потребительскую ценность ООО «СК Реаль» не подтвердило. Факт передачи ООО «СК Реаль» материала подтвержден товарными накладными, содержащими подпись представителя ООО «СК Реаль», принявшего товар.

Обязанности по хранению, целевому использованию и соответствующему учету полученного от ООО «Грань ЖилСтрой» материала, а также по возврату неиспользованного материала законом возложены на подрядчика - ООО «СК Реаль».

ООО «СК Реаль»» не представлено документальных доказательств возврата материала в спорном объеме, не представлены соответствующие накладные либо акты приема передачи материальных ценностей, либо иные доказательства.

Согласно п. 3.13 Договора 1 и п. 3.13. Договора 2, субподрядчик (ООО «СК Реаль») выплачивает Генподрядчику (ООО «Грань ЖилСтрой») вознаграждение за генподрядные услуги в размере 4% от Договорной цены.

Таким образом, ООО «СК Реаль» ненадлежащим образом исполнил свои обязательства, предусмотренные Договором 1, Договором 2.

На основании изложенного, истец просит взыскать с ответчика задолженность в размере 6 336 647,23 рублей, расходы по уплате госпошлины.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, причину неявки суду не сообщил.

В соответствии со статьей 233 Гражданского процессуального района Российской Федерации (далее ГПК РФ) в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод закреплено право каждого на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом. С учетом требований указанной нормы, а так же пункта 3 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах судопроизводство по…гражданским делам должно осуществляться без неоправданной задержки, в сроки, позволяющие оптимально обеспечить право граждан на судебную защиту.

При таких обстоятельствах, на основании части 4 статьи 167 ГПК РФ, судья считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчиков, надлежаще извещенных о месте и времени судебного заседания. Ответчики не сообщили суду о причинах своей неявки в суд, доказательств уважительности причин не явки не предоставлено. Вышеперечисленные действия ответчиков судья расценивает как волеизъявление, свидетельствующее об отказе от реализации своих прав на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела на основе принципа состязательности и равноправия сторон, установленного статьей 12 ГПК РФ.

Никаких возражений на исковые требования ответчиками не предоставлено, доказательств оплаты задолженности не имеется.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителя истца, суд приходит к следующему.

Согласно статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно части 1 статьи 713 ГК РФ подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

В соответствии со статьей 714 ГК РФ Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.

Согласно части 1 статьи 747 ГК РФ заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги.

Оплата предоставленных заказчиком услуг, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных договором строительного подряда.

Согласно статьи 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем.

Условия поручительства, относящиеся к основному обязательству, считаются согласованными, если в договоре поручительства имеется отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство.

Солидарная ответственность поручителя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательств установлена пунктом 1 статьи 363 ГК РФ.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

В соответствии с пунктом 4 статьи 367 ГК РФ поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. 

Согласно пункта 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством" кредитор вправе предъявить иски и одновременно к должнику и поручителю; только к должнику или только к поручителю.

Суд установил, что 25.01.2016 между ООО «Грань ЖилСтрой» (далее - истец) и ООО «СК Реаль» заключен договор субподряда № 05-02/01-16/Д6/ГЖС (далее - договор 1) на строительно-монтажные работы: устройство монолитного каркаса ниже отм.0.000 БС - 5, 6; кирпичная кладка ниже отм. 0.000 БС - 5,6; устройство кирпичной кладки армирование; перебазировка техники, монтаж крана и подкрановых путей на объекте: «Жилой дом №6 со встроенными нежилыми помещениями (4-ая очередь строительства, 1-й пусковой комплекс) комплекса жилых домов и объектов инфраструктуры»

25.01.2016 г. между ФИО1 (далее - ответчик) и ООО «Грань ЖилСтрой» был заключен договор поручительства № 40-10/03-16/П, по условиям которого поручитель ФИО1 отвечает по Договору 1 перед Кредитором (ООО «Грань ЖилСтрой») солидарно в том же объеме, что и Должник (ООО «СК Реаль»), включая уплату процентов, гарантийные обязательства, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств.

Согласно п.п. 2.6.,2.7., договора поручительства при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником основного договора кредитор вправе требовать исполнения обязательств по основному договору, как от должника и поручителя совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части. Для предъявления требования к поручителю достаточно факта неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по основному договору должником, при этом кредитор не обязан доказывать, что он предпринимал попытки получить исполнение обязательств от должника.

Согласно п. 3.1., п. 3.2., п. 3.3. договора 1 сммтоимость работ по настоящему договору составляет 15 077 055 рублей 89 копеек, в том числе НДС 18% - 2 299 889 рублей 89 копеек, согласно протоколу согласования договорной цены (Приложение № 2.1.) и локально-сметным расчетам (Приложение № 2.2. - № 2.5.). В стоимость договорной цены включены все затраты субподрядчика, связанные с выполнением им работ по договору и исправлением дефектов в период гарантийного срока.

Стоимость работ и эксплуатация механизмов по договору составляет - 6 032 895 рублей 70 копеек, в том числе НДС 18% - 920 272 рублей 23 копеек, стоимость материалов составляет - 9 044 160 рублей 19 копеек, в том числе НДС 18% - 1 379 617 рублей 66 копеек. На объект материалы поставляются генподрядчиком. Поставленные генподрядчиком материалы оформляются товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счетом-фактурой.

Расходы по охране материалов, оборудования, механизмов и выполненных работ во время строительства несёт субподрядчик.

Согласно пунктам 2.6.1, 2.6.2. договора 1 сроки начала и завершения работ - с 25.01.2016 до 31.07.2016. 

Согласно п. 3.13 договора 1 субподрядчик выплачивает генподрядчику вознаграждение за генподрядные услуги в размере 4% от договорной цены, указанной в п.3.1. договора, в течение 2 банковских дней с момента получения денежных средств за выполненные работы.

Согласно п. 3.6. договора 1 расчет за выполненный объем работ производится ежемесячно при условии соблюдения сроков строительства по графику производства работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания генподрядчиком актов о приемке выполненных работ (форма № КС - 2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и сдачи генподрядчику исполнительной документации, согласно действующим СНиП на очередной этап работ. При не соблюдении сроков выполнения этапов работ по графику производства работ оплата принятых работ производится после ликвидации отставания.

Согласно п. 3.8. не позднее 20 числа отчетного месяца, субподрядчик обязуется предоставить генподрядчику акты выполненных работ в первоначальной редакции (КС-2) и исполнительно-техническую документацию. Генподрядчик в срок не позднее 3 календарных дней с момента получения вышеуказанной документации обязан либо утвердить акт приёмки выполненных работ, либо вернуть его с письменным обоснованным отказом. Оформленные акты выполненных работ по форме № КС — 2, в окончательной редакции со справкой по форме № КС-3 и исполнительной документацией субподрядчик предоставляет не позднее 25 числа отчетного месяца. Подписанный акт выполненных работ по форме КС-2 считается принятым после проверки генподрядчиком, в том числе, после согласования актов взЗастройщика, и подписания справки по форме КС-3 не позднее 30 числа отчетного месяца.

По договору 1 были проведены следующие операции:

а) истцом в адрес ООО «СК Реаль» выставлены претензии исх. № 087 от 12.05.2016 на сумму 50 000 руб. (нарушение ОТ и ТБ), исх. № 095 от 25.05.2016 на сумму 50 000 руб. (нарушение ОТ и ТБ).

б) между сторонами были подписаны:

- соглашение о зачете взаимных требований от 04.05.2016 на сумму 5 032 115,74 руб.

- соглашение о зачете взаимных требований от 31.12.2016 на сумму 1 179 947, 56 руб.

в) истцом в адрес ООО «СК Реаль» отгружены материалы всего на сумму 5 899 790,46 руб., согласно нижеприведенной таблице № 1:

№ ТН Дата отгрузки Сумма, руб.

1. 00000324 10.02.2016 4516,5

2. 00000323 15.02.2016 9 033 руб.

3. 00000349 15.02.2016 128 225,51 руб.

4. 00000350 16.02.2016 121 025

5. 00000255 19.02.2016 22 029,84

6. 00000294 19.02.2016 431 270,76

7. 00000301 19.02.2016 235 826,44

8. 00000254 20.02.2016 20 069,44

9. 00000300 20.02.2016 129 222

10. 00000340 27.02.2016 2 811

11.00000346 02.03.2016 141 192,14

12.00000347 02.03.2016 99 092,86

13.00000413 03.03.2016 278 100

14.00000420 03.03.2016 4 216,5

15.00000423 03.03.2016 6 800

16.00000422 04.03.2016 4 216,5

17.00000410 07.03.2016 136 475

18.00000376 09.03.2016 156 426,6

19.00000544 09.03.2016 65 340

20.00000444 10.03.2016 10 323,46

21.00000370 11.03.2016 14 763

22.00000403 11.03.2016 86 350,59 23.00000409 14.03.2016 364 875 

25.00000399 15.03.2016 10 323,46

26. 00000443 15.03.2016 10 323,46

27.00000415 16.03.2016 99 750

28.00000506 19.03.2016 467 250

29.00000606 31.03.2016 5 622

30.00000445 01.04.2016 527 326,58

31.00000531 01.04.2016 254 625

32.00000372 01.04.2016 493 096,69

33.00000436 01.04.2016 527 032,09

34.00000397 01.04.2016 498 745

35.00000437 01.04.2016 520 295,04

г) истцом на расчетный счет ООО «СК Реаль» были перечислены денежные средства (авансовые платежи) в размере 2 500 000, 00 руб., согласно платежных поручений за №: 179 (от 08.02.16) на сумму 1 000 000 руб., 1 (от 27.06.16) на сумму 500 000 руб., 630 (от 20.04.16) на сумму 700 000 руб., 650 (от 22.04.16) на сумму 300 000 руб.

д) истцом были оказаны ООО «СК Реаль» генподрядные услуги на общую сумму 310 743, 40 руб., согласно:

акту № 00000056 (29.02.16) на сумму 49 961,13 руб. 

акту № 00000380 (30.11.16) на сумму 13 181,06 руб. 

акту № 00000154 (30.04.16) на сумму 247 601,21 руб.

е) истцом были приняты работы от ООО «СК Реаль» на общую сумму 7 768 584,95 руб., согласно:

акту по форме КС 2 № 1 от 29.02.16 на сумму 1 249 028,30 руб. 

акту по форме КС 2 № 2 от 30.04.16 на сумму 6 190 030,19 руб. 

акту по форме КС 2 № 5 от 30.11.2016 г. на сумму 329 526, 46 руб.

ё) истцом были оказаны услуги ООО «СК Реаль» по электроэнергии на общую сумму 15 921, 91 руб., согласно:

акту № 00000230 от 31.05.2016 г. на сумму 612 руб. 

акту № 00000171 от 30.04.2016 г. на сумму 599, 41 руб.

акту № 00000127 от 31.03.2016 г. на сумму 6 456, 29 руб.

акту № 00000076 от 29.02.2016 г. на сумму 8 254,21 руб.

Согласно бухгалтерским данным в рамках заключенного договора 1 у ООО «СК Реаль» перед истцом - ООО «Грань ЖилСтрой» образовалась задолженность в размере 114 392,47 руб., из которых:

- долг за электроэнергию, в размере 1 211,41 руб.,

- долг за ген. услуги, в размере 13 181,06 руб.,

- долг по выставленным и неоплаченным претензиям (штрафные санкции), на общую сумму 100 000 руб.

16.11.2015 между ООО «Грань ЖилСтрой» и ООО «СК Реаль» был заключен договор субподряда № 05-02/11-15/Д7/ГЖС (далее - Договор 2) на строительно-монтажные работы: устройство монолитного каркаса ниже отм.0.000 БС-5,6; кирпичная кладка ниже 0.000 БС-5,6; перебазировка техники, монтаж крана и подкрановых путей на объекте: Жилой дом № 7 со встроенными нежилыми помещениями (4-ая очередь строительства, 2-й пусковой комплекс). Комплекс жилых домов и объектов инфраструктуры» 

16.11.2015 между ФИО1 и ООО «Грань ЖилСтрой» заключен договор поручительства № 40-10/11-15/П, по условиям которого поручитель ФИО1 отвечает по договору 2 перед кредитором (ООО «Грань ЖилСтрой») солидарно в том же объеме, что и должник (ООО «СК Реаль»), включая уплату процентов, гарантийные обязательства, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств.

Согласно п.п. 2.6.,2.7., договора поручительства при неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником основного договора кредитор вправе требовать исполнения обязательств по основному договору, как от должника и поручителя совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части. Для предъявления требования к поручителю достаточно факта неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по основному договору должником, при этом кредитор не обязан доказывать, что он предпринимал попытки получить исполнение обязательств от должника. Согласно п. 3.1., п. 3.2., п. 3.3. договора 2 стоимость работ по настоящему договору составляет 16 753 638 рублей 43 копеек, в том числе НДС 18% - 2 555 639 рублей 76 копеек, согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение № 2.1.) и локально-сметным расчетам (Приложение №2.2.-№2.5.).

В стоимость договорной цены включены все затраты субподрядчика, связанные с выполнением им работ по договору и исправлением дефектов в период гарантийного срока. Стоимость работ и эксплуатация механизмов по договору составляет - 6 640 594 рублей 95 копеек в том числе НДС 18% - 1 012 972 рублей 12 копеек, стоимость материалов составляет - 10 113 043 рублей 48 копеек, в том числе НДС 18% - 1 542 667 рублей 65 копеек. На объект материалы поставляются генподрядчиком. Поставленные генподрядчиком материалы оформляются товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счетом- фактурой.

Расходы по охране материалов, оборудования, механизмов и выполненных работ во время строительства несёт субподрядчик. Согласно пунктам 2.5.1, 2.5.2. договора 2 сроки начала и завершения работ - с 16.11. 2015 до 30.01.2016.

Согласно п. 3.13 договора 2 субподрядчик выплачивает генподрядчику вознаграждение за генподрядные услуги в размере 4% от договорной цены, указанной в п.3.1. договора, в течение 2 банковских дней с момента получения денежных средств за выполненные работы.

Согласно п. 3.6. договора 2 расчет за выполненный объем работ производится ежемесячно при условии соблюдения сроков строительства по Графику производства работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания генподрядчиком актов о приемке выполненных работ (форма № КС - 2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и сдачи Генподрядчику исполнительной документации, согласно действующим СНиП на очередной этап работ. При не соблюдении сроков выполнения этапов работ по графику производства работ оплата принятых работ производится после ликвидации отставания.

Согласно п. 3.8. договора 2 не позднее 20 числа отчетного месяца, субподрядчик обязуется предоставить генподрядчику акты выполненных работ в первоначальной редакции (КС-2) и исполнительно-техническую документацию. Генподрядчик в срок не позднее 3 календарных дней с момента получения вышеуказанной документации обязан либо утвердить акт приёмки выполненных работ, либо вернуть его с письменным обоснованным отказом. Оформленные акты выполненных работ по форме № КС - 2, в окончательной редакции со справкой по форме № КС-3 и исполнительной документацией субподрядчик предоставляет не позднее 25 числа отчетного месяца. Подписанный акт выполненных работ по форме КС-2 считается принятым после проверки генподрядчиком, в том числе, после согласования актов выполненных работ по форме КС-2 строительным контролем Заказчика-Застройщика, и подписания справки по форме КС-3 не позднее 30 числа отчетного месяца.

Между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 1 от 29.01.2016 г., по условиям которого:

- стоимость работ по договору 2 увеличилась на 60 631 738 рублей 11 копеек, в том числе НДС 18% ~ 9 248 909 рублей. 21 копеек. Из них СМР составляет - 19 669 186 рублей 49 копеек, в том числе НДС 18 % - 3 000 384 рублей 38 копеек стоимость материалов - 40 962 551 рублей 62 копеек, в том числе НДС 18 % - 6 248 524 рублей 83 копеек.

- в п.3.1. договора 2 внести изменения, читать данный пункт в новой редакции: «Стоимость работ по настоящему договору составляет 77 385 376 рублей 54 копеек, в том числе НДС 18% - 11 804 548 рублей 97 копеек, согласно Протоколу согласования договорной цены и локальным сметным расчетам. В стоимость договорной цены включены все затраты субподрядчика, связанные с выполнением им работ по договору и исправлением дефектов в период гарантийного срока.».

- в п. 3.2. договора 2 внести изменения, читать данный пункт в новой редакции: «Стоимость работ и эксплуатация механизмов по договору составляет - 26 309 781 рублей 44 копеек в том числе НДС 18% - 4 013 356 рублей 49 копеек, стоимость материалов составляет - 51 075 595 рублей 10 копеек, в том числе НДС 18% - 7 791 192 рублей 48 копеек. На объект материалы поставляются генподрядчиком. Поставленные генподрядчиком материалы оформляются товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счетом-фактурой.».

По Договору 2 были проведены следующие операции:

а) истцом в адрес ООО «СК Реаль» выставлена претензия исх. № 104 от 09.06.2016 г. на сумму 50 000 руб. (нарушение ОТ и ТБ).

б) между сторонами были подписаны:

- соглашение о зачете взаимных требований от 31.12.2016 на сумму 2 619 340, 68 руб.

- соглашение о зачете взаимных требований от 04.05.2016 на сумму 1 250 577, 67 руб.

- соглашение о зачете взаимных требований от 31.12.2016 на сумму 29 772 748,18 руб.

в) истцом в адрес ООО «СК Реаль» отгружены материалы всего на сумму 37 832 459,32 рублей, согласно нижеприведенной таблице № 2:

№ ТН Дата отгрузки Сумма, руб.

00003906 11.11.2015 62 900

00003576 13.11.2015 193168,36

00003577 13.11.2015 34268,64

00003574 14.11.2015 282000

00003575 17.11.2015 94350

00003578 17.11.2015 558642,11

00003579 17.11.2015 558078,11

00003580 17.11.2015 342135,07

00003635 18.11.2015 456934,75

00003767 27.11.2015 24000

00003757 30.11.2015 240840,04

00003795 30.11.2015 12505,97

00003837 01.12.2015 278100

00003695 02.12.2015 550432,09

00003697 03.12.2015 73579,62

00003743 03.12.2015 1300

00003758 03.12.2015 543856,77

00003759 04.12.2015 530137,93

00003907 05.12.2015 244125

00003905 10.12.2015 262500

00003953 17.12.2015 179225

00003954 22.12.2015 580125

00003952 25.12.2015 190389,96

00003955 28.12.2015 58860

00000097 05.01.2016 144425

00000098 09.01.2016 126000 1

00000099 09.01.2016 4516,50

000000100 11.01.2016 4516,50

000000101 12.01.2016 6622

00000036 13.01.2016 43164

000000102 13.01.2016 4816,50

00000038 14.01.2016 46560

000000104 15.01.2016 441000

000000121 15.01.2016 7742,59

000000105 16.01.2016 4816,50

000000118 17.01.2016 168000

000000106 18.01.2017 90022

00000039 21.01.2016 522267,02

00000037 22.01.2016 66708

000000107 22.01.2016 6422

000000176 23.01.2016 6022

000000145 27.01.2016 10323,46

000000154 29.01.2016 353400

000000157 02.02.2016 503395,15

000000158 02.02.2016 503647,15

000000159 02.02.2016 516091,99

000000160 02.02.2016 332377,97

000000175 02.02.2016 141750

000000155 05.02.2016 506091,01

000000178 05.02.2016 173622

000000177 08.02.2016 522375

000000156 09.02.2016 516365,93

000000223 09.02.2016 10323,46

000000224 09.02.2016 12505,97

000000218 10.02.2016 141000

000000220 11.02.2016 15000

000000216 12.02.2016 21150

000000351 12.02.2016 133875

000000352 12.02.2016 189000

000000348 13.02.2016 551250

000000225 15.02.2016 25011,95

000000228 19.02.2016 60480

000000256 19.02.2016 514842,06

000000295 19.02.2016 88905,59

000000321 29.02.2016 630000

000000330 29.02.2016 413944,16

000000320 01.03.2016 510244,29

000000322 02.03.2016 351750

000000344 02.03.2016 546009,99

000000359 02.03.2016 18590

000000417 07.03.2016 525300

000000374 11.03.2016 545726,94

000000412 11.03.2016 236900

000000408 14.03.2016 396375

000000414 16.03.2016 215250

000000604 17.03.2016 54361,11

000000507 19.03.2016 84000

000000528 23.03.2016 21885,45

000000479 25.03.2016 39287

00000605 25.03.2016 412000

00000579 26.03.2016 262500

00000532 27.03.2016 216300

00000543 28.03.2016 77920

00000548 29.03.2016 553645

00000549 29.03.2016 533577,57

00000620 30.03.2016 483166,5

00000612 31.03.2016 26204,85

00000613 31.03.2016 33623,42

00000614 31.03.2016 65005,29

00000624 31.03.2016 52499,99

00000607 01.04.2016 669865,52

00000644 01.04.2016 15800

00000774 01.04.2016 2911

00000778 02.04.2016 250111

00000608 04.04.2016 667112,99

00000779 04.04.2016 5822

00000634 05.04.2016 36013,6

00000780 05.04.2016 435511

00000672 06.04.2016 595652,5

00000676 06.04.2016 187550,05

00000677 06.04.2016 97432,69

00000769 06.04.2016 5822

00000770 07.04.2016 227832,5

00000763 08.04.2016 2911

00000660 14.04.2016 36305,06

00000791 14.04.2016 463500

00000728 19.04.2016 17195,72

00000789 19.04.2016 249600

00000806 19.04.2016 22950

00000726 20.04.2016 19356,48

00000790 20.04.2016 362400

00000819 22.04.2016 153600

00000816 26.04.2016 451200

00000849 28.04.2016 678006,03

00000929 29.04.2016 670400

00000915 30.04.2016 24518,21

00000928 04.05.2016 225000

00000850 05.05.2016 871596,55

00000851 05.05.2016 744686,33

00000918 05.05.2016 453600

00000921 06.05.2016 14840

00000950 06.05.2016 826882,04

00001019 10.05.2016 232800

00001050 11.05.2016 921468,36

00000979 12.05.2016 893507,94

00001024 21.05.2016 30749,55

00001036 23.05.2016 352750

00001040 26.05.2016 875529,54

00001041 26.05.2016 851472,38

00001085 30.05.2016 178450

00001086 30.05.2016 381800

00001094 02.06.2016 17050

100001140 02.06.2016 1 70550

00001162 07.06.2016 448200

00001159 10.06.2016 851275,02

00001212 10.06.2016 16359,81

00001217 21.06.2016 853212,17

00001249 22.06.2016 176375

г) истцом на расчетный счет ООО «СК Реаль» были перечислены денежные средства (авансовые платежи) в размере 11 850 000 руб., согласно платежных поручений за №:

1900 от 23.11.15 на сумму 1 25000 руб. 

2065 от 16.12.2015 г. на сумму 1 600 000 руб. 

121 от 28.01.2016 г. на сумму 1 000 000 руб.

199 от 09.02.2016 г. на сумму 1 400 000 руб. 

401 от 11.03.2016 г. на сумму 479 000 руб. 

777 от 19.05.2016 г. на сумму 2 000 000 руб.

945 от 16.06.2016 г. на сумму 2 000 000 руб.

404 от 14.03.2016 г. на сумму 1 621 000 руб. 

513 от 30.03.2016 г. на сумму 500 000 руб.

д) истцом были оказаны ООО «СК Реаль» генподрядные услуги на общую сумму 1 865 712,50 руб., согласно:

акту № 904 от 31.12.15 г. на сумму 120 412,07 руб. 

акту № 00000014 от 31.01.16 г. на сумму 224 578,22 руб.

акту № 00000055 от 29.02.16 г. на сумму 138 088,38 руб.

акту № 00000109 от 30.03.16 г. на сумму 204 444,63 руб.

акту № 00000137 от 30.04.16 г. на сумму 475 547,51 руб.

акту № 00000200 от 31.05.16 г. на сумму 351 958 руб. 

акту № 00000346 от 31.10.16 г. на сумму 766 954,68 руб. 

акту № 00000356 от 30.11.16г. на сумму 237 386,23 руб.

акту № 00000412 от 31.12.16 на сумму 46 342,78 руб.

е) истцом были приняты работы от ООО «СК Реаль» на общую сумму 7 768 584,95 руб., согласно:

акту по форме КС 2 № 22 от 31.12.16 на сумму 1 158 569,51 руб.

акту по форме КС 2 № 22 от 30.11.16 на сумму 5 934 655,86 руб.

акту по форме КС 2 № 20 от 31.10.2016 г. на сумму 1 464 626,17 руб.

акту по форме КС 2 № 18 от 31.05.2016 г. на сумму 7 802 553,79 руб. 

акту по форме КС 2 № 20 от 31.10.2016 г. на сумму 1 464 626,17 руб. 

акту по форме КС 2 № 11 от 30.04.2016 г. на сумму 2 426 558, 50 руб., акту по форме КС 2 № 12 от 30.04.2016 г. на сумму 1 282 419, 63 руб., акту по форме КС 2 № 13 от 30.04.2016 г. на сумму 494 289, 39 руб., 

акту по форме КС 2 № 14 от 30.04.2016 г. на сумму 7 064 275, 32 руб., акту по форме КС 2 № 15 от 30.04.2016 г. на сумму 438 294,21 руб.,

акту по форме КС 2 № 16 от 30.04.2016 г. на сумму 182 850, 68 руб.

акту по форме КС 2 № 10 от 31.03.2016 г. на сумму 5 111 115,68 руб. 

акту по форме КС 2 № 7 от 29.02.2016 г. на сумму 25 057,09 руб.

акту по форме КС 2 № 8 от 29.02.2016 г. на сумму 382 542,16 руб.,

акту по форме КС 2 № 9 от 29.02.2016 г. на сумму 3 044 610,30 руб. 

акту по форме КС 2 № 5 от 31.01.2016 г. на сумму 155 010,17 руб.,

акту по форме КС 2 № 6 от 31.01.2016 г. на сумму 1 104 593,96 руб.,

акту по форме КС 2 № 4 от 31.01.2016 г. на сумму 2 710 973, 82 руб.,

акту по форме КС 2 № 2 от 31.01.2016 г. на сумму 1 628 801,99 руб.,

акту по форме КС 2 № 3 от 31.01.2016 г. на сумму 15 075,61 руб.

акту по форме КС 2 № 20 от 31.10.2016 г. на сумму 1 464 626,17 руб. акту по форме КС 2 № 1 от 31.12.2016 г. на сумму 3 010 301,75 руб. 

ё) истцом были оказаны ООО «СК Реаль» услуги по электроэнергии на общую сумму 116 749,47руб., согласно:

акту № 852 от 30.11.15 г. на сумму 1 327,77 руб.

акту № 00000929 от 31.12.15 г на сумму 16 918,62 руб. 

акту № 00000036 от 31.01.16 г. на сумму 34 842,25 руб. 

акту № 00000078 от 29.02.16 г. на сумму 8577,14 руб.

акту № 00000128 от 31.03.16 г. на сумму 25841,08 руб.

акту № 00000173 от 30.04.16 г. на сумму 24636,28 руб.

акту № 00000232 от 31.05.16 г. на сумму 2050,16 руб. 

акту № 00000282 от 30.06.16 г. на сумму 997,64 руб. 

акту № 00000297 от 31.07.16 г. на сумму 1558,53 руб.

Согласно бухгалтерским данным истца в рамках заключенного договора 2 у ООО «СК Реаль» перед истцом - ООО «Грань ЖилСтрой» образовалась задолженность в размере 6 222 254, 76 руб., из которых:

- долг за электроэнергию, в размере 29 242,61 руб.,

- долг за ген. услуги, в размере 702 641, 69 руб.,

- долг по выставленной и неоплаченной претензии (штрафные санкции), на общую сумму 50 000 руб.,

- долг по переданному, но неиспользованному материалу, в размере 5 440 370,46 руб.

Стоимость неизрасходованного материала определена ООО «Грань ЖилСтрой» по актам выполненных работ, подписанными сторонами. На текущую дату наличие данного материала, пригодного для дальнейшего использования и имеющего для ООО «Грань ЖилСтрой» потребительскую ценность ООО «СК Реаль» не подтвердило. Факт передачи ООО «СК Реаль» материала подтвержден товарными накладными, содержащими подпись представителя ООО «СК Реаль», принявшего товар.

Обязанности по хранению, целевому использованию и соответствующему учету полученного от ООО «Грань ЖилСтрой» материала, а также по возврату неиспользованного материала законом возложены на подрядчика - ООО «СК Реаль».

ООО «СК Реаль»» не представлено документальных доказательств возврата материала в спорном объеме, не представлены соответствующие накладные либо акты приема передачи материальных ценностей, либо иные доказательства.

Согласно п. 3.13 Договора 1 и п. 3.13. Договора 2, субподрядчик (ООО «СК Реаль») выплачивает Генподрядчику (ООО «Грань ЖилСтрой») вознаграждение за генподрядные услуги в размере 4% от Договорной цены.

Таким образом, ООО «СК Реаль» ненадлежащим образом исполнил свои обязательства, предусмотренные Договором 1, Договором 2.

Согласно части 1 статьи 1102 ГК РФ Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Согласно статьи 363 ГК РФ поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Учитывая изложенное, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению в размере 6336647,23 рублей, из которых долг за электроэнергию, в размере 29 242,61 руб., долг за ген. услуги, в размере 702 641, 69 руб., долг по выставленной и неоплаченной претензии (штрафные санкции), на общую сумму 50 000 руб., долг по переданному, но неиспользованному материалу, в размере 5 440 370,46 руб.

На основании части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса РФ в пользу истца с ответчиков в порядке возврата подлежит взысканию государственная пошлина в размере 39883 рублей.

Руководствуясь статьями 194, 198,235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Грань ЖилСтрой» к ФИО1 о взыскании задолженности по договору подряда удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Грань ЖилСтрой» задолженность в размере 6336647 (шесть миллионов триста тридцать шесть тысяч шестьсот сорок семь) рублей 23 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 39883 (тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят три) рублей. 

Ответчики вправе подать в Советский районный суд г. Казани заявление об отмене заочного решения суда в течение 7 дней со дня получения копии этого решения.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Татарстан через Советский районный суд города Казани в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения суда, а в случае, если такое заявление подано - в течение одного месяца со дня вынесения определения об отказе в удовлетворении этого заявления. 

Судья Р.М.Шарифуллин