Дело №2-249/2019

24RS0048-01-2018-004664-67

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 мая 2019 года Советский районный суд г.Красноярска в составе: 

председательствующего судьи Яниевой А.А., 

при секретаре Пилюгиной Ю.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 ФИО8 к Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» об обязании выполнить техническое присоединение, Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» к ФИО1 ФИО9 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, признании договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям недействительным, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «МРСК Сибири» об обязании последнего осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта – жилого дома, расположенного (который будет располагаться) по адресу: Россия, 

<

адрес> (кадастровый №), взыскании компенсации морального вреда в размере 15 000 рублей, расходов по оплате юридических услуг в размере 15 000 рублей, расходы на нотариальную доверенность в размере 1 500 рублей, штрафа, мотивируя заявленные требования тем, что истец является собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> между истцом и ПАО «МРСК Сибири» (Сетевая организация) заключен Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.1234.16 от 24.02.2016 года, согласно условиям которого Сетевая организация принимает на себя обязанность по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома Заявителя, а Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение. Согласно п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. Дополнительным соглашением №1 от 20.07.2016 года срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению был продлен до 30.12.2017 года. В силу п.6 договора технологического присоединения Сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. В соответствии с п.10 договора технологического присоединения размер платы составляет 550 рублей, которая оплачена истцом. Однако в установленный договором срок работы ответчик не выполнил. 

ПАО «МРСК Сибири» обратилось с исковым заявлением, уточненным в ходе судебного разбирательства в суд, к ФИО1 о признании недействительным договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.1234.16 от 24.02.2016 года заключенный с ФИО1, о расторжении указанного договора, мотивируя заявленные требования тем, что в ходе осуществлений мероприятий по технологическому присоединению было установлено, что дом, расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка № уже имеет технологическое присоединение к сетям дачного некоммерческого партнерства «Колос-2006», осуществляется энергоснабжение вышеуказанного дома. Ответчиком производится оплата потребленной электрической энергии. В 2008 году с ДНИ «Колос-2006» был заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям №20.24.8448.08 от 17.12.2008 г. на 630 кВт по земельному участку к.н. №, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения дачного строительства, общая площадь 58 867,00 кв.м, адрес местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, мкр. «Чистые пруды», уч. №. Исходя из кадастрового паспорта земельного участка кадастровый №. Земельный участок с кадастровым номером № являлся исходным для земельного участка с кадастровым номером 24:11:0090102:368 (на дату 01.04.2010г.). В 2013 году с ДНП «Колос-2006» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения №20.2400.8590.13 от 27.12.2013г., на увеличение мощности, в качестве правоустанавливающего было предоставлено свидетельство о государственной регистрации права 

<

адрес> на земельный участок общей площадью 58 867 кв.м. с кадастровым номером № на физическое лицо ФИО2, который является председателем ДНП «Колос-2006». Поскольку спорный земельный участок ранее был присоединен к электрическим сетям, ПАО «МРСК Сибири» вынуждено обратиться в суд с настоящим исковым заявлением, которое просит удовлетворить.

Определением Советского районного суда г.Красноярска от 22.08.2017 года, объединены в одно производство гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ПАО «МРСК Сибири» об обязании выполнить техническое присоединение и гражданское дело по исковому заявлению ПАО «МРСК Сибири» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения е электрическим сетям. 

В судебном заседании истец ФИО1, его представитель – ФИО3, действующая на основании доверенности в порядке передоверия от 15.02.2019 года исковые требования поддержали в полном объеме, исковые требования ПАО «МРСК Сибири» не признали. 

Председатель ДНП «Колос» - ФИО4, действующий на основании протокола общего собрания в судебном заседании с исковыми требованиями согласился, исковыми требованиями ПАО «МРСК Сибири» не согласился. 

Представитель ответчика (истца) ПАО «МРСК Сибири», третье лицо ФИО2 в судебное заседание не явились, о времени месте рассмотрения дела извещены своевременно, надлежащим образом, что подтверждается распиской и конвертом, возвращенным в адрес суда. 

Суд, полагает возможным рассмотрение гражданского дела в отсутствии неявившегося ответчика, третьего лица в соответствии с положениями ст.167 ГПК РФ. 

Выслушав участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, суд полагает исковые требования ФИО1 подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно положениям п.1 ст.26 Федерального закона от 26.03.2003 года №35-Ф3 «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Под однократностью понимается разовое осуществление процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также построенных линий электропередач и так далее.

При этом, ни смена собственника энергоустановки, земельного участка, ни смена собственника или формы собственности организации от сетей которых присоединен потребитель, ни смена статуса сетей (бесхозные) не влияет на невозможность повторного присоединения.

Согласно пункту 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами п. 16. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Заключение договора об осуществлении технологического присоединения происходит на основании Заявки с закрытым перечнем документов, предоставляемых Заявителем. Запрашивать иные документы, не предусмотренные перечнем Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, сетевая организация не имеет право.

Таким образом, в соответствии с приведенными нормами, договор технологического присоединения обязателен к заключению для Сетевой организации только на основании тех документов, которые Заявитель приложил к заявке.

Согласно ч.1 ст.307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (ч.2 ст.307 ГК).

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ч.1 ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Как установлено судом, 24.02.2016 года между ПАО «МРСК Сибири» (Сетевая организация) и ФИО1 (Заявитель) был заключен Договор №20.2400.1234.16 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя для электроснабжения дачного дома, расположенного по адресу: Россия, 

<

адрес> (кадастровый номер земельного участка №), точка (и) присоединения (в соответствии с техническими условиями и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя). 

Согласно п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. 

В соответствии с п.6 договора ПАО «МРСК Сибири» обязалось: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе, по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в предыдущем абзаце, с соблюдением срока осуществления технологического присоединения, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничении балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю. 

Согласно п.7 договора сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. 

Дополнительным соглашением №1 от 20.07.2016 года срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению был продлен до 30.12.2017 года.

В соответствии с п.10 договора заявитель обязался оплатить услуги ответчика в размере 550 рублей, в том числе, НДС 18% в сумме 83,90 рублей. Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе, по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению, в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, заявитель обязан уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий (п.8 договора).

В соответствии с п.10 технических условий №8000266051, являющихся Приложением №1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.1234.16, Сетевая организация от От ВЛ-10 кВ ф. № 134-2 до ТП-10/0,4 кВ (п. Ю.а.) обязуется запроектировать и построить ЛЭП – 10 кВ. Марку и сечение провода, способ прокладки определить проектом; Запроектировать и построить ТП-10/0,4 кВ. Тип и мощность силового трансформатора определить проектом; Установить линейный разъединитель на отпаечной ВЛ-10 кВ. Тип разъединителя и место установки определить проектом; От проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ. Марку и сечение провода определить проектом. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих энергетических сетей филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 №87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п.5 договора). 

Дополнительным соглашением №1 от 20.07.2016 года срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению был продлен до 30.12.2017 года.

Согласно чека-ордера от 01.03.2016 года ФИО1 оплатил ПАО «МРСК Сибири» денежные средства в размере 550 рублей.

21.12.2017 года ФИО1 направил уведомление о выполнении технических условий по технологическому присоединению к электрическим сетям. Указанное уведомление получено ПАО «МРСК – Сибири», однако до настоящего времени технологическое присоединение не осуществлено. 

Оценив представленные доказательства по правилам ст.67 ГПК РФ в их совокупности и взаимосвязи, руководствуется положениями п.п.1,2 ст.401 ГК РФ, п.1 ст.26 Федерального закона «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года №861, которым утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, учитывая тот факт, что ПАО «МРСК Сибири» нарушило условия заключенного с истцом договора, в течение 6 года не выполнило работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: Россия, 

<

адрес> (кадастровый номер земельного участка №), в точке (ах) присоединения, определенной техническими условиями, срок является предельным, его продление не допустимо, а также то, что бездействие ответчика не было обусловлено объективными причинами, с учетом того, что ПАО «МРСК Сибири» не выполнило определенный объем работ по исполнению принятых на себя обязательств по договору от 21.02.2016 года, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению, и с учетом разумности, объема выполнения обязательных технические и согласовательных процедур, соблюдения баланса интересов сторон договора, полагает возможным обязать ПАО «МРСК Сибири» в течение 2-х месяцев исполнить обязательства по Договору №20.2400.1234.16 от 24.02.2016 года, заключенного между ПАО «МРСК Сибири» и ФИО1, с момента вступления решения суда в законную силу.

Поскольку в судебном заседании установлен факт нарушения ответчиком прав истца ввиду ненадлежащего исполнения договорных обязательств и вина ответчика в нарушении прав, учитывая положения Закона РФ «О защите прав потребителей», ст.ст. 151, 1101 ГК РФ, исходя из принципа разумности и справедливости, суд определяет ко взысканию с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 2 000 рублей.

Принимая во внимание положения ч.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей», поскольку при рассмотрении дела установлено, что требования истца в добровольном порядке ответчиком в срок, согласованный сторонами и до настоящего времени не удовлетворены, доказательства обратного в деле отсутствуют, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 1 000 рублей, исходя из следующего расчета: 1 000 рублей х 50%. 

В соответствии со ст.88 ГПК РФ судебные расходы состоят из издержек, связанных с рассмотрением дела. 

В соответствии со ст.94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся, в том числе, расходы на оплату услуг представителей.

В соответствии со ст.100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Учитывая положения ст.100 ГПК РФ, разрешая вопрос о размере возмещения расходов на оплату юридических услуг в размере 15 000 рублей, и оформления нотариальной доверенности 1 500 рублей исходя из объема и категории дела, его сложности, представления соответствующих доказательств, объема работы в судебных заседаниях, а также исходя из принципа разумности и соразмерности, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца в счет оплаты юридических услуг 15 000 рублей, а также по оформлению нотариальной доверенности 1 500 рублей, которая является разумной, достаточной и справедливой, не нарушает прав ни одной из сторон по делу, так как находится в пределах суммы, уплаченной истцом за оказанные услуги и в полной мере соответствует сложности дела, характеру спора и объему работы, выполненной представителем, и подтверждены документально. 

Рассматривая исковые требования ПАО «МРСК Сибири» о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, о признании договора недействительным, суд приходит к следующему. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, ФИО1 на основании Договора дарения от 08.05.2015 года является собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, разрешенное использование: для ведения дачного строительства, общей площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером №, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права выданное 19.05.2015 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Указанный земельный участок расположен на территории ДНП «Колос-2006», образованного в 2006 году.

03.08.2009 года между ОАО «МРСК Сибири» и ДНП «Колос-2006» подписан акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, установлены границы эксплуатационной ответственности ДНП «Колос-2006» по адресу: 

<

адрес> с характеристиками присоединения: максимальная мощность: 630 кВА; точки присоединения расположены на опоре №47 ВЛ-10 кВ ф 134-2. К указанному акту прилагается схема расчета за потребленную электроэнергию, перечень объектов, перечень расчетных приборов учета, являющаяся его неотъемлемой частью.

03.02.2010 года между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ДНП «Колос-2006» заключен договор энергоснабжения №140364, в рамках которого ОАО «Красноярскэнергосбыт» обязалось осуществлять продажу электрической энергии, а также путем заключения договоров с третьими лицами обеспечить передачу электрической энергии и предоставление иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией потребителей, в количестве, определенном в соответствии с ежегодно договорными объемами потребления электроэнергии (мощности) по настоящему договору, с помесячной детализацией и категорией надежности электроснабжения, соответствующей выполненному технологическому присоединению в установленном законодательством РФ порядке.

27.12.2013 года между ОАО «МРСК Сибири» и ДНП «Колос-2006» заключен Договор №24.2400.8590.13 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их реконструкцию, проектирование и строительство) к присоединению знергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащим им объектов электросетевого хозяйства с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 1260 кВт (увеличение мощности на 630 кВт); категория надежности 3; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 630 кВт.

Согласно п.1.2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта заявителя: коттеджный поселок (42 дома), расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №.

Согласно выписке ЕГРН в указанный коттеджный поселок входит и участок ФИО1, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> №.

27.12.2013 года приложением №3 к вышеуказанному Договору об осуществлении технологического присоединения составлен акт выполненных работ, подписанный обеими сторонами, согласно которому договор исполнен в полном объеме.

16.02.2016 года ФИО1 обратился в ОАО «МРСК Сибири» с заявкой (как указано, впервые) на технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт объекта – жилого дома, по адресу: 

<

адрес> № со следующими характеристиками: 15 кВт, 380 вольт, с уровнем надежности энергопринимающих устройств 3 категории.

24.02.2016 года между ПАО «МРСК Сибири» и ФИО1 заключен Договор №20.2400.1234.16 об осуществлении технологического присоединения, в соответствии с которым сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, а заявитель – оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома по адресу: 

<

адрес> №, кадастровый номер земельного участка №

В соответствии с п.6 договора сетевая организация обязалась надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

К указанному договору приложены Технические условия предусматривающие мероприятия, выполняемые каждой из сторон договора.

Согласно п.10 указанного договора размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей.

Пунктом 5 договора предусмотрен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

ФИО1 предусмотренные договором обязательства выполнила, оплатив стоимость технологического присоединения, а также вручив ПАО «МРСК Сибири» 21.12.2017 года уведомление о выполнении ею технических условий.

Обращаясь в суд с исковым заявлением, ПАО «МРСК «Сибири» ссылается на тот факт, что №20.2400.1234.16 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 24.02.2016 года заключен с ФИО1 в нарушение предусмотренного ст.26 Федерального закона «Об электроэнергетике» принципа однократности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, при этом исходил из того, что земельный участок ФИО1 расположен на территории ДНП «Колос-2006», которое присоединено к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» на основании Договора на осуществление технологического присоединения №20.2400.8590.13 от 27.12.2013 года, в ДНП «Колос-2006» имеются коммунальные сети электроснабжения, которые позволяют передавать необходимую мощность

Согласно п.1 ст.166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Пунктом 1 ст.422 ГК РФ предусмотрено, что договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В соответствии с положениями ст.450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Согласно п.1 ст.26 Федерального закона «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора на осуществление технологического присоединения к объектам электросетевого устройства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом который носит публичный характер.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года №861 (далее Правила).

Согласно п.2 (2) указанных Правил (в редакции на момент заключения договора) их действие распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, принадлежащих садоводческому, огородническому или данному некоммерческому объединению либо его членам, а также гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, максимальная мощность которых изменяется.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.

Пунктом 8 (5) Правил установлено, что в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию указанным некоммерческим объединением либо его представителем. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию непосредственно гражданами, ведущими садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, или иными лицами.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется к сетям сетевой организации непосредственно или с использованием объектов инфраструктуры и другого имуществе общего пользования этого объединения.

При этом садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение не вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или иного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории этого объединения, и требовать оплату.

В соответствии с п.3 Правил сетевая организация обязана выполнить отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения ими настоящих правил и наличии фактической возможности технологического присоединения. Независимо от подключения или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п.п.12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое соединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее – заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В п.14 Правил указаны физические лица, обратившиеся в целях в технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Таким образом, при разрешении искового заявления ПАО «МРСК Сибири» юридически значимыми обстоятельствами, подлежащими установлению по делу, является наличия либо отсутствия фактического технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО1 к электрическим сетям с использованием инфраструктуры ДНП, а также вопрос относительно его членства в ДНП.

Как следует из материалов дела, ФИО1 не является членом ДНТ «Колос-2006» и не имеет подключения к электрическим сетям ДНТ «Колос-2006». 

При таких обстоятельствах, учитывая отсутствие технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО1 к электрическим сетям, в том числе, и ДНП «Колос-2006», а также принимая во внимание, что в соответствии с Правилами технологического присоединения, действующими на момент заключения договора, ФИО1 не являлся членом ДНП «Колос-2006», то есть вправе был подать заявку на технологическое присоединение непосредственно в сетевую организацию, которая обязана заключить с ним договор независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения, у суда не имеется оснований для признания оспариваемого Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.1234.16 от 24.02.2016 года недействительным как и оснований для расторжения указанного договора.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ПАО «МРСК Сибири» подлежит взысканию государственная пошлина в доход бюджета городского округа г.Красноярска в размере 600 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО1 ФИО10 к Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» об обязании исполнить обязательства по технологическому присоединению, взысканию денежных средств – удовлетворить частично. 

Обязать Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» исполнить обязательства по технологическому присоединению в соответствии с условиями Договора №20.2400.1234.16 от 24.02.2016 года о технологическом присоединении в течение 2-х месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. 

Взыскать с Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в пользу ФИО1 ФИО11 в счет компенсации морального вреда 2 000 рублей, расходы на оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей, по оформлению нотариальной доверенности 1 500 рублей, штраф в размере 1 000 рублей, всего 19 500 рублей. 

Исковые требования Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» к ФИО1 ФИО12 о расторжении Договора №20.2400.1234.16 от 24.02.2016 года о технологическом присоединении, о признании Договора №20.2400.1234.16 от 24.02.2016 года о технологическом присоединении недействительным, оставить без удовлетворения. 

Взыскать с Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в доход бюджета городского округа г.Красноярска государственную пошлину в размере 600 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Советский районный суд г.Красноярска путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий: А.А. Яниева 

Дата изготовления решения в окончательной форме – 24.05.2019 года.