Дело № 2-1923/2025 

УИД 76RS0024-01-2025-001776-85

Мотивированное 

решение

 изготовлено 25.09.2025 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

28 августа 2025 года г. Ярославль

Фрунзенский районный суд г. Ярославля в составе суда председательствующего судьи Ивахненко Л.А., при секретаре Фенютиной Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО9 к ПАО «

<

данные изъяты>», о защите прав потребителей в связи с нарушением срока осуществления технологического присоединения к электрическим сетям,

У С Т А Н О В И Л:

Истец ФИО10 обратился в су с иском к ПАО «

<

данные изъяты>», просит: 

Обязать ПАО «

<

данные изъяты>» исполнить обязательства по Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №НОМЕР, заключенного ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер земельного участка: НОМЕР в течение ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА месяца с даты вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ПАО «

<

данные изъяты>» договорную неустойку за период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. в размере 

<

данные изъяты>, у

Взыскать с ПАО «

<

данные изъяты>» компенсацию морального вреда, который в размере 

<

данные изъяты>.

Заявленные требования мотивирует тем, что между истцом и ПАО «

<

данные изъяты>» (сетевая организация) был заключен онлайн Договор №НОМЕР об осуществлении технологического присоединения.

По обязательствам указанного Договора Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя нежилой застройки (хозяйственной постройки, нежилого здания), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом характеристик, предусмотренных условиями Договора. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения нежилой постройки по 

<

адрес> (кадастровый номер земельного участка: НОМЕР) (п.

<

данные изъяты> Договора). Указанный земельный участок принадлежит истцу на праве собственности, что подтверждается выпиской из ЕГРН.

Технические условия являются неотъемлемой частью Договора. Срок действия технических условий составляет 

<

данные изъяты> год со дня заключения настоящего Договора (до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА.)

Пункт 

<

данные изъяты> Договора предусматривает обязанность истца как Заявителя оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с п. 

<

данные изъяты> Договора размер платы за технологическое присоединение определялось в соответствии с Приказом Департамента регулирования тарифов ЯО от 29.11.2022г. №363-стс и составил 

<

данные изъяты>., в т.ч. НДС-20% - 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>.

В соответствии с п.

<

данные изъяты> Договора, он считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.

Пунктом 

<

данные изъяты> Договора предусмотрено, что датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на счет сетевой организации.

Оплата была произведена по реквизитам Ответчика ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года в размере 

<

данные изъяты>, что подтверждается чеком об оплате. В этой связи Договор вступил в действие с указанной даты и свои обязательства по оплате истец исполнил.

Согласно п.

<

данные изъяты> Договора Сетевая организация обязалась надлежащим образом исполнить свои обязательства по договору.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, согласно п.

<

данные изъяты>

Договора, составлял 

<

данные изъяты> месяцев со дня заключения Договора.

Однако, в нарушение принятых на себя обязательств по Договору, Ответчиком по состоянию на текущую дату работы по осуществлению технологического присоединения в рамках договора не исполнены, дополнительных соглашений о продлении сроков исполнения Ответчик в адрес истца не направлял.

Истец неоднократно обращался к Ответчику с письмами и претензиями, однако электроснабжением принадлежащий истцу земельный участок до настоящего времени не обеспечен, что нарушает его права как заказчика услуг и потребителя.

Учитывая длительный период просрочки исполнения обязательств по Договору, допущенный со стороны Ответчика, истец лишен возможности использовать земельный участок для строительства дома, хозяйственных построек (бани, сарая), испытывает переживания по данному поводу, а также не имеет возможности обратиться к другому подрядчику за выполнением указанных работ. Внесенные истцом по Договору денежные средства не возвращены и стоимость обусловленных Договором работ за период просрочки исполнения обязательства могла значительно увеличиться в ценовом соотношении. Возможности дополнительно оплачивать услуги в настоящий момент не имеет.

Согласно п. 

<

данные изъяты> Договора, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 

<

данные изъяты> процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки. Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходов в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки. Так, согласно расчету, размер неустойки по состоянию на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. составляет 

<

данные изъяты> руб.

В судебном заседании истец ФИО11., его представитель ФИО12. заявленные требования поддержали в полном объеме по основаниям, изложенным в иске. 

Представитель ответчика ПАО «

<

данные изъяты>» по доверенности ФИО13 в судебном заседании не участвовал, ходатайств, заявлений не представил, ранее представил письменный отзыв на иск, в котором в удовлетворении заявленных требований возражал в полном объеме.

Иные лица, участвующие в деле, явку не обеспечили, ходатайств, заявлений суду не представили. 

Суд определил рассмотреть заявленные требования при имеющейся явке, в порядке заочного судопроизводства. 

Заслушав пояснения истца, представителя, исследовав письменные материалы дела, в том числе представленный истцом фотоматериал, суд приходит к следующему. 

Из материалов дела видно, что между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО14 заключен договор об осуществлении технологического присоединения № НОМЕР.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно п. 

<

данные изъяты> договора составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Во исполнение пп. а п. 18 Правил технологического присоединения, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г., сетевая организация подготовила и выдала заявителю технические условия - Приложение №

<

данные изъяты> к договору, для технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО15 к электрическим сетям ПАО «

<

данные изъяты>».

Указанные технические условия являются неотъемлемой частью договора (п. 

<

данные изъяты> Договора) и определяют объем мероприятий, необходимых для выполнения обеими сторонами в целях осуществления технологического присоединения (п. 

<

данные изъяты> ТУ).

В соответствии с п. 

<

данные изъяты>. Технических условий, заявитель обязан предусмотреть строительство ВЛИ/КЛ 0,4 кВ от точки присоединения на границе земельного участка до ВРУ; укомплектовать ВРУ защитой or перенапряжения, вводным коммутационным аппаратом, оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети, обеспечивающей контроль величины максимальной мощности; оснастить ВРУ защитным заземлением, защитным уравниванием потенциалов, устройством защитного отключения, провести необходимые измерения и испытания электрооборудования.

Вместе с тем, принимая во внимание доводы истца по иску, суд предложил ответчику представить доказательства, отвечающие требованиям относимости и допустимости, того, что по указанному договору ответчиком в полном объеме выполнены работы по организации технологического присоединения на уровне напряжения не ниже 0,4 кВ, в том числе представить копию акта приема –передачи выполненных работ, таких доказательств суду не представлено и ответчик на факт выполнение работ не ссылается. 

Возражая в удовлетворении требований по иску, ответчик указывает, что п. 85 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.. .», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее - «Правила») устанавливает также обязанность заявителя уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий. При этом, к уведомлению о выполнении технических условий заявитель должен приложить перечень определенных документов, а именно:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения,обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схемевнешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производствуэлектрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, иобосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), вслучае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевуюорганизацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления овыполнении технических условий (если в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о градостроительной деятельности разработка проектной документацииявляется обязательной);

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочныхработ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объектаэлектроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений(электроустановки).

Пунктом 87 Правил № 861 установлено, что сетевая организация рассматривает представленные заявителем документы, предусмотренные пунктом 85 настоящих Правил, и осуществляет осмотр электроустановок заявителя.

Как указывает ответчик, каких-либо уведомлений или иных сообщений о выполнении мероприятий с приложением необходимых документов в соответствии с условиями договора в пределах срока выполнения мероприятий, установленного п. 5 договора, со стороны истца в сетевую организацию не поступало.

Однако, как видно из определения ФАС по Ярославской и Костромской областям от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г., письмом ПАО «

<

данные изъяты>» направило в адрес Управления график выполнения работ по осуществлению технологического присоединения, в том числе энергопринимающих устройств ФИО16. В соответствии с указанным графиком технологическое присоединение будет осуществлено до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г., т.е. со стороны истца необходимые мероприятия по состоянию на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г. и ранее были выполнены в полном объеме, в то время как ответчик свои обязательства по организации технологического присоединения на уровне напряжения не ниже 0,4 кВ, не выполнил.

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) устанавливает основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической энергии.

Согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Правила №861 определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств. потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

В соответствии с пунктом 3 Правил №861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Пунктом 14 Правил №861 выделена специальная категория заявителей: физические лица, которые направляют заявки в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее - присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил №861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил.

По указанным основаниям следует обязать ПАО «

<

данные изъяты>» исполнить обязательства по Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №НОМЕР, заключенного между мною и Ответчиком ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер земельного участка: НОМЕР) в течение 

<

данные изъяты> месяца с даты вступления решения суда в законную силу.

ПАО «

<

данные изъяты>» должно было исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №НОМЕР, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, в течение 

<

данные изъяты> месяца с даты вступления решения суда в законную силу. Согласно п. 

<

данные изъяты> Договора, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 

<

данные изъяты> процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки. Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходов в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки. Судом расчет неустойки, представленной истцом, проверен, суд полагает, что начисление неустойки должно производиться, начиная с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г. – истечения шестимесячного срока со дня оплаты истцом цены договора – ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г., что составит 

<

данные изъяты> руб. Учитывая последствия для истца вследствие нарушения его прав ответчиком, принимая во внимание, что отсутствие электроэнергии на земельном участке истца препятствует выполнению работ по строительству жилого дома, суд не находит оснований для применения по заявлению ответчика положений ст. 333 ГК РФ в части снижения размера неустойки. 

Требования истца о компенсации морального вреда также являются обоснованными, соответствует положениям ст. 151, 1101 ГК РФ, ст. 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее Закон). При определении размера компенсации морального вреда суд учитывает требования разумности и справедливости, характер причиненных истцу физических и нравственных страданий, оцениваемый с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего (пол, возраст), степень вины нарушителя. При определении размера компенсации морального вреда суд принимает во внимание обстоятельства дела, длительный период неисполнения ответчиком особо значимого для истца обязательства, необходимость обращения истца с заявлениями и жалобами на действия ответчика. На основании изложенного, учитывая требования разумности и справедливости, суд считает, что с ответчика следует взыскать компенсацию морального вреда в истребуемом размере в сумме 

<

данные изъяты> руб. 

Поскольку предусмотренный пунктом 6 статьи 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" штраф взыскивается с ответчика лишь за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, а таковое имело место быть, т.к. ответчиком в добровольном порядке не были удовлетворены требования истца в связи с чем имеются основания для взыскания штрафа в сумме 

<

данные изъяты> руб., на основании ст. 333 ГК РФ по заявлению ответчика, руководствуясь принципом соразмерности суммы штрафа последствиям нарушенного обязательства, суд полагает необходимым снизить размер штрафа до 

<

данные изъяты> руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО17 СНИЛС НОМЕР к ПАО «

<

данные изъяты>», ИНН НОМЕР удовлетворить частично. 

Обязать ПАО «

<

данные изъяты>» в течение 

<

данные изъяты> месяца с даты вступления решения суда в законную силу выполнить работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер земельного участка: НОМЕР) в соответстви с условиями договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года,.

Взыскать с ПАО «

<

данные изъяты>» в пользу ФИО18 неустойку в размере 

<

данные изъяты> руб., компенсацию морального вреда в сумме 

<

данные изъяты> руб., штраф в сумме 

<

данные изъяты> руб. 

Ответчик вправе в течение 7 дней со дня получения копии заочного решения обратиться во Фрунзенский районный суд г. Ярославля с заявлением об отмене заочного решения.

Заочное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ярославский областной суд путем подачи жалобы через Фрунзенский районный суд г. Ярославля в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

Судья Л.А. Ивахненко