Дело № 2-4413/2017 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

29 июня 2017 года

Октябрьский районный суд г.Ижевска в составе: 

председательствующего судьи Кузнецовой Н.В., 

при секретаре Федоровой Н.Л,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Развитие» о защите прав потребителей,

У с т а н о в и л:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО «Строительная компания «Развитие» о взыскании неустойки. Требования мотивированы следующим.

25 августа 2014 года между сторонами заключен договор участия в долевом строительстве № 

<

номер>. В соответствии с условиями договора ответчик принял на себя обязательство передать истцу объект долевого строительства не позднее 29 февраля 2016 года. Истцом обязательства по договору выполнены в полном объеме. Вместе с тем в нарушение условий договора ответчик в установленные договором сроки объект долевого участия истцу не передал. Объект долевого участия передан истцу по акту приема-передачи 17.09.2016. На основании изложенного просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков передачи объекта участнику долевого строительства за период с 01 марта 2016 по 16 сентября 2016 в сумме 114800 руб., штраф за неудовлетворение требований потребителей в добровольном порядке.

В судебное заседание истец не явилась, будучи уведомленной о времени и месте его проведения надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщила. 

Представитель ответчика ФИО2, действующая на основании доверенности, в судебном заседании просила производство по делу прекратить, т.к. по такому же иску уже имеется решение Октябрьского районного суда г.Ижевска от 03.05.2017.

В судебном заседании установлено, что решением Октябрьского районного суда г.Ижевска от 03.05.2017 Иск ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Развитие» о защите прав потребителей удовлетворен частично.

Взыскана с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Развитие» в пользу ФИО1 неустойка по договору участия в долевом строительстве за период с 01.03.2016 по 16.09.2016 в сумме 35 000 руб. 00 коп, штраф за не удовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в сумме 10 000 руб. 00 коп. 

Решение в законную силу вступило 06.06.2017.

В силу ст. 220 ГПК РФ, Суд прекращает производство по делу в случае, если:

…

имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон;

Учитывая то, что имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, суд считает необходимым производство по делу прекратить.

Руководствуясь ст. 220, 224, 225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Производство по делу по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Развитие» о защите прав потребителей прекратить.

Разъяснить истцу, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается

Определение может быть обжаловано в Верховный Суд УР в течение 15 дней через Октябрьский районный суд г.Ижевска. 

Судья Н.В. Кузнецова