Дело № 2-2771/2025

54RS0003-01-2025-002340-56

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 июня 2025 года г. Новосибирск

Заельцовский районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего судьи Березневой Е.И., 

при секретаре Шемендюк А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «ФМГрупп» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась суд с иском к ООО «ФМГрупп» о защите прав потребителей.

В обосновании заявленных исковых требований истец указала, что xx.xx.xxxx года между ООО «ФМГРУПП» (Подрядчик) в лице директора ФИО2 и ФИО1 (Заказчик) был заключен договор строительного подряда __ на выполнение строительства индивидуального жилого одноэтажного дома, по которому исполнитель обязался в срок обозначенный графиком работ выполнить строительные работы, оговоренные в договоре и в дополнительном соглашении __ к договору, который заключен xx.xx.xxxx. Однако, до сегодняшнего дня строительно-монтажные работы по возведению индивидуального жилого дома (бани) в соответствии с проектной документацией ответчиком не выполнены, но заказчиком денежные средства в размере 731 675 руб. ответчику полностью переданы. Истец неоднократно выходила с ответчиком на связь, в том числе при помощи мессенджеров с целью выявления причин неисполнения последним договорных обязательств и не устранения договорных нарушений, однако со стороны ответчика никакого ответа не последовало. xx.xx.xxxx истец направила ответчику претензию с требованием о возврате денежных средств, выплате компенсации морального вреда, расходов на юриста и уплате процентов, ответ на которую не последовал.

На основании изложенного истец просит суд расторгнуть договор строительного подряда __ от xx.xx.xxxx, заключенный между ФИО1 и ООО «ФМГРУПП», а также взыскать с ООО «ФМГРУПП» сумму оплаты в размере 731 675 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 11.07.2024 по 24.04.2025 в размере 114 620,26 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами с 21.03.2025 по день фактического исполнения обязательств, компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., а также расходы по оплате юридических услуг в размере 51 000 руб.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, просила рассматривать дело в свое отсутствие.

Представитель ответчика ООО «ФМГРУПП» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, корреспонденция возвращена за истечением срока хранения.

Кроме того, информация о месте и времени рассмотрения дела была заблаговременно размещена на официальном интернет-сайте Заельцовского районного суда г.Новосибирска в соответствии со ст.ст. 14, 16 Федерального закона от 22.12.2008 N 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».

Руководствуясь положениями статьи 233 Гражданского процессуального кодекса РФ суд рассмотрел дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу ст. 709 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Как указывается в ст. 711 Гражданского кодекса РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

В силу ст. 716 Гражданского кодекса РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу пункта 3 указанной статьи, в случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Согласно пункту 3 статьи 730 Гражданского кодекса РФ к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным Гражданским кодексом РФ, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в частности, отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Судом установлено, что xx.xx.xxxx года между ООО «ФМГРУПП» (Подрядчик) в лице директора ФИО2 и ФИО1 (Заказчик) был заключен договор строительного подряда __ согласно п. 1.1. которого, Подрядчик обязался в соответствии с визуальным решением (Приложение __ к Договору), Планировочным решением (Приложение __ к Договору) выполнить работы по строительству индивидуального жилого одноэтажного дома, а Заказчик обязался принять работу и оплатить ее в полном объеме.

Согласно Разделу 2 Договора, стоимость работ стороны определили в размере 795 000 рублей. Цена за наличный расчет. Заказчик обязуется оплатить цену договора в следующем порядке: при заключении договора заказчик вносит аванс в размере договора в сумме 556 500 руб. – до 11.05.2024; 79 500 руб. – после окончания работ по сборке каркаса, кровля, фасад (п. 2.2 договора); 159 000 руб. – после окончания работ по сборке дома (бани) на производстве перед отправкой.

В соответствии с п.2.1 и п.2.2 договора, xx.xx.xxxx ФИО1 был оплачен аванс в размере 556 500 руб., что подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру __ и в последствии истцом ответчику переданы денежные средства в размере 175175 руб., а всего 731 675 руб.

Разделом 3 Договора установлены обязанности подрядчика по осуществлению строительства объекта в указанные договором сроки (п.3.1.), по выполнению строительства в полном соответствии с договором (п.3.2.), по обеспечению соблюдения правил техники безопасности (п.3.3.), по Приобретению необходимых материалов (п.3.4.), по несению ответственности перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками (п.3.6).

Разделом 5 договора предусмотрено, что по завершению работ подрядчик предоставляет заказчику акт сдачи-приемки работ. Приемка результатов полностью завершенных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком следующих условий: полное и качественное выполнение всех работ согласно Приложения __ (п. 5.1-5.2).

Согласно п. 5.3 договора заказчик с участием подрядчика принимает результат работ и в течение 5 календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки работ обязан направить подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний. Если в указанный срок, оформленный заказчиком акт сдачи-приемки или мотивированный отказ заказчика от приемки работ подрядчику, не поступят, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

Согласно п. 5.5. договора в случае прекращения работ по указанию заказчика стороны обязаны в пятидневный срок со дня прекращения работ составить двухсторонний акт о выполненной части работы и фактических расходах подрядчика.

После составления акта стороны должны в течение 10 дней произвести взаиморасчеты с учетом выполненных подрядчиком работ и выданного ранее аванса.

Наличие недостатков либо частично невыполненных работ, выявленных при приемке работ (этапа), не является основанием для отказа в подписании акта выполненных работ Заказчиком. При этом Подрядчик обязан указать в акте выполненных работ объемы и сроки устранения недостатков и/или невыполненных работ (п. 5.6 договора).

Пунктом 6.4. Договора предусмотрен гарантийный период на выполненные работ сроком 12 месяцев.

Так, сроки выполнения работ согласованы сторонами в приложении __ к договору и составляли: 30 рабочих дней - сборка модульного дома (бани); 3 рабочих дня -доставка; сваи и обвязку монтирует заказчик; 5 рабочих дней- установка веранды при подписании доп.соглашения.

xx.xx.xxxx между ФИО1 и ООО «ФМГРУПП» было заключено дополнительное соглашение к договору строительного подряда __ согласно которому были внесены изменения в п. 1 графика работ (приложение __ к договору строительного подряда) в связи с чем срок выполнения работ составил: 35 рабочих дней - сборка модульного дома (бани); 3 дня - доставка; «смонтировано заказчиком» - сваи; 5 рабочих дней - обвязка; 5 рабочих дней- установка веранды при подписании доп.соглашения.

xx.xx.xxxx истцом в адрес ответчика была направлена претензия, согласно которой истец просила вернуть денежные средства в размере 731 675 руб., возместить причиненный моральный вред в размере 100 000 руб., расходы по оплате юридических услуг в размере 51 000 руб., а также возместить проценты на сумму долга в соответствии со ст. 395 ГК РФ в размере 77 996,42 руб. за период 11.07.2024 по 27.01.2025.

Требования претензии от 27.01.2025 ООО «ФМГРУПП» не исполнены.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии с ч. 3 ст. 67 ГПК РФ суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Доказательств, подтверждающих факт исполнения договора строительного подряда в полном объеме, ответчиком в ходе рассмотрения дела не представлено.

Кроме того, доказательств наличия обстоятельств, препятствующих ответчику приступить к выполнению работ для исполнения договора также не представлено, в связи с чем требования истца о взыскании с ответчика денежных средств уплаченных по договору строительного подряда __ от xx.xx.xxxx в размере 731 675 руб. подлежат удовлетворению. 

xx.xx.xxxx истец направила ответчику претензию с требованием о возврате денежных средств, выплате компенсации морального вреда, расходов на юриста и уплате процентов, ответ на которую не последовал.

В соответствии со ст. 32 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Согласно п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено данным Кодексом, другими законами или договором.

В силу п. 1 и п. 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (ст. 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

На основании изложенного суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца о расторжении договора строительного подряда __ от xx.xx.xxxx.

В силу пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

При этом, в силу пункта 3 статьи 395 Гражданского кодекса РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Истец просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 11.07.2024 года по день фактического исполнения обязательств.

Проверив расчет истца, суд не может признать его арифметически верным и приходит к выводу, что размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.07.2024 (как просит истец) по 20.06.2025 составляет 138 374 руб. 64 коп., исходя из следующего расчета:

- с 11.07.2024 по 28.07.2024: 731 675 руб. *18 дней *16%/100%/365дней = 5 757,44 руб.;

- с 29.07.2024 по 15.09.2024: 731 675 руб. *49 дней *18%/100%/366дней = 17 632,17 руб.;

- с 16.09.2024 по 27.10.2024: 731 675 руб. *42 дня *19%/100%/366дней = 15 952,91 руб.;

- с 28.10.2024 по 31.12.2024: 731 675 руб. *65 дней *21%/100%/366дней = 27 287,88 руб.;

- с 01.01.2025 по 08.06.2025: 731 675 руб. *159 дней *21%/100%/365дней = 66 933,23 руб.;

- с 09.06.2025 по 20.06.2025: 731 675 руб. *12 дней *20%/100%/365дней = 4 811,01 руб.

При этом, в силу пункта 3 статьи 395 Гражданского кодекса РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 48 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). Размер процентов, начисленных за периоды просрочки, имевшие место с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года включительно, определяется по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц, а за периоды, имевшие место после 31 июля 2016 года, - исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды после вынесения решения.

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска, является установленный факт нарушения прав потребителя.

Учитывая, что факт нарушения прав потребителя установлен, судом, с учетом фактических обстоятельств дела, характера допущенных ответчиком нарушений прав истца, определен размер компенсации морального вреда, с учетом принципов разумности и справедливости, в сумме 10 000 руб.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя /исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера, за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 50% от взыскиваемой суммы, т.е. 370 837 руб. 50 коп. (731 675 руб.+10 000)/2)), при этом судом не усматривается оснований для снижения размера штрафа, размер которого определен в соответствии с законодательством.

Согласно части 1 статьи 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Истцом заявлено требование о взыскании судебных расходов по оплате юридических услуг в размере 51 000 руб. При этом, доказательств несения данных расходов истцом суду не представлено, в связи с чем данное требование удовлетворению не подлежит.

Поскольку истец, как потребитель, в силу закона была освобождена от уплаты государственной пошлины при подаче иска, то на основании статьи 103 Гражданского процессуального кодекса РФ с ответчика также подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина в сумме 22 633 руб. 50 коп. (19 633,50 руб. + 3 000 руб. – за требование не имущественного характера).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.

Расторгнуть договор строительного подряда __ от xx.xx.xxxx, заключенный между ФИО1 и ООО «ФМГРУПП».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ФМГРУПП» (ИНН __, ОГРН __) в пользу ФИО1 (21

<

данные изъяты>) денежные средства в сумме 731 675 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 11.07.2024 по 20.06.2025 в размере 138 374 руб. 64 коп., штраф в размере 370 837 руб. 50 коп., а всего 1 240 887 (один миллион двести сорок тысяч восемьсот восемьдесят семь) руб.14 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ФМГРУПП» (ИНН __, ОГРН __) в пользу ФИО1 (21

<

данные изъяты>) проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на остаток основного долга в сумме 731 675 000 руб., в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки, начиная с 21.06.2025 по дату фактического возврата денежных средств. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ФМГРУПП» (ИНН __, ОГРН __) в доход бюджета государственную пошлину в сумме 22 633 руб. 50 коп.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле, и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья (подпись) Е.И. Березнева

Заочное решение суда изготовлено в окончательном виде 04.07.2025 г.

Судья (подпись) Е.И. Березнева

Подлинник заочного решения суда хранится в гражданском деле № 2-2771/2025 в Заельцовском районном суде г. Новосибирска