Дело 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>

Номер строки статотчета 2.169

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> 

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН> 

Майминский районный суд Республики Алтай в составе судьи Бируля С.В., при секретаре Смирновой О.Ж., рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о понуждении выполнить обязательства,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иксом к ПАО «МРСК Сибири» ( ныне ПАО «Россети Сибирь») о понуждении в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу выполнить обязательства по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства, расположенного по адресу: 

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, на земельном участке расположенном в северо-западной части кадастрового квартала 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>, кадастровый номер земельного участка 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>, предусмотренные договором № 20.0400.1919.18 от 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>, заключенного между ФИО1 и ПАО «МРСК Сибири» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указывая, что 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> между истцом и ответчиком заключен договор 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которому ответчик принял обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ( дома животновода), расположенного на земельном участке 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>. Срок выполнения мероприятия определен в один год, дополнительным соглашением тот срок увеличен до 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>. Истец выполнил свои обязательства по оплате технологического присоединения, ответчик не выполнил своих обязательств по договору. 

В судебном заседании истец на иске настаивал, представитель ответчика в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещен о его времени и месте, о причинах неявки не сообщил, поэтому дело рассмотрено в его отсутствие, в порядке заочного производства, на что истец выразил согласие.

Выслушав участвующих в деле лиц, исследовав доказательства, суд находит иск подлежащим удовлетворению.

В соответствии с положениями ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом; односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Согласно положениям п. 1 ст. 26 Федерального закона от 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> N 861.

В соответствии с п. 3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим (физическим) лицом. При этом заключение договора является обязательным для сетевой организации (п. 6 Правил).

В перечень существенных условий договора, установленный п. 16 Правил, входит, в том числе, указание на перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора.

Из материалов дела следует, что 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> между ПАО «МРСК Сибири» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предметом которого является осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя дома животновода, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом характеристик ( перечислено). Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения дома животновода, расположенного по адресу: 

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, земельный участок расположен в северо – западной части квартала 04:06:120202, кадастровый номер земельного участка 04:06:120202:227. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы земельного участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя ( п.1,2,3 договора). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора ( п.5).

Дополнительным соглашением к договору стороны установили срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – до 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>.

Приложением 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> к договору являются технические условия 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> для присоединения к электрическим сетям, где определены мероприятия, которые осуществляет каждая из сторон. 

В частности, в обязанности заявителя входит установление щита учета электроэнергии. Из пояснений истца, данных в судебном заседании, следует, что указанная обязанность им выполнена, о чем он уведомил ответчика посредством электронной почты. 

Оплата по договору истцом произведена, что не оспаривалось ответчиком.

Ответчик не оспаривает невыполнением им обязательств по договору, заключенному с истцом.

Довод возражения на иск о недостаточности финансирования для выполнения ответчиком обязательств по технологическому присоединению, основанием для отказа в иске служить не может как не имеющий правового значения.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Учитывая, что со стороны ответчика имеет место нарушение сроков исполнения договора в отсутствие доказательств невозможности осуществить технологическое присоединение дома животновода истца к электрическим сетям на предусмотренных договором условиях, иск подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» удовлетворить.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу выполнить обязательства по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства, расположенного по адресу: 

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, на земельном участке расположенном в северо-западной части кадастрового квартала 04:06:120202, кадастровый номер земельного участка 04:06:120202:227, предусмотренные договором 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>.0400.1919.18 от 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>, заключенного между ФИО1 и ПАО «МРСК Сибири» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Алтай в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Алтай течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Бируля С.В.

Мотивированное решение изготовлено 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>