Дело № 58RS0018-01-2024-001540-90

№ 2-1289/2024

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

6 мая 2024 года г. Пенза

Ленинский районный суд г. Пензы в составе

председательствующего судьи Миллер С.А.

при секретаре Аниськиной А.А., 

рассмотрев в помещении Ленинского районного суда г. Пензы в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Пензенская горэлектросеть» к ФИО1 о расторжении договора, возмещении убытков, 

установил:

АО «Пензенская горэлектросеть» обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора, возмещении убытков, указав, что АО «Пензенская горэлектросеть» (ранее ЗАО «Пензенская горэлектросеть») является территориальной сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии через объекты электросетевого хозяйства, принадлежащие АО «Пензенская горэлектросеть», а также услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей к своим сетям.

03.07.2015г. между ЗАО «Пензенская горэлектросеть» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Номер -ТП.

Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – ВРУ здание, максимальная мощность 15 кВт, третья категории надежности. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения здания (гаража) с кадастровым номером Номер по адресу: Адрес .

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора. 

08.12.2015г. в сетевую организацию поступило заявление ФИО1 о переносе срока подключения объекта на апрель 2016 года. 

До настоящего времени ФИО1 не уведомила сетевую организацию о готовности объекта к подаче напряжения. 

Срок действия технических условий от 01.05.2015г. составляет два года со дня заключения договора, договор поступи в сетевую организацию 08.07.2015г., следовательно, указанный срок закончился 07.07.2017г.

До выполнения ФИО1 всех мероприятий по технологическому присоединению сетевая организация не может закончить процедуру технологического присоединения и выполнить фактическое подключение энергопринимающего устройства заявителя к своим сетям. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек 07.11.2015г.

17.08.2023г. в адрес ФИО1 почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) направлено соглашение от 15.08.2023г. о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Номер -ТП от 03.07.2015г. Корреспонденция ФИО1 не вручена. 

Сетевой организацией в целях исполнения своих обязательств разработаны мероприятия по технологическому присоединению, подготовлены и выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям, затраты сетевой организации составили 3162,60 руб.

Длительное неисполнение ФИО1 своих обязательств по выполнению мероприятий, необходимых для завершения процедуры технологического присоединения, является существенным нарушением договора.

АО «Пензенская горэлектросеть» просило расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Номер -ТП от 03.07.2015г., взыскать с ФИО1 фактически понесенные расходы в размере 31672,60 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 6400 руб. 

Впоследствии АО «Пензенская горэлектросеть» уточнило исковые требования в части взыскания фактически понесенных расходов, просило взыскать с ФИО1 фактически понесенные расходы в размере 2612,60 руб., указав, что при заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ФИО1 оплатила денежные средства в размере 550 руб.

В судебное заседание представитель АО «Пензенская горэлектросеть» не явился, о судебном заседании извещен, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

ФИО1 в судебное заседание не явилась, о судебном заседании извещена по адресу, указанному в материалах дела. 

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон в порядке заочного производства. 

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Установлено, что АО «Пензенская горэлектросеть» (ранее ЗАО «Пензенская горэлектросеть») является территориальной сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии через объекты электросетевого хозяйства, принадлежащие АО «Пензенская горэлектросеть», а также услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей к своим сетям.

03.07.2015г. ЗАО «Пензенская горэлектросеть» - сетевая организация и ФИО1 – заявитель заключили договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Номер -ТП, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – ВРУ здания, максимальная мощностью 15 кВт, третья категории надежности, класс напряжения электрических сетей 0,38кВ, здание (гараж) с кадастровым номером Номер по адресу: Адрес (п. 1 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора (п. 5 договора). 

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию (п. 21 договора).

Заявитель обязался после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий (п. 8 договора).

Договор Номер -ТП от 03.07.2015г. поступил в сетевую организацию 08.07.2015. Предусмотренные данным договором мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены в срок до 07.11.2015г.

Сетевой организацией в целях исполнения своих обязательств по договору Номер -ТП от 03.07.2015г. выполнены мероприятия, предусмотренные техническими условиями «Номер -ТУ от 01.07.2015г., необходимые для осуществления технологического присоединения объекта заявителя. 

08.12.2015. в сетевую организацию поступило заявление ФИО1 о переносе срока подключения на апрель 2016 года. 

ФИО1 не уведомила сетевую организацию о готовности энергопринимающих устройств к осуществлению технологического присоединения в установленный договором срок.

ФИО1 не предприняла действий, свидетельствующих о ее заинтересованности в исполнении договора об осуществлении технологического присоединения.

Действие выданных ФИО1 технических условий Номер -ТУ от 01.07.2015г. закончилось.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, в том числе по фактическому присоединению, истек.

АО «Пензенская горэлектросеть» понесены затраты в размере 3162,60 руб. на подготовку и выдачу технических условий ФИО1 для исполнения ее заявки на технологическое присоединение.

17.08.2023г. АО «Пензенская горэлектросеть» в адрес ФИО1 направлено соглашение от 15.08.2023г. о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Номер -ТП от 03.07.2015г. корреспонденция адресатом не получена.

В силу ст. 309, п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений, технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

В п.п. 3, 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861, в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений, предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п.п. 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Согласно п.п. 1, 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В п. 5 ст. 453 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Неисполнение ФИО1 своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Номер -ТП от 03.07.2015г. является существенным нарушением условий данного договора, делает невозможным исполнение АО «Пензенская горэлектросеть» обязательств по фактическому присоединению энергопринимающих устройств ФИО1 к электрическим сетям, влечет расторжение этого договора и возложение на ФИО1 гражданско-правовой ответственности по возмещению АО «Пензенская горэлектросеть» убытков (расходов на разработку и выдачу технических условий).

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ с ФИО1 подлежат взысканию расходы по государственной пошлине, которые понесены АО «Пензенская горэлектросеть» при обращении в суд с иском. 

При таких обстоятельствах настоящий иск подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

иск АО «Пензенская горэлектросеть» к ФИО1 о расторжении договора, возмещении убытков удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Номер -ТП от 03.07.2015г., заключенный между ЗАО «Пензенская горэлектросеть» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 (Дата года рождения, паспорт Номер выдан Дата Адрес ) в пользу АО «Пензенская горэлектросеть» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в возмещение убытков денежные средства в размере 2612,60 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 6400 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья С.А. Миллер