Дело №

УИД 50 RS 0№-93

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

22 октября 2025 года 

<

адрес> ФИО1 

<

адрес>

Видновский городской суд ФИО1 

<

адрес> в составе: 

председательствующего судьи Крестниковой Д.В., 

при секретаре судебного заседания ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску АО «Мособлгаз» к ФИО2 о внесении изменений в договор,

УСТАНОВИЛ:

Истец АО "Мособлгаз" обратилось в суд с иском к ФИО2 о внесении изменений в договор.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что ДД.ММ.ГГГГ №-

<

адрес> между АО «Мособлгаз» и ФИО2 заключен договор о поставке природного газа и подключении (технологическом присоедннении) газоиспользующего оборудования к сети распределения в рамках догазификации в отношении объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ФИО1 

<

адрес>А, с кадастровым номером №, №.

В соответствии с п. 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет ДД.ММ.ГГГГ, в редакции дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, срок исполнения обязательств продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Выполнение мероприятий по догазификации предусмотрено ФИО1 

<

адрес> "Развитие газификации в ФИО1 

<

адрес> до 2035 года", утвержденной Постановлением ФИО1 

<

адрес> от от ДД.ММ.ГГГГ № и изменениями, внесенными в ФИО1 Постановлениями ФИО1 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП и от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП.

ДД.ММ.ГГГГ Постановлением ФИО1 

<

адрес> принято постановление №-ПП «О внесении изменений в ФИО1 

<

адрес> «Развитие газификации в ФИО1 

<

адрес> до 2035 года» и изменении сроков строительства распределительного газопровода в 

<

адрес>, г.о. Домодедово, ФИО1 

<

адрес> и подключения (технологического присоединения) домовладения ответчика ФИО2 по адресу: ФИО1 

<

адрес>, г.о. Домодедово, 

<

адрес>А.

Новая редакция ФИО1 социальной газификации вкелючает в себя мероприятия по догазификации в том числе принадлежащего ответчику домовладения, включенного в раздел 2 «Пообъектный план-график догазификации в Приложении к ФИО1 ( п. 18089 стр. 744).

Срок окончания выполнения указанных мероприятий запланирован на декабрь 2028 года (п. 18089) Пообъектного плана-графика догазикации, являющегося приложением к разделу 2 Приложения к ФИО1 

<

адрес> «Развитие газификации в ФИО1 

<

адрес> до 2035 года» в редакции постановления ФИО1 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.

АО «Мособлгаз» не отказывается от исполнения обязательств по договору, заключенному с ответчиком, подтверждает их наличие и безусловное намерение исполнить свои обязательства.

В связи с чем, истцом в адрес ответчика направлено дополнительное соглашение об изменении срока выполнения мероприятий по подключению, от подписания которого последний уклоняется. 

Просил суд (с учетом уточнений в порядке ст. 39 ГПК РФ): 

- внести изменения в договор от ДД.ММ.ГГГГ N 06/838-

<

адрес> поставке природного газа и подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенный между АО "Мособлгаз" и ФИО2, изложив абзац первый пункта 3 договора в следующей редакции: 

"3. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет ДД.ММ.ГГГГ, в случае внесения изменений в ФИО1 

<

адрес> «Развитие газификации в ФИО1 

<

адрес> ло 2032 года, утвержденной Постановлением ФИО1 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии со сроками, установленными Програмой. 

Изложить пункт 6 технических условий N 

<

адрес>-Д/27 (Приложение N к Договору) в следующей редакции: 

"6. Срок подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства ДД.ММ.ГГГГ, в случае внесения изменений в ФИО1 

<

адрес> «Развитие газификации в ФИО1 

<

адрес> ло 2032 года, утвержденной Постановлением ФИО1 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии со сроками, установленными Програмой

В пункте 8 технических условий N- 

<

адрес>-Д/27 (Приложение N к Договору) слова " до 31.12.2024» заменить словами « ДД.ММ.ГГГГ в случае внесения изменений в ФИО1 

<

адрес> «Развитие газификации в ФИО1 

<

адрес> ло 2032 года, утвержденной Постановлением ФИО1 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии со сроками, установленными Програмой.

Изложить пункт 14 технических условий N 

<

адрес>-Д/27 (Приложение к Договору) в следующей редакции: 

"14. Срок действия настоящих технических условий ДД.ММ.ГГГГ со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, в случае внесения изменений в ФИО1 

<

адрес> «Развитие газификации в ФИО1 

<

адрес> ло 2032 года, утвержденной Постановлением ФИО1 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии со сроками, установленными Програмой.

-зыскать с ФИО2 в пользу АО "Мособлгаз" расходы по оплате государственной пошлины в размере 

<

данные изъяты> руб. 

Представитель АО "Мособлгаз" ФИО4 в судебное заседание явился, исковые требования просил удовлетворить по доводам, изложенным в исковом заявлении и в письменных пояснениях.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание явилась, против удовлетворения исковых требований возражала по доводам письменных возражений, 

Выслушав объяснения явившихся лиц, исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

В силу ч. 1, 4 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422). В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой. 

По правилам ч. 1, 2 ст. 423 ГК РФ договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным. Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления. 

В силу ч. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

По правилам ч. 1 ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 

Согласно ст. 17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется единым оператором газификации, региональным оператором газификации совместно с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами публичной власти федеральных территорий в соответствии с разработанными на основании схем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации с учетом топливно-энергетических балансов, утверждаемых соответственно высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, руководителями исполнительно-распорядительных органов федеральных территорий, и принятыми в установленном порядке межрегиональными и региональными ФИО1 газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также со схемами расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом. 

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее - объект капитального строительства) урегулирован Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. 

Выполнение мероприятий по догазификации предусмотрено ФИО1 

<

адрес> "Развитие газификации в ФИО1 

<

адрес> до 2035 года", утвержденной Постановлением ФИО1 

<

адрес> от от ДД.ММ.ГГГГ № и изменениями, внесенными в ФИО1 Постановлениями ФИО1 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП и от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП. 

Пунктом 2 Правил закреплено понятие "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа или ФИО1 газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в текущем календарном году предусмотрено строительство газораспределительных сетей до границ такого населенного пункта. 

Особенности подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации определены в пунктах 119 - 126 Правил (раздел VII). 

В соответствии с п. 121 Правил срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется ФИО1 газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем. 

В силу п. 122 Правил в случае отсутствия в ФИО1 газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать: 

30 дней - в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка; 

100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью до 30 метров; 

135 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 30 до 200 метров; 

200 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 200 до 500 метров; 

один год - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров. 

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен не более чем: 

на 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа; 

на 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода протяженностью до 30 метров; 

на 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения; 

на 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности; 

на 200 дней - в случае пересечения сети газораспределения с автомобильными дорогами регионального или федерального значения, железными дорогами, водными преградами, прокладки газопровода на территории земель лесного фонда или необходимости вырубки зеленых насаждений и (или) прокладки газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, и (или) по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых территорий, и (или) в границах зон охраны памятников историко-культурного наследия. 

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) продлевается не более чем на 70 дней (200 дней - для случаев, для которых настоящим пунктом предусмотрено продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 200 дней). 

В случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению). 

По правилам п. 123 Правил в случае, если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем), в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в ФИО1 газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил. 

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ №-

<

адрес> между АО «Мособлгаз» и ФИО2 заключен договор о поставке природного газа и подключении (технологическом присоедннении) газоиспользующего оборудования к сети распределения в рамках догазификации в отношении объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ФИО1 

<

адрес>А, с кадастровым номером №, №.

В соответствии с п. 1 договора исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети жилой дом, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения), расположенного по адресу: ФИО1 

<

адрес>А, с кадастровым номером №, №, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Пунктом 3 стороны согласовали, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет до ДД.ММ.ГГГГ.

Договор заключен по типовой форме, предусмотренной Правилами.

В ходе судебного разбирательства ответчик пояснил, что сторонами неоднократно заключались дополнительные соглашения, последним внесены изменения в части срока исполнения обязательств по договору о подключении. Данное обстоятельство представителем истца не оспаривалось.

Ответчику также было предложено заключить дополнительное соглашение к договору об изменении сроков исполнения мероприятий по подключению - до 31.12..2025 г., что подтверждается письмом №-ОГ/Ю/30.6 от ДД.ММ.ГГГГ, однако предложение оставлено без удовлетворения.

Выполнение мероприятий по догазификации предусмотрено ФИО1 

<

адрес> "Развитие газификации в ФИО1 

<

адрес> до 2035 года", утвержденной Постановлением ФИО1 

<

адрес> от от ДД.ММ.ГГГГ № и изменениями, внесенными в ФИО1 Постановлениями ФИО1 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП и от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП.

АО "Мособлгаз" является исполнителем ФИО1 социальной газификации, государственным заказчиком которой является Министерство энергетики ФИО1 

<

адрес>.

Согласно п. 5 Правил подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

В соответствии с п. 9 Правил договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами. 

На момент заключения сторонами договора о подключении (ДД.ММ.ГГГГ) действовала ФИО1 социальной газификации в редакции от ДД.ММ.ГГГГ и изменениями, внесенными в ФИО1 Постановлениями ФИО1 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП и от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП.

Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ Постановлением ФИО1 

<

адрес> принято постановление №-ПП «О внесении изменений в ФИО1 

<

адрес> «Развитие газификации в ФИО1 

<

адрес> до 2035 года» и изменении сроков строительства распределительного газопровода в 

<

адрес>, г.о. Домодедово, ФИО1 

<

адрес> и подключения (технологического присоединения) домовладения ответчика ФИО2 по адресу: ФИО1 

<

адрес>, г.о. Домодедово, 

<

адрес>А.

Новая редакция ФИО1 социальной газификации вкелючает в себя мероприятия по догазификации в том числе принадлежащего ответчику домовладения, включенного в раздел 2 «Пообъектный план-график догазификации в Приложении к ФИО1 ( п. 18089 стр. 744).

Срок окончания выполнения указанных мероприятий запланирован на декабрь 2028 года (п. 18089) Пообъектного плана-графика догазикации, являющегося приложением к разделу 2 Приложения к ФИО1 

<

адрес> «Развитие газификации в ФИО1 

<

адрес> до 2035 года» в редакции постановления ФИО1 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.

Из объяснений представителя истца следует, что необходимостью внесения изменений в договор о подключении является приведение его условий в соответствие с п. 121, 123 Правил и ФИО1 социальной газификации. 

АО "Мособлгаз" не отказывается от исполнения обязательств по договору, заключенному с ответчиком, подтверждает их наличие и безусловное намерение исполнить свои обязательства. 

Как следует из письменных пояснений ответчика ФИО2 после ДД.ММ.ГГГГ АО «Мособлгаз» в лице субподрядчиков приступили к строительсву сети газораспределения до границ земельного участка, также приступили к строительно-монтажным работам в пределах границ земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ АО «Мособлгаз» выполнило строительно-монтажные работы в пределах границ земельного участка ответчика, что подтверждается актом о приемке работ от ДД.ММ.ГГГГ. Работы по строительству сети газораспределения до границ земельного участка ответчика также выполнены истцом в полном объеме, что подтверждается прилагаемыми фотоматериалами. Более того, выполнено фактическое присоединение газопровода, контрольный пуск газа и опресовка газопровода. Единственными работами, необходимыми для составления акта о подключепнии, являются пуско-наладочные работы. 

Данные обстоятельства стороной истца оспорены не были.

С учетом изложенных обстоятельств, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований АО «Мособлгаз».

Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу расходы, в том числе государственную пошлину.

Из приобщенного к материалам дела платежного 

<

данные изъяты> руб., которая в силу закона подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования АО «Мособлгаз» к ФИО2 о внесении изменений в договор - удовлетворить.

Внести изменения в договор от ДД.ММ.ГГГГ N 06/838-

<

адрес> поставке природного газа и подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенный между АО "Мособлгаз" и ФИО2, изложив абзац первый пункта 3 договора в следующей редакции: 

"3. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет ДД.ММ.ГГГГ, в случае внесения изменений в ФИО1 

<

адрес> «Развитие газификации в ФИО1 

<

адрес> ло 2032 года, утвержденной Постановлением ФИО1 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии со сроками, установленными Програмой. 

Изложить пункт 6 технических условий N 

<

адрес>-Д/27 (Приложение N к Договору) в следующей редакции: 

"6. Срок подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства ДД.ММ.ГГГГ, в случае внесения изменений в ФИО1 

<

адрес> «Развитие газификации в ФИО1 

<

адрес> ло 2032 года, утвержденной Постановлением ФИО1 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии со сроками, установленными Програмой

В пункте 8 технических условий N- 

<

адрес>-Д/27 (Приложение N к Договору) слова " до 31.12.2024» заменить словами « ДД.ММ.ГГГГ в случае внесения изменений в ФИО1 

<

адрес> «Развитие газификации в ФИО1 

<

адрес> ло 2032 года, утвержденной Постановлением ФИО1 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии со сроками, установленными Програмой.

Изложить пункт 14 технических условий N 

<

адрес>-Д/27 (Приложение к Договору) в следующей редакции: 

"14. Срок действия настоящих технических условий ДД.ММ.ГГГГ со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, в случае внесения изменений в ФИО1 

<

адрес> «Развитие газификации в ФИО1 

<

адрес> ло 2032 года, утвержденной Постановлением ФИО1 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии со сроками, установленными Програмой.

Взыскать с ФИО2 в пользу АО "Мособлгаз" расходы по оплате государственной пошлины в размере 

<

данные изъяты> руб. 

Решение может быть обжаловано в ФИО1 областной суд через Видновский городской суд в течение одного месяца с момента изготовления решения суда в окончательной форме. 

Председательствующий судья Д.В. Крестникова 

Полное мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.