УИД №RS0№-81

Дело №

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Кызыл 

26 августа 2025 года 

Кызылский городской суд Республики Тыва в составе председательствующего Папий-оол М.А., при секретаре Нортуп-оол А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к акционерному обществу «Россети Сибирь Тываэнерго» о защите прав потребителя, об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям немедленно,

у с т а н о в и л :

ФИО1 (далее-истец) обратился в суд с иском к Акционерному обществу «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее - ответчик) о защите прав потребителя, об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям немедленно.

В обоснование требований указано, что 04.03.2024 г. между истцом и ответчиком заключен договор № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, расположенного по адресу: 

<

адрес> кадастровым номером №. Согласно п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора. Со дня заключения договора истец неоднократно обращался к ответчику. До настоящего времени договор ответчиком не исполнен. Просит обязать ответчика исполнить обязательство по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям немедленно.

Представитель ответчика в судебном заседании ФИО8 просил о предоставлении срока для исполнения решения суда, а именно пяти месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Мотивировал это тем, что подрядчик ООО «

<

данные изъяты>», с которым был заключен договор поставки стоек не выполнен, необходимо время для заключения нового договора с другим подрядчиком. Пояснил, что стойки должны были установить в мае месяце. Стойка – это железо-бетонная опора, без нее невозможно технологическое присоединение. Со стороны истца требуется приобретение СИБ-кабеля, зажимов анкерных, их стоимость вполне доступна. 

Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, просил о рассмотрении дела без его участия. 

При таких обстоятельствах суд, руководствуясь частью 3 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) и учитывая надлежащее извещение истца, признает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Изучив материалы дела, выслушав представителя ответчика, суд приходит к следующему. 

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ч. 1).

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (ч. 2).

Ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ч. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Как следует из материалов дела, 04.03.2024 г. между ФИО1 и АО "Россети Сибирь Тываэнерго" заключен договор № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно п. 1.1 Договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее технологическое присоединение) «

<

данные изъяты>», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкция) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: - максимальная мощность присоединениях энергопринимающих устройств 15 кВт; - категория надежности третья; - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ; - максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

В пункте 2 договора отражено, что технологическое присоединение необходимо для электроснабжения «

<

данные изъяты>», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Россия, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, 

<

адрес>.

В пункте 5 договора определен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, который составляет 1 год со дня заключения настоящего договора.

На основании пункта 6 договора сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора; не позднее 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного п.5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю. 

В соответствии с пунктом 8 договора заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора; получить разрешение уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов; после осуществления сетевой организации фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществление технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 2 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения; заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий. 

Согласно пункту 10 договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Службы по Тарифам Республики Тыва от 20.12.2023 № 72 и составляет 16710,00 рублей, в том числе НДС 20 % в сумме 2785,00 руб.

Пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике) определено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Порядок, технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее - Правила N 861).

Согласно пункту 3 Правил N 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя. Сетевая организация обязана заключить договор с лицами, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологического присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Пунктом 6 Правил N 861 предусмотрено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике и пункты 8, 17 Правил N 861).

Согласно пункту 14 Правил N 861, заявителями являются - физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

В соответствии с пунктом 16.1 Правил N 861 заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.

Согласно пункту 16.3 Правил N 861, в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.

Таким образом, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В пункте 10 Договора стороны определили размер платы за технологическое присоединение в соответствии с Постановлением Службы по тарифам Республики Тыва от 20.12.2023 № 72 и составляет 16 710 рублей, в том числе НДС 20% в сумме 2 785 рублей. 

Истец во исполнение своих обязательств по вышеуказанному договору произвел оплату по договору в размере 16 710 рублей, что подтверждается платежным документом от 04.03.2024г.

Как указано выше, по договору срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора. Значит, свои обязательства сетевая организация должна была выполнить до 04.03.2025г.

Поскольку к указанному сроку ответчик свои обязательства по договору не выполнил, истец обратился с заявлением 04.03.2025 с целью надлежащего исполнения договора в сетевую организацию за вх.№.

На его обращение ответчик за подписью заместителя директора по реализации и развитию услуг ФИО6 17.04.2025 ответил, что в мероприятия по строительству воздушной линии, установке прибора учета и подключению к сетям АО «Россети Сибирь Тываэнерго» объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес> будут выполнены до конца четвертого квартала текущего года.

Представителем ответчика представлена выписка из постановления по делу об административном правонарушении № № ДД.ММ.ГГГГ, вынесенная Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва, согласно которому АО «Россети Сибирь Тываэнерго» было признано виновным за совершение административного правонарушения, за которое предусмотрена ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ. При этом в подп. 204 постановления видно, что одним из эпизодов административного правонарушения является нарушение договора, заключенного с истцом ФИО1

При таких обстоятельствах, в действиях ответчика усматривается факт неисполнения обязательств по заключенному с истцом договору на технологическое подключение его объекта, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований и возложении на ответчика обязанности технологическое присоединение электроустановок объекта истца к электрическим сетям согласно условиям заключенного договора и технических условий.

Также представителем ответчика в подтверждение его доводов о необходимости разумных сроков для исполнения решения суда представлены: договор поставки продукции между ответчиком и ООО «

<

данные изъяты>», переписка с ООО «

<

данные изъяты>» от 30.05.2025 г., 19.06.2025 г., 25.063.2025 г. содержащая претензии по поводу нарушения сроков поставки продукции (в частности 174, 120, 239 единиц) что не позволило своевременно обеспечить исполнение производственных программ ответчика; скрин-шот с экрана, на котором видно, что направлено письмо с наименованием «расторжение договора».

Суд полагает возможным установить срок исполнения в течение 5 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, принимая во внимание положения ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, учитывая разумность указанного срока, его достаточность для возможности ответчика исполнить решение суда, степень затруднительности исполнения судебного акта, что соотносится с разъяснениями в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств". 

Разрешая требование о защите прав потребителя, суд приходит к следующему.

Ст. 15 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" ответчик, взявший на себя обязанность произвести технологическое присоединение к электрическим сетям условия договора не выполнил, в связи с чем требования истца являются законными и обоснованными. 

При таких обстоятельствах, оценив представленные в материалы дела доказательства, и установив, что ответчиком нарушен порядок подключения технологического присоединения к электрическим сетям объекта потребителя в части нарушения срока исполнения мероприятий по технологическому присоединению, суд руководствуясь ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, а именно издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае государственная пошлина подлежит взысканию в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации

Поскольку истец ФИО1 был освобожден от уплаты государственной пошлины, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход бюджета муниципального образования городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» в размере 3000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ФИО1 к акционерному обществу «Россети Сибирь Тываэнерго» о защите прав потребителя, об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям немедленно, удовлетворить частично.

Обязать акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго» (ОГРН 

<

***>) исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № № от 04.03.2024 г., заключенного с ФИО1 в течение пяти месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» в доход бюджета муниципального образования городской округ «город Кызыл Республики Тыва» государственную пошлину в размере 3000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Тыва в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения путем подачи апелляционной жалобы через Кызылский городской суд Республики Тыва.

Мотивированное решение изготовлено 15 сентября 2024 года. 

Судья М.А. Папий-оол