Дело № 2-582/2026

УИД 33RS0002-01-2018-004377-37

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

«20» января 2026 года

Октябрьский районный суд г. Владимира в составе:

председательствующего судьи Изоховой Е.В.,

при секретаре Масаловой А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Владимире гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания» к ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения, неустойки,

у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «### обратилось в суд с уточненным иском к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения, неустойки по договору поручительства.

В обоснование иска указано, что между ###) заключен договор подряда ### от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 1.1 Договора Подрядчик обязуется выполнить работы по демонтажу вспомогательного помещения, устройству фундаментной плиты в осях ### (в рамках реконструкции аммиачной холодильной установки ###, этап 2 на объекте «Аммиачная компрессорная с насосной, градирней, лит. Ю» по адресу 

<

...> (Проект ###.###) (объект), а также разработать и передать Заказчику исполнительную документацию. Согласно п.ДД.ММ.ГГГГ Договора Подрядчик обязан выполнять работы с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные Договором. П. 2.1. Договора предусмотрено, что Работы выполняются Подрядчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента оплаты авансового платежа. Таким образом, работы должны были быть выполнены Подрядчиком в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. ДД.ММ.ГГГГ Договора Подрядчик обязан выполнять работы с надлежащим качеством, с соблюдением проектно-сметной, технической документации, а также рабочими чертежами и пр. В обеспечение исполнения обязательств Подрядчиком между ### (Заказчик) и ФИО1 (Поручитель) заключен Договор поручительства №### от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 1.1. Договора поручительства Поручитель обязуется отвечать всем своим имуществом перед Заказчиком за исполнение ###» всех обязательств по договору № ### от ДД.ММ.ГГГГ, включая все приложения и дополнения к нему, в т.ч. заключаемые позднее даты подписания настоящего Договора, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком в размере, не превышающем ### В нарушение принятых на себя обязательств Подрядчик своевременно работы не выполнил, и Заказчику не сдал. В соответствии с п. 13.2 Договора Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличения сроков окончания работ. Заказчик, руководствуясь п.13.2 Договора, ст. 715 ГК РФ, направил Подрядчику уведомление о расторжении Договора от ###. Уведомление получено Подрядчиком ДД.ММ.ГГГГ. На момент расторжения Договора Подрядчиком частично были выполнены работы на общую сумму ###., что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и затрат ### от ДД.ММ.ГГГГ по форме ### и Актом о приемке выполненных работ ### от ДД.ММ.ГГГГ по форме ###, на сумму ### руб., Справкой о стоимости выполненных работ и затрат ### от ### по форме ### Актом о приемке выполненных работ ### от ДД.ММ.ГГГГ по форме ### на сумму ### руб. Таким образом, Подрядчик не исполнил обязательства по Договору в размере ###. (неотработанный аванс - неосновательное обогащение). В соответствии с п. 14.4 Договора размер неустойки по ставке 0,5% за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет ### ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику Уведомление № ### от ДД.ММ.ГГГГ о неисполнении Подрядчиком обязательств по договору подряда № ### ДД.ММ.ГГГГ. и требование об оплате задолженности. Ответ ответчик не предоставил, в добровольном порядке требование не удовлетворил.

Учитывая вышеизложенное, ссылаясь на положения ст.ст. 22, 322, 323, п. 1 ст. 361, п. 1 ст. 363 ГК РФ, ООО «ОСК» просит взыскать с ФИО1 неосновательное обогащение (неотработанный аванс) по договору подряда ### от ДД.ММ.ГГГГ в размере ### копеек; неустойку за нарушение срока возврата суммы неотработанного аванса за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере ### с последующим ее начислением с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательства; расходы по оплате государственной пошлины.

В судебном заседании представитель истца ### по доверенности ФИО4 исковые требования поддержала в полном объеме, по изложенным в иске основаниям, просила удовлетворить. Не возражала против рассмотрения дела в отсутствие ответчиков в порядке заочного судопроизводства.

Представитель ответчика ### в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом. О причинах неявки не сообщил, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просил.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом. О причинах неявки не сообщил, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просил.

Суд, руководствуясь ст. 233 ГПК РФ, с учетом согласия представителя истца, определил рассмотреть дело в отсутствие ответчиков в порядке заочного судопроизводства.

Выслушав представителя истца, изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с ч. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании ст. 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано: возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 названного кодекса.

В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или cбepeжeнное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения (п. 1 ст. 1105 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 361 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Согласно п. 1 ст. 363 Гражданского кодекса Российской Федерации при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

В соответствии с п. 1 ст. 323 Гражданского кодекса Российской Федерации при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что между ООО «ОСК» (Заказчик) и ООО «ПРОМТЕХСТРОЙ» (Подрядчик) заключен договор подряда № Д-2022-07-10203 от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 1.1 Договора Подрядчик обязуется выполнить работы по демонтажу вспомогательного помещения, устройству фундаментной плиты в осях ### рамках реконструкции аммиачной холодильной установки ###, ### на объекте «### по адресу 

<

...> (Проект ###.2) (объект), а также разработать и передать Заказчику исполнительную документацию.

Стоимость работ определяется ведомостью договорной цены и составляет ###. (п.3.1 Договора в редакции Протокола разногласий к Договору).

В соответствии с п. 3.3.1 Договора Заказчик оплатил авансовый платеж в сумме ### что подтверждается платежным поручением ### от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п.ДД.ММ.ГГГГ Договора Подрядчик обязан выполнять работы с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные Договором.

П. 2.1. Договора предусмотрено, что Работы выполняются Подрядчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента оплаты авансового платежа. Таким образом, работы должны были быть выполнены Подрядчиком в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. ДД.ММ.ГГГГ Договора Подрядчик обязан выполнять работы с надлежащим качеством, с соблюдением проектно-сметной, технической документации, а также рабочими чертежами и пр.

В обеспечение исполнения обязательств Подрядчиком между ### (Заказчик) и ФИО1 (Поручитель) заключен Договор поручительства №### от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 1.1. Договора поручительства Поручитель обязуется отвечать всем своим имуществом перед Заказчиком за исполнение ### всех обязательств по договору № ### от ДД.ММ.ГГГГ, включая все приложения и дополнения к нему, в т.ч. заключаемые позднее даты подписания настоящего Договора, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком в размере, не превышающем ###.

Согласно п. 1.2. Договора поручительства Поручитель несет солидарную ответственность с Подрядчиком перед Заказчиком за исполнение Подрядчиком обязательств по Договору подряда.

В соответствии с п. 1.3 Договора поручительства основаниями ответственности Поручителя является неисполнение Подрядчиком обязательств по возврату Заказчику денежных средств, уплаченных по Договору подряда. Обязательство по возврату денежных средств может возникнуть в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору подряда, в случае его досрочного расторжения, а также неисполнение Подрядчиком обязательств по оплате Заказчику.

В нарушение принятых на себя обязательств Подрядчик своевременно работы не выполнил, и Заказчику не сдал.

В соответствии с п. 13.2 Договора Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличения сроков окончания работ.

Заказчик, руководствуясь п.13.2 Договора, ст. 715 ГК РФ, направил Подрядчику уведомление о расторжении Договора от ### Уведомление получено Подрядчиком ДД.ММ.ГГГГ.

На момент расторжения Договора Подрядчиком частично были выполнены работы на общую сумму ### руб., что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и затрат ### от ДД.ММ.ГГГГ по форме ### и Актом о приемке выполненных работ ### от ДД.ММ.ГГГГ по форме ### Справкой о стоимости выполненных работ и затрат ### от ###. по форме ### и Актом о приемке выполненных работ ### от ДД.ММ.ГГГГ по форме ###

Таким образом, Подрядчик не исполнил обязательства по Договору в размере ###

В соответствии с п. 14.4 Договора в случае досрочного расторжения Договора Заказчик вправе требовать от Подрядчика возврата суммы не отработанного аванса за работы. Стороны договорились, что указанное требование подлежит исполнению Подрядчиком в срок не более 5 (пяти) дней с момента проведения всех взаиморасчетов. При нарушении подрядчиком указанного срока Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в сумме 0,5% от невозвращенной в срок суммы за каждый день просрочки.

Размер неустойки по ставке 0,5% за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет ### руб.

В соответствии с п. 2.2. Договора поручительства в случае неисполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик вправе потребовать исполнения обязательств Поручителем, в том числе осуществить в установленном законом порядке принудительное взыскание долга с Поручителя.

ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику Уведомление ### от ДД.ММ.ГГГГ о неисполнении Подрядчиком обязательств по договору подряда № ### от ДД.ММ.ГГГГ. и требование об оплате задолженности. Ответ ответчик не предоставил, в добровольном порядке требование не удовлетворил, в связи с чем истец обратился с иском в суд.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, исходя из условий договоров подряда и поручительства, руководствуясь положениями гражданского законодательства, суд находит установленным факт ненадлежащего исполнения ответчиками принятых на себя обязательств, в связи с чем, с ответчиков солидарно в пользу истца подлежит взысканию сумма неосновательного обогащения в размере ###

Суд находит расчет истца верным, соответствующим представленным документам.

Ответчиками каких-либо возражений по делу не представлено, контррасчет не приведен.

### просит взыскать с ответчиков неустойку за нарушение срока возврата суммы неотработанного аванса за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере ### коп., с последующим ее начислением с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательства, из расчета ###

Проверив представленный истцом расчет, суд приходит к выводу о том, что исковые требования о взыскании неустойки являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания» удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 (паспорт ### в пользу ООО «Объединенная строительная компания» (### неосновательное обогащение (неотработанный аванс) по договору подряда № ### от ДД.ММ.ГГГГ в размере ### коп.; неустойку за нарушение срока возврата суммы неотработанного аванса за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере ###.; неустойку за нарушение срока возврата суммы неотработанного аванса за период с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательства (возврата суммы неотработанного аванса) в размере ### от невозвращенной суммы в день.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий судья Е.В. Изохова

Мотивированное решение изготовлено 21.01.2026.

Председательствующий судья Е.В. Изохова