Судья Кулик Е.А. Дело № 77- 26/2026

(№12-468/2025)

Р Е Ш Е Н И Е

г. Киров 20 января 2026 года

Судья Кировского областного суда Мазюта Т.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу защитника Власовой О.Н. на постановление заместителя министра финансов Кировской области ФИО1 № от 17 сентября 2025 года, решение судьи Октябрьского районного суда г.Кирова от 27 ноября 2025 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица – главы администрации города Кирова ФИО2,

У С Т А Н О В И Л:

постановлением заместителя министра финансов Кировской области ФИО1 № от 17 сентября 2025 года должностное лицо – глава администрации города Кирова ФИО2 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначено административное наказание в виде предупреждения.

Решением судьи Октябрьского районного суда г.Кирова от 27 ноября 2025 года постановление должностного лица оставлено без изменения.

В жалобе, поданной в Кировский областной суд, защитник Власова О.Н. выражает несогласие с постановлением должностного лица и решением судьи районного суда, просит их отменить, прекратить производство по делу. В обоснование приводит доводы о том, что установленная мера ответственности за недостижение значений результатов использования субсидий должна быть применена к муниципальному образованию, вместе с тем МО «Город Киров» ни к каким мерам ответственности за невыполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2024 году не привлекалось. Обращает внимание, что те граждане, местоположение которых было неизвестно на момент предоставления жилых помещений, включаются в целевой показатель расселенных на отчетную дату. С учетом введения в эксплуатацию предусмотренного соглашением количества квадратных метров жилья; регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения; издания постановления администрации города Кирова о передаче жилых помещений в собственность и социальный найм гражданам, чьи жилые помещения были признаны аварийными и подлежащими сносу до 01 января 2017 года; подготовки проектов договоров мены и социального найма, полагает, что целевые показатели использования субсидии со стороны администрации города Кирова по состоянию на отчетную дату достигнуты. Просит учесть, что все граждане, которые должны быть переселены в рамках соглашения от 14 февраля 2024 года №/А, переселены, жилые помещения для них построены администрацией города Кирова в установленный соглашением срок. В связи с отсутствием субъективной и объективной стороны правонарушения, считает вину главы администрации города Кирова ФИО2 недоказанной.

Заместитель министра финансов Кировской области ФИО1, глава администрации города Кирова ФИО2, прокуратура Ленинского района г.Кирова надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, ходатайство об отложении не заявлено.

В соответствии с положениями пункта 4 части 2 статьи 30.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нахожу возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Изучив материалы дела, проверив доводы жалобы, заслушав защитника Власову О.Н., поддержавшую доводы жалобы, представителя административного органа ФИО5, прокурора Русанову О.А. о законности состоявшихся по делу актов, прихожу к следующему.

В соответствии с частью 3 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение финансовым органом, главным распорядителем (распорядителем) или получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 названного Кодекса, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ межбюджетными трансфертами являются средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Под субсидиями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (часть 1 статьи 139 Бюджетного кодекса РФ).

Правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования субъектом Российской Федерации (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования, устанавливаются нормативным правовым актом высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации. Условием предоставления субсидии бюджету муниципального образования является заключение соглашения о предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (часть 3 статьи 139 Бюджетного кодекса РФ).

Постановлением Правительства Кировской области от 02 февраля 2024 года № 32-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем» утвержден порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2024 году.

В соответствии с пунктом 2 Приложения № 2 Порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Кировской области по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - расходные обязательства). Субсидии предоставляются министерством строительства Кировской области (пункт 3).

Распределение субсидий осуществляется между муниципальными районами, муниципальными округами, городскими округами, городскими поселениями Кировской области (далее - муниципальные образования) - участниками областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» (далее - адресная программа), утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 27.03.2019 N 113-П "Об областной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года», которые выполнили установленные статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 N185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» условия предоставления финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», на территории которых расположены аварийные многоквартирные дома, признанные таковыми до 01 января 2017 года (пункт 4).

Субсидии предоставляются муниципальному образованию при соблюдении следующих условий: при наличии муниципальной программы, содержащей мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и (или) муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии; при заключении между министерством и администрацией муниципального образования соглашения о предоставлении субсидий (дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидий) в электронном виде в автоматизированной системе управления бюджетным процессом Кировской области в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета, утверждаемой министерством финансов Кировской области (пункты 6, 6.1, 6.2).

В соответствии с пунктом 7 результатами использования субсидий являются: количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров; количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, человек. Снижение значений результатов использования субсидий в течение текущего финансового года возможно только в случае сокращения размеров субсидий.

Муниципальные образования предоставляют в министерство: отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодный отчет не позднее 10 января 2025 года; отчет о достижении значений результатов использования субсидий не позднее 15 января 2025 года (пункт 12).

Из материалов дела следует, что МО «

<

адрес>» является участником адресной программы, интересы которого в силу положений части 1 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 34,37 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 29 Устава муниципального образования «Город Киров», утвержденного решением Кировской городской Думы от 29 июня 2005 года №42/19, представляет администрация города Кирова.

Администрация МО «Город Киров» является получателем бюджетных ассигнований из областного бюджета Кировской области.

В соответствии с Уставом МО «Город Киров» администрация города Кирова является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления муниципального образования, наделенным настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Кировской области (часть 1 статьи 29 Устава) Администрацией города Кирова на принципах единоначалия руководит глава администрации города (часть 2 статьи 29 Устава).

К компетенции главы администрации города в сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности администрации города относится, в том числе осуществление руководства деятельностью администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации города (пункт 1 статьи 30Устава), осуществление функции главного распорядителя бюджетных средств при исполнении бюджета (пункт 5 статьи 30 Устава).

Решением Кировской городской Думы от 31 октября 2022 года №, распоряжением главы города Кирова от 01 ноября 2022 года №, главой администрации города Кирова назначен ФИО2 (том 1 л.д.66,67)

Министерством строительства Кировской области и администрацией города Кирова в лице главы города Кирова ФИО2 14 февраля 2024 года заключено соглашение №/А о предоставлении из областного бюджета в 2024/2025 и 2026 годах субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Соглашение) (в редакции дополнительных соглашений от 07.03.2024, 11.06.2024. 07.08.2024, 09.08.2024, 14.08.2024, 30.09.2024, 30.10.2024, 04.12.2024, 24.12.2024). Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2024 году не более 1164792400,00 руб. (т.1 л.д.73-80, 83-109)

В соответствии с пунктом 4.3.3 Соглашения получатель субсидии обязуется обеспечивать достижение результатов использования субсидии, установленных Приложением № к Соглашению, согласно которому (в редакции дополнительного соглашения №/А) результатам использования субсидии, в том числе является: расселение до 31 декабря 2024 года 374 граждан из аварийного жилищного фонда в многоквартирный жилой дом в 

<

адрес> на земельном участке с адресом: 

<

адрес>, земельный участок № расселение до 31 декабря 2024 года 300 граждан из аварийного жилищного фонда в многоквартирный жилой дом в 

<

адрес> на земельном участке с адресом: 

<

адрес>, земельный участок № (т.1 л.д.81 оборот.сторона – 82)

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской области (пункт 5.1 Соглашения).

Согласно пункту 5.3 Соглашения Муниципалитет за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда несет ответственность в виде возврата в областной бюджет части средств финансовой поддержки за счет средств Фонда: в сумме 17 рублей за каждый квадратный метр общей площади жилых помещений, переселение граждан из который было просрочено и тем самым привело к недостижению целевого показателя, за каждый день такой просрочки. При этом для целей расчета суммы, подлежащей уплате, в объеме достижений целевого показателя также учитывается общая площадь жилых помещений, переселение граждан из которых еще не завершено (не заключены договоры социального найма, договоры о передаче права собственности на жилое помещение взамен изымаемого помещения (договоры мены) если: а) гражданам фактически предоставлена возможность проживания в жилых помещениях, подлежащих предоставлению им на основании договора социального найма или договора о передаче в собственность жилого помещения взамен изымаемого жилого помещения (договора мены); б) дома, в которых находятся указанные жилые помещения введены в эксплуатацию (имеется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию). Предоставление гражданам возможности фактического проживания в указанных жилых помещениях должно быть подтверждено: а) договорами, предусматривающими обязательство Муниципалитета по предоставлению гражданину данного жилого помещения по договору социального найма или в собственность или предварительными договорами, предусматривающими обязательство Муниципалитета заключить с гражданином в будущем договор социального найма или договор о передаче в собственность данного помещения; б) передаточным актом, подписанным гражданином и Муниципалитетом (в случаях, когда Муниципалитет на момент подписания акта не имеет права распоряжаться жилым помещением, он должен быть уполномочен на подписание данного акта застройщиком), подтверждающим фактическую передачу помещения гражданину.

28 января 2025 года администрацией города Кирова в министерство строительства направлен отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии (Приложение № к Соглашению от 

<

дата> №/А), в котором искажены наименования результатов использования субсидии, а именно в направленном отчете администрацией указано:

-374 переселяемых граждан из аварийного жилищного фонда в многоквартирный жилой дом в 

<

адрес> на земельном участке с адресом: 

<

адрес>, земельный участок №

-300 переселяемых граждан из аварийного жилищного фонда в многоквартирный жилой дом в 

<

адрес> на земельном участке с адресом: 

<

адрес>, земельный участок №т.1 л.д.57)

При этом в соответствии с утвержденным Соглашением Приложением № – наименованием результатов использования субсидии являлось:

-расселение до 31 декабря 2024 года 374 граждан из аварийного жилищного фонда в многоквартирный жилой дом в 

<

адрес> на земельном участке с адресом: 

<

адрес>, земельный участок №

-расселение до 31 декабря 2024 года 300 граждан из аварийного жилищного фонда в многоквартирный жилой дом в 

<

адрес> на земельном участке с адресом: 

<

адрес>, земельный участок №

На основании решения первого заместителя прокурора Кировской области от 04 декабря 2024 года и решения о продлении проверки от 27 декабря 2024 года проведена проверка в министерстве строительства Кировской области в период с 05 декабря 2024 года до 24 января 2025 года на предмет соблюдения, в том числе постановления Правительства Кировской области от 27.03.2019 N 113-П «Об областной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года».

В ходе проверки было установлено, что администрацией г.Кирова не исполнена адресная программа, несмотря на выполнение целевых показателей 2024 года, вместо реальных действий по переселению граждан в новые квартиры в двух домах г.Кирове по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес> люди объявлены в розыск. Опрос граждан показал, что их не разыскивали, жилые помещения не предлагали. 10 февраля 2025 года в адрес губернатора Кировской области направлено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Информация о выявленных нарушениях прокуратурой Кировской области направлена прокурору Ленинского района г.Кирова.

Прокуратурой Ленинского района г.Кирова при проверке соблюдения законодательства при исполнении адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года», утвержденной постановлением правительства Кировской области от 27.03.2019 №-П во исполнение требований приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 14 марта 2019 года № «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов», указания Генерального прокурора Российской Федерации от 18 марта 2020 года № «Об активизации прокурорского надзора за исполнением требований законодательства о целевом использовании бюджетных средств» было установлено, что по состоянию на 

<

дата> не был достигнут результат использования Субсидии, указанный в Приложении № к Соглашению от 

<

дата> №/А, поскольку не обеспечено расселение 374 граждан из аварийного жилищного фонда в многоквартирный дом в ленинском районе 

<

адрес> на земельном участке с адресом: 

<

адрес>, земельный участок № и 300 граждан из аварийного жилищного фонда в многоквартирный дом в 

<

адрес> на земельном участке с адресом: 

<

адрес>, земельный участок №

Сведения, представленные администрацией гор.Кирова в министерство строительства Кировской области о невозможности установления местонахождения ряда граждан по состоянию на 01 января 2025 года не нашли своего подтверждения. Место пребывания ФИО17, ФИО7, ФИО15, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО16, ФИО12, ФИО13, ФИО14 было установлено МКУ «Кировское жилищное управление» в сентябре – ноябре 2024 года. Договоры заключены не со всеми гражданами. ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18 не были расселены из аварийного жилья в срок до 31 декабря 2024 года.

Таким образом, на 01 января 2025 года не был достигнут результат использования субсидии, указанный в Приложении № к Соглашению от 14 февраля 2024 года №/А, по расселению указанных граждан до 31 декабря 2024 года. Достижение планируемых показателей по количеству переселенных граждан, количеству закрепленных квадратных метров в пределах установленного срока на основании заключенного Соглашения обеспечено частично.

Данные обстоятельства явились основанием для вынесения заместителем прокурора Ленинского район г.Кирова ФИО19 05 сентября 2025 года постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении главы администрации города Кирова ФИО2 по части 3 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. (том 1 л.д.43-53)

Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении с материалами прокурорской проверки направлены для рассмотрения в Министерство финансов Кировской области. (т.1 л.д.41)

Заместитель министерства финансов Кировской области ФИО1, оценив доказательства по делу, приведенные доводы о невиновности, пришел к выводу о доказанности совершения главой администрации г.Кирова ФИО2 административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Признавая ФИО2 виновным в совершении административного правонарушения, должностным лицом указано, что ФИО2, являясь руководителем администрации г.Кирова, подписав Соглашение и возложив выполнение предусмотренных Соглашением обязательств за деятельностью отраслевых органов администрации города, должным образом не осуществил контроль за их деятельностью и не принял всех зависящих от него мер, направленных на достижение плановых показателей результативности использования субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. По состоянию на 01 января 2025 года в нарушение условий расходования представленных средств субсидии, предусмотренных пунктом 3, подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения, не обеспечил достижение значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением №2 к Соглашению, являющимся неотъемлемой его частью.

Проверяя законность вынесенного по делу постановления, судья районного суда согласился с выводами должностного лица административного органа.

Оснований не согласиться с принятыми по делу актами не усматриваю.

Обстоятельства совершения административного правонарушения, подтверждаются постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении (т.1 л.д.43-53), отчетом о достижении значений показателей результативности использования субсидии по состоянию на 01 января 2025 года (т.1 л.д.57); соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету (т.1 л.д.73-80); материалами прокурорской проверки (т.1 л.д.149-200, т.2), представленными при настоящем рассмотрении решениями о проведении проверки и её продлении от 04 декабря и от 27 декабря 2024 года, представлением прокуратуры Кировской области от 10 февраля 2025 года, иными доказательствами, которые отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

Доводы жалобы несостоятельны, им дана правильная правовая оценка как в постановлении должностного лица, так и в решении судьи районного суда.

Обязательство по достижению основных, определенных Соглашением показателей, которые включают в себя не только количество квадратных метров жилья, но и количество переселенных граждан, а также срок, в который это обязательство необходимо достичь-31 декабря 2024 года.

Материалами дела подтверждено, что в указанный срок запланированное количество граждан для переселения жильем не обеспечено, а, следовательно, достижение планируемых показателей по количеству переселенных граждан, количеству закрепленных квадратных метров администрацией города Кирова на основании заключенного Соглашения обеспечено частично, значения показателей результативности не были достигнуты, что нарушает порядок и условия предоставления субсидии.

Имеющиеся в материалах дела акты от 12 ноября, 13 ноября, 14 ноября, 15 ноября, 18 ноября, 19 ноября, 20 ноября 02 декабря, 04 декабря, 06 декабря 2024 года, обращения в УМВД России по г.Кирову о содействии в установлении местонахождения и контактных данных граждан для расселения и сноса аварийных домов, о предоставлении сведений о заведении розыскных дел от 13 декабря 2023 года, от 11 декабря 2024 года не могут быть признаны достаточными мерами по соблюдению требований законодательства для исполнения взятых на себя обязательств по достижению до 31 декабря 2024 года результатов использования субсидии, указанных в Приложении № 2 Соглашения. (т.3 л.д.27-34, 35-42)

Согласно статье 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей ФИО2, являясь главой администрации города Кирова - должностным лицом получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации, не предпринял все зависящие от него меры по соблюдению требований законодательства для исполнения взятых на себя обязательств по достижению до 31 декабря 2024 года результатов использования субсидии, указанных в Приложении № Соглашения, а именно расселение 374 граждан из аварийного жилищного фонда в многоквартирный жилой дом в 

<

адрес> на земельном участке с адресом: 

<

адрес>, земельный участок № и 300 граждан из аварийного жилищного фонда в 

<

адрес> на земельном участке с адресом: 

<

адрес>, земельный участок №

Выводы должностного лица и судьи районного суда о наличии в деянии главы администрации города Кирова ФИО2 состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам.

Действия квалифицированы в соответствии с установленными обстоятельствами, нормами названного кодекса и подлежащего применению законодательства.

Субъект административного правонарушения определен верно. Отсутствие мер ответственности к муниципальному образованию за недостижение результатов использования субсидий, за невыполнение мероприятий по переселению граждан аварийного жилищного фонда в 2024 году не свидетельствует о незаконности принятых по делу актов.

Требования статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении дела об административном правонарушении выполнены, на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства его совершения, предусмотренные статьей 26.1 названного Кодекса.

Доводы жалобы не содержат правовых аргументов, ставящих под сомнение законность и обоснованность обжалуемых актов.

При рассмотрении дела не допущено нарушений норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и (или) предусмотренные им процессуальные требования, не позволивших всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. Нормы материального права применены правильно.

Порядок и срок давности привлечения к административной ответственности не нарушены.

Административное наказание назначено с соблюдением требований статей 3.1, 3.4, части 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Применение положений части 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений при выявлении административного правонарушения в ходе прокурорской проверки при осуществлении прокурорского надзора соответствует правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, отраженной в постановлении от 18 июля 2024 г. N 39-П «По делу о проверке конституционности положения части 1.3 - 3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «НТСИ Телеком».

Руководствуясь статьями 30.7, 30.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, судья

Р Е Ш И Л:

постановление заместителя министра финансов Кировской области ФИО1 № от 17 сентября 2025 года, решение судьи Октябрьского районного суда г.Кирова от 27 ноября 2025 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица – главы администрации города Кирова ФИО2 оставить без изменения, жалобу защитника Власовой О.Н. - без удовлетворения.

Решение вступает в законную силу в день его вынесения и может быть обжаловано в Шестой кассационный суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном статьями 30.12-30.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Судья

Кировского областного суда Т.Н. Мазюта