Дело № 2-1377/2017 30 ноября 2017 года 

Решение

Именем Российской Федерации

Приозерский городской суд Ленинградской области в составе:

Председательствующего судьи Глазковой Т.А, 

при секретаре Лещик Ю.А.,

без участия сторон,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Ленэнерго» к ФИО1 об обязании исполнения обязательств, 

установил:

ПАО «Ленэнерго» обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО1 об обязании исполнения обязательств, истец просит: 

- Обязать ФИО1 в течение 30 дней, с даты вынесения решения суда, исполнить обязательство, предусмотренное п.8 Договора № от 18.06.2014г. и Технические условия (Приложение №1 к Договору), а именно:

- Установить ВРУ с РЩ-0,4кВ в границах земельного участка с соблюдением требований ПУЭ. При необходимости предусмотреть установку вводной опоры либо трубостойки для ВРУ. Присоединить к ВРУ провод необходимого сечения и длиною, достаточной для присоединения его к проводам магистральной ВЛ-0,4кВ на отпаечной опоре, находящейся на расстоянии не далее 25 метров от ВРУ заявителя.

- от ВРУ построить ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ) до жилого дома (иных объектов электроснабжения) и внутреннюю проводку объектов электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ.

-смонтировать внутреннюю распределительную сеть объекта электроснабжения.

-установить вводной автоматический выключатель номиналом 25 А, срабатывающий при увеличении мощности свыше договорной величины с возможностью его защиты от несанкционированного доступа (пломбирующая крышка).

-предъявить к осмотру присоединяемые энергопринимающие устройства в соответствие с действующими нормативными документами.

- взыскать с ФИО1 расходы по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Мотивируя свои требования тем, что 18.06.2014г. между ОАО «Ленэнерго» (ныне - ПАО «Ленэнерго», Сетевая организация, Истец) и ФИО1 (далее - Заявитель, Ответчик) заключен- Договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям строящегося дома Заявителя, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения Договора. Согласно п. 8 Договора, Заявитель обязуется:

-надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; 

-принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

-после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежностиэлектрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 30 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации;

-надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

-уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. В соответствие с п. 11 Технических условий, являющихся неотъемлемой частью Договора, Заявитель обязан:

- Установить ВРУ с РЩ-0,4кВ в границах земельного участка с соблюдением требований ПУЭ. При необходимости предусмотреть установку вводной опоры либо трубостойки для ВРУ. Присоединить к ВРУ провод необходимого сечения и длиною, достаточной для присоединения его к проводам магистральной ВЛ-0,4кВ на отпаечной опоре, находящейся на расстоянии не далее 25 метров от ВРУ заявителя.

- От ВРУ построить ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ) до жилого дома (иных объектов электроснабжения) и внутреннюю проводку объектов электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ.

-Смонтировать внутреннюю распределительную сеть объекта электроснабжения.

-- Установить вводной автоматический выключатель номиналом 25А, срабатывающий при увеличении мощности свыше договорной величины с возможностью его защиты от несанкционированного доступа (пломбирующая крышка).

Ни в установленный договором срок, ни на дату подачи искового заявления ответчиком не исполнены обязательства по договору, в части выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Со стороны ПАО «Ленэнерго» все мероприятия по технологическому присоединению выполнены в полном объеме, о чем неоднократно сообщалось заявителю в Уведомлении № от 19.12.2016г. и претензии № от 14.04.2017г. Заявитель не отказывался в одностороннем порядке от исполнения Договора и от услуги технологического присоединения своего энергопринимающего устройства к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго».

Истец ПАО «Ленэнерго» в судебном заседании, извещен надлежащим образом, представителя не направил, ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Ответчик, извещенный по последнему месту регистрации, в судебное заседание не явился, судебное извещение возвращено по истечении срока хранения.

Суд, руководствуясь ст.ст. 119,167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с учетом надлежащего извещения сторон, принимая во внимание, что судом предприняты все меры для надлежащего извещения ответчика, счел возможным рассмотреть гражданское дело по существу при имеющейся явке. 

Суд, исследовав материалы дела и оценивая собранные по делу доказательства, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 308.3, 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. В случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно статье 26 Федерального закона от 26.03.2003г. №35-Ф3 «Об электроэнергетике» (далее - Закон «Об электроэнергетике») по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случая, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Согласно абзацу 5 статьи 21 Закона «Об электроэнергетике» порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствие с законодательством об электроэнергетике. Во исполнение положений вышеназванной статьи Постановлением Правительства Российской Федерации 27.12.2004г. № 861 утверждены Правила технологического присоединена энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов ю производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Из материалов дела следует, что 18.06.2014г. между ОАО «Ленэнерго» (ныне - ПАО «Ленэнерго», Сетевая организация, Истец) и ФИО1 (далее - Заявитель, Ответчик) заключен Договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям строящегося дома Заявителя, расположенного по адресу: 

<

адрес> Согласно п. 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения Договора. Согласно п. 8 Договора, Заявитель обязуется:

-надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; 

-принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

-после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежностиэлектрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 30 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации;

-надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

-уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. В соответствие с п. 11 Технических условий, являющихся неотъемлемой частью Договора, Заявитель обязан:

- Установить ВРУ с РЩ-0,4кВ в границах земельного участка с соблюдением требований ПУЭ. При необходимости предусмотреть установку вводной опоры либо трубостойки для ВРУ. Присоединить к ВРУ провод необходимого сечения и длиною, достаточной для присоединения его к проводам магистральной ВЛ-0,4кВ на отпаечной опоре, находящейся на расстоянии не далее 25 метров от ВРУ заявителя.

- От ВРУ построить ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ) до жилого дома (иных объектов электроснабжения) и внутреннюю проводку объектов электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ.

-Смонтировать внутреннюю распределительную сеть объекта электроснабжения.

- Установить вводной автоматический выключатель номиналом 25А, срабатывающий при увеличении мощности свыше договорной величины с возможностью его защиты от несанкционированного доступа (пломбирующая крышка).

Пункт 18 Правил ТП предусматривает, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение. технических условий как сетевой организацией, так и заявителем, включая проверку выполнения технических условий заявителем сетевой организацией.

Согласно п. 6 Договора срок фактического присоединения к сетям с выдачей акта об осуществлении технологического присоединения и актов разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон составляет 30 рабочих дней со дня проведения проверки сетевой организацией выполнения заявителем технических условий о своей стороны. Из условий договора объективно следует, что срок исполнения обязательств сетевой организации находится в прямой зависимости заявителем мероприятий по технологическому присоединению со своей стороны и исчисляется со дня истечения 30 рабочих дней, предоставленных сетевой организации в соответствие с п.6 договора на совершение дальнейших, предусмотренных договором, действий.

В силу п.85 Правил ТП, для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением копий сертификатов соответствия на электрооборудование (если оно подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики.

Материалами дела подтверждается, что в установленный договором срок и по настоящее время, ответчиком не исполнены обязательства по договору, в части выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Со стороны ПАО «Ленэнерго» заявителю было направлено Уведомление об исполнении технических условий сетевой организации 

<

адрес> от 19.12.2016г. и претензии 

<

адрес> от 14.04.2017г.

Заявитель не отказывался в одностороннем порядке от исполнения Договора и от услуги технологического присоединения своего энергопринимающего устройства к электрическим сетям 

<

адрес>

Так как до настоящего времени ответчиком обязательства по договору не исполнены, суд находит требование истца обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

решил:

исковые требования ПАО «Ленэнерго» к ФИО1 об обязании исполнения обязательств - удовлетворить.

Обязать ФИО1, зарегистрированного по адресу: 

<

...> в течение 30 дней, с даты вынесения решения суда, исполнить обязательство, предусмотренное п.8 Договора № от 18.06.2014г. и Технические условия (Приложение №1 к Договору), а именно: Установить ВРУ с РЩ-0,4кВ в границах земельного участка с соблюдением требований ПУЭ. При необходимости предусмотреть установку вводной опоры либо трубостойки для ВРУ. Присоединить к ВРУ провод необходимого сечения и длиною, достаточной для присоединения его к проводам магистральной ВЛ-0,4кВ на отпаечной опоре, находящейся на расстоянии не далее 25 метров от ВРУ заявителя, от ВРУ построить ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ) до жилого дома (иных объектов электроснабжения) и внутреннюю проводку объектов электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ, смонтировать внутреннюю распределительную сеть объекта электроснабжения, установить вводной автоматический выключатель номиналом 25 А, срабатывающий при увеличении мощности свыше договорной величины с возможностью его защиты от несанкционированного доступа (пломбирующая крышка), предъявить к осмотру присоединяемые энергопринимающие устройства в соответствие с действующими нормативными документами.

Взыскать с Д ФИО1, зарегистрированного по адресу: Ленинградская 

<

адрес> государственную пошлину в размере 600 рублей 00 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение месяца через Приозерский городской суд.

Председательствующий

мотивированное решение изготовлено 05 декабря 2017 года