66RS0051-01-2024-001186-76

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Серов Свердловской области «19» сентября 2024 года 

Серовский районный суд Свердловской области в составе председательствующего Фарафоновой Е.А., при секретаре судебного заседания Бобровой С.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1220/2024 по иску

Прокурора Гаринского района, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Обществу с ограниченной ответственностью Лесная компания «ТЕТЛА» о понуждении выполнить лесовосстановительные и противопожарные мероприятия,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Гаринского района, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в Серовский районный суд с вышеуказанным исковым заявлением.

В обоснование требований указано, что Прокуратурой Гарийского района проведены надзорные мероприятия в сфере соблюдения требований лесного законодательства по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению, а также требований законодательства о пожарной безопасности. В прокуратуру Гаринского района поступили материалы проверки из ГКУ СО «Гаринское лесничество» от 22.03.2024 года № 127 «О лесопользователях, не выполнивших в полном объёме мероприятия по противопожарному обустройству лесов в соответствии с договором аренды и проектом освоения лесов в 2023 году и не устранивших нарушения», а также информация от 22.03.2024года № 121 «О невыполнении условий договора аренды лесного участка», ООО Лесная Компания «ТЕТЛА» являющейся арендатором лесного участка на территории Гаринского лесничества, не выполнены в полном объеме следующие лесовосстановительные и противопожарные мероприятия на арендуемых лесных участках, запланированные на 2023 год, а именно: Благоустройство зон отдыха 4 шт.; Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам водоснабжения - 1 шт.; Создание лесных культур (искусственное лесовосстановление) - 34,8 га.; Содействие естественному лесовосстановлению - 158,1 га.; Комбинированное лесовосстановление - 75,0 га.; Дополнение лесных культур - 14,4 га.; Агротехнический уход за лесными культурами -216,9 га.; Подготовка почвы под культуры будущего года - 34,8 га.; Уход за молодняками - 50,5 га.; Проходные рубки,- 71,3 га.; Прореживание - 110,5 га. В соответствии с договором аренды лесного участка для заготовки древесины от 12.05.2020 года № 1063 Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области обществу с ограниченной ответственностью Лесная Компания «ТЕТЛА» предоставлены во временное пользование лесные участки для заготовки древесины, находящиеся в государственной собственности, площадью 53891,8 га., имеющим местоположение: Свердловская область, Гаринский городской округ, Гаринское лесничество, Кузнецовское участковое лесничество, Андрюшинский участок, лесные кварталы № 103 (1-24, 26-38, 41-44), 104-109, 115-122, 130-134, 143- 148, 160-168, 173-173, 180(1-5, часть 6 часть 7, 8-10, часть 11, 12, часть 13, 14- 16, часть 17, часть 18, часть 19, часть 20, 22-24), 181 (1-15, часть 16, 17-21), 182-194, 195 (1-22, 24), 196 (часть 1, 2-4, часть 6, часть 7, 8-18), 197-232, 237- 252, 257-271, являющегося частью земельного участка с кадастровым номером 66:10:0000000:508. Свердловская область, Гаринский городской округ, Гаринское лесничество, Андрюшинское участковое лесничество, урочище совхоз «Крутореченский»

<

...>, 32 (1-19, часть 20, 21, 22, часть 23, 24, 25, часть, 26, 27), 33 (1-20, часть 21, 22-27), 39-41, 69-71, 72 (1-13, часть 14, часть15, 16-32), 73 (1-14, часть 15, 16, 17, часть 18, 19-33), 74-77, являющегося частью земельного участка с кадастровым номером 66:10:0000000:507. Объемы и сроки выполнения работ по противопожарному обустройству и санитарной безопасности лесов изложены в приложении № 7 к договору аренды лесного участка от 12.05.2020 года № 1063, а также в Проекте освоения лесов ООО Технологии безопасности «АВАН» (таблица 4.2). Таким образом, ООО Лесная Компания «ТЕТЛА» в соответствии с Договором, приняло на себя обязательства использовать лесной участок по назначению в соответствии с лесным законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором аренды, осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия, лесовосстановление и уход за лесом, а также противопожарные мероприятия на арендуемом участке на условиях, в объемах и в сроки, которые указаны в Проекте освоения лесов и приложении № к договору аренды лесного участка.

В исковом заявлении просит суд: Обязать ООО Лесная Компания «ТЕТЛА», в течении одного месяца после вступления решения суда в законную силу, произвести запланированные на 2023 год противопожарные мероприятия на предоставленных в пользование лесных участках, а именно: Благоустройство зон отдыха 4 шт.; Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам водоснабжения - 1 шт.; Создание лесных культур (искусственное лесовосстановление) - 34,8 га.; Содействие естественному лесовосстановлению - 158,1 га.; Комбинированное лесовосстановление - 75,0 га.; Дополнение лесных культур - 14,4 га.; Агротехнический уход за лесными культурами - 216,9 га.; Подготовка почвы под культуры будущего года - 34,8 га.; Уход за молодняками - 50,5 га.; Проходные рубки - 71,3 га.; Прореживание - 110,5 га.

Стороны в судебное заседание не явились, своего представителя не направили, о времени и месте судебного заседания извещены заблаговременно, каких-либо ходатайств не представили. 

Представитель ответчика ООО ЛК «Тетла» ФИО1 суду предоставил отзыв (возражения) на исковое заявление, согласно которых, Ответчик с исковыми требованиями не согласен на основании следующего: 1. Благоустройство зон отдыха 4 шт. Данные мероприятия Ответчиком выполнены в полном объеме. Как указано в Акте приема-сдачи выполненных работ от 28.06.2024 года по Договору аренды лесного участка № 1063 от 12.05.2020 года, Исполнитель (ООО ЛК «Тетла») выполнил, а Заказчик (ГКУ СО «Гаринское лесничество») принял работы по благоустройству мест отдыха в количестве 4 штук. 2. Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения – 1 шт. Данные мероприятия Ответчиком выполнены в полном объеме. Как указано в Акте приема-сдачи выполненных работ от 30.06.2024 года по Договору аренды лесного участка № 1063 от 12.05.2020 года. Исполнитель (ООО ЛК «Тетла») выполнил, а Заказчик (ГКУ СО «Гаринское лесничество») принял работы по эксплуатации подъезда к противопожарному водоему п. Тройное, дорога к озеру Русское. 3. Создание лесных культур (искусственное лесовосстановление) - 34,8 га. Данные мероприятия Ответчиком выполнены частично, в максимально возможном объеме. Как указано в Акте приема-сдачи выполненных работ от 30.06.2024 года по Договору аренды лесного участка № 1063 от 12.05.2020 года, Исполнитель (ООО ЛК «Тетла») выполнил, а Заказчик (ГКУ СО «Гаринское лесничество») принял работы по созданию лесных культур (искусственное лесовосстановление, ОКС) в Андрюшинском участковом лесничестве, урочище совхоз Крутореченский: квартал 40 выдел 4, квартал 76 выдел 19, квартал 75 выдел 23, всего на площади 9,2 га. В настоящее время Ответчиком производятся работы по подготовке почвы под посадку саженцев. Посадка будет производится в осенний период в соответствии с агротехническими сроками и проектом освоения лесов. В настоящее время (до наступления осеннего периода) производство работ по искусственному лесовосстановлению невозможны, саженцы попросту не приживутся. 4. Содействие естественному лесовосстановлению 158,1 га. В настоящее время Ответчиком производятся работы по подготовке почвы к содействию естественному лесовосстановлению. Соответствующие мероприятия будут выполнены в осенний период в соответствии с агротехническими сроками и проектом освоения лесов. 5. Комбинированное лесовосстановление - 75 га. Данные мероприятия Ответчиком выполнены частично, в максимально возможном объеме. Как указано в Акте приема-сдачи выполненных работ от 30.06.2024 года по Договору аренды лесного участка № 1063 от 12.05.2020 года, Исполнитель (ООО ЛК «Тетла») выполнил, а Заказчик (ГКУ СО «Гаринское лесничество») принял работы по комбинированному лесовосстановлению (саженцы ОКС) в Андрюшинском участковом лесничестве, урочище совхоз Крутореченский: квартал 76 выделы 1,2, 4, 6, квартал 77 выдел 4, всего на площади 46,1 га. В настоящее время Ответчиком производятся работы по подготовке почвы под посадку саженцев. Посадка будет производится в осенний период в соответствии с агротехническими сроками и проектом освоения лесов. В настоящее время (до наступления осеннего периода) производство работ по искусственному лесовосстановлению невозможны, саженцы попросту не приживутся. 6. Дополнение лесных культур - 14,4 га. В настоящее время (до наступления осеннего периода) производство работ по дополнению лесных культур невозможно, саженцы попросту не приживутся. Посадка саженцев будет производится в осенний период, в соответствии с агротехническими сроками и проектом освоения лесов. 7. Агротехнический уход за лесными культурами - 216,9 га. Данные мероприятия Ответчиком выполнены частично, в максимально возможном объеме. Как указано в Акте приема-сдачи выполненных работ от 30.06.2024 года по Договору аренды лесного участка № от 12.05.2020 года, Исполнитель (ООО ЛК «Тетла») выполнил, а Заказчик (ГКУ СО «Гаринское лесничество») принял работы по агротехническому уходу за лесными культурами (оправка саженцев) в Андрюшинском участковом лесничестве, урочище совхоз Крутореченский: квартал 76 выделы 1, 2, 4, 6, квартал 77 выдел 4, квартал 40 выдел 4, квартал 76 выдел 19, квартал 75 выдел 23, всего на площади 55,3 га. При этом в настоящее время Ответчик продолжает производство работ по агротехническому уходу за лесными культурами, работы запланированы на летний и осенний периоды в соответствии с агротехническими сроками и проектом освоения лесов. 8. Подготовка почвы под культуры будущего года - 34,8 га. Данные мероприятия Ответчиком выполнены, даже с запасом на будущий год. Как указано в Акте приемки выполненных работ от 13.12.2023 года по Договору аренды лесного участка № 1063, Исполнитель (ООО ЛК «Тетла») в 2023 году выполнил, а Заказчик (ГКУ СО «Гаринское лесничество») принял работы по подготовке почвы под комбинированные лесные культуры на площади 57,55 га и под сплошные лесные культуры на площади 11,6 га, а всего на площади 69,15 га. 9. Уход за молодняками 50,5 га. Осуществление данного вида мероприятий невозможно. Так. Арбитражным судом Свердловской области было рассмотрено исковое заявление Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (№) к обществу с ограниченной ответственностью Лесная компания «Тетла» (ИНН 

<

***>, №) о возложении обязанности выполнения мероприятий по рубкам ухода за лесом. При этом Истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к ответчику с требованием об обязании выполнить мероприятия по рубкам ухода за лесом на площади 7,2 га на лесном участке, переданного по договору аренды № 1092 от 09.06.2021 года Решением Арбитражного суда Свердловской области от 22.09.2023 года по делу № А60-27397/2023 исковые требования удовлетворены. Суд обязал ООО Лесная компания «Тетла» в срок до 01.11.2023 года выполнить мероприятия по рубкам ухода за лесом за 2022 год на площади 7,2 га. Однако, Определением Арбитражного суда Свердловской области от 28.05.2024 года по делу № А60-27397/2023 было удовлетворено заявление ООО ЛК «Тетла» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о прекращении исполнительного производства по делу №А60-27397/2023. Арбитражный суд прекратил исполнительное производство № 66924/24/66001-ИП от 01.03.2024 года, возбужденное на основании исполнительного листа ФС №043914469 от 29.01.2024 года, выданного Арбитражным судом Свердловской области по делу №А60-27397/2023. При этом, в указанном определении было указано, что «как следует из материалов дела, в целях исполнения судебного акта ООО ЛК «Тетла» подготовлена и направлена в Минприроды СО лесная декларация от 10.04.2024 года, которая предусматривала проведение рубок ухода в молодняках на площади 7,2 га на основании проекта освоения лесов. В принятии лесной декларации было отказано, что подтверждается уведомлением от 15.04.2024 года № ЛД-20240410-17387997039-4. Согласно справке ООО «ПромТехПроект» от 17.04.2024 года лесосеки для проведения рубок ухода в молодняках (прочистки), указанные в проекте освоения лесов в соответствующей таблице, в настоящее время непригодны для проведения данных работ по причинам их несоответствия по возрасту, рубки ухода в молодняках (осветления, прочистки) проводятся в лесных насаждениях в возрасте до 20 лет (включительно). Лесоустройство на данных участках проводилось в 1987 году и в 1990 году. С учетом периода времени, прошедшего с момента лесоустройства, эти лесные насаждения не подходят для проведения рубок ухода в молодняках, так как в настоящее время молодняками не являются. В целях получения актуальных сведений о количественных и качественных характеристиках лесного участка, арендуемого по договору от 09.06.2021 года № 1092, за счет средств ООО ЛК «Тетла» в 2022-2023 годах проведена таксация лесов. Материалы таксации приняты на 2-м лесоустроительном совещании 28.12.2023 года, полученные данные о лесном участке внесены в государственный лесной реестр. Согласно материалам таксации 2022-2023 годов проведение на лесном участке рубок ухода за молодняками не предусмотрено, так как площади, нуждающиеся в проведении данных работ, отсутствуют (таблица 3.1 проектной документации). Таким образом, учитывая вышеприведенные фактические обстоятельства, исходя из того, что заявителем представлены доказательства, достоверно свидетельствующие о реальной утрате возможности исполнения исполнительного документа, заявление о прекращении исполнительного производства № 66924/24/6600 КИП от 01.03.2024 года суд удовлетворяет». Поясняют, что упомянутая Арбитражным судом Свердловской области таксация лесов, проведенная за счет средств ООО ЛК «Тетла», касается и лесных участков, арендуемых ООО ЛК «Тетла» по Договору аренды лесного участка № 1063 от 12.05.2020 года. Таким образом, и на арендуемых по Договору аренды лесного участка № 1063 от 12.05.2020 года лесных участках проведение рубок ухода за молодняками не предусмотрено, так как площади, нуждающиеся в проведении данных работ, отсутствуют (таблица 3.1 проектной документации). 10. прореживание 110,5 га. Прореживание, то есть выборочные или проходные рубки (рубки по уходу за лесом) регулярно проводятся ООО ЛК «Тетла». Как следует из Отчета об использовании лесов (Форма № 1-ИЛ) за январь - декабрь 2023 года, в Андрюшинском участковом лесничестве, урочище Совхоз Крутореченский и в Кузнецовском участковом лесничестве, урочище Андрюшинский ООО ЛК «Тетла» осуществляло выборочную рубку на общей площади: (19 га + 28,1 га + 9,85 га) 56,95 га. При этом работы выполнялись в соответствии с проектом освоения лесов и лесными декларациями, переходящими на январь 2024 года. Как следует из Отчета об использовании лесов (Форма № 1-ИЛ) за январь 2024 года, в Андрюшинском участковом лесничестве, урочище Совхоз Крутореченский ООО ЛК «Тетла» осуществляло выборочную рубку на общей площади: (19 га + 28,1 га + 9,85 га + 9 га) 65,95 га, а всего за период 122,9 га. В связи с чем, просит отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Суд в порядке ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определил, рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Суд, исследовав позицию сторон, изучив материалы гражданского дела, пришел к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

В соответствии со ст. 1 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ЛК РФ), лесное законодательство, в числе прочих, основывается на следующих принципах: обеспечение охраны и защиты лесов; использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.

Согласно ч. 1 ст. 51 ЛК РФ, леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов.

В силу ст. 26 ЛК РФ законное освоение лесного участка и изъятие лесных ресурсов осуществляется только при наличии у лесопользователя проекта освоения лесов и последующим представлением лесопользователем лесной декларации по установленной форме и утвержденному федеральным органом исполнителем власти.

Частью 2 ст. 24 ЛК РФ регламентировано, что невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка.

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 61 ЛК РФ вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству. Воспроизводство лесов включает в себя: лесное семеноводство; лесовосстановление; уход за лесами; осуществление отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями.

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, проекта освоения лесов в части воспроизводства лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков (ч. 4 ст. 61 ЛК РФ).

В соответствии со ст. 62 ЛК РФ, п. 3 Правил лесовосстановления, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 04.12.2020 года № 1014, лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, их биологического разнообразия. На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков.

Согласно ч. 1 ст. 64 ЛК РФ - уход за лесами представляет собой осуществление мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций (вырубка части деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные мероприятия).

В силу ч. 2 ст. 64 ЛК РФ, уход за лесами осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов.

В силу ст. 88 ЛК РФ, приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 года № 69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки» способы и объемы лесовосстановления, а также виды и объемы ухода за лесом при воспроизводстве лесов утверждаются на основании материалов лесоустройства и определяются в проекте освоения лесов.

В судебном заседании установлено и подтверждается письменными материалами дела, что в соответствии с договором аренды лесного участка для заготовки древесины от 12.05.2020 года № 1063 Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области обществу с ограниченной ответственностью Лесная Компания «ТЕТЛА» предоставлены во временное пользование лесные участки для заготовки древесины, находящиеся в государственной собственности, площадью 53891,8 га., имеющим местоположение: Свердловская область, Гаринский городской округ, Гаринское лесничество, Кузнецовское участковое лесничество, Андрюшинский участок, лесные кварталы № 103 (1-24, 26-38, 41-44), 104-109, 115-122, 130-134, 143- 148, 160-168, 173-173, 180(1-5, часть 6 часть 7, 8-10, часть 11, 12, часть 13, 14- 16, часть 17, часть 18, часть 19, часть 20, 22-24), 181 (1-15, часть 16, 17-21), 182-194, 195 (1-22, 24), 196 (часть 1, 2-4, часть 6, часть 7, 8-18), 197-232, 237- 252, 257-271, являющегося частью земельного участка с кадастровым номером 66:10:0000000:508. Свердловская область, Гаринский городской округ, Гаринское лесничество, Андрюшинское участковое лесничество, урочище совхоз «Крутореченский»

<

...>, 32 (1-19, часть 20, 21, 22, часть 23, 24, 25, часть, 26, 27), 33 (1-20, часть 21, 22-27), 39-41, 69-71, 72 (1-13, часть 14, часть15, 16-32), 73 (1-14, часть 15, 16, 17, часть 18, 19-33), 74-77, являющегося частью земельного участка с кадастровым номером 66:10:0000000:507. Объемы и сроки выполнения работ по противопожарному обустройству и санитарной безопасности лесов изложены в приложении № 7 к договору аренды лесного участка от 12.05.2020 года № 1063, а также в Проекте освоения лесов ООО Технологии безопасности «АВАН» (таблица 4.2). 

Прокуратурой Гарийского района проведены надзорные мероприятия в сфере соблюдения требований лесного законодательства по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению, а также требований законодательства о пожарной безопасности. 

В прокуратуру Гаринского района поступили материалы проверки из ГКУ СО «Гаринское лесничество» от 22.03.2024 года № 127 «О лесопользователях, не выполнивших в полном объёме мероприятия по противопожарному обустройству лесов в соответствии с договором аренды и проектом освоения лесов в 2023 году и не устранивших нарушения», а также информация от 22.03.2024года № 121 «О невыполнении условий договора аренды лесного участка», ООО Лесная Компания «ТЕТЛА» являющейся арендатором лесного участка на территории Гаринского лесничества, не выполнены в полном объеме следующие лесовосстановительные и противопожарные мероприятия на арендуемых лесных участках, запланированные на 2023 год, а именно: Благоустройство зон отдыха 4 шт.; Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам водоснабжения - 1 шт.; Создание лесных культур (искусственное лесовосстановление) - 34,8 га.; Содействие естественному лесовосстановлению - 158,1 га.; Комбинированное лесовосстановление - 75,0 га.; Дополнение лесных культур - 14,4 га.; Агротехнический уход за лесными культурами -216,9 га.; Подготовка почвы под культуры будущего года - 34,8 га.; Уход за молодняками - 50,5 га.; Проходные рубки,- 71,3 га.; Прореживание - 110,5 га.

Согласно акта приема-сдачи выполненных работ от 28.06.2024 года по договору аренды лесного участка № 1063 от 12.05.2020 года работы по благоустройству мест отдыха в количестве 4шт. выполнены в полном объеме. 

Согласно акта приема-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору аренды лесного участка № от ДД.ММ.ГГГГ работы по устройству минерализованных противопожарных поло, прочистки и обновления минерализованных противопожарных полос, эксплуатация подъезда к противопожарному водоему выполнены в полном объеме.

Согласно акта приема-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору аренды лесного участка № от ДД.ММ.ГГГГ работы выполнены частично, а именно: по созданию лесных культур (из 34,8 га выполнено 9,2 га); по комбинированному лесовосстановлению (из 75 га выполнено 46,1 га); по агротехническому уходу за лесными культурами (из 216,9 га выполнено 55,3 га).

Согласно акта приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору аренды лесного участка № от ДД.ММ.ГГГГ работы по подготовке почвы под культуры будущего года выполнены в полном объеме.

Согласно отчета об использовании лесов (Форма №-ИЛ) за январь - декабрь 2023 года, в Андрюшинском участковом лесничестве, урочище Совхоз Крутореченский и в Кузнецовском участковом лесничестве, урочище Андрюшинский ООО ЛК «Тетла» осуществляло выборочную рубку на общей площади: (19 га + 28,1 га + 9,85 га) 56,95 га. При этом работы выполнялись в соответствии с проектом освоения лесов и лесными декларациями, переходящими на январь 2024 года. 

Согласно Отчета об использовании лесов (Форма №-ИЛ) за январь 2024 года, в Андрюшинском участковом лесничестве, урочище Совхоз Крутореченский ООО ЛК «Тетла» осуществляло выборочную рубку на общей площади: (19 га + 28,1 га + 9,85 га + 9 га) 65,95 га, а всего за период 122,9 га. 

Таким образом, ООО Лесная Компания «ТЕТЛА» в соответствии с Договором, приняло на себя обязательства использовать лесной участок по назначению в соответствии с лесным законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором аренды, осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия, лесовосстановление и уход за лесом, а также противопожарные мероприятия на арендуемом участке на условиях, в объемах и в сроки, которые указаны в Проекте освоения лесов и приложении № к договору аренды лесного участка, однако в полном объеме необходимые работы не выполнила в установленные сроки.

В связи с чем и с иучетом вышеизложенного, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Исковых требований Прокурора Гаринского района, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Обществу с ограниченной ответственностью Лесная компания «ТЕТЛ» о понуждении выполнить лесовосстановительные и противопожарные мероприятия – удовлетворить частично.

Обязать ООО ЛК «ТЕТЛА» в течении месяца после вступления решения суда в законную силу произвести запланированные на 2023 год противопожарные мероприятия, а именно: Создание лесных культур (искусственное лесовосстановление) – 25.6 га.; Содействие естественному лесовосстановлению - 158,1 га.; Комбинированное лесовосстановление – 28,9 га.; Дополнение лесных культур - 14,4 га.; Агротехнический уход за лесными культурами -161,6 га.; Уход за молодняками - 50,5 га.; Проходные рубки,- 71,3 га..

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение месяца со дня изготовления решения в окончательном виде через Серовский районный суд Свердловской области.

Решение в окончательном виде изготовлено 03.10.2024 года.

Председательствующий Е.А. Фарафонова