№2-220/2020

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Канск 19 ноября 2020 года

Канский районный суд Красноярского края в составе: 

председательствующего судьи Гришаниной Н.В.,

при секретаре Рыковой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Канского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц 

<

данные изъяты>» о возложении обязанности,

УСТАНОВИЛ:

Канский межрайонный прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ООО «Ресурс», в котором просит обязать ответчика в течении 2-х месяцев со дня вступления решения суда в законную силу исполнить обязанности, предусмотренные приложением №3 к концессионному соглашению от 31.12.2015 №7К-2015-6: 

- осуществить инвестиции в реконструкцию объекта соглашения, а именно произвести замену насоса агрегата марки ЦНСГ 6-98 насосной станции 1 подъема, произвести реконструкцию сетей водоснабжения от ВК 16 до ВК 17 

<

адрес>, произвести замену водозаборного колодца 1 подъема р. Кан, а так же заменить кровлю насосной станции 1 подъема в 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>.

- осуществить инвестиции в реконструкцию объекта соглашения: произвести реконструкцию тепотрассы по 

<

адрес> от ТК5 до ввода в здание детского сада в с. ФИО2 

<

адрес>.

Требования мотивированы тем, что Канской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о концессионных соглашениях ООО «Ресурс», заключенного 31.12.2015 с МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Канского района Красноярского края», в ходе которой было выявлено нарушение требований ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях». По результатам проверки ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «Ресурс» вынесено представление об устранении нарушений требований законодательства. Однако, указанные в представлении нарушения не были устранены. На основании изложенного истец просит обязать ООО «Ресурс» исполнить обязанности, предусмотренные приложением № к вышеуказанному концессионному соглашению.

В судебном заседании помощник Канского межрайонного прокурора ФИО5 исковые требования поддержал по доводам, изложенным в исковом заявлении, просит установить срок исполнения до 01.09.2021.

В судебном заседании представители ответчика ООО «Ресурс» ФИО6 в судебное заседание не явилась, в адрес суда направила ходатайство о признании заявленных исковых требований и рассмотрении дела в ее отсутствии. 

В судебное заседание представитель третьего лица Администрации Канского района Красноярского края не явился, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом. В адрес суда направлен отзыв на исковое заявление о поддержании заявленных исковых требований, и о рассмотрении дела в их отсутствии.

Заслушав участников судебного заседания, исследовав материалы дела: копию концессионного соглашения №7К-2015-6 от 31.12.2015 с приложением,, представление прокурора от 30.07.2019, копию ответа ООО «Ресурс» от 24.09.2019 по результатам рассмотрения представления, копию ответа на претензионное письмо от 22.07.2019 ; копию акта передачи к концессионному соглашению от 31.12.2015 №7К-2015-6; копию концессионного соглашения №4К-2015-1 от 21.12.2015 с приложением; суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с ч.1 ст.3 ФЗ от 21.07.2005 №115-ФЗ « О концессионных соглашениях», по концессионном соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

В соответствии с. ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» при исполнении концессионного соглашения концессионер обязан: 

1) осуществить в установленные концессионным соглашением сроки создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения приступить к его использованию (эксплуатации);

2) использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;

3) осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия концедент;

4) обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возможность получения потребителям соответствующих товаров, работ, услуг;

5) предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актам органа местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ, услуг, в случаях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;

6) поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание этого объекта, если иное не установлено концессионным соглашением;

Как установлено в судебном заседании, 21.12.2015 между МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ФИО3 

<

адрес>» и ООО «Ресурс» заключено концессионного соглашения №К-2015-1 в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории Краснокурышинского, Таеженского сельсовета ФИО3 

<

адрес>.

31.12.2015 между МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ФИО3 

<

адрес>» и ООО «Ресурс» заключено концессионного соглашения №К-2015-6 в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории Таеженского сельсовета ФИО3 

<

адрес>.

В соответствии с п.3.7 концессионного соглашения от 21.12.2015 №4К-2015-1, а также приложением №3 в данному соглашению, концессионер обязан был в течение 2017-2018 годов осуществить инвестиции в реконструкцию объекта соглашения, а именно - произвести замену насоса агрегата марки ЦНСГ 6-98 насосной станции 1 подъема, произвести реконструкцию сетей водоснабжения от ВК 16 до ВК 17 

<

адрес>, произвести замену водозаборного колодца 1 подъема 

<

адрес>, а так же заменить кровлю насосной станции 1 подъема в 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>. 

В соответствии с п.3.7 концессионного соглашения от 31.12.2015 №7К-2015-6, а также приложением №3 в данному соглашению, концессионер обязан был в течение 2017 года осуществить инвестиции в реконструкцию объекта соглашения, а именно- произвести реконструкцию теплотрассы по 

<

адрес> от ТК5 до ввода в здание детского сада в с. ФИО2 

<

адрес>.

В нарушение данного концессионного соглашения и ч.2 ст.8 ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», данное обязательство концессионером не выполнено. Представление прокурора об устранении нарушения рассмотрено, но меры по устранению нарушения до настоящего времени так и не приняты. 

Учитывая, что установленная законом обязанность по выполнению требований законодательства, по выполнению мероприятий предусмотренных концессионным соглашением ООО «Ресурс» не исполнена, исковые требования прокурора о понуждении к исполнению обязанности и установлении срока исполнения до 01.09.2021 подлежат удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 197-199 ГПК РФ, 

РЕШИЛ:

Иск Канского межрайонного прокурора удовлетворить. 

Возложить на Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» в срок до 01.09.2021 обязанность:

-произвести замену насоса агрегата марки ЦНСГ 6-98 насосной станции 1 подъема, произвести реконструкцию сетей водоснабжения от ВК 16 до ВК 17 

<

адрес>, произвести замену водозаборного колодца 1 подъема 

<

адрес>, а так же заменить кровлю насосной станции 1 подъема в 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>;

- произвести реконструкцию теплотрассы по 

<

адрес> от ТК5 до ввода в здание детского сада в с. ФИО2 

<

адрес>.

Взыскать с ООО «Ресурс» госпошлину в доход местного бюджета в размере 6000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Канский районный суд Красноярского края в течение месяца со дня его принятия.

Судья Н.В. Гришанина