РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15.08.2017 г. п. Володарский

Володарский районный суд Астраханской области в составе:

председательствующего судьи Сливина Д.Н.,

при секретаре Уразалиевой А.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 Филиалу ОАО «МРСК Юга -Астраханьэнерго» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

в суд обратилась ФИО1 с иском к Филиалу ОАО «МРСК Юга -Астраханьэнерго» о защите прав потребителя, указав, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и филиалом ОАО «МРСК «Астраханьэнерго» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

По настоящему договору в соответствии с п. 1 сетевая организация принимает на обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение) жилой дом, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами по поводу принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики учетом следующих характеристик: Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 5 (пять) (кВт), в т.ч. по категориям надежности 3 (третья) 5 кВт; Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляетсятехнологическое присоединение 0,22 (кВ); Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 (ноль) кВт; В т.ч. по категориям надежности 0 кВт;

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическоеприсоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу 

<

адрес>

В соответствии с п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединения составляет не более 6 месяцев со дня заключения настоящего договора

Истица оплатила расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора, по квитанции от ДД.ММ.ГГГГ ей оплачено технологическое присоединение в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

До настоящего времени условия договора ответчиком не выполнены, несмотря на неоднократные требования с ее стороны к руководителю сетевой организации. Так, истицей направлялась претензия ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с исполнением обязательств, ответчик должен выплатить проценты за просрочку исполнения обязательства из расчета 1% за каждый день просрочки, что в соответствии с прилагаемым расчетом составляет 

<

данные изъяты> руб.

В связи с неисполнением обязательств ответчиком по вышеуказанному истица и ее семья испытывает неудобства, то есть в течении трех лет проживают без энергоснабжения, от чего испытывают нравственные страдания.

Просила обязать ответчика произвести технологическое присоединение соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскать в свою пользу с ответчика проценты за просрочку исполнения обязательства в сумме 

<

данные изъяты> руб.., компенсацию морального вред в сумме 

<

данные изъяты> рублей, штраф в размере 50% от взысканных сумм.

В судебном заседании истица и ее представитель адвокат Григорьева С.М., действующая по ордеру, исковые требования поддержали. Представитель ответчика, надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения дела, в суд не явился.

Выслушав сторону истца, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Положениями ч. 1 ст. 26 ФЗ "Об электроэнергетике" предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Согласно п. 3 и п. 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 861), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно пункту 16.3 Правил технологического присоединения обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, названными в пунктах 12.1 - 14 и 34 Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В силу ч. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Таким образом, во всяком случае, при предъявлении требования о возмещении убытков должна быть доказана причинная связь между нарушением прав и убытками, необходимыми для восстановления нарушенного права.

Согласно свидетельству о праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ истице принадлежит жилой дом по адресу 

<

адрес> Разрешение на строительство дома получено ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между истицей и филиалом ОАО «МРСК «Астраханьэнерго» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

По настоящему договору в соответствии с п. 1 сетевая организация принимает на обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение) жилой дом, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами по поводу принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики учетом следующих характеристик: Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 5 (пять) (кВт), в т.ч. по категориям надежности 3 (третья) 5 кВт; Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляетсятехнологическое присоединение 0,22 (кВ); Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 (ноль) кВт; В т.ч. по категориям надежности 0 кВт;

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическоеприсоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу 

<

адрес>

В соответствии с п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединения составляет не более 6 месяцев со дня заключения настоящего договора

Истица оплатила расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора, по квитанции от ДД.ММ.ГГГГ ей оплачено технологическое присоединение в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Предусмотренные договором условия по оплате стоимости услуг по технологическому присоединению, истцом исполнены надлежащим образом.

В соответствии с п. 4 договора технические условия на технологическое присоединение являются неотъемлемой частью договора, и срок их действия составляет 2 года. Согласно п. 10 технических условий, являющихся приложением к договору об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ, сетевая организация (ответчик) осуществляет фактическое присоединение объекта после выполнения заявителем своих технических условий.

Доказательств исполнения договора ответчиком не представлено.

Суд приходи к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения требований истицы, поскольку материалы дела бесспорно свидетельствуют о неисполнении ответчиком своих обязательств по договору в установленный срок, при этом каких-либо доказательств того, что данное обстоятельство было обусловлено нарушением условий договора со стороны истца, представлено не было, как не было представлено и доказательств наличия обстоятельств, позволяющих освободить ответчика от ответственности.

Установив факт нарушения прав потребителя на своевременное получение услуги по присоединению энергопринимающих устройств, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации морального вреда, определив ко взысканию в соответствии ст. 15 ФЗ "О защите прав потребителей" сумму в размере 

<

данные изъяты> руб., считая размер заявленного требования явно завышенным в данной части, неустойки в размере 

<

данные изъяты> рублей, также исходя из положений п. 6 ст. 13 указанного закона штрафа в размере 

<

данные изъяты> руб.

Руководствуясь ст. ст. 194-199ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать Филиал ОАО «МРСК Юга-Астраханьэнерго» произвести технологическое присоединение в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>.

Взыскать с Филиала ОАО «МРСК Юга –Астраханьэнерго» в пользу ФИО1 неустойку в размере 

<

данные изъяты> рублей, компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты> рублей, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя - в размере 

<

данные изъяты> рублей. В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с Филиал ОАО «МРСК Юга -Астраханьэнерго» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Решение может быть обжаловано в Астраханский областной суд в течение 1 месяца в апелляционном порядке.

Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья Д.Н. Сливин