№ 2-3434/2025 

47RS0011-01-2025-000707-50

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

город Ломоносов 05 ноября 2025 года 

Ломоносовский районный суд Ленинградской области в составе: 

председательствующего судьи Амелькович Е.С.

при секретаре Плехановой О.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО "Россети Сибирь" об обязании исполнить условия договора, об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и компенсации морального вреда,

УСТАНОВЛЕНО:

ФИО1 обратилась с иском в суд к ПАО "Россети Сибирь" об обязании исполнить условия договора, об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и компенсации морального вреда, просила суд обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» исполнить условия договора от 21.01.2021 № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по адресу: Россия, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, район 

<

адрес>, 

<

адрес> предоставить возможность действиями ФИО1 осуществить технологическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии; Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» после исполнения договора от 21.01.2021 № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям предоставить ФИО1 по электронной почте: 

<

данные изъяты>: акт о выполнении технический условий; акт о выполнении технологического присоединения; акт допуска/ввода в эксплуатацию установленного прибора учета электроэнергии, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации; Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» выплатить ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 30 000 руб. 00 коп.

В обоснование иска указано, что между сторонами 21.01.2021 заключен договор № о технологическом присоединении к электрическим сетям, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: район 

<

адрес>, 

<

адрес>. В установленный договором и законом срок договор ответчиком не исполнен. 22.10.2024 истец направила в адрес ответчика претензию, в ответе на которую от 15.11.2024 ПАО "Россети Сибирь" сообщило, что в связи с дефицитом источника финансирования на реализацию мероприятий капитального характера отсутствует возможность выполнить мероприятия в рамках договора. При недостаточном объеме финансирования по технологическому присоединению планируется исполнить в 2025 г. Также сообщено, что у организации отсутствует возможность выплатить неустойку. 

Истец в судебное заседание не явилась, извещена лично, о чем в материалах дела имеется собственноручная расписка.

ПАО "Россети Сибирь" в судебное заседание своего представителя не направило, судебное извещение получено адресатом 16.09.2025 (ШПИ №).

Третье лицо АО "Алтайэнергосбыт" в судебное заседание своего представителя не направило, судебное извещение получено адресатом 15.09.2025 (ШПИ №

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что 21.01.2024 между сторонами заключен договор № о технологическом присоединении к электрическим сетям земельного участка с кадастровым номером №, по адресу: район 

<

адрес>, 

<

адрес> (далее – Договор).

Истцом суду представлены условия типового договора №, без подписи сторон.

Однако, факт заключения договора о технологическом подключении сторонами не оспаривался, перепиской сторон, а также материалами проверки УФАС по Алтайскому краю, полученными по запросу суда, его условия, дата заключения 21.01.2024 подтверждаются. 

В соответствии с п. 5 Договора срок осуществления мероприятий по технологическому присоединения составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора, что соответствует требованиям абз. 13 пп. "б" п. 16 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861.

Таким образом, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению истек в 00 час. 01 мин. 22 июля 2024 года.

05.03.2024 истцом подана заявка физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью), к заявке приложены план расположения энергопринимающих устройств, документ, подтверждающий право собственности на объект.

В установленный договором и законом срок мероприятия по технологическому присоединению ответчиком не исполнены. 

22.10.2024 истец направила в адрес ответчика претензию, в ответе на которую от 15.11.2024 ПАО "Россети Сибирь" сообщило, что в связи с дефицитом источника финансирования на реализацию мероприятий капитального характера отсутствует возможность выполнить мероприятия в рамках договора. При недостаточном объеме финансирования по технологическому присоединению планируется исполнить в 2025 г. Также сообщено, что у организации отсутствует возможность выплатить неустойку. 

Постановлениями Управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю от 10.01.2025 по делу № 022/04/9.21-1727/2024 ПАО "Россети Сибирь", от 15.01.2025 по делу № № 022/04/9.21-7/2025 должностное лицо ПАО "Россети Сибирь" – заместитель директора по инвестиционной деятельсности ФИО5 признаны виновными в совершении предусмотренного ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ административного правонарушения, с назначением наказаний в виде административных штрафов в размере 600 000 рублей и 40 000 рублей соответственно.

Из названных постановлений следует, что ПАО "Россети Сибирь" (сетевая организация) не выполнила в срок, установленный пунктом 16 Правил технологического присоединения, мероприятия, предусмотренные договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, включая договор, заключенный с ФИО1 № (порядковые номера 695, 643).

В соответствии с положениями ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом; односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно п. 1 ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее по тексту - Правила присоединения N 861).

Пунктами 12.1, 14, 34 Правила присоединения N 861 определена обязанность сетевой организации независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя заключить договор и выполнить в отношении энергопринимающих устройств следующих лиц мероприятия по технологическому присоединению, в частности, физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Из Правил присоединения N 861 следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии).

При этом из подп. "б" п. 25 и подп. "б" п. 25(1) Правил присоединения N 861 следует, что сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия за свой счет в отношении любых заявителей.

В силу п. 16.3 Правил присоединения N 861 обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В нарушение положений ст. 56 ГПК РФ ПАО "Россети Сибирь" не представлено достаточных и бесспорных доказательств отсутствия технической возможности исполнить обязательства по заключенному между сторонами договору об осуществлении технологического присоединения и принятия всех исчерпывающих и необходимых мер, предусмотренных действующим законодательством, направленных на исполнение спорного договора.

Напротив, в ответе на претензию истца ответчик, как на причину невыполнения мероприятий в срок, ссылается лишь на дефицит источника финансирования, иных объективных причин, препятствующих выполнить мероприятия, не приведено. 

Виновность действий ответчика по неисполнению договора о технологическом присоединении, заключенного с истцом, подтверждена также фактом привлечения юридического и должностного лица ПАО "Россети Сибирь" к административной ответчивенности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ УФАС по Алтайскому краю.

С учетом изложенного, суд полагает обязать ПАО "Россети Сибирь" исполнить обязательства по договору от №, заключенному 21.01.2024 с ФИО1, в течение 3 месяцев со дня вступления решения в законную силу, полагает установленный срок разумным, справедливым, учитывающим реальную возможность ответчика его исполнить, соблюдающим баланс интересов сторон. 

Суд не усматривает правовых оснований для удовлетворения исковых требований в части предоставления возможности действиями ФИО1 осуществить технологическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии, а также в части требований об обязании ПАО «Россети Сибирь» после исполнения договора от 21.01.2021 № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям предоставить ФИО1 по электронной почте: 

<

данные изъяты>: акт о выполнении технический условий; акт о выполнении технологического присоединения; акт допуска/ввода в эксплуатацию установленного прибора учета электроэнергии, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, поскольку истцом не указано чем предусмотрено выполнение ответчиком названных обязанностей и не представлено доказательств, позволяющих сделать вывод о последующем уклонении ответчика от их выполнения после осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

В силу ст. 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Учитывая, что в ходе рассмотрения спора нашел подтверждение факт нарушения прав истца, как потребителя, ввиду нарушения срока оказания услуг ФИО1 причинен моральный вред. 

Суд находит требования истца о компенсации морального вреда с ответчика в свою пользу обоснованными и подлежащими удовлетворению, однако, размер компенсации морального вреда, оцененный истцом в 30 000 руб. является завышенным.

При определении размера компенсации морального вреда, подлежащего взысканию с ответчика, суд учитывает характер и степень нравственных страданий истца, столкнувшегося с нарушением срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению земельного участка к электрическим сетям, что повлекло в свою очередь необходимость обращения с исковым заявлением в суд, потерю времени, длительность нарушения прав истца, степень вины нарушителя, а также требования разумности и справедливости, полагает подлежащим взысканию с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в размере 3 000 рублей.

В соответствии со ст. 13 Закона РФ от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

С учетом уклонения ответчика от удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке на основании направленной им претензии, удовлетворения требований истца к ответчику на сумму 3 000 рублей (компенсация морального вреда), с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 1 500 рублей 00 копеек.(3 000 рублей 00 копеек / 2).

В силу ст. 98 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 4000 руб. 00 коп., от уплаты которой истец был освобожден.

Руководствуясь статьями 98, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.

Обязать ПАО "Россети Сибирь" (ОГРН 

<

***>) исполнить обязательства по договору от №, заключенному 21.01.2024 с ФИО1, в течение 3 месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Взыскать с ПАО "Россети Сибирь" (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 (

<

данные изъяты>) компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей 00 копеек, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 1 500 рублей 00 копеек.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ПАО "Россети Сибирь" (ОГРН 

<

***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 4000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Ленинградский областной суд через Ломоносовский районный суд Ленинградской области в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение суда изготовлено в окончательной форме 15.12.2025

Судья Е.С. Амелькович

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>