РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

13 мая 2024 г. г. Иркутск

Свердловский районный суд г. Иркутска в составе:

председательствующего судьи Жильчинской Л. В., 

при секретаре судебного заседания Верезонской В.Ю., 

с участием представителя истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 

УИД 38RS0036-01-2024-002282-29 (производство № 2-2232/2024) 

по иску ФИО3 к акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» о понуждении исполнить обязательства по договору, 

установил:

В обоснование иска указано, что 19 апреля 2023 г. ФИО4 посредством личного кабинета технологического присоединения обратилась в АО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» с заявкой вх. .... о технологическом присоединении к электрическим сетям по адресу: ..... К данной заявке были приложены все, предусмотренные законодательством Российской Федерации необходимые документы: согласие на обработку персональных данных с подписью на 1 л., план расположения энергопринимающего устройства на 1 л., копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренноезаконом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на которомрасположены (будут располагаться) объекты заявителя на 17 л.; копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность на 2 л.

По результатам поданной заявки в личный кабинет поступил Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям .... от 4 мая 2023 г. (далее - Договор) с указанием в нем условий выполнения и сроков оплаты, с приложениями, с Техническими условиямидля присоединения к электрическим сетям (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которое используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) .... от 4 мая 2023 г.

В соответствии с условиями Договора Заявитель обязуется в сроки, установленные настоящим Договора оплатить в адрес Ответчика 36277, 03 рублей, в том числе НДС 20% - 6046,17 рублей, в связи с чем, истец произвела оплата:

12 мая 2023 г. в сумме 5 441,55 руб., что составляет 15 процентов платы за технологическое присоединение;

24 мая 2023 г. в сумме 10 883,11 руб., что составляет 30 процентов платы за технологически присоединение;

5 июля 2023 г. в сумме 12 696,96 руб., что составляет 35 процентов платы за технологически присоединение.

Заявителем все необходимые работы, предусмотренные ТУ, были выполнены надлежащим образом и в срок, предусмотренный условиями настоящего Договора и законодательством РФ.

14 июля 2023 г. через личный кабинет Заявитель направила Уведомление овыполнении технических условий, зарегистрированное Ответчиком 17 июля 2023 г. за .....

Не получив ответа на свое заявление, 13 сентября 2023 г. истец повторно обратилась с заявлением через личный кабинет в адрес Ответчика (входящий № .... от 13 сентября 2023 г.) с просьбой осуществить проверку выполнения технических условий и составить акт об осуществлении технологического присоединения.

13 октября 2023 г., в связи с бездействием Ответчика, истец была вынуждена через личный кабинет обратиться в адрес Ответчика с претензией на бездействие Ответчика (входящий № ....-С от 13 октября 2023 г.)

На сегодняшний день истец не получила ни одного ответа ни на заявления с просьбой осуществить проверку выполнения технических условий и составить акт об осуществлении технологического присоединения, ни на претензию.

Согласно п. 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Обязательства Ответчика по Договору не исполнены до настоящего времени.

На основании изложенного истец просила суд:

- обязать акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям .... от 4 мая 2023 г., осуществив технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя на условиях, определенных Договором и техническими условиями .... от 4 мая 2023 г., установить срок исполнения 1 месяц со дня вступления решения суда в законную силу.

Истец ФИО3 о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, в судебное заседание не явилась, о причинах неявки суду не сообщала, просила о рассмотрении дела в своё отсутствие.

Кроме того, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 117 ГПК РФ судебное извещение вручено представителю истца ФИО1, действующей на основании нотариальной доверенности, что считается извещенными надлежащим образом судом. 

Представитель истца ФИО1, действующая на основании нотариальной доверенности, в судебном заседании заявленные требования поддержала в полном объеме по доводам, изложенным в исковом заявлении, настаивала на их удовлетворении.

С учетом мнения лиц, участвующих деле, суд рассмотрел дело в отсутствие неявившегося истца в соответствии с ч. 5 ст. 167 ГПК РФ..

Представитель ответчика ФИО2, действующая на основании доверенности, в судебном заседании против удовлетворения заявленных требований возражала по доводам, изложенным в письменном отзыве на иск.

В обоснование возражений ответчика указано, что своевременное технологическое присоединение по договору .... явилось невозможным в связи отсутствием технической возможности технологического присоединения, по критериям, предусмотренным п. 28 Правил № 861.

Мероприятия, позволяющие снять нагрузку с ПС Урик, от которой запитана ПС 35/10 кВЛыловщина первоначально в инвестиционной программе ОАО «ИЭСК» на 2020-2024 года отсутствовали.

На сегодняшний день после устранения направленных Минэнерго замечаний к корректировке указанной инвестиционной программе ОАО «ИЭСК» повторно направлены на рассмотрение изменения к инвестиционной программе ОАО «ИЭСК» 2020-2024 гг. Данные изменения были приняты к рассмотрению.

ОАО «ИЭСК» с учетом планируемых изменений предусмотрена возможность разгрузки ПС Урик путем переключения ПС ФИО5 на новый центр питания 110 кВ ПС Столбово, а также путем установки модульной ПС. К реализации данных мероприятий ОАО «ИЭСК» уже приступило, так проведены конкурсы на заключение договоров подряда. Условие по надежности электроснабжения на центрах питания Иркутского района не соблюдается. В целях преодоления проблемы перегруза центров питания ОАО «ИЭСК» с 2020 года проводятся мероприятия по разработке и утверждению схемы энергосистемы Иркутского района с учётом существующих потребностей населения данного района. На сегодняшний день объекты заявителей с территории Хомутовского, Уриковского муниципальных образований, в том числе объект заявителя не включены в СиПР энергосистемы Иркутской области. Для внесения изменений ОАО «ИЭСК» было подготовлено Технико-экономическое обоснования, которое передано на согласование в Иркутское РДУ, за период с 2021 г. по настоящее время устранены все вынесенные замечания Иркутского РДУ, также подготовлены и направлены на утверждение изменения в инвестиционную программу ОАО «ИЭСК».

Выполнение перечисленных мероприятий в осенне-зимний период 2022-2023, 2023-2024 являлось недопустимым ввиду перегруженности трансформаторов ПС Урик и могло привести к веерным отключения абонентов, выполнение таких работ стало возможным только в летний период при спаде потребительской нагрузки. Завершение мероприятий по разгрузки ПС Урик - 2024-2025 год.

На основании изложенного, представитель ответчика просила в удовлетворении исковых требований отказать.

Обсудив доводы иска и возражений ответчика, заслушав пояснения представителей сторон, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Судом установлено, что истец ФИО3 является собственником земельного участка, площадью 680 кв. м., с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: ...., на основании договора купли-продажи земельных участков от 19 ноября 2021 г., дополнительного соглашения к договору купли-продажи земельных участков.

19 апреля 2023 г. ФИО3 направил заявку физического лица на присоединение по одному источнику энергоснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно.

4 мая 2023 г. истцу направлены условия Типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, технические условия для присоединения к электрическим сетям.

По условиям договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: жилого дома, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающихустройств, объектов электроэнергетики) с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15кВт, категория надежности III, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Сетевая организация и заявитель являются сторонами договора (п. 1 договора).

В соответствии с пунктом 4 договора срок действия технологических условий составляет 2 года со дня заключения договора. 

Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Настоящий договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п.21).

Из положения п. 2 договора следует, что технологическое присоединение необходимо для электроснабжения: жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером .... по адресу: ..... 

Размер платы (п. 10 договора) за технологическое присоединение составляет 36277,03 руб., в том числе НДС 20% 6046,17 руб. 

Как следует из п. 11 договора, внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 

- 15 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 дней со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения;

- 30 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 

- 35 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 

- 20 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов за технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (п.12 договора). 

Согласно скриншота с личного кабинета плательщика, потребитель произвел оплату в следующем порядке: 12 мая 2023 г. – 5441,55 руб., 24 мая 2023 г. – 10883,11 руб., 5 июля 2023 г. – 12696,96 руб., а так же внесен платеж на сумму 7255,41 руб. Всего внесено 29021,62 руб.

Оставшиеся 20 % платы за технологическое присоединение внесены не были, поскольку акт об осуществлении технологического присоединения либо уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям ответчиком в личном кабинете Заявителя размещены не были.

Исковые требования мотивированы тем, что истцом обязательства по договору исполнены в полном объеме, произведена оплата по договору и исполнены технические условия к договору, о чем сетевая организация была уведомлена, ответчик в свою очередь как сетевая организация в нарушение условий договора не осуществляет технологическое присоединение.

Из доводов представителя ответчика следует, что подключение к электрическим сетям возможно при условии усиления питающей электрической сети после реализации в полном объеме указанных в п. 10.1 Технических условий к Договору мероприятий по строительству и реконструкции электрических сетей в сроки, определенные Инвестиционной программой АО «ИЭСК».

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Пунктом 3 названной выше статьи предусмотрено, что ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении", если иное не установлено законом, в случае, когда должник не может исполнить своего обязательства до того, как кредитор совершит действия, предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающие из обычаев или существа обязательства, правила статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации применению не подлежат.

Поскольку встречным признается исполнение обязательства одной из сторон (последующего предоставления), которое в соответствии с договором обусловлено надлежащим исполнением своих обязательств другой стороной (первоначального исполнения), юридически значимыми являются обстоятельства того, какой из сторон должно быть осуществлено первоначальное, а какой последующее исполнение, а также обстоятельства установления невозможности исполнения одного требования в отсутствие исполнения другого.

В пункте 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее - Правила), установлено, что обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными пункте 14 этих Правил (физического лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику), распределяются следующим образом: 

- заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; 

- сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Подпунктом "г" пункта 25 (1) названных выше Правил установлено, что в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктом 14 Правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

Пунктом 10 Технических условий от 4 мая 2023 г., выданных ответчиком истцу, предусмотрено, что сетевая организация осуществляет: 

- Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства включенные в инвестиционную программу ОАО "ИЭСК": замена провода (АС-150/24) ВЛ 110 кВ Правобережная - УрикI(II) цепь с отпайками я участке от ПС 220 кВ Правобережная до отпайки на ПС 110 кВКарлук; замена ВЧЗ на ПС 220 кВ Правобережная в ячейке ВЛ 110 кВПравобережная - Урик I (II) цепь с отпайками; переключение обмотки ТТ на ПС 110 Урик в ячейке ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – УрикIцепь; замена ВЧЗ на ПС 110 Урик в ячейке ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик I цепь; переключение обмотки ТТ на Иркутской ТЭЦ-10 в ячейке ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-К Урик I цепь; переключение обмотки ТТ на ПС 110 Урик в ячейке ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик 1 цепь с отпайкой на ПС Никольск; переключение обмотки ТТ на ПС 110 кВУрик в ячейке ВЛ 110 кВУрик - Усть-Орда I(II) цепь с отпайкой на ПС Оёк; замена трансформаторов на ПС 110 кВУрик.

- Установку прибора учета электрической энергии и мощности (активной tреактивной) на границе раздела электрических сетей Сетевой организации и Заявителя либо \ месте, максимально к ней приближенном, в котором имеется техническая возможность его установки в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 с составлением Акта допуска прибора учета в эксплуатацию.

- Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя (в т.ч. подача напряжения) к своим электрическим сетям после выполнения условий настоящего договора.

В соответствии с пунктом 11 приложенных к договору Технических условий заявитель осуществляет: 

- Монтаж трехфазного ввода проводом СИП от точки присоединения до ВРУ 0,4 кВ энергопринимающего устройства Заявителя. При необходимости установить подставную опору в пределах своего земельного участка.

- Для крепления провода СИП установить кронштейн (арматуру) на стене здания (сооружения) либо на подставной опоре, расположенной внутри земельного участка заявителя. Расстояние от провода до поверхности земли на ответвлении к вводу должно быть не менее 2,5 м.;

- Монтаж вводного устройства объекта с установкой коммутационного аппарата.

После выполнения строительно-монтажных (монтажных) работ Заявитель предоставляет объем работ по п. 11 настоящих технических условий в Сетевую организацию на проверку путем направления соответствующего Уведомления о выполнении технических условий с приложением необходимых документов.

В подтверждение выполнения указанных требований истцом в материалы дела представлено уведомление от 14 июля 2023 г., о выполнении технических условий.

13 сентября 2023 г. ФИО3 обратилась в АО «ИЭСК» с претензией, указав на полное выполнение ею мероприятий, предусмотренные техническими условиями для присоединения к электрическим сетям .... от 4 мая 2023 г. Просила в течение 5 рабочих дней дать ответ. 

Из материалов дела следует, что ответ на претензию истца АО «ИЭСК» направлен не был.

Таким образом, суд установил, что истец со своей стороны исполнил условия договора № .... в полном объеме, направил в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий для проведения проверки. 

Как следует из доводов иска и не оспаривалось стороной ответчика, в настоящее время обязательства по договору .... ОАО «ИЭСК» не исполнены, технологическое присоединение не осуществлено.

Таким образом, судом установлено, что АО «ИЭСК» не исполнило принятые на себя обязательства по договору ...., к выполнению технических условий не приступило.

В силу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно пункту 4 статьи 13 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

Таким образом, обязанность доказывать наличие обстоятельств, освобождающих сетевую организацию от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства перед истцом, лежит на ответчике, однако таких доказательств в материалы дела ответчиком в нарушение положений статей 56, 57 ГПК РФ не представлено.

В соответствии с пунктом 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае непредставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Пунктом 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. К числу указанных лиц в соответствии с п. 14 Правил относятся физические лица, подавшие заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

В соответствии с требованиями пункта 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии N 861 обязательства сторон по договору распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Из материалов дела следует, что ответчик принятые на себя обязательства сетевой организации, в частности урегулирования отношений с иными лицами, не исполнил.

Согласно п. 28 постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

Пунктом 29 указанных правил установлено, что в случае несоблюдения любого из указанных в пункте 28 настоящих Правил критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

Включение мероприятий по реконструкции или расширению (сооружению новых) объектов электросетевого хозяйства (за исключением объектов заявителей, указанных в пункте 13 настоящих Правил) и (или) мероприятий по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, проведение которых необходимо для обеспечения присоединения объектов заявителя, в инвестиционные программы сетевых организаций, в том числе смежных сетевых организаций, и (или) наличие обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий, означают наличие технической возможности технологического присоединения и являются основанием для заключения договора независимо от соответствия критериям, указанным в подпунктах "а" - "г" пункта 28 настоящих Правил.

АО «ИЭСК» не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что после заключения договора и выданных технических условий имеют место обстоятельства, сделавшие невозможным присоединение объекта недвижимости истца к электрическим сетям в соответствии с условиями Договора и техническими условиями.

В данном случае ответчик, зная о повышенной нагрузке в местности, в которой истец просит осуществить технологическое присоединение, не был лишен возможности заблаговременно планировать растущую нагрузку на сети с учетом увеличения количества подключений.

Поскольку факт неисполнения ответчиком обязательств по договору .... нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения иска в части возложения обязанности на ответчика исполнить договор, осуществив технологическое присоединение для энергоснабжения жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: .....

Истец просит возложить на ответчика выполнить обязательства в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу.

В силу положения, закрепленного статьей 210 ГПК Российской Федерации и имеющего общий характер, решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу.

Частями 2, 3 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). При установлении указанного срока суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу о возложении на ответчика выполнить обязательства в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО3 удовлетворить.

Возложить на акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 

<

***>) обязанность исполнить заключенный с ФИО3 договор ...., осуществив технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств: новое строительство (жилой дом), расположенных по адресу: ...., в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу. 

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Иркутский областной суд через Свердловский районный суд г. Иркутска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: Л.В. Жильчинская

Решение суда в окончательной форме принято 20 мая 2024 г.