КОПИЯ:

Дело № 2-2796/2025

УИД 74RS0002-01-2025-001989-80 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

г.Челябинск 23 сентября 2025 года

Центральный районный суд г. Челябинска в составе председательствующего судьи Соколовой М.Г., при секретаре Мордовиной Л.П., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к акционерному обществу «Газпром газораспределение Челябинск», обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» о возложении обязанности, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском, с учетом уточнений, к ответчикам, в котором просит обязать АО «Газпром газораспределение Челябинск» в течение 30 рабочих дней осуществить строительство сети газораспределения до точки подключения, а также подготовить сеть газораспределения к подключению и пуску газа в отношении объекта – частного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>; обязать ООО «Газпром газификация» в течение 30 рабочих дней осуществить мониторинг исполнения ответчиком АО «Газпром газораспределение Челябинск» действий по созданию сети газораспределения и подключению объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес> пуску газа; также просит в случае неисполнения решения суда взыскать с ответчиков судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения решения до даты фактического исполнения решения суда.

В обоснование иска указал, что истец является собственником земельного участка с кадастровым номером № и расположенного на нем жилого дома, находящихся по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 (заявитель) и АО «Газпром газораспределение Челябинск» (исполнитель), ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (с учетом дополнительного соглашения), по которому исполнитель обязался осуществить в установленные сроки подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети, расположенный по адресу: 

<

адрес>, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с участком максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 года №1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ) (далее – правила), расположенный по адресу: 

<

адрес>, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Однако АО «Газпром газораспределение Челябинск» в предусмотренные договором сроки не осуществило подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения.

Истец в судебное заседание не явилась, извещена, просила рассмотреть дело в свое отсутствие, ее представитель ФИО2 в судебном заседании на удовлетворении иска настаивал.

Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение Челябинск» по доверенности ФИО3 в судебном заседании исковые требования не признала, просила в удовлетворении иска отказать.

Представитель ответчика ООО «Газпром газификация» в судебное заседание не явились, извещены, представили отзыв, в котором просили в удовлетворении иска отказать.

Заслушав пояснения представителей истца и ответчика АО «Газпром газораспределение Челябинск», исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении иска.

В соответствии с п. 1 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Согласно ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Гражданские права и обязанности возникают, в том числе из из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; вследствие иных действий граждан и юридических лиц.

В силу п. 1 ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

При этом не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) (п. 1 ст. 10 ГК РФ).

Статьей 11 ГК РФ закреплена защита нарушенных или оспариваемых прав перечисленными в ст. 12 ГК РФ способами. При этом выбор способа защиты нарушенного права должен привести к восстановлению нарушенного материального права или к реальной защите законного интереса.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 401 ГК РФ Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Пунктом 8 Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021 Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, публичным акционерным обществом и иными газораспределительными организациями поручено обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку марка автомобиля до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения).

Во исполнение указанного поручения Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее - Правила).

Согласно пункту 2 Правил догазификация представляет собой осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать марка автомобиля для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц, при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка марка автомобиля.

В пункте 5 названных Правил предусмотрено, что подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

В силу пункта 6 Правил № 1547 договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации.

По договору о подключении единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечивает подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно пункту 53 Правил подключения № 1547 для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII Правил.

Пунктом 121 Правил подключения № 1547 установлен срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации. Данный срок определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Абзацы 2 - 5 указанного пункта Правил № 1547 в редакции, действующей до 1 марта 2023 года, предусматривали, что срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), определяемый программой газификации, не может выходить за пределы 2022 года, за исключением случаев, когда:

- для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем;

- для подключения домовладений, расположенных в населенных пунктах, в которых газораспределительные сети будут проложены после 1 января 2022 г.;

- для подключения домовладений требуется осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) со сроком, определенным в соответствии с пунктом 122 Правил подключения № 1547, выходящим за пределы 2022 года.

С 1 марта 2023 года, в связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2022 года № 2187, абзацы 2 - 5 пункта 121 Правил № 1547 утратили силу.

В силу пункта 122 Правил N 1547, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя. Данным пунктом предусмотрено, что в этом случае срок устанавливается в зависимости от удаленности газораспределительной сети до подключаемого объекта капитального строительства и протяженности газопровода до границы земельного участка заявителя, подлежащего строительству. В частности, в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 30 до 200 метров - срок не может превышать 135 дней.

При этом, предусмотренный пунктом 122 Правил срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен на 30 дней в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа.

В случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

Таким образом, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации определяется в соответствии с программой газификации.

Сроки, предусмотренные пунктом 122 Правил подключения № 1547 устанавливаются в случае, если в программе газификации отсутствует домовладение заявителя.

При этом пунктом 123 Правил предусмотрено, что для случаев, указанных в пункте 121 настоящих Правил, в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.

С 1 марта 2023 года пункт 123 правил изложен в новой редакции, согласно которой в случае если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем), в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что ФИО1 на праве собственности принадлежат жилой дом и земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 (заявителем) и АО «Газпром газораспределение Челябинск» (исполнителем), ООО «Газпром газификация» (региональным оператором газификации) заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (далее - договор от ДД.ММ.ГГГГ).

Согласно пункту 1 договора от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель обязался осуществить в установленные сроки подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети, расположенный по адресу: 

<

адрес>, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с участком максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ) (далее – правила), расположенный по адресу: 

<

адрес>, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Пунктом 11 договора от ДД.ММ.ГГГГ плата за подключение (технологическое присоединение) состоит из платы за установку газоиспользующего оборудования, и (или) проектирование сети газопотребления, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (или) поставку газоиспользующего оборудования, и (или) поставку прибора учета газа и взимается с заявителя в случаях, установленных п. 12 Правил. 

Пунктом 12 договора от ДД.ММ.ГГГГ размер платы за подключение (технологическое присоединение) определяется в соответствии с постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области №83/3 «Об установлении стандартизированных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения газораспределительных организаций Челябинской области на 2022 год» составляет 0 руб.

Стоимость газоиспользующего оборудования и (или) прибора учета газа, а также порядок расчетов за их поставку определяется в соответствии с гражданским законодательством на основании заключенного сторонами отдельного договора. 

На основании пункта 4 договора от ДД.ММ.ГГГГ надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе: обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя и получить на нее положительное заключение экспертизы; осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки (точек) подключения не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора (при необходимости выполнения таких мероприятий); обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора; осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности) и составить акт о подключении (технологическом присоединении);

Согласно пункта 6 договора от ДД.ММ.ГГГГ заявитель обязан надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе: обязательства по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, на котором расположен присоединяемый объект капитального строительства заявителя; осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка.

Пунктом 8 договора от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что единый оператор газификации или региональный оператор газификации обязан осуществить мониторинг исполнения исполнителем действий по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренных договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению подключения (технологического присоединения); рассматривать претензии от заявителя на действия (бездействие) исполнителя и принимать меры в рамках указанного мониторинга, направленные на исполнение исполнителем своих обязанностей.

Данные положения также закреплены в п. 76 Правил №1547.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 декабря 2021 года №3603-р ООО «Газпром газификация» определено единым оператором газификации, действующим в 72 субъектах и одной федеральной территории РФ. Следовательно, ООО «Газпром газификация» осуществляет все права и обязанности единого оператора газификации, определенные, в частности, в Федеральном законе от 31 марта 1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в РФ», в правилах №1547 и в правилах №1550, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 года.

Пунктом 3 договора от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа определен до 31 декабря 2023 года.

Последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения) домовладения. В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.

ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключено дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа определяются в соответствии с пунктами 121, 122, 123 Правил до 31 июля 2024 года.

Таким образом, договор должен был быть исполнен сторонами не позднее 31 июля 2024 года.

Согласно представленного в материалы дела акта от ДД.ММ.ГГГГ о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) исполнителю представлены проектная документация объекта капитального строительства; сеть газопотребления, построенные на территории земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, включая газопровод надземный и присоединенное к сетям газопотребления газоиспользующее оборудование: газовый счетчик и газовый котел. Согласно имеющегося в акте заключения монтаж газоиспользующего оборудования выполнен в полном объеме в соответствии с проектом заявителя; сеть газопотребления и газоиспользующее оборудование к подключению (технологическому присоединению) готовы. 

Истец ссылается на невыполнение ответчиком обязательств, предусмотренных пунктом 4 договора, а именно: отсутствие сети газораспределения до точки подключения, как следствие, отсутствие подключения сети газораспределения и отсутствие газа.

Ответчик доказательства исполнения перед истцом своих обязательств, предусмотренных договором от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ), суду не представил. В материалах дела также не имеется и доказательств принятия АО «Газпром газораспределение Челябинск» мер для надлежащего исполнения обязательств, либо неисполнения обязательств вследствие непреодолимой силы.

Таким образом, с учетом изложенного, установив указанные обстоятельства дела, руководствуясь нормами действующего законодательства, суд приходит к выводу о наличии оснований для возложения на АО «Газпром газораспределение Челябинск», ООО «Газпром газификация» обязанности по выполнению работ, предусмотренных договором № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно пункта 4 договора от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель обязан осуществить мониторинг выполнения заявителем технических условий при условии обеспечения заявителем доступа исполнителя к объекту капитального строительства в срок не позднее 15 дней со дня подключения к сетям газораспределения и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению.

На основании пункта 21 договора от ДД.ММ.ГГГГ для осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий заявитель не позднее чем за 22 рабочих дня до окончания срока осуществления мероприятий по подключению представляет уполномоченной организации уведомление о выполнении технических условий с приложением соответствующих документов.

При этом, руководствуясь ст. 204, ч. 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая, что устанавливаемый срок должен отвечать принципу разумности и, кроме того, обеспечивать соблюдение баланса сторон, суд устанавливает срок исполнения решения суда 30 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную илу.

Разрешая требование истца о взыскании судебной неустойки суд исходит из следующего.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства (ст. ст. 309, 310 Кодекса).

Руководствуясь нормами ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, разъяснениями, приведенными в п. п. 28, 30, 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", исходя из существа заявленных требований, суд первой инстанции признает допустимым и разумным установление судебной неустойки, подлежащей взысканию со дня, следующего за днем окончания установленного судом срока на добровольное исполнение судебного решения, в размере 2 500 руб. в день, подлежащей начислению до дня фактического исполнения судебного решения.

Согласно п. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

В связи с удовлетворением иска, с ответчиков в равных долях в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3 000 руб.

руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.

Обязать акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск» (ИНН №, ОГРН №) в течение 30 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить строительство сети газораспределения до точки подключения – жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Обязать акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск» (ИНН №, ОГРН №) в течение 30 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу подготовить сеть газораспределения к подключению объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> пуску газа.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (ИНН №, ОГРН №) в течение 30 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить действия, предусмотренные пунктом 8 договора от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации, а именно: осуществить мониторинг исполнения акционерным обществом «Газпром газораспределение Челябинск» действий по созданию сети газораспределения, подготовке сети газораспределения к подключению жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> пуску газа.

В случае неисполнения акционерным обществом «Газпром газораспределение Челябинск», обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» решения суда в установленный судом срок, взыскать в равных долях с акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» (ИНН №, ОГРН №), общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (ИНН №, ОГРН №) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт №) судебную неустойку в размере 2 500 руб. за каждый день неисполнения решения суда.

В удовлетворении остальной части иска ФИО1 отказать.

Взыскать в равных долях с акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» (ИНН №, ОГРН №), общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (ИНН №, ОГРН №) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 3 000 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Центральный районный суд г. Челябинска.

Председательствующий: п/п М.Г. Соколова 

Копия верна. Решение не вступило в законную силу.

Судья Центрального районного

суда г. Челябинска: М.Г. Соколова 

Секретарь: Л.П. Мордовина

Решение вступило в законную силу

Судья Центрального районного

суда г. Челябинска: М.Г. Соколова 

Секретарь:

Мотивированное решение изготовлено 29 сентября 2025 года.