Дело № 2-2237/2017

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 октября 2017 г. г. Ярославль

Дзержинский районный суд города Ярославля

в составе судьи Ловецкой М.П., 

при секретаре Денискиной М.О., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к открытому акционерному обществу «Российский железные дороги» о возложении обязанности по осуществлению работ, предусмотренных договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, компенсации морального вреда,

установил:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском о возложении обязанности на ответчика исполнить обязательства по договору N № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД», выполнить работы, предусмотренные п. 10 Технических условий, иные мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям, в соответствии с п. 2.1.3 осуществить действия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрической сети сетевой организации, фактический прием подачу напряжения, в соответствии с п. 2.1.4 договора обязать направить на подписание проектов следующих документов: акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения, акт сдачи приемки услуг по технологическому присоединению, взыскании компенсации морального вреда в размере 10 000 руб. Истец условия договора выполнил в полном объеме, ответчик обязательств по договору не исполнил.

Истец, представитель истца ФИО2 требования поддержали, истец требования уточнил, просил возложить обязанность на ответчика по исполнению условий договора до июня-июля 2018 г.

Представитель ОАО «Российские железные дороги» по доверенности ФИО3 просила в удовлетворении требований отказать, принять во внимание, что сооружения линии электропередач до границ участка истца включены в инвестиционную программу ОАО «РЖД», которой предусмотрены проектные и изыскательные работы на 2017 г., строительно-монтажные работы на 2018 г. На основании ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" сроки технологического присоединения должны определяться исходя из инвестиционных программ сетевой организации.

Соответчик ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» извещено о дате и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явилось, представлены письменные возражения по делу, дело рассмотрено в его отсутствие.

Заслушав лиц, участвующих при рассмотрении дела, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Истец ФИО1 является собственником участка № №, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

По договору № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» от 13.10.2015 г., заключенному между ОАО «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», от имени и за счет которого выступает ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» и ФИО1 (заявитель), сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетике) с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 5 (кВт); категория надежности 3 (третья), класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,23 (кВ), максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств нет.

Согласно п. 1.3 указанного договора технические условия являются неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

На основании п. 10 технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевая организация (ОАО «РЖД») от 13.10.2015 г. осуществляет:

1) проверку соответствия действующим требованиям нормативно-технических документов в условиях увеличивающихся электрических нагрузок (воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, комплектной трансформаторной подстанции КТП-40/6-312 км ст. Клинцево - разъезд 312 км Ярославской дистанции электроснабжения Северной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала Сетевой организации):

мощности и номинального тока обмоток трансформаторов и реакторов (в том числе трансформаторов собственных нужд);

номинального тока и номинального тока отключения выключателей;

номинального тока иных коммутационных аппаратов;

номинального тока первичных обмоток трансформаторов тока;

сечения сборных и соединительных шин, токопроводов, кабелей, проводов линий электропередачи;

наличия и количества ступеней защит, а также коэффициентов, характеризующих их работу (коэффициентов чувствительности, запаса и отстройки);

ёмкости источников электроэнергии в сети постоянного оперативного тока;

2) замену (при выявлении несоответствия) элементов электроустановок, монтаж защит и (или) изменение их уставок в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, выбор заменяемого и вновь устанавливаемого оборудования из числа, разрешённого к применению в Сетевой организации;

3) организацию одного ответвления отходящей линии электропередачи напряжением 0,23 кВ от опоры № 10 воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ распределительного устройства напряжением 0,4 кВ комплектной трансформаторной подстанции КТП-40/6-312 км ст. Клинцево -разъезд 312 км Ярославской дистанции электроснабжения Северной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала Сетевой организации;

4) строительство линии электропередачи напряжением 0,23 кВ от нового ответвления на опоре № 10 воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ распределительного, устройства напряжением 0,4 кВ комплектной трансформаторной подстанции КТП-40/6-312 км ст. Клинцево - разъезд 312 км Ярославской дистанции электроснабжения Северной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала Сетевой организации до границ участка Заявителя, с организацией одного ответвления отходящей линии электропередачи напряжением 0,23 кВ.

На основании п. 2.1.3 договора № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевая организация (ОАО «РЖД») от 13.10.2015 г. обязалась осуществить фактические действия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрической сети сетевой организации, фактический прием (подачу) напряжения.

В п. 2.1.4 договора № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям предусмотрена обязанность сетевой организации (ОАО «РЖД») от 13.10.2015 г. направить ФИО1 на подписание проекты следующих документов: акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения, акт сдачи приемки услуг по технологическому присоединению.

Суд принимает во внимание разъяснения ФАС РФ "По вопросу определения сроков технологического присоединения к электрическим сетям", согласно которым соответствии с абзацем 1 части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Согласно абзацу 3 части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

В соответствии с абзацами 4, 7 части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861.

Перечень существенных условий договора об осуществлении технологического присоединения установлен в пункте 16 Правил технологического присоединения.

Согласно подпункту "б" пункта 16 Правил технологического присоединения срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать:

- 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей, указанных в пункте 13 настоящих Правил, в случае если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

- 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

- 1 год - для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;

- 2 года - для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВА, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон.

Таким образом, применение второго предложения абзаца 3 части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" должно осуществляться с учетом указанных выше положений статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и Правил технологического присоединения.

Включение сетевой организацией в договор условий об осуществлении технологического присоединения с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подпункте "б" пункта 16 Правил технологического присоединения для соответствующих категорий заявителей, является нарушением статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", пункта 16 Правил технологического присоединения и может содержать признаки нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Согласно подпункту 2 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" антимонопольный орган вправе выдать хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения предписания. Например:

- о прекращении злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции;

- о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам;

- о недопущении действий, которые могут являться препятствием для возникновения конкуренции и (или) могут привести к ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства;

- об устранении последствий нарушения антимонопольного законодательства;

- о прекращении иных нарушений антимонопольного законодательства;

- о восстановлении положения, существовавшего до нарушения антимонопольного законодательства;

- о заключении договоров, об изменении условий договоров или о расторжении договоров в случае, если при рассмотрении антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства лицами, права которых нарушены или могут быть нарушены, было заявлено соответствующее ходатайство, либо в случае осуществления антимонопольным органом государственного контроля за экономической концентрацией.

В случае, если по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, будет установлен факт его нарушения, выражающийся в установлении сетевой организацией сроков осуществления технологического присоединения с нарушением Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и Правил технологического присоединения, антимонопольный орган вправе выдать сетевой организации предписание об устранении нарушений антимонопольного законодательства, в том числе путем внесения соответствующих изменений в договор об осуществлении технологического присоединения.

На основании изложенного, абзац 3 пункта 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике не предусматривает увеличения срока технологического присоединения.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статья 26 Федерального "Об электроэнергетике" регулирует порядок доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии. Данный порядок предусматривает технологическое присоединение на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом; необходимость затрат на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе затрат сетевой организации на строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства; соблюдение технических условий, необходимых для технологического присоединения; оказание услуг по передаче электрической энергии покупателю на основании договора возмездного оказания услуг, исполнение обязательств по которому должно осуществляться надлежащим образом; права на ограничение режима потребления электрической энергии. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, определяющим порядок технологического присоединения.

В соответствии с п. 3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В силу п. 4 Правил любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

Согласно п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

В силу подп. "в" п. 7 Правил стороны по договору на осуществление технологического присоединения обязаны выполнить установленные в договоре мероприятия.

При рассмотрении дела не опровергнуты доводы истца в той части, что условия договора со стороны истца выполнены в полном объеме.

На основании п. 1.4 договора № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» от 13.10.2015 г. срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Согласно п. 7.1 договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

08.06.2017 г., 15.10.2016 г. истец поставил в известность сетевую организацию о выполнении им технических условий к договору, письмом «Желдорэнерго-филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» истцу сообщено, что реализация по договору осуществляется через включение в инвестиционную программу ОАО «РЖД» и за счет его средств, срок исполнения договора увеличился по независящим причинам в связи с длительностью согласования предпроектной документации, оптимизацией технико-экономических параметров проекта.

На основании представленного акта о выполнении технических условий от 27.12.2016 г., составленного начальником ЭЧС-3 ст. Рыбинск, проведена проверка выполнения истцом технических условий к договору на технологическое присоединение № № от 13.10.2015 г., по результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями, со стороны заявителя выполнены (л.д. 16).

Согласно акту осмотра (обследования) электроустановки от 27.12.2016 г., составленного начальником электроснабжения ст. Рыбинск, установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями со стороны заявителя выполнены, мероприятия, предусмотренные техническими условиями, со стороны сетевой организации не выполнены (л.д. 17-18).

Учитывая изложенное, в установленные договором сроки ответчиком не исполнены мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца, расположенные на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных истцом исковых требований.

При рассмотрении дела суду ответчиком предоставлены сведения по инвестиционной программе (л.д.54-55) по объекту, принадлежащему на праве собственности истцу, установлены сроки по технологическому присоединению – 2017 г. Из задания на проектирование (л.д. 88) плановый срок начала строительства указан как 2018 г., окончание определяется проектом, в связи с чем, суд соглашается с доводами истца в той части, что срок осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» должен быть установлен до июля 2018 г.

В тех случаях, когда отдельные виды гражданско-правовых отношений с участием потребителей, помимо норм ГК РФ, регулируются и специальными законами Российской Федерации, то к отношениям, вытекающим из таких договоров, Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" может применяться в части, не противоречащей ГК РФ и специальному закону.

В соответствии со статьей 27 ФЗ "О защите прав потребителей", исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (п. 4 ст. 13, п. 5 ст. 14, п. 6 ст. 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей").

В соответствии со ст. 15 Закона "О защите прав потребителей", моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

При рассмотрении дела установлен факт нарушения прав потребителя, суд приходит в выводу о том, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда, исходя из степени вины ответчика, характера и степени причиненных истцу нравственных страданий и, исходя из требований разумности и справедливости, в размере 4 000 рублей.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Согласно пункту 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Истец неоднократно обращался в адрес сетевой организации об исполнении условий договора № 382-09-15/ТП об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» от 13.10.2015 г.

На основании п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" в пользу истца с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 2 000 рублей.

Доводы ответчика в той части, что ОАО «РЖД» не является надлежащим ответчиком, опровергаются договором № 382-09-15/ТП об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» от 13.10.2015 г., а также техническими условиями для присоединения к электрическим сетям, из которых следует, что ОАО «РЖД» является сетевой организацией, то есть исполнителем, на которого на основании договора возложена обязанность по осуществлению выполнения определенных работ (оказание услуги). ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» на основании представленного договора выступает в качестве уполномоченного представителя.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, ГПК РФ, суд

решил:

Обязать открытое акционерное общество «Российский железные дороги» осуществить работы по договору № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» от 13.10.2015 г. в срок до июля 2018 г.:

- на основании п. 10 технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» от 13.10.2015 г.:

1) по проверке соответствия действующим требованиям нормативно-технических документов в условиях увеличивающихся электрических нагрузок (воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, комплектной трансформаторной подстанции КТП-40/6-312 км ст. Клинцево - разъезд 312 км Ярославской дистанции электроснабжения Северной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала Сетевой организации):

мощности и номинального тока обмоток трансформаторов и реакторов (в том числе трансформаторов собственных нужд);

номинального тока и номинального тока отключения выключателей;

номинального тока иных коммутационных аппаратов;

номинального тока первичных обмоток трансформаторов тока;

сечения сборных и соединительных шин, токопроводов, кабелей, проводов линий электропередачи;

наличия и количества ступеней защит, а также коэффициентов, характеризующих их работу (коэффициентов чувствительности, запаса и отстройки);

ёмкости источников электроэнергии в сети постоянного оперативного тока;

2) по замене (при выявлении несоответствия) элементов электроустановок, монтаж защит и (или) изменение их уставок в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, выбор заменяемого и вновь устанавливаемого оборудования из числа, разрешённого к применению в Сетевой организации;

3) по организации одного ответвления отходящей линии электропередачи напряжением 0,23 кВ от опоры № 10 воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ распределительного устройства напряжением 0,4 кВ комплектной трансформаторной подстанции КТП-40/6-312 км ст. Клинцево -разъезд 312 км Ярославской дистанции электроснабжения Северной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала Сетевой организации;

4) по строительству линии электропередачи напряжением 0,23 кВ от нового ответвления на опоре № 10 воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ распределительного, устройства напряжением 0,4 кВ комплектной трансформаторной подстанции КТП-40/6-312 км ст. Клинцево - разъезд 312 км Ярославской дистанции электроснабжения Северной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала Сетевой организации до границ участка Заявителя, с организацией одного ответвления отходящей линии электропередачи напряжением 0,23 кВ; 

- на основании п. 2.1.3 договора № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» от 13.10.2015 г. осуществить фактические действия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрической сети сетевой организации, фактический прием (подачу) напряжения;

- на основании п. 2.1.4 договора № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» от 13.10.2015 г. направить ФИО1 на подписание проекты следующих документов: акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения, акт сдачи приемки услуг по технологическому присоединению.

Взыскать с открытого акционерного общества «Российский железные дороги» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 4 000 руб.

Взыскать с открытого акционерного общества «Российский железные дороги» в пользу бюджета расходы по оплате государственной пошлины в размере 600 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Дзержинский районный суд г. Ярославля в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме. 

Решение изготовлено в окончательной форме 17.11.2017 г.

Судья М.П.Ловецкая