Дело №2-4/2017 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу

с.Лямбирь 16 марта 2017 г.

Лямбирский районный суд Республики Мордовия в составе

судьи Солдатова М.О.

при секретаре Бахметовой Л.К.,

с участием:

истца - общества с ограниченной ответственностью «Саранскэлектрокапремонт», его представителя ФИО1,

ответчика ФИО2, не явился,

представителя ответчика ФИО3, действующего на основании доверенности 13 АА №0616223 от 08 сентября 2016г.,

ответчика - администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, представитель не явился,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Саранскэлектрокапремонт» к ФИО2, администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия об изменении договора строительного подряда,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Саранскэлектрокапремонт» (далее по тексту - ООО «Саранскэлектрокапремонт», подрядчик) обратилось в суд к ФИО2, администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия с вышеназванным иском. Заявленные требования мотивирует тем, что 03 июня 2015 г. между сторонами был заключен договор подряда на строительство жилья, согласно которого подрядчик обязался провести работы по строительству жилого дома по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с выданным администрацией района (уполномоченный орган) техническими условиями и проектно-сметной документацией, предоставленной ФИО2 (заказчик). Стоимость работ составляет 1 995 552 руб., срок выполнения до 31 декабря 2015 г. Заказчиком указано, что стоимость выполнения работ составлена исходя из размера субсидии по Свидетельству о предоставлении социальной выплаты на строительство в сельской местности от 19 мая 2015 г., выданного Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. Договором предусмотрено строительство жилого дома с полноценным подвалом, фундаментом из блоков ФБС, перекрытиями из железобетонных плит ПК, стен из облицовочного кирпича и пеноблоков, сложной кровли из профнастила, о чем ООО «Саранскэлектрокапремонт» подготовлена смета на сумму 2 730 252 руб. 12 коп. На основании актов приемки выполненных работ от 23 ноября 2015 г. ФИО2 принял от подрядчика без замечаний работы по фундаменту, перекрытиям и стенам здания на сумму 1 096 966 руб. 91 коп. 16 декабря 2015 г. заказчику были переданы акты о приемке выполненных работ по крыльцу и кровле на суммы 166 522 руб. 49 коп. и 980 295 руб. 20 коп. ФИО2 отказался подписывать данные акты, поскольку договор заключен на сумму 1 995 552 руб. вне зависимости от объема строительных работ. Указывает, что со стороны заказчика имеет место злоупотребления правом, так как строительство спорного дома с учетом приемки большого объема работ по фундаменту и по стенам не представляется возможным, в связи с чем, просит изменить договор подряда на строительство жилья от 03 июня 2015 г., установив общую стоимость выполнения работ согласно смете в размере 2 730 252 руб. 12 коп.

06 марта 2017 года представитель истца - директор общества с ограниченной ответственностью «Саранскэлектрокапремонт» ФИО4 представил суду заявление об отказе от исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Саранскэлектрокапремонт» к ФИО2, администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия об изменении договора строительного подряда в связи с добровольным урегулированием настоящего спора, указав также, что последствия отказа от иска, предусмотренные статьями 173, 220, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации известны и понятны. 

В судебном заседании представитель истца - общества с ограниченной ответственностью «Саранскэлектрокапремонт» ФИО1 заявление об отказе от иска поддержал, просил производство по делу прекратить по вышеуказанному основанию. 

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, по неизвестной суду причине, о времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом.

Представитель ответчика ФИО3 в судебном заседании не возражал против прекращения производства по настоящему делу в связи с отказом истца от исковых требований.

Представитель ответчика - администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался своевременно и надлежащим образом, имеется заявление представителя администрации ФИО5, действующей на основании доверенности №2 от 09.01.2017г., о рассмотрении дела без участия их представителя.

В соответствии с положениями статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие вышеуказанных лиц.

Согласно статье 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом.

Отказ представителя истца - общества с ограниченной ответственностью «Саранскэлектрокапремонт» от исковых требований заявлен добровольно, не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.

В связи с изложенным, суд считает возможным принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Саранскэлектрокапремонт» от исковых требований, в связи с чем производство по данному гражданскому делу на основании статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации подлежит прекращению.

Руководствуясь статьями 173, 220, 221, 224-225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Саранскэлектрокапремонт» от исковых требований к ФИО2, администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия об изменении договора строительного подряда. 

Производство по гражданскому делу по иску общества с ограниченной ответственностью «Саранскэлектрокапремонт» к ФИО2, администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия об изменении договора строительного подряда прекратить.

Разъяснить, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На определение может быть подана частная жалоба в Верховный Суд Республики Мордовия в течение 15 дней со дня его вынесения путем подачи жалобы через Лямбирский районный суд Республики Мордовия.

Судья Лямбирского районного суда

Республики Мордовия М.О. Солдатов