.

.

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 декабря 2019 года город Новокуйбышевск

Новокуйбышевский городской суд Самарской области в составе:

председательствующего судьи Бегишевой Н.В.

при секретаре Мешалкиной А.Д., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2103/2019 по иску ФИО1 к АО «Самарская сетевая компания» о защите прав потребителя по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании судебных расходов, 

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с вышеуказанным иском, в котором просил обязать АО «Самарская сетевая компания» осуществить технологическое присоединение к электрической сети и осуществить фактическую подачу напряжения к дому, расположенному на земельном участке с кадастровым 

<

№>, в течении месяца со дня вступления настоящего решения в законную силу. В обоснование требований указал, что 

<

Дата> между ним и ответчиком был заключен договор 

<

№> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств- технологического присоединения для электроснабжения дачного дома, расположенного на земельном участке с кадастровым 

<

№>, по адресу: 

<

Адрес>. Пунктом 5 договора установлен срок для выполнения мероприятий по технологическому присоединению- 6 месяцев со дня заключения договора. Условия договора по оплате выполнены им в полном объеме. Однако, обязательства ответчика, срок исполнения которых истек 

<

Дата>, до настоящего времени не исполнены.

Истец ФИО1 не явился, извещен о времени и месте проведения судебного заседания.

В судебном заседании представитель истца ФИО1 – ФИО2, действующий на основании доверенности, поддержала требования по основаниям, изложенным в заявлении.

В судебном заседании представитель ответчика – ФИО3, действующая по доверенности, требования ФИО1 признала.

С учетом мнения участников судебного заседания, на основании ст. 167 ГПК РФ, суд определил рассмотреть дело в отсутствии истца.

Изучив основания заявленных требований, выслушав участников судебного заседания, исследовав материалы по делу, суд приходит к выводу об удовлетворении требований по следующим основаниям.

В соответствии со ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ст.60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими.

В силу части 3 статьи 154 ГК РФ для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

Согласно части 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. При этом, существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательств, одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев предусмотренных законом.

На основании положений ч.1, ч.2 ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В силу положений ч.1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.Согласно п.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, истец ФИО1 является собственником земельного участка с кадастровым 

<

№>, по адресу: 

<

Адрес>.

<

Дата> между истцом- заявитель и АО «Самарская сетевая компания» - сетевая организация, был заключен договор 

<

№> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно условиям п.1 данного договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя- дачный дом, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 (кВт); категория надежности 3; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,22 (кВ); ранее присоединенная в точке присоединения, указанной в п.3 договора, мощность 0 кВт. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технические условия являются неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора (п.4).

В соответствии с п.5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Согласно п.6 договора 

<

№> от 

<

Дата>, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем;

не позднее 14 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), с соблюдением срока, установленного п.5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Пунктом 10 договора предусмотрен размер платы за технологическое присоединение- ... руб., в том числе НДС 18%- ... руб.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

Оплата производится в порядке 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет сетевой организации в течение 10 банковских дней с момента заключения настоящего договора на основании счета, выставленного сетевой организацией (п.11).

Плата за технологическое присоединение внесена ФИО1 в полном объеме 

<

Дата>, что подтверждается представленным в материалы дела чеком-ордером.

Ввиду неисполнения сетевой организацией принятых на себя обязательств, ФИО1 в адрес ответчика направлена претензия, полученная 

<

Дата>, с требованием в срок до 

<

Дата> осуществить технологическое присоединение по договору 

<

№> от 

<

Дата>.

Однако, до настоящего времени обязательства АО «Самарская сетевая компания» не исполнены.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, неисполнение ответчиком надлежащим образом обязательств по осуществлению технологического присоединения по договору 

<

№> от 

<

Дата> для электроснабжения дачного дома, признание заявленных ФИО1 требований представителем ответчика, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения иска в полном объеме

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Требования ФИО1 к АО «Самарская сетевая компания» о защите прав потребителя по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании судебных расходов – удовлетворить.

Обязать АО «Самарская сетевая компания» осуществить технологическое присоединение для электроснабжения дачного дома, расположенного на земельном участке с кадастровым 

<

№>, принадлежащего ФИО1, по адресу: 

<

Адрес>, в течении месяца со дня вступления настоящего решения в законную силу. 

Взыскать с АО «Самарская сетевая компания» в пользу ФИО1 расходы по оплате государственной пошлины – 300 (триста) рублей. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Самарский областной суд через Новокуйбышевский городской суд Самарской области в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Решение в окончательной форме принято 30 декабря 2019 года.

Судья /подпись/ Н.В.Бегишева

.