Дело № 2-2747/2019

78RS0017-01-2019-002539-58

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербург 18 сентября 2019 года

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга

в составе: председательствующего судьи Калининой М.В.,

при помощнике ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 и ФИО3 к ООО «Финансово-строительная корпорация «Лидер Северо-Запад» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 и ФИО3 обратились в суд с иском к ООО «Финансово-строительная корпорация «Лидер Северо-Запад» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

В обоснование своих требований истцы указали следующее.

09.10.18 между ООО «Финансово-строительная корпорация «Лидер Северо-Запад» и истцами был заключен Договор № № участия в долевом строительстве (далее, Договор). Согласно условиям Договора, ответчик, являющийся застройщиком, обязался в предусмотренный Договором срок построить многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, земельный участок с кадастровым номером 47:07:0713003:994, и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, передать участникам долевого строительства квартиру, в указанном жилом доме, расположенную на 

<

данные изъяты> этаже, в 6-й секции, общей площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с условным номером №, а участники долевого строительства обязуются уплатить Застройщику установленную договором цену и принять квартиру по акту приема-передачи. Цена договора была определена в 4 132 513 рублей. Застройщик обязался передать квартиру участникам долевого строительства по акту приема-передачи не позднее 31.12.18 (л.д.13 - 30).

Денежные обязательства истцов перед ответчиком исполнены в полном объеме, что в споре между сторонами не находится.

Согласно акту взаиморасчетов от 27.02.19 фактическая площадь объекта долевого строительства на основании обмеров увеличилась на 2,09 кв.м, а стоимость подлежащая доплате составила 214 450 рублей 40 копеек (л.д.32 - 33). Денежные обязательства истцами в указанной части исполнены 27.02.19 (л.д.34, 35), таким образом, цена договора стала составлять 4 346 963 рубля 40 копеек.

Квартира по акту приема-передачи передана 13.03.2019 (л.д.36 – 37).

Поскольку срок передачи квартиры был нарушен, истцы исчислили неустойку с 01.01.19 по 13.03.19, согласно положений ч.2 ст.6 ФЗ РФ от 30.12.04 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домой и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее, Закона), и просили взыскать таковую. Полагал, что ответчик причинил им моральный вред, определил размер компенсации.

После уточнения исковых требований, истцы просят взыскать с ответчика в свою пользу неустойку, в размере по 80 853 рубля 52 копейки, каждому; компенсацию морального вреда, в размере по 50 000 рублей, каждому; штраф; расходы на юридические услуги, в размере по 26 000 рублей, каждому.

Истцы о судебном заседании уведомлены, в судебное заседание не явились, уважительных причин к неявке не представили, об отложении рассмотрения дела не просили, направили своего представителя Мукачева Д.С., который требования иска поддержал в полном объеме.

Ответчик о судебном заседании уведомлен, в суд своего представителя не направил, об отложении рассмотрения дела не просил, уважительных причин к неявке не представил.

Ответчик представил возражения на исковое заявление, которые приобщены к материалам настоящего гражданского дела. В указанных возражениях ответчик просил о снижении неустойки, согласно положениям ст.333 ГК РФ (л.д.61 – 63).

В соответствии со ст.167 ГПК РФ, суд принял решение о возможности рассмотрения дела в отсутствие истца и ответчика.

Выслушав представителя истцов, исследовав материалы настоящего гражданского дела, суд приходит к следующим выводам.

Заключение Договора, его условия, не передача квартиры ответчиком истцам в установленный договором срок, между сторонами в споре не находится.

В соответствии со ст.56 ГПК РФ, каждый доказывает обстоятельства, на которые ссылается в обоснование своих требований и возражений.

В соответствии со ст.309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом.

В соответствии с ч.2 ст.6 ФЗ РФ от 30.12.04 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домой и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее, Закона), в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

С учетом изложенного при расчете неустойки, подлежащей взысканию с ответчика, ставка рефинансирования определяется исходя из действующей по состоянию на предусмотренный договором день исполнения застройщиком своих обязательств по передаче истцам квартиры – 31.12.18.

На момент обусловленного договором срока исполнения обязательств по передаче истцу объекта долевого строительства (31 декабря 2018 года) действовала ставка рефинансирования ЦБ РФ, в размере 7,75%, которая и подлежит применению при расчете неустойки в соответствии с ч.2 ст.6 ФЗ РФ от 30.12.04 № 214-ФЗ. 

Судом также установлено, что никаких доказательств невиновной непередачи объекта застройщиком дольщикам в сроки, оговоренные договором, не имеется.

При таких обстоятельствах, неустойка подлежит исчислению с 01.01.19 по 27.02.19, составляет 58 дней на сумму 4 132 513 рублей, далее с 28.02.19 по 13.03.19 – 14 дней на сумму 4 346 963 рубля 40 копеек, соответственно, неустойка составляет 

(4 132 513 рублей х 7,75%\300 х 58 дня) х 2 = 123 837 рублей 63 копейки; 

(4 346 963 рубля 40 копеек х 7,75%/300 х 14 дня) х 2) = 31 443 рубля 03 копейки.

Всего 152 280 рублей 66 копеек.

Ответчик просил о снижении неустойки, полагая ее чрезмерно завышенной.

Рассматривая ходатайство ответчика о снижении неустойки, полагая ее чрезмерно завышенной, суд полагает следующее.

В соответствии с п.1 ст.330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно ст.333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Как разъяснено в п.34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.12 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», применение ст.333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

В соответствии с разъяснениями, данными в п.71 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 24.03.16 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств», если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (п.1 ст.2, п.1 ст.6, п.1 ст.333 ГК РФ).

Согласно п.73 указанного Постановления, бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

С учетом правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в п.2 Определения № 263-О от 21.12.2000, положения п.1 ст.333 ГК РФ содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования ст.17 (часть 3) Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Следовательно, гражданское законодательство предусматривает неустойку, в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной.

По смыслу названной нормы закона уменьшение неустойки является правом суда. Наличие оснований для снижения и определение критериев соразмерности определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств.

Рассмотрев указанное заявление, суд с учетом всех обстоятельств дела, установленных в судебном заседании, в том числе с учетом степени выполнения обязательств застройщиком, допущенной ответчиком просрочки нарушения обязательства и его последствий, полагает, что размер неустойки не является соразмерным, а потому таковая подлежит взысканию с ответчика в пользу истцов, в размере по 50 000 рублей, каждому.

Разрешая требование о взыскании компенсации морального вреда, суд исходит из следующего.

В соответствии со ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающие на принадлежащие гражданину другие материальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

В силу ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителей, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда, при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом.

Истицы просят взыскать в пользу каждого компенсацию морального вреда, в размере 50 000 рублей.

Судом установлено, что обязательства по договору участия в долевом строительстве ответчиком не были исполнены надлежащим образом, однако, каких-либо доводов о наступивших тяжких последствиях суду для рассмотрения представлено не было, с учетом злоупотребления правом со стороны истцов, суд полагает разумным взыскать с ответчика в пользу истцов компенсацию морального вреда, в размере по 15 000 рублей, каждому.

В силу п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф, в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Соответственно, с ответчика в пользу истцов надлежит взыскать штраф, в размере ((50 000 рублей +15 000 рублей) : 2) по 32 500 рублей, каждому.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны понесенные по делу судебные расходы, пропорционально удовлетворенным исковым требованиям. 

В соответствии со ст.100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

В подтверждение расходов на представителя истцы представили суду для рассмотрения соглашение № 01/09/19-03 об оказании юридической помощи от 01.05.2019, заключенный ими с адвокатом Мукачевым Д.С., которым предусмотрено вознаграждение в сумме 52 000 рублей (л.д.68 - 70). Денежные средства были уплачены (л.д.70).

С учетом того, что настоящее гражданское дело было рассмотрено в три судебных заседаний, гражданское дело не представляет какой-либо сложности, аналогичные многократно решаются судами, решения публикуются на официальных сайтах судом, а потому формирование позиции у представителя не вызывало сложностей. Суд полагает возможным взыскать в разумных пределах с ответчика в пользу истцов расходы на представителя, в размере по 10 000 рублей, каждому.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ, с ответчика в доход бюджета Санкт-Петербурга надлежит взыскать государственную пошлину, в размере 3 800 рублей.

Руководствуясь ст.ст.194, 198, 199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО2 и ФИО3 удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Финансово-строительная корпорация «Лидер Северо-Запад» в пользу ФИО2 и ФИО3, каждому, неустойку, в размере по 50 000 рублей; компенсацию морального вреда, в размере по 15 000 рублей; штраф, в размере по 32 500 рублей; расходы на представителя, в размере по 10 000 рублей.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с ООО «Финансово-строительная корпорация «Лидер Северо-Запад» в доход бюджета Санкт-Петербурга государственную пошлину, в размере 3 800 рублей.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд через Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Решение принято в окончательной форме 23.09.19.

Председательствующий: М.В. Калинина