РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 января 2020 года г. Иркутск

Октябрьский районный суд г. Иркутска в составе: председательствующего судьи Амосовой H.Л., при секретаре Левченко А.П., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-455/2020 по иску ФИО1 к Открытому акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» об обязании осуществить технологическое присоединение, 

УСТАНОВИЛ:

В обоснование исковых требований указано, что земельный участок, расположенный по адресу: Адрес, принадлежит истцу на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от Дата.

В целях подведения электроснабжения к указанному объекту, между истцом и ответчиком Дата заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, по которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность 15 кВт, III категория надежности, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ, а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с пунктом 5 договора № от Дата составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.?

Во исполнение условий договора истец:

- Дата оплатил за технологическое присоединение 10 321,76 руб. (квитанция об оплате).

- Дата уведомил сетевую организацию (ответчика) о выполнении им технических условий №.

- Дата представителем ответчика проведен осмотр и составлен акт осмотра (обследования) электроустановки № в котором указано, что технические мероприятия, предусмотренные техническими условиями № от Дата выполнены в полном объеме.

По условиям договора № (пункт 6.3) сетевая организация обязалась не позднее 10 рабочих дней со дня проведения осмотра с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Вместе с тем, до настоящего времени ответчиком данные обязательства не исполнены, энергопринимающие устройства истца не подключены к электрическим сетям ответчика, чем нарушены права и законные интересы истца на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств в установленный законом срок.

В соответствии со ст. 425 ГК РФ, договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

В соответствии со ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

В силу ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации № от Дата «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», законодательство о защите прав потребителей распространяется на отношения, одной из сторон которых выступает организация, либо индивидуальный предприниматель, а с другой - гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий, либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

К отношениям, вытекающим из отдельных видов договорных отношений с участием потребителей, которые регулируются специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права, применяется Закон Российской Федерации № от Дата «О защите прав потребителей» (Закон) в части, не урегулированной специальными законами.

Например, к таковым относятся договоры участия в долевом строительстве, договор страхования, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения.

В случае, когда последствия нарушения условий договоров об оказании отдельных видов услуг с участием гражданина не подпадают под действия главы III Закона, применяются его общие положения (ст. 39). В частности, о праве граждан на предоставление информации (ст. ст. 8-9), об ответственности за нарушение прав потребителей (ст. 13), о возмещении вреда (ст. 14), компенсации морального вреда (ст. 15), об альтернативной подсудности (п. 2 ст. 17), об освобождении от уплаты госпошлины (п. 3 ст. 17).

Истец просит суд обязать Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» исполнить обязательства по договору № от Дата, а именно: осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить и выдать истцу акт об осуществлении технологического присоединения.

В судебное заседание истец ФИО1 не явился, извещенный надлежащим образом, просил о рассмотрении дела в свое отсутствие.

В судебном заседании представитель истца по доверенности ФИО2 поддержала исковые требования.

В судебном заседании представитель ответчика ОАО «ИЭСК» по доверенности ФИО3 не признала исковые требования, поддержала отзывы на исковое заявление.

Суд рассмотрел дело в отсутствие истца в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав явившихся лиц, изучив материалы дела, суд приходит к следующему выводу. 

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Порядок технологического присоединения предусмотрен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Настоящие Правила определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации (п. 1 Правил).

В соответствии п. 1 ст. 26 Федерального закона «Об электроэнергетике», которому корреспондируют положения п. 6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Процедура технологического присоединения, на основании п. 7 Правил технологического присоединения, завершается составлением акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно п. 1 ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

П. 1 ст. 779 ГК РФ предусмотрено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу ст. 9 Федерального закона № 15-ФЗ от 26.01.1996 «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

Из разъяснений, содержащихся в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», следует, что если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Согласно ч. 1 ст. 27 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Судом установлено, что Дата между ОАО «ИЭСК» и ФИО1 был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (технологическое присоединение): домовладение, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, категория надежности III (третья), класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ, а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора - размер платы за технологическое присоединение составляет 10 321,76 руб. (п. 10 договора).

В соответствии с п. 2 договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения: домовладение, расположенное на земельном участке с кадастровым номером: № по адресу: Адрес, который принадлежит ФИО1 на праве собственности, что следует из выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от Дата.

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (технические условия) и располагается на расстоянии 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя - п. 3 договора. 

Согласно п. 4 договора, технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

П. п. 6.1, 8.1 договора предусмотрено, что сетевая организация выполняет мероприятия по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, а заявитель - в пределах.

Перечень мероприятий по технологическому присоединению, подлежащих выполнению сторонами, определен техническими условиями.

В силу п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с п. п. 6.2, 6.3 договора, сетевая организация обязуется в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя, и, не позднее 10 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в п. 6.2 настоящего договора, с соблюдением срока, установленного п. 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

Согласно п. п. 8.2, 8.3 договора, заявитель обязуется уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств.

Таким образом, по условиям договора, для осуществления технологического присоединения стороны должны выполнить определенные подготовительные мероприятия, как со стороны ответчика, так и со стороны истца.

Как видно из материалов дела, ФИО1 исполнил обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения, внес оплату за технологическое присоединение в определенном договором размере (чек по операции от Дата на сумму 10 321,76 руб.) и выполнил мероприятия по технологическому присоединению, о чем составлен акт осмотра (обследования) электроустановки № от Дата, из которого следует, что технические мероприятия, предусмотренные техническими условиями № от Дата, выполнены в полном объеме, замечаний нет. 

Однако ОАО «ИЭСК» обязательства по договору не исполнены, технологическое присоединение не осуществлено, что не оспаривается, доказательств обратного, в нарушение требований ст. ст. 56, 60 ГПК РФ, не представлено, напротив, исходя из отзывов на иск, домовладение, которому требуется электроснабжение расположено на земельном участке в границах Прибрежной защитной полосы, в зоне с особыми условиями использования территории «Центральная экологическая зона Байкальской природоохранной прокуратуры», в водоохраной зоне, по вопросам законности предоставления указанного земельного участка, а также осуществления строительства линейных объектов, линии электропередач на данной территории направлены запросы в Байкальскую природоохранную прокуратуру, Ольхонскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Росреестра по Адрес, ответы до настоящего времени не получены; земельный участок с кадастровым номером: № снят с кадастрового учета, требуется предоставить сведения о земельном участке в отношении которого заключен договор, с целью определения границ, внесения изменений в его условия; до установления перечисленных выше обстоятельств исполнение договора об осуществлении технологического присоединения не представляется возможным.

В подтверждение данных обстоятельств, ответчиком в материалы дела представлены письмо от Дата, исх. № юр-270 «О законности предоставления земельных участков» на имя прокурора Адрес, письмо от Дата, исх. № «О проверке законности оформления ЗУ» в Ольхонскую межрайонную природоохранную прокуратуру, письмо от Дата, исх. № № на имя руководителя Управления Росреестра по Адрес, ответ на обращение от Дата, исх. №, поступившее в Ольхонскую межрайонную природоохранную прокуратуру, данный Управлением Росреестра по Адрес от Дата, исх. №, выписка из ЕГРН об объекте недвижимости от Дата в отношении земельного участка с кадастровым номером: № из которой видно, что из земельного участка образованы земельные участки с кадастровыми номерами: № и №, письмо от Дата, исх. № «О технологическом присоединении» на имя ФИО1 с уведомлением о приостановлении мероприятий по технологическому присоединению по причине снятия земельного участка, на котором должно располагаться ЭПУ, с кадастрового учета и указанием, что непредставление правоустанавливающих документов будет являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство линии электропередач, без которого ведение строительства не допускается. 

Между тем, исходя из письменных пояснений по делу истца, снятие земельного участка с кадастрового учета связано с межеванием, которое произведено до составления акта осмотра электроустановки и местоположение энергопринимающих устройств не изменило, при подписании акта замечания отсутствовали; земельный участок под домовладением, которому требуется электроснабжение находится на одной территории с земельными участками под объектами, имеющими технологическое присоединение, что подтверждается межевым планом, подготовленным Дата, в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием двух земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером: №, выписками из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от Дата в отношении образованных земельных участков с кадастровыми номерами: № и №, договором № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от Дата, заключенным между ОАО «ИЭСК» и ФИО1 в отношении строительного вагончика на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: Адрес, актом об осуществлении технологического присоединения (временный) № от Дата, договором энергоснабжения жилого дома (домовладения) № № от Дата, выпиской из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от Дата, данными публичной кадастровой карты, договором № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от Дата, заключенным между ОАО «ИЭСК» и ФИО1 в отношении домовладения на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: Адрес, актом об осуществлении технологического присоединения № от Дата, выпиской из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от Дата, сведениями об оплате, договором № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от Дата, заключенным между ОАО «ИЭСК» и ФИО1 в отношении домовладения на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: Адрес, актом об осуществлении технологического присоединения № от Дата, выпиской из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от Дата, извещением и сведениями об оплате, соглашением о перераспределении земельных участков от Дата, межевым планом от Дата, из которых видно, что земельный участок с кадастровым номером: № перераспределен. 

В соответствии с п. 16.3 Правил, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, что корреспондирует подп. «г» п. 25(1) Правил.

Перечень существенных условий договора, содержащийся в п. 16 Правил, включает, в том числе срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

При этом подп. «а» п. 25(1) Правил предусмотрено, что в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Приведенные положения Правил подлежат применению к сложившимся правоотношениям сторон и согласуются с условиями договора.

Так, с учетом п. п. 5, 6.2, 6.3 договора, даты составления акта осмотра (обследования) электроустановки №, фактическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям должно было быть осуществлено не позднее 10 рабочих дней с Дата, то есть Дата и в течение 6 месяцев с Дата - Дата, а значит допущено существенное нарушение установленного Правилами и условиями договора срока на осуществление технологического присоединения. 

Согласно п. 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Исходя из системного анализа п. 3 и п. п. 12.1, 14, 34 Правил, сетевая организация обязана заключить договор об осуществлении технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, мощность которых составляет до 15 кВт включительно вне зависимости от технической возможности технологического присоединения на дату обращения. 

Следовательно, отсутствие технической возможности технологического присоединения не является основанием для неисполнения договора.

Вместе с тем, оценивая обстоятельства неисполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения, представленные в дело доказательства, суд полагает, что нарушение условий договора о сроках выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения не обусловлено объективными причинами невозможности исполнить договор и осуществить технологическое присоединение; нахождение энергопринимающих устройств на земельном участке, расположенном в зоне с особыми условиями использования территории, снятие земельного участка с кадастрового учета, связанное с межеванием не исключают возможности исполнения договора; местоположение земельного участка относительно зонирования территории на момент заключения договора не препятствовало ответчику заключить договор с истцом и принять оплату, земельный участок граничит с земельными участками, в отношении которых фактическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям осуществлено, запросы в государственные органы направлялись спустя полтора года с даты заключения договора, а должны быть направлены в установленный Правилами и условиями договора срок на осуществление технологического присоединения, кадастровые изменения влекут внесение изменений в договор в соответствующей части, но на исполнение обязательств не влияют, межевание привело к образованию двух земельных участков на месте земельного участка, заявленного в договоре, произведено до составления акта осмотра электроустановки, подписанного без замечаний, местоположение энергопринимающих устройств не изменилось, на момент получений сведений о кадастровых изменениях выполнение мероприятий по осуществлению технологического присоединения должно быть завершено; несвоевременность совершения действий по исполнению договора изобличает бездействие, проявленное в выходе сетевой организации за допустимые пределы осуществления гражданских прав и о наложении на заявителя необоснованных ограничений, в том числе связанных с невозможностью создать техническую возможность технологического присоединения в установленный срок; договор об осуществлении технологического присоединения отвечает требованиям закона, не оспорен и не признан судом недействительным или незаключенным, обратного, в нарушение требований ст. ст. 56, 60 ГПК РФ, не доказано.

Таким образом, указанные обстоятельства не являются основанием для освобождения от исполнения обязательств по договору.

Доказательств невозможности иным способом выполнить мероприятия, предусмотренные Правилами и условиями договора, в частности осуществить технологическое присоединение без строительства линейных объектов на земельном участке с использованием существующих на соседних земельных участках, находящихся на одной территории и исполнить обязательства, не представлено, приведенные факты не являются безусловным основанием невозможности исполнения договора, а потому наличия объективных причин невозможности исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения не доказано, необходимых мер к исполнению обязательств по договору не принято (ст. ст. 56, 60 ГПК РФ).

Анализируя установленные по делу обстоятельства и представленные доказательства, учитывая, что обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения, выразившееся в нарушении установленного срока выполнения мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения не исполнены, принимая во внимание, что ответчик - сетевая организация должен исполнить обязанность по выполнению мероприятий по осуществлению технологического присоединения до границ земельного участка истца - заявителя, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить и выдать акт об осуществлении технологического присоединения, суд полагает, что исковые требования являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению. 

В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Из разъяснений п. 52 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 следует, что при удовлетворении требования потребителя об обязании произвести определенные действия, связанные с исполнением (например, безвозмездное устранение недостатков, замену товара), суду в каждом случае следует указывать в резолютивной части решения срок, в течение которого после вступления решения в законную силу ответчик обязан совершить эти действия (часть 2 статьи 206 ГПК РФ).

П. 27 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что, удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), часть 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Суд, с учетом обоснованности требований истца об обязании ответчика осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить и выдать акт об осуществлении технологического присоединения, установленного Правилами и условиями заключенного ими договора срока на исполнение обязательств, существа и длительности допущенных ответчиком нарушений прав истца, объема работы в рамках выполнения мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения, считает возможным установить срок исполнения вынесенного судом решения - в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

По правилам ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ, с ответчика в доход муниципального образования г. Иркутск подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 руб.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить.

Обязать Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» исполнить обязательства по договору № от Дата, а именно осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО1 к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить и выдать ФИО1 акт об осуществлении технологического присоединения в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» в доход муниципального образования г. Иркутск государственную пошлину в размере 300 руб.

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Октябрьский районный суд г. Иркутска в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения 22.01.2020 г.

Судья Н.Л. Амосова