Дело № 2-4/2019 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

28 января 2019 года пгт. Эгвекинот 

Иультинский районный суд Чукотского автономного округа в составе:

председательствующего Пеннер И.А.,

при секретаре Карьялайнен В.Ю., 

с участием: старшего помощника прокурора Иультинского района Вавиловой А.А.,

представителя ответчиков ФИО1, ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в пгт. Эгвекинот гражданское дело по иску прокурора Иультинского района к Администрации городского округа Эгвекинот, Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское» о возложении обязанности по обеспечению мероприятий, связанных с производством капитального ремонта (замене) ветхих сетей системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, расположенных на территории городского округа Эгвекинот, 

у с т а н о в и л:

прокурор Иультинского района обратился в суд с иском в порядке статьи 45 ГПК РФ в интересах неопределенного круга лиц к Администрации городского округа Эгвекинот, Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское» (далее МУП ЖКХ «Иультинское») о возложении обязанности по обеспечению мероприятий, связанных с производством капитального ремонта (замене) ветхих сетей системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, расположенных на территории городского округа Эгвекинот, в обоснование которого указано, что прокуратурой района проведена проверка исполнения органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального хозяйства требований законодательства по замене ветхих сетей системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, расположенных на территории городского округа Эгвекинот. В ходе проверки установлено, что Администрация городского округа Эгвекинот, являясь собственником сетей и сооружений теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, и МУП ЖКХ «Иультинское», являясь организацией эксплуатирующей данные объекты недвижимого имущества на основании постановления Главы Иультинского муниципального района № -№ от и осуществляющей функции по теплоснабжению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, электроснабжению, водоотведению (канализация) в населенных пунктах п. Эгвекинот, с. Амгуэма, с. Конергино, с. Уэлькаль, с. Ванкарем, с. Нутэпельмен, п. Мыс Шмидта, с. Рыркайпий на основании постановления Главы Иультинского муниципального района № -пг от не осуществляли мероприятия, направленные на устройство, содержание, надлежащую эксплуатацию сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. 

В населенных пунктах городского округа Эгвекинот имеются сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, подлежащие техническому освидетельствованию для последующего капитального ремонта (замены). Несмотря на изношенное состояние вышеперечисленных участков коммунальных сетей, что в свою очередь свидетельствует об их ветхости, Администрацией городского округа Эгвекинот и МУП ЖКХ «Иультинское» данные участки в планы ремонтных работ не включались, так как не производилось их техническое обследование и осмотр. Согласно актам обследования и дефектным ведомостям, составленным комиссионно представителями Администрации городского округа Эгвекинот и МУП ЖКХ «Иультинское», участки сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения на территории городского округа Эгвекинот подлежат капитальному ремонту (замене) ввиду того, что данные участки имеют частичное разрушение конструкций, уплотнение и осыпание изоляционного слоя, протечки вследствие коррозионных повреждений, износ сетей составляет от 80 до 100 %, а также ввиду эксплуатации более 12 лет.

Вместе с тем, на момент проведения прокуратурой района проверки, ремонтные работы указанных выше участков коммунальных сетей со стороны Администрации городского округа Эгвекинот и МУП ЖКХ «Иультинское» не проводились, финансовые средства на данные цели не выделялись. Необходимость в обследовании и ремонтных работах сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения возникла у Администрации городского округа Эгвекинот и МУП ЖКХ «Иультинское» при подготовке к отопительному периоду, так как из-за их ветхости, ввиду превышения срока службы, могут возникнуть аварийные ситуации. Непринятие надлежащих мер со стороны Администрации городского округа Эгвекинот и МУП ЖКХ «Иультинское» по содержанию коммунальных сетей расположенных на территории городского округа Эгвекинот в исправном состоянии, может привести к чрезвычайным ситуациям, что неизбежно влечет причинение ущерба собственникам жилых помещений, помещений административного, культурного и социально-бытового назначения и т.д., чем нарушаются права и законные интересы неопределенного круга лиц, которые невозможно индивидуализировать (определить), привлечь в процесс в качестве истцов, указать в решении и решить вопрос о правах и обязанностях каждого из них при разрешении дела. 

На основании изложенного, прокурор Иультинского района просит возложить на Администрацию городского округа Эгвекинот обязанность по обеспечению финансирования мероприятий по капитальному ремонту (замене) ветхих сетей системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, расположенных на территории городского округа Эгвекинот, а на МУП ЖКХ «Иультинское» возложить обязанность в течение 18 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу произвести капитальный ремонт (замену) коммунальных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, воздушных и кабельных линий электропередач в с. Рыркайпий, п. Мыс Шмидта, с. Ванкарем, с. Нутепельмен, с. Конергино, с. Уэлькаль, с. Амгуэма, п. Эгвекинот. Кроме того, прокурор просит возложить на МУП ЖКХ «Иультинское» обязанность в течение 9 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу для оценки технического состояния произвести обследование сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории городского округа Эгвекинот.

Участвующий в судебном заседании прокурор Вавилова А.А. исковые требования поддержала в полном объеме по изложенным в иске основаниям.

Представитель ответчика Администрации городского округа Эгвекинот ФИО1, и представитель ответчика МУП ЖКХ «Иультинское» ФИО2, действующие на основании доверенностей, в судебном заседании, а также в письменных отзывах (том № л.д. ) исковые требования признали, однако просили установить более длительный срок для исполнения судебного решения, а именно 5 лет, ввиду значительного объема работ, отсутствия финансовых возможностей для производства ремонта коммунальных сетей в бюджете городского округа Эгвекинот.

Суд, заслушав требования прокурора, выяснив мнения представителей ответчиков, исследовав материалы дела, приходит к следующему выводу. 

В соответствии с частью 1 статьи 45 ГПК РФ, частью 3 статьи 35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Согласно части 1 статьи 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. По смыслу части 2 названной статьи суд может принять признание иска ответчиком, если это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 68 ГПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств.

В силу части 3 статьи 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

На основании абзаца 2 части 4 статьи 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Ответчики в представленных суду и приобщенных к материалам дела письменных отзывах, а также представители ответчиков в судебном заседании, заявленные прокурором исковые требования признали в полном объеме. Последствия признания иска ответчиком, предусмотренные частью 3 статьи 173 ГПК РФ, представителям ответчиков в судебном заседании разъяснены и понятны. 

По делу установлено, что прокуратурой Иультинского района в период с 20.08.2018 по 19.09.2018 проведена проверка исполнения органами местного самоуправления и МУП ЖКХ «Иультинское» требований законодательства по замене ветхих сетей системы теплоснабжения, водоснабжения водоотведения, электроснабжения, расположенных на территории городского округа Эгвекинот, в ходе которой установлено нарушение ответчиками пункта 4.3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», пункта 1 части 1 статьи 6, пункта 2 части 1, 5 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пункта 1 части 1 статьи 6, части 1 статьи 10 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пункта 2 части 6 статьи 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», части 3 статьи 5 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пункта 1.1.6 Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001, утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168, пунктов 6.2.26, 6.2.37, 6.2.63, 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, пунктов 1.9.1, 2.10.1, 2.10.5, 2.10.6 Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168, пунктов 5.1.1 и 5.1.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, пунктов 1.13 и 1.16 Типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522-99, утвержденной РАО «ЕЭС России» 09.12.1999, пунктами 2.7, 2.8 Положения о проведении планово-предупредительного ремонта на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденного протоколом Госстроя РСФСР № 13-8 от 01.06.1989 и Управлением жилищно-гражданского строительства Госстроя УССР от 21.09.1989 № 2/329, пунктов 1.5.2, 5.7.1, 5.7.18 Приказа Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

В частности, Администрация городского округа Эгвекинот, являясь собственником сетей и сооружений теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, а МУП ЖКХ «Иультинское», являясь организацией, эксплуатирующей данные объекты недвижимого имущества не исполняют надлежащим образом обязанность по контролю за состоянием сетей системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения на территории городского округа Эгвекинот. В населенных пунктах городского округа Эгвекинот имеются сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, подлежащие техническому освидетельствованию для последующего капитального ремонта (замены). Администрацией городского округа Эгвекинот и МУП ЖКХ «Иультинское» данные участки в планы ремонтных работ не включались, так как не производилось их техническое обследование и осмотр. Из актов обследования и дефектных ведомостей следует, что на территории городского округа Эгвекинот подлежат капитальному ремонту (замене) ряд участков сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения ввиду их ветхости, частичного разрушения конструкций, протечки вследствие коррозионных повреждений, износ сетей составляет от 80 до 100 %. Вместе с тем на момент проведения прокуратурой района проверки, ремонтные работы указанных выше участков коммунальных сетей со стороны Администрации городского округа Эгвекинот и МУП ЖКХ «Иультинское» не проводились, финансовые средства на данные цели не выделялись.

Непринятие ответчиками Администрацией городского округа Эгвекинот и МУП ЖКХ «Иультинское» надлежащих мер по содержанию коммунальных сетей, расположенных на территории городского округа Эгвекинот, в исправном состоянии, может привести к чрезвычайным ситуациям, что неизбежно влечет причинение ущерба собственникам жилых помещений, помещений административного, культурного и социально-бытового назначения и другим последствиям, чем нарушаются интересы неопределенного круга лиц в области охраны окружающей среды.

С учетом вышеизложенного, суд не усматривает нарушения закона, прав и законных интересов других лиц при признании ответчиками заявленных требований, в связи с чем, суд принимает признание иска ответчиками Администрацией городского округа Эгвекинот, МУП ЖКХ «Иультинское» и приходит к выводу об удовлетворении исковых требований о возложении на ответчиков обязанности по обеспечению мероприятий, связанных с производством капитального ремонта (замене) ветхих сетей системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, расположенных на территории городского округа Эгвекинот.

В силу требований статьи 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок.

Устанавливая срок исполнения ответчиками решения суда, обязывающего их совершить определенные действия, суд исходит из требований разумности и объективной возможности исполнения решения суда, и считает возможным установить срок для исполнения решения суда:

Администрации городского округа Эгвекинот в части исполнения обязанности по обеспечению финансирования мероприятий по производству капитального ремонта (замене) ветхих сетей системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения в течении 24-х месяцев со дня вступления решения суда в законную силу;

МУП ЖКХ «Иультинское» в части производства капитального ремонта (замены) участков коммунальных сетей, расположенных на территории городского округа Эгвекинот, в течении 36 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, а в части производства обследования сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в течении 9 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Срок, предложенный представителями ответчиков в судебном заседании, а именно 5 лет со дня вступления решения суда в законную силу, суд считает необоснованно длительным, затягивающим исполнение решения суда о возложении на ответчиков соответствующих обязанностей, то есть не отвечающим принципу разумного срока исполнения судебного постановления, предусмотренному статьей 61 ГПК РФ. 

Суд также учитывает, что в соответствии со статьей 203 ГПК РФ при возникновении обстоятельств, затрудняющих исполнение решения суда в установленный срок, ответчики вправе обратиться в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения суда.

Разрешая вопрос о распределении судебных расходов, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что прокурор обратился в суд с тремя исковыми требованиями, одно – к Администрации городского округа Эгвекинот, два – к МУП ЖКХ «Иультинское». Данные требования являются самостоятельными, и в соответствии с положением пункта 10 части 1 статьи 91 ГПК РФ подлежали оплате государственной пошлиной, которая уплачивается исходя из каждого требования в отдельности по правилам, установленным частью 1 статьи 333.19 НК РФ.

Поскольку истцом в силу статьи 45 ГПК РФ иск предъявлен в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга физических лиц, то размер государственной пошлины определяется исходя из размера государственной пошлины, которую должны были уплатить лица, в интересах которого заявлен данный иск.

В силу пункта 3 части 1 статьи 333.19 НК РФ, при подаче искового заявления неимущественного характера государственная пошлина для физических лиц уплачивается в размере 300 рублей. 

При этом, в указанном размере государственная пошлина уплачивается при подаче искового заявления, в котором содержится одно требование неимущественного характера.

Принимая во внимание, что истцом заявлено три требования неимущественного характера, то каждое из них подлежит оплате в размере, установленном частью 1 статьи 333.19 НК РФ.

В соответствии с подпунктами 9, 19 части 1 статьи 333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, освобождаются: прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции в качестве истцов или ответчиков.

Согласно частям 1, 4 статьи 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В случае, если обе стороны освобождены от уплаты судебных расходов, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, возмещаются за счет средств соответствующего бюджета.

Таким образом, государственная пошлина в части требований к Администрации городского округа Эгвекинот в размере 300 рублей подлежит возмещению за счет средств бюджета городского округа Эгвекинот, поскольку и истец и ответчик освобождены от уплаты государственной пошлины. В то же время, с МУП ЖКХ «Иультинского» в доход бюджета муниципального образования городского округа Эгвекинот подлежит взысканию государственная пошлина в размере 600 рублей (за два требования неимущественного характера), поскольку прокурор, обратившийся в суд с настоящим иском в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, освобожден от уплаты государственной пошлины на основании пункта 9 части 1 статьи 333.36 НК РФ

Руководствуясь статьями 103, 194-198, 206 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

исковое требование прокурора Иультинского района к Администрации городского округа Эгвекинот, Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское» о возложении обязанности по обеспечению мероприятий, связанных с производством капитального ремонта (замене) ветхих сетей системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, расположенных на территории городского округа Эгвекинот удовлетворить.

Возложить на Администрацию городского округа Эгвекинот, зарегистрированную в качестве юридического лица 10.12.2008, ИНН 

<

***>, расположенную по адресу: Чукотский автономный округ, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 9, обязанность по обеспечению финансирования мероприятий по производству капитального ремонта (замене) ветхих сетей системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, расположенных на территории городского округа Эгвекинот в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, а на Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское», зарегистрированное в качестве юридического лица 30.11.2012, ИНН 

<

***>, расположенное по адресу: Чукотский автономный округ, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 18, обязанность в течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня вступления в законную силу решения суда произвести капитальный ремонт (замену) следующих участков коммунальных сетей:

- в с. Рыркайпий: сеть трубопровода холодного водоснабжения от Котельной в направлении ТК6 на железобетонных опорах в металлической обвязке в двухтрубном исполнении, протяженностью 170 м.; сеть трубопровода холодного водоснабжения от Копани № 2 до котельной ООО «Тепло-Рыркайпий» наземная на опорах в кожухе из оцинкованной стали в двухтрубном исполнении, протяженностью 2300 м.; сеть водоснабжения между ТК11-ТК32-ТК33, выполненная в виде наземной прокладки в деревянных коробах, протяженностью 301 м.; сеть водоснабжения между ТК-21/2 до ТК-21/3 на железобетонных опорах в металлической обвязке, протяженностью 60 м.; сеть трубопровода канализации до врезки выпуска № 2 ул. Мира, д.18, протяженностью 60 м., и выпуска № 1 ул. Полярная, д.1, протяженностью 170 м.; сеть трубопровода холодного водоснабжения на подачу и обработку воды в накопительную емкость, протяженностью 60 м.; воздушные линии электропередач - ВЛ-6 кВ от ТП «Копань» до с. Рыркайпий, протяженностью 3000 м.; ВЛ-6 кВ «Поселок», протяженностью 2154 м.; Фидер-2 ВЛ-0,4 кВ (ТП-3 - ТП-4), протяженностью 248,0 м.; Фидер-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3, протяженностью 376,0 м.; Фидер-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, протяженностью 644,0 м.; Фидер-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 (от опоры №75 до оп №78), протяженностью 120,0 м.; Фидер-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, протяженностью 60,0 м.; Фидер-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5, протяженностью 227,0 м.; Фидер-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-6, протяженностью 273,0 м.; Фидер-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-6, протяженностью 257,0 м.; Фидер-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-7, протяженностью 145,0 м.; Фидер-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-7, протяженностью 216,0 м.; кабельные линии электропередач - КЛ-6 кВ опора № 44 ВЛ-6 кВ «Водозабор» - ТП-Копань, протяженностью 90 м.; КЛ-6 кВ МВ-4 - ТП-Копань, протяженностью 2714 м.; КЛ-6 кВ ТП-Копань-1 - ТП-Копань, протяженностью 400 м; КЛ-0,4 кВ Фидер-2 Школа (основной), протяженностью 320 м.; КЛ-0,4 кВ Фидер-2 Школа (резерв), протяженностью 320 м.;

- в п. Мыс Шмидта: кабельные линии электропередач - КЛ-6 кВ. от ТП-ЦБИ до РУ ДЭС-2000, протяженностью 180 м.; КЛ-6 кВ. от ТП-8 до ТП-ЦБИ, протяженностью 420 м.; КЛ-6 кВ. от ТП-Д до ТП-8, протяженностью 800 м.; КЛ-6 кВ. от РУ ДЭС-1 до ТП-Д, протяженностью 660 м.; КЛ-6 кВ ТП-ЦБИ - ТП-Коровник, протяженностью 250 м.; КЛ-6 кВ ТП-Коровник - ВЛ-6 кВ «ГМО», протяженностью 80 м.; КЛ-6 кВ ВЛ-6 кВ «ГМО» - ТП-ГМО, протяженностью 200 м; КЛ-0,4 кВ Фидер-1 Котельная-7, протяженностью 80 м; КЛ-0,4 кВ Фидер-2 Гаражи больницы, пограничники, протяженностью 400 м.; воздушные линии электропередач ВЛ-6 кВ «ГМО» (ТП-ГМО - ТП-Пограничники), протяженностью 2000 м.;

- в с. Ванкарем: воздушные линии электропередач 0,4 кВ - Фидер-1, протяженностью 1814,0 м.; Фидер-2, протяженностью 1588,0 м.; Фидер-3, протяженностью 1265,0 м.;

- в с. Нутепельмен: воздушные линии электропередач 0,4 кВ - Фидер-1, протяженностью 498,0 м.; Фидер-2, протяженностью 458,0 м.; Фидер-3, протяженностью 739,0 м.;

- в с. Конергино: сеть тепло-водоснабжения между ТК6 и ТК9 частично подземной прокладки и частично наземной прокладки, протяженностью 133 м.; сеть тепло-водоснабжения между ТК21 и ТК21/1 подземной прокладки, протяженностью 21 м.; сеть тепло-водоснабжения между ТК21 и ТК21/3 частично подземной прокладки и частично наземной прокладки, протяженностью 75 м.; воздушные линии электропередач 0,4 кВ - Фидер-1, протяженностью 1238,0 м; Фидер-2, протяженностью 1762,0 м.; Фидер-3, протяженностью 1187,0 м; Фидер-7 «ГСМ», протяженностью 186,0 м.; Фидер-7 «ТЗП», протяженностью 627,0 м; кабельные линии электропередач КЛ-0,4 кВ Фидер-ДЭС-Котельная-Водозабор, протяженностью 60,0 м.;

- в с. Уэлькаль: сеть тепло-водоснабжения между ТК1-ТК3-ТК4-ТК5-ТК5/2-ТК5/3 подземной прокладки, протяженностью 159 м.; сеть тепло-водоснабжения между ТК8-ТК8/2-ТК8/3-ТК8/4 подземной прокладки, протяженностью 77 м.; воздушные линии электропередач 0,4 кВ - Фидер-1, протяженностью 1215,0 м; Фидер-3, протяженностью 962,0 м.; кабельные линии электропередач - КЛ-0,4 кВ Фидер-10 Водозабор (ДЭС-ТП-1), протяженностью 60,0 м.; КЛ-6 кВ Фидер-10 Водозабор (ТП-1 – ТП-2), протяженностью 2000,0 м.; КЛ-0,4 кВ Фидер-10 Водозабор (ТП-2 - водозабор), протяженностью 600,0 м.;

- в с. Амгуэма: сеть тепло-водоснабжения между ТК5-ТК6-ТК7-ТК8-ТК9 надземной прокладки в деревянных коробах, протяженностью 187 м.; сеть тепло-водоснабжения между ТК12-ТК12/1 надземной прокладки в деревянных коробах, протяженностью 30 м.; сеть тепло-водоснабжения между ТК20-ТК20/1-ТК20/2-ТК20/3-ТК20/4-ТК20/5-ТК20/6-ТК20/7-ТК20/8 надземной прокладки в деревянных коробах, протяженностью 256 м.;

- в п. Эгвекинот: сеть тепло-водоснабжения между ТК4-МКД ФИО3 №7 подземной канальной прокладки, протяженностью 5,5 м.; сеть тепло-водоснабжения между ТК4-МКД ФИО3 №6 подземной канальной прокладки, протяженностью 29 м.; сеть тепло-водоснабжения между ТК66-ТК69 подземной канальной прокладки, протяженностью 46 м.; сеть тепло-водоснабжения между ТК70-МКД Ленина № 17 подземной канальной прокладки, протяженностью 21,3 м.; сеть тепло-водоснабжения между ТК12-ТК13-ТК4-ТК3-ТК2-ТК1 подземной канальной прокладки, протяженностью 222 м.; сеть тепло-водоснабжения между ТК2-МКД ФИО3 №11 подземной канальной прокладки, протяженностью 29,5 м.; сеть тепло-водоснабжения между ТК3-МКД ФИО3 №8 подземной канальной прокладки, протяженностью 22,5 м.; сеть тепло-водоснабжения между ТК3-МКД ФИО3 №9 подземной канальной прокладки, протяженностью 5,5 м.; сеть тепло-водоснабжения между ТК2-МКД ФИО3 № 10 подземной канальной прокладки, протяженностью 37,5 м; сеть тепло-водоснабжения между ТК51-ТК52-ТК53 подземной канальной прокладки, протяженностью 5,5 м.; сеть тепло-водоснабжения между ТК24-ТК25а-ТК26-ТК27 подземной канальной прокладки, протяженностью 5,5 м.; сеть водоотведения между ВЯ№30-ПК1-ПК2-ПК3-МКД ФИО4 №3 подземной безканальной прокладки, протяженностью 75 м.; сеть водоотведения между ПК1-1-ПК1-2-ПК1-3-МКД ФИО3 №6 подземной безканальной прокладки, протяженностью 41,5 м. 

Возложить на Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское», зарегистрированное в качестве юридического лица 30.11.2012, ИНН 

<

***>, расположенное по адресу: Чукотский автономный округ, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 18, обязанность в течение 9 (Девяти) месяцев со дня вступления в законную силу решения суда для оценки технического состояния произвести обследование сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории городского округа Эгвекинот:

- в с. Амгуэма: сети теплоснабжения (закрытая система) в двухтрубном исполнении, наземной прокладки - участок сети ТС ТК8-ТК8/3, ТК8-ТК8/5, протяженностью 135,0 м.; участок сети ТС ТК9-ТК9/3, ТК9-ТК9/7, протяженностью 155,0 м.; участок сети ТС ТК12/1-ТК12/4, протяженностью 109,0 м.; участок сети ТС ТК15-ТК18-УТСВ, протяженностью 140,0 м.; участок сети ТС ТК17-ТК17/1, протяженностью 36,0 м.; участок сети ТС ТК13-ТК13/4, протяженностью 172,0 м.; участок сети ТС ТК21-ТК 21/9, протяженностью 272,0 м.; участок сети ТС ТК21/5-ТК21/13, протяженностью 168,0 м.; участок сети ТС ТК22-ТК22/7, протяженностью 232,0 м.; участок сети ТС ТК23-ТК23/3, протяженностью 119,0 м.; участки сети ТС подвода от тепловых колодцев к потребителям 2961,1 м.; сети горячего водоснабжения (ГВС) в двухтрубном исполнении, наземной прокладки - участок сети ВС ТК8-ТК8/3, ТК8-ТК8/5, протяженностью 135,0 м.; участок сети ВС ТК9-ТК9/3, ТК9-ТК9/7, протяженностью 155,0 м.; участок сети ВС ТК12/1-ТК12/4, протяженностью 109,0 м.; участок сети ВС ТК15-ТК18, протяженностью 125,0 м.; участок сети ВС ТК17-ТК17/1, протяженностью 36,0 м.; участок сети ВС ТК13-ТК13/4, протяженностью 172,0 м.; участок сети ВС ТК21-ТК21/9, протяженностью 272,0 м.; участок сети ВС ТК21/5-ТК21/13, протяженностью 168,0 м.; участок сети ВС ТК22-ТК22/7, протяженностью 232,0 м.; участок сети ВС ТК23-ТК23/3, протяженностью 119,0 м.; участки сети ВС подвода от тепловых колодцев к потребителям 1523,0 м.; сети холодного водоснабжения (ХВС) в однотрубном исполнении, наземной прокладки - участок сети ВС ТК8-ТК8/3, ТК8-ТК8/5, протяженностью 135,0 м.; участок сети ВС ТК9-ТК9/3, ТК9-ТК9/7, протяженностью 155,0 м.; участок сети ВС ТК12/1-ТК12/4, протяженностью 109,0 м.; участок сети ВС ТК15-ТК18-УТСВ, протяженностью 140,0 м.; участок сети ВС ТК17-ТК17/1, протяженностью 36,0 м.; участок сети ВС ТК13-ТК13/4, протяженностью 172,0 м.; участок сети ВС ТК21-ТК 21/9, протяженностью 272,0 м.; участок сети ВС ТК21/5-ТК21/13, протяженностью 168,0 м.; участок сети ВС ТК22-ТК22/7, протяженностью 232,0 м.; участок сети ВС ТК23-ТК23/3, протяженностью 119,0 м.; участок сети ВС УТСВ-«Насосная водовода», протяженностью 1300,0 м.; участки сети ВС подвода от тепловых колодцев к потребителям 1173,1 м.; сети нецентрализованного водоотведения (ВЯ) в однотрубном исполнении, наземной прокладки - участок сети ВО выпуск Северная №13-Северная №1, протяженностью 128,0 м.; участок сети ВО выпуск Северная №6-Северная №14, протяженностью 132,0 м.; участок сети ВО выпуск Магистральная №11-Магистральная №19/1, протяженностью 211,0 м.; участок сети ВО выпуск Магистральная №9-Магистральная №3, протяженностью 68,0 м.; участок сети ВО пер. Западный №7 – выпуск, протяженностью 100,0 м.; участок сети ВО выпуск пер. Западный №2 - пер. Западный №16 - пер. Восточный №1 - пер. Восточный №15, протяженностью 237,0 м.; участок сети ВО выпуск пер. Восточный №8 - пер. Восточный №14, протяженностью 107,0 м.; участки сети ВО подвода от выпусков к потребителям 1000,5 м.;

- в с. Конергино: сети теплоснабжения (открытая система) в двухтрубном исполнении, наземной прокладки - участок сети ТС ТК19-ТК19/2, протяженностью 115,0 м.; участок сети ТС ТК19-ТК20, протяженностью 17,0 м.; участок сети ТС ТК20-ТК21/3, протяженностью 119,0 м.; сети холодного водоснабжения (ХВС) в однотрубном исполнении, наземной прокладки - участок сети ВС ТК19-ТК19/2, протяженностью 115,0 м.; участок сети ВС ТК19-ТК20, протяженностью 17,0 м.; участок сети ВС ТК20-ТК21/3, протяженностью 119,0 м.; участок сети ВС УТ1-ТК5, протяженностью 86,5 м.; участок сети ВС ТК6-ТК7, протяженностью 28,0 м.; участок сети ВС ТК9/1-ТК9/2, протяженностью 36,0 м.; участок сети ВС ТК11-ТК11/3, протяженностью 70,0 м.; участок сети ВС ТК11-ТК11/6, протяженностью 61,0 м.; участок сети ВС ТК5-ТК12-ТК12/2, протяженностью 75,0 м.; участок сети ВС ТК12-ТК21/3, протяженностью 350,0 м.; участок сети ВС ТК14-ТК14/3, протяженностью 80,0 м.; участок сети ВС ТК19-ТК19/4, протяженностью 195,0 м.; участки сети ВС УТ1-«Насосная водовода», протяженностью 910,0 м.; участки сети ВС подвода от ТК к потребителям 338,5 м.; сети нецентрализованного водоотведения (ВЯ) в однотрубном исполнении, наземной прокладки - участок сети ВО Октябрьская №1А (МКД) – яма, протяженностью 15,0 м.; участок сети ВО Октябрьская №4 (МКД) – яма, протяженностью 75,5 м.; участок сети ВО Октябрьская №7 (МКД) – яма, протяженностью 22,0 м.; участок сети ВО Ленина №5А (МКД) – яма, протяженностью 19,0 м.; участок сети ВО Ленина №12 (МКД) – яма, протяженностью 21,5 м.; участок сети ВО Ленина №14 (МКД) – яма, протяженностью 58,0 м.; участок сети ВО ФИО5 №23 (Гараж МУП ЖКХ «Иультинское») – яма, протяженностью 4,0 м.; участок сети ВО ФИО5 №23/1 (ДЭС МУП ЖКХ «Иультинское») – яма, протяженностью 3,0 м.;

- в с. Уэлькаль: сети холодного водоснабжения (ХВС) в однотрубном исполнении, подземной безканальной прокладки - участок сети ВС ТК1-ТК4, протяженностью 467,8 м.; участок сети ВС ТК6-ТК10/1, протяженностью 187,9 м.; участок сети ВС ТК5-ТК5/2, протяженностью 48,0 м.; участки сети ВС подвода от ТК к потребителям 290,5 м.; сети нецентрализованного водоотведения (ВЯ) в однотрубном исполнении, наземной прокладки - участок сети ВО МКД Тундровая №1 – яма, протяженностью 2,9 м.; участок сети ВО МКД Тундровая №2 – яма, протяженностью 9,6 м.; участок сети ВО МКД Тундровая №3 – яма, протяженностью 3,0м.; участок сети ВО МКД ФИО6 №2 – яма, протяженностью 6,0 м.; участок сети ВО МКД ФИО6 №3 – яма, протяженностью 6,0 м.; участок сети ВО МКД ФИО6 №19 (ЖД) – яма, протяженностью 4,0 м.; участок сети ВО МКД Набережная №3 (ЖД) – яма, протяженностью 2,0 м.; участок сети ВО МКД Центральная №7 (ЖД) – яма, протяженностью 4,6 м.; участок сети ВО МКД Центральная №8 (МКД) – яма, протяженностью 24,7 м.; участок сети ВО МКД Центральная №10 (МКД) – яма, протяженностью 18,9 м.; участок сети ВО Центральная №1 - Котельная МУП ЖКХ «Иультинское» - яма, протяженностью 2,5 м.; участок сети ВО Центральная №3 («Баня») – яма, протяженностью 6,5 м.;

- в п. Мыс Шмидта: сети централизованного водоотведения в однотрубном исполнении, наземной прокладки - участок сети КС выпуск №2, протяженностью 420,0 м.; участки сети КС подвода от выпуска №2 к потребителям 185,0 м.;

- в с. Рыркайпий: сети холодного водоснабжения (ХВС) в однотрубном исполнении, наземной прокладки - емкость «1000» (насосная) ТК; участки сети ВС ТК3-ТК3/1, протяженностью 12,0 м.; участки сети ВС ТК5-ТК5/1, протяженностью 22,0 м.; участки сети ВС ТК7/1-ТК7/2, протяженностью 12,0 м.; участки сети ВС ТК8-ТК8/1, протяженностью 6,0 м.; участки сети ВС ТК9-ТК9/1, протяженностью 6,0 м.; участки сети ВС ТК16-ТК16/1, протяженностью 26,0 м.; участки сети ВС ТК31-ТК32, протяженностью 246,8 м.; участки сети ВС ТК32-ТК32/1, протяженностью 48,0 м.; участки сети ВС ТК32-ТК33, протяженностью 55,0 м.; участки сети ВС ТК33-ТК34, протяженностью 31,8 м.; участки сети ВС ТК34-ТК34/1, протяженностью 31,5 м.; участки сети ВС ТК34-ТК35, протяженностью 15,0 м.; участки сети ВС ТК1-ДЭС-3, протяженностью 12,0 м.; участки сети ВС подвода от ТК к потребителям 40,5 м.; сети централизованного водоотведения в однотрубном исполнении, наземной прокладки - участки сети КС подвода от выпуска №2 к потребителям 548,2 м.; участки сети КС подвода от выпуска №4 к потребителям 688,0 м.; участок сети КС выпуск №1, протяженностью 243,0 м.; участок сети КС выпуск №3, протяженностью 146,0 м.;

- в п. Эгвекинот: сети теплоснабжения (открытая система) в двухтрубном исполнении, наземной прокладки (Н) и подземной прокладке в непроходных каналах (ПК) - участок сети ТС ТК2-ТК79, протяженностью 63,0 м.; участок сети ТС ТК79-ТК79/1, протяженностью 63,0 м.; участок сети ТС ТК3-ТК3/6, протяженностью 146,0 м.; участок сети ТС ТК12-ТК88, протяженностью 48,0 м.; участок сети ТС ТК1-ТК93-ТК94-ТК30, протяженностью 581,0 м.; участок сети ТС ТК30-ТК29, протяженностью 98,0 м.; участок сети ТС ТК28А-УТ ЖКХ (ул. Комсомольская 28), протяженностью 60,0 м.; участок сети ТС ТК81-ТК82, протяженностью 35,0 м.; участок сети ТС ТК25-ТК39-ТК99, протяженностью 116,0 м.; участок сети ТС ТК53-ТК54, протяженностью 80,0 м.; участок сети ТС ТК95-ТК47-ТК56-ТК57, протяженностью 72,0 м.; участок сети ТС ТК69-ТК87, протяженностью 60,0 м.; участок сети ТС ТК65-ТК67-ТК68, протяженностью 122,0 м.; участок сети ТС ТК68-ТК89-ТК89/1, протяженностью 113,0 м.; участок сети ТС ТК67-ТК71, протяженностью 9,0 м.; участки сети ТС подвода от тепловых колодцев к потребителям 40,0 м.; участки сети ТС подвода от тепловых колодцев к потребителям 281,0 м.; участки сети ТС подвода от тепловых колодцев к потребителям 132,5 м. В п. Эгвекинот-1: участки сети ТС ТК1/1-ТК1-ТК2-ТК3-ТК4-ТК13-ТК12, протяженностью 299,0 м.; участок сети ТС ТК12-ТК9, протяженностью 12,0 м.; участки сети ТС ТК13-ТК14-ТК15-ТК16-ТК19-ТК20, протяженностью 218,0 м.; участки сети ТС ТК16-ТК17-ТК26-ТК26/1, протяженностью 164,0 м.; 

сети водоснабжения в однотрубном исполнении, наземной прокладки (Н) и подземной прокладки в непроходных каналах (ПК) - участки сети ВС ТК2-ТК79-ТК79/1, протяженностью 167,5 м.; участки сети ВС ТК3/1-ТК3/6, протяженностью 167,5 м.; участки сети ВС ТК30-ТК29, протяженность 98,0 м.; участки сети ВС ТК28А-УТ ЖКХ (ул. Комсомольская 28), протяженностью 60,0 м.; участки сети ВС ТК81-ТК82-ТК90, протяженностью 101,0 м.; участки сети ВС ТК25-ТК39-ТК99, протяженностью 121,0 м.; участки сети ВС ТК53-ТК54, протяженностью 80,0 м.; участки сети ВС ТК95-ТК47, протяженностью 20,0 м.; участок сети ВС ТК47-ТК56, протяженностью 31,0 м.; участок сети ВС ТК56-ТК57, протяженностью 33,0 м.; участки сети ВС ТК65-ТК67-ТК71, протяженностью 70,0 м.; участки сети ВС ТК65-ТК68-ТК89- Эгвекинот (Лаборатория), протяженностью 215,0 м.; участок сети ВС Водовод «7км»- Эгвекинот (Лаборатория), протяженностью 6650,0 м.; участки сети ТС подвода от тепловых колодцев к потребителям 40,0 м.; участки сети ТС подвода от тепловых колодцев к потребителям 322,0 м.; участки сети ТС подвода от тепловых колодцев к потребителям 133,0 м.; участки сети ТС подвода от тепловых колодцев к потребителям 245,0 м. В п. Эгвекинот-1: участки сети ТС ТК1/1-ТК1-ТК2-ТК3-ТК4-ТК13-ТК12, протяженностью 299,0 м.; участок сети ТС ТК12-ТК9, протяженностью 12,0 м.; участки сети ТС ТК13-ТК14-ТК15-ТК16-ТК19-ТК20, протяженностью 218,0 м.; участки сети ТС ТК16-ТК17-ТК26-ТК26/1, протяженностью 164,0 м.; участок сети ВС Водовод «7км»-ТК12, протяженностью 5650,0 м.;

сети нецентрализованного водоотведения (ВЯ) в однотрубном исполнении, подземной безканальной (ПБ) прокладки - участок сети ВО выпуск ямы № 66, протяженностью 160,0 м.; участок сети ВО выпуск ямы № 67, протяженностью 184,0 м.; участок сети ВО выпуск ямы №68, протяженностью 82,0 м.; участок сети ВО выпуск ямы № 59, протяженностью 16,4 м.; участок сети ВО выпуск ямы № 60, протяженностью 193,7 м.; участок сети ВО выпуск ямы №66, протяженностью151,2 м.; участок сети ВО ул. Рынтыргина №6 - яма №55, протяженностью 43,6 м.; участок сети ВО выпуск ямы №56, протяженностью 45,3 м.; участок сети ВО выпуск ямы № 57, протяженностью 40,4 м.; участок сети ВО выпуск ямы №49, протяженностью 34,4 м.; участок сети ВО выпуск ямы № 48, протяженностью 22,4 м.; участок сети ВО выпуск ямы №32, протяженностью 47,6 м.; участок сети ВО выпуск ямы №38, протяженностью 35,6 м.; участок сети ВО выпуск ямы №40, протяженностью 25,9 м.; участок сети ВО ул. Ленина № 17 - яма № 31, протяженностью 11,0 м.; участок сети ВО выпуск ямы №30, протяженностью 66,0 м.; участок сети ВО выпуск ямы № 29, протяженностью 72,5 м.; участок сети ВО ул. ФИО4 № 7 - яма № 26, протяженностью 11,8 м.; участок сети ВО ул. ФИО4 № 5А - яма № 28, протяженностью 7,8 м.; участок сети ВО ул. ФИО4 № 9 - яма № 23, протяженностью 47,3 м.; участок сети ВО выпуск ямы № 13, протяженностью 39,9 м.; участок сети ВО выпуск ямы №10, протяженностью 26,1 м.; участок сети ВО ул. Попова №1 - яма №12, протяженностью 14,0 м.; участок сети ВО выпуск ямы №6, протяженностью 63,0 м.; участок сети ВО выпуск ямы №7, протяженностью 36,5 м.; участок сети ВО выпуск ямы №8, протяженностью 43,8 м.; участок сети ВО выпуск ямы №17, протяженностью 96,0 м.; участок сети ВО выпуск ямы №19, протяженностью 45,4 м.; участок сети ВО выпуск ямы №20, протяженностью 132,7 м.; участок сети ВО выпуск ямы №21, протяженностью 95,0 м.; участок сети ВО выпуск ямы №22, протяженностью 33,0 м; участки сети ВО подвода от выпуска на ямы к потребителям 382,3 м. В п.Эгвекинот-1: участок сети ВО выпуск ямы №1, протяженностью 167,2 м; участок сети ВО выпуск ямы № 2, протяженностью 172,1 м.; участки сети ВО подвода от выпуска на ямы к потребителям 51,0 м.

Взыскать с Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское», зарегистрированного в качестве юридического лица 30.11.2012, ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 18, государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования городского округа Эгвекинот в размере 600 (Шестьсот) рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в суд Чукотского автономного округа через Иультинский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 01 февраля 2019 года. 

Судья И.А. Пеннер