Дело № 2-780/2025

УИД 45RS0026-01-2024-013679-46

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Курган 10 февраля 2025 г.

Курганский городской суд Курганской области в составе

председательствующего судьи Черных С.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шевелевой Е.А., 

с участием представителя процессуального истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора города Кургана в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному казенному учреждению «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» о возложении обязанности,

установил:

прокурор города Кургана обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному казенному учреждению (далее – МКУ) «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» о возложении обязанности. 

В обоснование исковых требований указал, что прокуратурой города проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасности гидротехнических сооружений, в ходе которой установлено следующее. На территории города Кургана имеются гидротехнические сооружения (далее - ГТС), находящиеся в оперативном управлении у МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана»: ГТС защиты восточной части г. Кургана и ГТС инженерной защиты г. Кургана от паводка реки Тобол. В комплекс ГТС защиты восточной части г. Кургана входят: водооградительная дамба с водовыпусками в пос. ТЭЦ; водооградительная дамба с водовыпусками бульвар «Солнечный» на участке «Сады Зауралья» - пер. Красномаячный; водооградительная дамба с водовыпусками в микрорайоне № 8 на участке ул. Луговая - ул. Тобольная; водооградительная дамба с водовыпусками на участке мемориал ФИО3 - ул. Ленина; водооградительная дамба с водовыпусками на участке ул. Ленина - ул. Б. Петрова; водооградительная дамба с водовыпуском на участке ул. Б. Петрова - ж/д мост через р. Тобол. Установлено, что в нарушение требований п. 15.16 Приказа № 17-139 откосы дамб не очищены от растительности и мелкого кустарника, гребень дамб имеет колейные выбоины, разрушены и деформированы решетчатые плиты крепления откосов (б. Солнечный), разрушены откосы дамб (участок ТЭЦ - б. Солнечный), имеются постройки на откосах дамб (участок ул. Б. Петрова - ул. Крупской). В комплекс ГТС инженерной защиты г. Кургана от паводка реки Тобол входит водооградительная дамба в г. Кургане на левом берегу р. Тобол. В ходе проверки выявлены нарушения п. 15.16. Приказа № 17-139: водоспуск № 1 - подводящий канал укреплен ж/б плитами, швы раскрыты, растительность в швах. Входной оголовок омоноличен в бетон, устроены металлические направляющие для установки деревянных шандор. В период весеннего половодья засыпается грунтом. В районе входящего оголовка наблюдается размыв. Водоспуск № 2 - в колодце мусор, штурвал сверху сломан. Водоспуски № 3 и 4 - входные оголовки замусорены. На основании ст. 9.1. Закона № 117-ФЗ работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, капитальным ремонтом, эксплуатацией, реконструкцией, консервацией и ликвидацией, а также техническим обслуживанием, эксплуатационным контролем и текущим ремонтом гидротехнических сооружений, в целях подтверждения знания обязательных требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений обязаны не реже одного раза в пять лет проходить аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений. Первичная аттестация работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений проводится не позднее одного месяца при назначении на соответствующую должность. Вместе с тем, в МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» нет ни одного аттестованного сотрудника. Гидротехнические сооружения - это объекты повышенной опасности, на которых недопустимо возникновение ситуаций способных негативно отразиться как на состояние окружающей среды, так и здоровье граждан.

Просит суд возложить обязанность на МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» ГТС защиты восточной части г. Кургана откосы дамб очистить от растительности и мелкого кустарника, отремонтировать решетчатые плиты крепления откосов (б. Солнечный), восстановить откосы дамб (участок ТЭЦ - б. Солнечный), демонтировать постройки на откосах дамб (участок ул. Б. Петрова - ул. Крупской), водоспуск № 1 очистить растительность в швах, водоспуск № 2 - очистить в колодце мусор, штурвал сверху отремонтировать, водоспуски № 3 и 4 очистить от мусора. Возложить обязанность на МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» работникам и руководителю организации, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, капитальным ремонтом, эксплуатацией, реконструкцией, консервацией и ликвидацией, а также техническим обслуживанием, эксплуатационным контролем и текущим ремонтом гидротехнических сооружений провести первичную аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений.

В судебном заседании представитель процессуального истца ФИО1 на исковых требованиях настаивала.

Представитель ответчика ФИО2 с иском не согласилась.

Третьи лица Администрация города Кургана, Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области, межрегиональный отдел по надзору за гидротехническими сооружениями Уральского Управления «Ростехнадзора», ИП ФИО4 в судебное заседание не явились, извещались надлежащим образом.

Суд, руководствуясь ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, извещенных надлежащим образом. 

Заслушав пояснения участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, как это определено в ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - это комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Согласно частям 2 и 6 ст. 3, ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (далее - Федеральный закон о безопасности гидротехнических сооружений) гидротехнические сооружения - это плотины, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, ответственность за безопасность которых несет их собственник и (или) эксплуатирующая организация.

Федеральным законом о безопасности гидротехнических сооружений определено, что безопасность гидротехнических сооружений - это свойство гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и хозяйственных объектов (абзац шестой ст. 3).

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131) к вопросам местного значения муниципального городского округа относится, в том числе участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Согласно ст. 7 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68) мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, определяются исходя из принципа необходимой достаточности средств.

В соответствии с пп. «а», «в» ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68 органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях.

Федеральный закон от 2 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (далее – Федеральный закон от 2 июля 1997 г. № 117-ФЗ) регламентирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, устанавливает обязанности органов государственной власти, собственников гидротехнических сооружений и эксплуатирующих организаций по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 2 июля 1997 г. № 117-ФЗ собственник гидротехнического сооружения и эксплуатирующая организация обязаны обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт.

Пунктом 15.16. Приказа Министерства строительства Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 17-139 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов» (далее - Приказ № 17-139) установлены требования по содержанию территории гидротехнических сооружений: осмотр и ремонт выявленных дефектов, постоянное поддерживание санитарно-гигиенического состояния основных и сопряженных сооружений, исправление мелких повреждений откосов защитных дамб, скашивание травы и вырубка кустарника на откосах, замена поврежденных крышек колодцев и т.д.

Актом послепаводкового обследования гидротехнического сооружения - Зашита восточной части города Кургана от паводка на реке Тобол, водооградительная дамба от 5 июня 2024 г. установлено, что водооградительная дамба в г. Курган с ПК0 до ПК38+27 (I этап) расположена на левом берегу р. Тобол. Дамба грунтовая насыпная из суглинка, глины, песка. Начало дамбы у железнодорожного моста, окончание дамбы на пересечении с ул. Гагарина у дома № 146. Общая фактическая протяженность дамбы составляет 3 827 м. Фактическая ширина гребня дамбы составляет 4,5-6,0 м. Высота дамбы по длине неравномерна: от 4 до 6 м. Фактические высотные отметки гребня дамбы составляют от 73,37 мБС до 74,58 мБС. Заложение наружного откоса 1:2,0 - 1:2,5, внутреннего откоса 1:2,0-1:2,5. Откосы задернованы, на откосах произрастает кустарниковая растительность. Водоспуски. В теле дамбы устроены водоспуски, фактические количество - 7 шт. Водоспуск № 1 расположен в 365 м от начала дамбы. Металлическая труба диаметром 0,8 м. Подводящий канал укреплен ж/б плитами, швы раскрыты, растительность в швах. Входной оголовок омоноличен в бетон, устроены металлические направляющие для установки деревянных шандор. В период весеннего половодья засыпается грунтом. В районе входящего оголовка наблюдается размыв бермы. Водоспуск № 2 расположен в 1315 м от начала дамбы. Металлическая труба, входной оголовок диаметром 0,5 м, выходной оголовок 0,3 м. В колодце мусор, штурвал сверку сломан. Водоспуск № 3 расположен в 2235 м от начала дамбы. Металлическая труба диаметром 0,3 м. Перекрывается задвижкой, штурвал боковой. Входной оголовок замусорен. Водоспуск № 4 расположен в 2605 м от начала дамбы. Металлическая труба диаметром 0,3 м. Выходной оголовок засыпан мусором. Водоспуск № 5 расположен в 2840 м от начала дамбы. Металлическая труба диаметром 0,3 м, перекрывается задвижкой со штурвалом сверху. Водоспуск № 6 расположен в 3510 м от начала дамбы. Колодец из ж/б колец, вокруг колец промоины. Труба металлическая диаметром 0,5 м, перекрывается фланцевой задвижкой со штурвалом. Отводящий канал земляной. Водоспуск № 7 расположен в 3820 м от начала дамбы. Колодец из ж/б колец. Поверх кольца уложен металлический лист, приваренный к петлям в бетонных кольцах. С наружного откоса выхода трубы не обнаружено. 

В ходе обследования установлено следующее: Техническое состояние оценивается как работоспособное. Уровень безопасности нормальный. Водооградительная дамба находятся в оперативном управлении МКУ дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана», свидетельство о регистрации права собственности от 8 мая 2020 г. № 45:25:000000:28121-45/051/2020-2. МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства г. Кургана» рекомендуется: обеспечить соблюдение и обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт; систематически анализировать причины снижения безопасности ГТС и своевременно осуществлять разработку и реализацию мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасность, а также по предотвращению аварий ГТС; вести контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнических сооружений. После прохождения паводка разрушений гидротехнических сооружений не зафиксировано.

Актом послепаводкового обследования гидротехнического сооружения - инженерная защита города от паводка на реке Тобол в городе Кургане от 7 июня 2024 г. установлено, что инженерная защита г. Кургана от паводков р. Тобол (участок 

<

...>) расположена на левом берегу реки Тобол на участке от пос. ТЭЦ до ул. Крупской в Восточном поселке. Назначение объекта - защита территории г. Кургана на площади 11,264 км2 от затопления весенним паводком р. Тобол 1% обеспеченности. В комплекс сооружений инженерной защиты г. Кургана входят: водооградительные дамбы с водовыпусками: в пос. ТЭЦ, бульвар «Солнечный» на участке «Сады Зауралья» - пер. Красномаячный, в микрорайоне № 8 на участке ул. Луговая - ул. Тобольная, на участке мемориал ФИО3 - ул. Ленина, на участке ул. Ленина - ул. Б. Петрова, на участке ул. Б. Петрова - ж/д мост через р. Тобол. Водооградительные дамбы расположены на левобережной части р. Тобол. Водооградительные дамбы расположены в левобережной части р. Тобол. Гидрологический режим р. Тобол характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью, иногда прерываемой дождевыми паводками, и продолжительной зимней меженью с устойчивым ледоставом. Общий подъем уровней воды в период весеннего половодья составляет в среднем около 5 м, а в многоводные годы до 10 м. в такие годы до строительства инженерной защиты затапливалась обширная территория г. Кургана, в том числе жилая. 

Техническое состояние оценивается как работоспособное. Уровень безопасности неудовлетворительный. Муниципальное образование город Курган оформило право собственности на Комплекс инженерной защиты от паводков р. Тобол в городе Кургане, свидетельство о регистрации права собственности от 7 апреля 2016 г. № 45-45/001-45/201/106/2016-193/1. МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства г. Кургана» рекомендуется: обеспечить соблюдение и обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт; систематически анализировать причины снижения безопасности ГТС и своевременно осуществлять разработку и реализацию мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасность, а также по предотвращению аварий ГТС; вести контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнических сооружений; очистить откосы дамб от растительности и мелкого кустарника. После прохождения паводка разрушений гидротехнических сооружений незафиксировано.

29 июля 2024 г. МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» заключен муниципальный контракт № 246 с ИП ФИО4 на выполнение работ по техническому обслуживанию гидротехнического сооружения, водооградительная дамба р. Тобол (водооградительная дамба с ПКО до ПК38-27 (I этап), сооружение-берегоукрепление нижнего бьефа Курганского гидроузла, участок поселок ТЭЦ-улица Крупской) в г. Кургане. 

31 января 2025 г. МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» заключен муниципальный контракт № 22 с ООО Торгово-Строительная Компания «АНДРИГОР» на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию гидротехнического сооружения, водооградительная дамба р. Тобол (водооградительная дамба с ПКО до ПК38-27 (I этап), сооружение-берегоукрепление нижнего бьефа Курганского гидроузла, участок поселок ТЭЦ-улица Крупской) в г. Кургане. В приложении к контракту перечислены виды работ.

Согласно п. 3.1 указанного контракта сроки выполнения работ по контракту определены с даты подписания контракта по 25 декабря 2025 г.

В подтверждение выполнения работ, указанных прокурором в иске, представителем ответчика в материалы дела представлены журнал работ № 1 МК № 246 от 29 июля 2024 г. за период по 18 декабря 2024 г., сметы, справки о стоимости выполненных работ и затрат, подтверждающие выполнение подрядчиком ИП ФИО4 комплекса работ по техническому обслуживанию гидротехнического сооружения, водооградительная дамба р. Тобол (водооградительная дамба с ПКО до ПК38-27 (I этап), сооружение-берегоукрепление нижнего бьефа Курганского гидроузла, участок поселок ТЭЦ-улица Крупской) в г. Кургане, в том числе: ремонтное профилирование гребня дамбы, покос травы на откосах дамбы, погрузочно-разгрузочные работы (кустарники, деревья) и транспортировка, визуальные наблюдения обходчиков, удаление поросли (кустарник и мелколесье), валка и корчевка деревьев, ревизия шандора, очистка открытых водостоков, оголовков экскаватором от грязи, мусора, перемещение грунта для засыпки, расчистки пазух шандора.

Суд, принимая во внимание представленные в материалы дела доказательства, приходит к выводу о том, что работы по очистке от растительности и мелкого кустарника, восстановление откосов дамбы, очистка от растительности в швах, очистка колодцев от мусора подрядчиком ответчика выполнены в соответствии с муниципальным контрактом. При этом, на 2025 г. ответчиком также заключен муниципальный контракт на выполнение работ, таких как: визуальные наблюдения, ревизия запорной арматуры, ее ремонт, устройство дублирования запорной арматуры (задвижек) – устройством в виде заглушек на водовыпусках диаметром 300 мм, диаметром 500 мм, диаметром 600 мм, ремонтное профилирование гребня дамбы, удаление поросли (кустарник и мелколесье), покос травы на откосах дамбы, валка и корчевка деревьев с восстановлением теля дамбы после корчевки пней, транспортировка мусора и посторонних предметов на полигон ТБО, ремонт смотровых колодцев и т.д.

Оснований для возложения обязанности по ремонту решетчатых плит крепления откосов (б. Солнечный) суд не усматривает, поскольку истцом не представлено доказательств необходимости ремонта или замены указанной плиты, расположенной на участке б. Солнечный. Суд также учитывает, что согласно акту послепаводкового обследования гидротехнических сооружений от 7 июня 2024 г. разрушений гидротехнических сооружений не зафиксировано.

Суд также не усматривает оснований для возложения обязанности на ответчика по демонтажу построек на откосах дамб (участок ул. Б. Петрова – ул. Крупской), поскольку истцом не представлено доказательств наличия каких-либо построек на указанном участке дамбы. Из пояснений представителя ответчика и представленной истцом фототаблицы усматривается, что на указанном участке дамбы в момент производства осмотра имелся строительный мусор (строительные конструкции), прибившиеся в паводок на указанный участок.

Согласно ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем присуждения к исполнению обязанности в натуре, а также восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Учитывая выполненный объем и вид работ, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в части возложения обязанности на Муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» отремонтировать штурвал сверху ГТС инженерной защиты г. Кургана от паводка реки Тобол на Водоспуске № 2.

На основании ст. 9.1. Федерального закона от 2 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, капитальным ремонтом, эксплуатацией, реконструкцией, консервацией и ликвидацией, а также техническим обслуживанием, эксплуатационным контролем и текущим ремонтом гидротехнических сооружений, в целях подтверждения знания обязательных требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений обязаны не реже одного раза в пять лет проходить аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений. Первичная аттестация работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений проводится не позднее одного месяца при назначении на соответствующую должность.

Аттестация работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений проводится аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти, или аттестационными комиссиями, формируемыми организациями, осуществляющими деятельность по проектированию, строительству, капитальному ремонту, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации, а также по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю и текущему ремонту гидротехнических сооружений.

Категории работников, проходящих аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений в аттестационных комиссиях, формируемых федеральными органами исполнительной власти, определяются Правительством Российской Федерации.

Если в указанной организации аттестационная комиссия не сформирована, аттестация работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений проводится аттестационной комиссией, формируемой соответствующим федеральным органом исполнительной власти.

Порядок проведения аттестации по вопросам безопасности гидротехнических сооружений устанавливается Правительством Российской Федерации.

Работники, не прошедшие аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, не допускаются к работе на гидротехнических сооружениях.

Работники, не прошедшие аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, вправе обжаловать решения соответствующей аттестационной комиссии в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1 августа 2024 г. директор Департамента развития городского хозяйства Администрации города Кургана обращался в Департамент финансов и имущества Администрации города Кургана по вопросу выделения дополнительных бюджетных ассигнований на 2024 г. МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» из резерва нераспределенных средств Администрации города Кургана в сумме 1 300 р. (госпошлина за аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений за ФИО5).

В силу ст. 56 Гражданского кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Поскольку ответчиком не представлено доказательств проведения первичной аттестации по вопросам безопасности гидротехнических сооружений работникам и руководителю организаций, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, капитальным ремонтом, эксплуатацией, реконструкцией, консервацией и ликвидацией, а также техническим обслуживанием, эксплуатационным контролем и текущим ремонтом гидротехнических сооружений, указанные требования суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования удовлетворить частично.

Возложить обязанность на Муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» (ИНН 

<

***>) отремонтировать штурвал сверху ГТС инженерной защиты г. Кургана от паводка реки Тобол Водоспуск № 2.

Возложить обязанность на Муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» (ИНН 

<

***>) работникам и руководителю организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, капитальным ремонтом, эксплуатацией, реконструкцией, консервацией и ликвидацией, а также техническим обслуживанием, эксплуатационным контролем и текущим ремонтом гидротехнических сооружений провести первичную аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курганский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Курганский городской суд Курганской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение суда фактически изготовлено 21 апреля 2025 г.

Судья С.В. Черных