Дело №2-5654/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Мягкова Е.А.,

при секретаре Григоренко К.А.,

с участием представителя истца ФИО2 – ФИО1, действующего на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании 19 ноября 2018 года в городе Волгограде гражданское дело по иску ФИО2 к Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная корпорация» о взыскании неустойки по договору долевого строительства, компенсации морального вреда, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в суд с иском о взыскании с ООО «Объединенная строительная корпорация» неустойки за нарушение срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства, компенсации морального вреда и штрафа в размере 50 % от суммы присужденной судом за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Свои требования мотивирует тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ЗАО «Юниж-Строй» заключен договор №...б участия в долевом строительстве, по условиям которого застройщик принял на себя обязательства в предусмотренный договором срок своими силами (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный многоэтажный жилой дом, имеющий строительный адрес: г. Волгоград, мкр.122-123, ... с кадастровыми номерами №..., №..., и после получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию передать дольщику в собственность однокомнатную ..., расположенную на 13 этаже, площадью по проекту 67,90 кв.м., а дольщик обязуется оплатить обусловленную договором цену и в сроки, установленные настоящим договором, принять квартиру по акту приема-передачи. Срок передачи Застройщиком квартиры Дольщику составляет ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ истцом и ООО «Объединенная строительная корпорация «Юниж-Строй» в лице генерального директора ФИО3, заключено дополнительное соглашение №... к договору №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному соглашению стороны пришли к соглашению внести изменения в преамбулу договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ и заменить слова «ЗАО «ЮНИЖ-СТРОЙ», в лице генерального директора ФИО4, на слова «общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная корпорация «Юниж-Строй», в лице генерального директора ФИО3.

ДД.ММ.ГГГГ истцом и ООО «Объединенная строительная корпорация» в лице генерального директора ФИО3, заключено дополнительное соглашение №... к договору №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному соглашению стороны пришли к соглашению в связи со сменой фирменного наименования застройщика, внести изменения в преамбулу договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ и заменить слова (Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная корпорация «Юниж-Строй» в лице генерального директора ФИО3 на слова (Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная корпорация» в лице генерального директора ФИО3.

Обязательства по договору Дольщиком исполнены в полном объеме, Застройщику были перечислены денежные средства в размере 1 580 640 рублей на строительство жилого дома. В нарушение норм действующего законодательства и условий договора участия в долевом строительстве, обязательства, принятые на себя застройщиком – ООО «Объединенная строительная корпорация» выполнены не были, дом до настоящего момента в эксплуатацию не сдан, квартира не была передана Дольщику в собственность до ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с нарушением сроков исполнения обязательств истец просил суд взыскать с ответчика неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 895 379,87 рублей. Кроме того, просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. 

Истец ФИО2 в судебное заседание не явился, о слушании дела извещен надлежащим образом, доверил представлять свои интересы представителю.

В судебном заседании представитель истца ФИО2 по доверенности ФИО1 исковые требования поддержал и настаивал на их удовлетворении, пояснил, что оснований для снижения неустойки не имеется, поскольку ответчик об этот не заявил.

Представитель ответчика ООО «Объединенная строительная корпорация»в судебное заседание не явился, о слушании дела извещен надлежащим образом, о причине неявки суд не уведомил, об отложении судебного разбирательства не просил.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, проверив и исследовав письменные доказательства, представленные в материалах дела, находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости урегулированы Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

На основании ч.1 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.

К отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом.

В судебном заседании установлено и следует из материалов дела, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ЗАО «Юниж-Строй» заключен договор №...б участия в долевом строительстве.

ДД.ММ.ГГГГ истцом и ООО «Объединенная строительная корпорация «Юниж-Строй» в лице генерального директора ФИО3, заключено дополнительное соглашение №... к договору №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному соглашению стороны пришли к соглашению внести изменения в преамбулу договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ и заменить слова «ЗАО «ЮНИЖ-СТРОЙ», в лице генерального директора ФИО4, на слова «общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная корпорация «Юниж-Строй», в лице генерального директора ФИО3.

ДД.ММ.ГГГГ истцом и ООО «Объединенная строительная корпорация» в лице генерального директора ФИО3, заключено дополнительное соглашение №... к договору №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному соглашению стороны пришли к соглашению в связи со сменой фирменного наименования застройщика, внести изменения в преамбулу договора №... участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ и заменить слова (Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная корпорация «Юниж-Строй» в лице генерального директора ФИО3 на слова (Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная корпорация» в лице генерального директора ФИО3.

По условиям договора участия в долевом строительстве, застройщик принял на себя обязательства в предусмотренный договором срок своими силами (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный многоэтажный жилой дом имеющий строительный адрес: г. Волгоград, мкр.122-123, ... с кадастровыми номерами №..., №..., и после получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию передать дольщику в собственность однокомнатную ..., расположенную на 13 этаже, площадью по проекту 67,90 кв.м., а дольщик обязуется оплатить обусловленную договором цену и в сроки, установленные настоящим договором, принять квартиру по акту приема-передачи.

Согласно п.3.1.3 договора срок передачи застройщиком квартиры дольщику составляет ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, обязанность по передаче квартиры участникам долевого строительства должна быть исполнена до ДД.ММ.ГГГГ.

Размер денежных средств подлежащих уплате дольщиком по настоящему договору (п.2.3) для строительства жилого дома составляет – 1 580 640 рублей.

Финансовые обязанности по договору дольщиком выполнены в полном объеме, уплачено по договору 1 580 640 рублей, что не оспаривалось в судебном заседании. 

Судом также установлено, что в обусловленный договором №...б от ДД.ММ.ГГГГ срок, передача объекта долевого строительства застройщиком истцу не произведена, тем самым нарушив оговоренный договором срок. 

При этом, о заключении какого-либо дополнительного соглашения к рассматриваемому договору участия в долевом строительстве в части изменения срока передачи квартиры сторонами в ходе рассмотрения не заявлялось, такие изменения в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не регистрировались.

Согласно статье 12 Закона обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. Обязательства участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

В связи с не передачей квартиры, в срок, установленный договором участия в долевом строительстве жилья, истцом направлена ответчику претензия, в которой содержалось требование о взыскании неустойки. 

Требования истца, основанные на ч.2 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» об уплате неустойки, ответчиком удовлетворены не были.

При таких обстоятельствах, суд полагает установленным факт нарушения застройщиком обязательств по договору, влекущих в соответствии с ч.2 ст.6 Федерального закона №214-ФЗ взыскания с ООО «Объединенная строительная корпорация» законной неустойки в пользу ФИО2

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Согласно представленному истцом расчету с ответчика подлежит взысканию в пользу истца неустойка за нарушение срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 895 379,87 рублей, из расчета: 1 580 640 х 7,25% (ставка рефинансирования) х 1/300 х 1172 х 2.

Суд принимает расчет представленный истцом, поскольку он согласуется с материалами дела и математически верен. 

Представителем ООО «Объединенная строительная корпорация» не заявлено о снижении неустойки, следовательно, оснований для ее снижения не имеется.

Согласно п.9 ст.4 Федерального закона №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной этим Федеральным законом.

В силу ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей", моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) или организацией, выполняющей функции изготовителя (продавца) на основании договора с ним, прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

С учетом характера причиненных истцу нравственных страданий, с учетом, что истец длительное время не может вселиться в оплаченное им жилье, вынужден испытывать бытовые неудобства, а так же исходя из принципа разумности и справедливости, суд считает, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию в счет компенсации причиненного морального вреда в размере 1 000 рублей.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В соответствии с п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителя» №... от ДД.ММ.ГГГГ при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Поскольку истец обратился в суд с настоящим иском до истечения срока для добровольного исполнения ответчиком обязательств по договору, у суда отсутствуют основания к взысканию с ответчика в пользу истца штрафа. 

В связи с тем, что истец при подаче иска о защите прав потребителей освобожден об уплаты государственной пошлины, с ответчика в силу ст.103 ГПК РФ подлежит взысканию государственная пошлина в доход бюджета муниципального образования городской округ город-герой Волгоград в размере 12 453,80 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО2 к Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная корпорация» о взыскании неустойки по договору долевого строительства, компенсации морального вреда – удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная корпорация» в пользу ФИО2 неустойку, в связи с нарушением срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства по договору №...б от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 895 379,87 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований ФИО2 к Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная корпорация» о взыскании компенсации морального вреда свыше 1 000 рублей, штрафа в размере 50 % от суммы присужденной судом за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная корпорация» государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования городской округ город-герой Волгоград в сумме 12 453,80 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд города Волгограда со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 26.11.2018 года.

Судья Е.А. Мягкова