УИД № 76RS0009-01-2025-000026-19 Мотивированное 

решение

 изготовлено 

Дело №2-51/2025 28.03.2025 г. 

РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации

26 марта 2025 года п. Пречистое

Первомайский районный суд Ярославской области в составе

председательствующего судьи Грачёвой Е.И., 

с участием представителя истца – пом. прокурора Первомайского района Ярославской области Дорошева А.Ю.,

ответчика ФИО1,

при секретаре судебного заседания Смирновой Н.В.,

рассмотрев материалы гражданского дела по исковому заявлению прокурора Первомайского района Ярославской области, действующего в интересах муниципального образования – Первомайского муниципального района Ярославской области, к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения,

у с т а н о в и л:

Прокуратура Первомайского района Ярославской области, действуя в интересах муниципального образования – Первомайского муниципального района Ярославской области, обратилась в суд с иском (с учетом его уточнения) к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения в размере 54582 рубля, в обоснование указав, что в СГ Отд МВД России по Первомайскому району 09.07.2023 г. было возбуждено уголовное дело №12301780007000035 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе предварительного расследования было установлено, что ФИО1, являющийся индивидуальным предпринимателем (далее по тексту, - ИП) в сфере строительства автомобильных дорог, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в ходе исполнения муниципального контракта № на ремонт дороги до д. Карамышево Первомайского района Ярославской области, заключенного с Администрацией Первомайского муниципального района в лице Главы ФИО2, путем обмана, совершил хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Первомайскому району, при следующих обстоятельствах. Администрация Первомайского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Первомайского муниципального района ФИО2, действующего основании Устава Первомайского муниципального района Ярославской облает и ИП ФИО1, ОГРН №, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», являющийся победителем электронного аукциона, извещение № от «24» июня 2022 года заключили 18.07.2022 муниципальный контракт № на ремонт дороги до д. Карамышево Первомайского района Ярославской области. В соответствии с п. 1.1 муниципального контракта индивидуальный предприниматель ФИО1 (подрядчик) принимает на себя обязательство выполнить ремонт дороги до д. Карамышево Первомайского муниципального района Ярославской области в соответствии с условиями Контракта, Технического задания сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, графиком выполнения строительно-монтажных работ, являющимися неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить их. В соответствии с п. 2.2. муниципального контракта его цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от № 44-ФЗ. В соответствии с п. 2.10 контракта источником финансирования является бюджет Первомайского муниципального района. В соответствии с п.2.1 оплата за выполненные по Контракту работы в размерах, установленных Контрактом, графиком оплаты выполненных работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком в российских рублях по безналичному расчету после выполнения Подрядчиком работ на основании выставленного Подрядчиком в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусмотрено. В соответствии с п. 1.1 контракта срок выполнения работ: с даты заключения контракта (18.07.2022) до 01.10.2022 в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ. В соответствии с п.5.3.1 ИП ФИО1 (подрядчик) обязан принять на себя обязательства выполнить на объекте работы по ремонту автомобильных дорог в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ. В соответствии с п. 5.3.2 ИП ФИО1 (подрядчик) обязан обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. В соответствии с п. 5.3.6 ИП ФИО1 (подрядчик) несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Техническим заданием, перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ и нормами, установленными законодательством Российской Федерации для данного вида работ. В соответствии с п. 5.3.7 Поставить на объект необходимые материалы, оборудование, технику, а также осуществлять их приёмку, разгрузку, складирование и обеспечивать их сохранность. В соответствии с п. 5.3.8 Выполнить работы своим оборудованием и материалами. Все применяемое при проведении работ оборудование и материалы должны быть новыми, качественными, иметь соответствующие сертификаты и/или другие документы, удостоверяющие их качество соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 3 рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество применяемого им оборудования и материалов. В соответствии с п. 2.1. Цена контракта составляет 5 736 997,80 рублей, НДС не облагается. Проектной документацией, являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта - планом и техническими решениями, локальным сметным расчетом, ведомостью дефектов среди прочих работ предусмотрено: в соответствии с п.14 ТЕРЗО-08-023-03, устройство гидроизоляции звеньев труб обмазочной битумной мастикой двухслойной, площадь изолируемой поверхности 33,75 м2, в соответствии п. 17 ТЕРЗ 0-08-023-02, устройство гидроизоляции звеньев труб оклеечной (2 слоя), площадью изолируемой поверхности 4,5 м2, в соответствии п.21 ТЕРЗО-08-023-03, устройство гидроизоляции оголовков труб обмазочной битумной мастикой двухслойной, площадь изолируемой поверхности 27,6 м2. В период времени с 18.07.2022 по 16.09.2022 ИП ФИО1 не организовал выполнение работ на вышеуказанном объекте соответствующих проектной и сметной документации по устройству гидроизоляции звеньев труб обмазочной битумной мастикой; по гидроизоляции звеньев 2 слоя; по устройству гидроизоляции оголовков труб обмазочной битумной мастикой двухслойной. Не позднее 31.08.2022 ФИО1 обеспечил предоставление в Администрацию Первомайского муниципального района по адресу: 

<

адрес>, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения о выполненных на объекте ремонта работах, указав в акте выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ (форма КС-3) недостоверные сведения о объемах фактически выполненных работ и использованных материалов. После подписания со стороны заказчика Администрации Первомайского района акта о приеме выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат 06.09.2022 и 16.09.2022 на расчетный счет ИП ФИО1 № ПАО «Сбербанк» с расчетного счета № отдела финансов администрации Первомайского муниципального района, открытого в Отделении г. Ярославля УФК по Ярославской области, в полном объеме осуществлена оплата за выполненные по муниципальному контракту № №0171200001922002087-1 от 18.07.2022 работы в размере 5736997,80 рублей следующими платежами: 06.09.2022 на сумму 1867765,80 руб., 16.09.2022 на сумму 3869232 руб., из которых сумма денежных средств по невыполненным работам по устройству гидроизоляции звеньев труб обмазочной битумной мастикой двухслойной (Площадь изолируемой поверхности 33,75 м2) - сметная стоимость в текущем уровне цен 26745,00 руб.; по устройству гидроизоляции звеньев труб оклеечной (2 слоя) площадью изолируемой поверхности 4,5 м2 - сметная стоимость в текущем уровне цен 5 964,00 руб.; по устройству гидроизоляции оголовков труб обмазочной битумной мастикой двухслойной площадью изолируемой поверхности 27,6 м2 - сметная стоимость в текущем уровне цен 21873,00 руб. Согласно выводам строительно-технической судебной экспертизы № 1819/24 от 03.07.2024, стоимость невыполненных работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ (соответствующей позициям 14, 17, 21 локального сметного расчета №б/н) в рамках исполнения положений по муниципальному контракту №0171200001922002087-1 от 18.07.2022 в соответствии с показателями стоимости, содержащимися в актах о приемке выполненных работ от 31.08.2022, составляет 54582 рубля. Таким образом, ФИО1 совершил необоснованное обогащение, чем причинил Первомайского муниципального района материальный ущерб на общую сумму 54582 руб. Полученными из бюджета Первомайского муниципального района денежными средствами на общую сумму 54582 руб. ФИО1 распорядился по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинил Первомайскому муниципальному району Ярославской области ущерб на указанную сумму. Таким образом, действиями ФИО1 администрации Первомайского муниципального района причинен материальный ущерб на общую сумму 54582 руб. Учитывая, что ФИО1 не являлся собственником присвоенных денежных средств, не имел законных оснований для их отчуждения и присвоения, он неосновательно получил данные денежные средства, о чем знал в момент их присвоения (хищения). Указанное свидетельствует об обязанности ФИО1 вернуть администрации Первомайского муниципального района неосновательно приобретенные денежные средства, а в случае невозможности их возврата по каким-то причинам обязан компенсировать стоимость утраченных денежных средств в сумме 54 582 рублей. 

В судебном заседании помощник прокурора Первомайского района Ярославской области Дорошев А.Ю. уточненные исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить, взыскать с ФИО1 сумму неосновательного обогащения в размере 54582 руб.

В судебном заседании ответчик ФИО1 уточненные исковые требования признал в полном объеме, с суммой согласился, пояснил, что уголовное дело в отношении него было прекращено, не произвел действия по гидроизоляции труб по причине недосмотра за своими рабочими, не умышленно, обязался возместить причиненный ущерб в полном объеме в размере суммы не произведенных работ - 54582 руб. 

Представитель третьего лица - администрации Первомайского муниципального района Ярославской области в судебное заседание не явился, ходатайствовали о рассмотрении дела без участия представителя, исковые требования поддержали.

Представитель третьего лица - Отд МВД России по Первомайскому району в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте судебного заседания извещены должным образом, возражений не представили. 

В силу ч. 5 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту, - ГПК РФ), суд считает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствии ответчика, надлежащим образом извещенного о дате, месте и времени судебного заседания. 

Су, заслушав пояснения представителя истца, ответчика, исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, с учетом требований ст. 56 ГПК РФ и по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

На основании п. 1 ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В силу ст.1103 ГК РФ, поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой (обязательства вследствие неосновательного обогащения), подлежат применению также к требованиям: 1) о возврате исполненного по недействительной сделке; 2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения; 3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством; 4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.

В судебном заседании установлено, что 18.07.2022 г. между администрацией Первомайского муниципального района Ярославской области в лице главы - ФИО3 и ИП ФИО1, по итогам электронного аукциона, был заключен муниципальный контракт №0171200001922002087-1 на ремонт дороги. 

Во исполнение своих обязательств администрацией Первомайского муниципального района Ярославской области на счет ИП ФИО1 были переведены денежные средства за оплату работ по муниципальному контракту в размере 5736997,80 руб., что подтверждается платежными поручениями от 06.09.2022 на сумму 1867765,80 руб., от 16.09.2022 на сумму 3869232 руб.

В связи с невыполнением всех работ, предусмотренных сметной документацией, являющейся приложением к муниципальному контракту №0171200001922002087-1 от 18.07.2022 г., в СГ Отд МВД России по Первомайскому району 09.07.2023 г. в отношении ФИО1 было возбуждено уголовное дело №12301780007000035 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В рамках предварительного следствия, производимого по данному уголовному делу, была назначена и проведена строительно-техническая судебная экспертиза, в соответствии с заключением которой № 1819/24 от 03.07.2024 г., стоимость невыполненных работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ (соответствующей позициям 14, 17, 21 локального сметного расчета №б/н) в рамках исполнения положений по муниципальному контракту №0171200001922002087-1 от 18.07.2022 в соответствии с показателями стоимости, содержащимися в актах о приемке выполненных работ от 31.08.2022 г., составляет 54582 руб. 

Указанному заключению суд доверяет, поскольку оно проведено специалистами, имеющую соответствующую квалификацию, разрешения на производство подобного рода экспертиз, эксперты, при выполнении судебной экспертизы, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, кроме того, с постановлением о назначении данной экспертизы стороны по настоящему гражданскому делу в рамках предварительного следствия были ознакомлены своевременно, их права в данном случае нарушены не были.

С учетом результатов экспертизы, 08.07.2024 г. ФИО1 было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ, при этом, ФИО1 в ходе предварительного следствия вину в совершении вменяемого ему преступления не признал, указав на отсутствие умысла в его действиях. 

29.12.2024 г. на основании постановления начальника СГ Отд МВД России по Первомайскому району ФИО4 уголовное преследование в отношении ФИО1 было прекращено на сновании п.1 ч.1 ст.27 УПК РФ, ч.2.2. ст.27 УПК РФ, в связи с непричастностью к совершению преступления, а уголовное дело №12301780007000035 было прекращено на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, за ФИО1 признано право на реабилитацию. Указанное постановление не обжаловалось и вступило в законную силу.

В судебном заседании ФИО1 не оспаривал факт невыполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, отраженных в заключении строительно-технической судебной экспертизы № 1819/24 от 03.07.2024 г., их стоимость в размере 54582 руб., о чем свидетельствует собственноручная письменная расписка ФИО1 о признании исковых требований. 

В соответствии со ст.1109 ГК РФ, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: 1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; 2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности; 3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; 4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Денежная сумма в размере 54582 руб., в качестве стоимости невыполненных работ по муниципальному контракту, не входит в перечень обстоятельств, предусмотренных ст.1109 ГК РФ, которые свидетельствовали бы о том, что указанная сумма не может быть взыскана с ответчика. 

На основании изложенного, сумма стоимости невыполненных по муниципальному контракту №0171200001922002087-1 от 18.07.2022 г. работ в размере 54582 руб. подлежит взысканию с ответчика ФИО1 в качестве неосновательного обогащения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования прокурора Первомайского района Ярославской области, действующего в интересах муниципального образования - Первомайского муниципального района Ярославской области, удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, паспорт № выдан 06.11.2012 г. ТП №2 отдела УФМС России по Ярославской области в Ярославском районе (код подразделения 760-020), в пользу администрации Первомайского муниципального района Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) сумму неосновательного обогащения в размере 54582 рубля. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение 1 месяца с момента изготовления мотивированного решения путем подачи жалобы в Первомайский районный суд.

Судья Грачёва Е.И.