Дело № 2-562/2023 КОПИЯ

УИД № 59RS0042-01-2023-000668-35

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

21 июля 2023 года г. Чернушка

Чернушинский районный суд Пермского края в составе

председательствующего судьи Клепилиной Е.И., 

при секретаре судебного заседания Антипиной Л.В.,

с участием и.о. прокурора Чернушинского района Штенцова Э.П., 

представителя ответчика администрации Чернушинского городского округа ФИО1, 

представителя третьего лица ООО «ЖК «Гранд» ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Чернушинского района Пермского края в интересах неопределенного круга лиц к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», администрации Чернушинского городского округа о возложении обязанностей,

установил:

Прокурор Чернушинского района Пермского края в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с исковым заявлением к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», администрации Чернушинского городского округа о возложении обязанностей.

В обоснование исковых требований указано, что прокуратурой Чернушинского района в рамках рассмотрения обращения 

<

ФИО>2 и анализа принятых мер по устранению нарушений содержащихся в акте прокурорского реагирования, внесенного 20.04.2023, проведена проверка соблюдения требований законодательства при организации проведения капитального ремонта крыши и фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>. Субъекты Российской Федерации наделены полномочиями по самостоятельному решению вопросов, связанных с подготовкой и утверждением региональных программ капитального ремонта, созданием и функционированием региональных операторов, определением минимального размера взноса на капитальный ремонт и других. В целях реализации региональной программы капитального ремонта, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны утверждать краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации региональной программы капитального ремонта в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта утверждена постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014 № 288-п. Данной региональной программой предусмотрено выполнение в многоквартирном доме по адресу: 

<

...> в период с 2021 года по 2023 год работ по капитальному ремонту крыши, фасада, ВИС (Эл). Исполнителями программы являются: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края, некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Пермского края», органы местного самоуправления муниципальных образований, собственники помещений в многоквартирных домах, управляющие организации и др. В целях реализации региональной программы капитального ремонта, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной, муниципальной поддержки капитального ремонта органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны утверждать краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока. При формировании фонда капитального ремонта на специальном счете владельцем счета по выбору собственников жилых помещений выступает: товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, управляющая организация, а также региональный оператор. Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 15.06.2020 № СЭД-24-03-23-ПР-7 утвержден краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2021 - 2023 годы. Согласно указанному краткосрочному плану плановая дата завершения работ по капитальному ремонту крыши и фасада МКД № 95 ул. Красноармейская установлена на 4 квартал 2021 и 4 квартал 2022. В целях формирования фонда капитального ремонта собственниками помещений указанного многоквартирного дома взносы на капитальный ремонт перечисляются на счет регионального оператора. Несмотря на истекшие сроки осуществления капитального ремонта, установленные региональной программой на 2021 - 2023 годы и краткосрочным планом в срок до 31.12.2021, 31.12.2022 НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (исполнитель программы) должных мер, предусмотренных региональной программой, не принято, проведение капитального ремонта крыши и фасада не обеспечено. По результатам ранее проведенной проверки в деятельности НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Пермского края» выявлены нарушения требований жилищного законодательства. Нарушения, указанные в представлении по состоянию на 09.06.2023 не устранены. Объем средств, который региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта (объем средств, предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество, в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде), определяется нормативным правовым актом субъекта РФ в зависимости от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших региональному оператору за предшествующий год, и (или) прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году. При этом размер указанной доли устанавливается законом субъекта РФ с учетом остатка средств, не использованных региональным оператором в предыдущем периоде. Решением Ленинского районного суда г. Перми от 01.02.2022 установлено, что требования к обеспечению финансовой устойчивости деятельности регионального оператора при исполнении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, не исполняются, в связи с наличием дефицита средств для реализации программы. Бездействие Фонда, выразившееся в непринятии мер по обеспечению финансовой устойчивости деятельности регионального оператора признаны незаконным. Решение суда вступило в законную силу 18.05.2022. Выявленные нарушения не устранены, исполнение акта прокурорского реагирования оставлено на контроле в прокуратуре района. Представление об устранении выявленных нарушений является обязательным к исполнению, оно в отличие от судебного акта не может быть исполнено в принудительном порядке. По результатам проверки установлено, что Фондом длительное время не принимаются действенные и эффективные меры по своевременной реализации Программы, краткосрочного плана 2021-2023 годы, что влечет нарушения прав граждан, проживающих в жилищном фонде, требующем проведения капитального ремонта, и оплачивающих соответствующие взносы. Ненадлежащее состояние общего имущества в многоквартирном доме (крыши) приводит к нарушению жилищных прав неопределенного круга лиц, проживающих в многоквартирном доме, и создает препятствия управляющей организации в осуществлении обязательств по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Прокурор просит возложить обязанность на некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить проведение работ по капитальному ремонту фасада и крыши многоквартирного дома № 95, расположенного в г. Чернушка на ул. Красноармейская путем привлечения для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту подрядных организаций, заключения с подрядными организациями от своего имени договоров, предусматривающих установление гарантийного срока на оказанные услуги и выполненные работы продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг или выполненных работ; возложить обязанность на некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» осуществлять контроль качества и сроков оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту фасада и крыши многоквартирного дома № 95, расположенного в г. Чернушка на ул. Красноармейская подрядными организациями и соответствия таких услуг и работ требованиям проектной документации; возложить обязанность на некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» обеспечить приемку оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту фасада и крыши многоквартирного дома № 95, расположенного в г. Чернушка на ул. Красноармейская посредством создания соответствующих комиссий с участием представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта краткосрочных планов их реализации, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и представителей собственников помещений в многоквартирном доме; возложить обязанность на администрацию Чернушинского городского округа обеспечить участие в приемке оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту фасада и крыши многоквартирного дома № 95, расположенного в г. Чернушка на ул. Красноармейская в составе комиссии, созданной некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

Определением судьи от 16.06.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «ЖК «Гранд». 

И.о. прокурора Чернушинского района Штенцов Э.П. в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования по доводам, изложенным в исковом заявлении, дополнительно пояснил, что считает возражения ответчика некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» несостоятельными, поскольку не осуществлением ремонта фасада и кровли дома № 95 по ул. Красноармейская г. Чернушка нарушаются права граждан, работа по утвержденной программе не проводилась, сроки истекли, на общем собрании вопрос о переносе срока программы не решался, собрание собственников не проводилось.

Представитель ответчика администрации Чернушинского городского округа Москалева С.С. в судебном заседании против удовлетворения исковых требований не возражала.

Представитель ответчика некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, направил письменное ходатайство о рассмотрении дела без участия представителя, указав, что Фонд является исполнителем региональной программы капитального ремонта. Многоквартирный дом № 95 по ул. Коммунистическая г. Чернушка включен в Программу. Актуализированный краткосрочный план реализации региональной программы на период 2021-2023 годов утвержден приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края № 24-01-04-190 от 02.06.2023. Согласно данного краткосрочного плана по указанному многоквартирному дому плановая дата завершения работ установлена на 31.12.2023. Следовательно плановая дата завершения работ по проведению капитального ремонта у Фонда как исполнителя региональной программы капитального ремонта в настоящее время не наступила. Обязанности регионального оператора закреплены в статье 24 Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Пермского края». Требования истца в части возложения обязанности подлежат отклонению в связи с тем, что обязанность регионального оператора уже установлена в силу закона. Фонд считает необоснованными и незаконными доводы, указанные в исковом заявлении прокурора Чернушинского района о том, что иск предъявлен в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц. Требование о соблюдении законодательства не является способом защиты, обеспечивающим восстановление нарушенного права, поскольку соблюдение закона является обязанностью всех граждан и организаций Российской Федерации. 

Представитель третьего лица ООО «ЖК «Гранд» ФИО2 в судебном заседании исковые требования прокурора поддержала, пояснила, что дому № 95 по ул. Красноармейская в г. Чернушка необходим ремонт фасадов и кровли, в 2021 году осуществлялся текущий ремонт крыши, перенос сроков не возможен, поступают жалобы от жильцов. На основании чего и на какие сроки перенесен ремонт дома не известно, уведомлений не было, общее собрание собственников, не проводилось. 

Третье лицо Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края в судебное заседание представителя не направило, извещено надлежащим образом, направило письменное ходатайство о рассмотрении дела без участия представителя. В письменных возражениях, просило в удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме. Многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

...>, включен в Региональную программу с плановым проведением работ в период с 2021-2023 годы – ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжения), ремонт крыши, фасада. Краткосрочный план реализации Региональной программы на 2021-2023 годы утвержден приказом Министерства от 15.06.2020 №СЭД-24-03-23-ПР-7. Многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

...>, включен в указанный Краткосрочный план. В настоящее время данный Краткосрочный план не закончен, в связи с чем, говорить о невыполнении Фондом сроков Региональной программы нельзя. Требования прокуратуры о понуждении Фонда провести капитальный ремонт указанных домов незаконны. Данные требования прокуратура вправе предъявлять после окончания периода 2021-2023 годы, т.е. в 2024 году. Полагает, что требование о соблюдении законодательства не является способом защиты, обеспечивающим восстановление нарушенного права, поскольку соблюдение закона является обязанностью всех граждан и организаций Российской Федерации. Обязанности регионального оператора установлены в силу закона. Полагает, что определение состава комиссии по приемке является производственной деятельностью регионального оператора. Суд не вправе вмешиваться в осуществление юридическим лицом хозяйственной (производственной) деятельности в силу п. 1 ст. 1 ГК РФ (л.д. 161-163). 

Суд, заслушав представителей истца, ответчика администрации Чернушинского городского округа, третьего лица ООО «ЖК «Гранд», исследовав письменные доказательства, приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 2 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе: организуют обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.

На основании ч. 10.1 ст. 12 ЖК РФ к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области жилищных отношений относится, в том числе методическое обеспечение установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно ч. 8.3 ст. 13 ЖК РФ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений относится, в то числе определение порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

В силу ч. 1 ст. 166 ЖК РФ перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, включает в себя: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома.

На основании ч. 1 ст. 168 ЖК РФ региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяются предельные сроки проведения собственниками помещений в таких домах и (или) региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов (далее - государственная поддержка, муниципальная поддержка капитального ремонта), контроля своевременности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений в таких домах, региональным оператором.

Согласно ч. 6 ст. 168 ЖК РФ внесение в региональную программу капитального ремонта при ее актуализации изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с ч. 6 ст. 178 ЖК РФ субъект Российской Федерации несет субсидиарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным оператором обязательств перед собственниками помещений в многоквартирных домах.

В силу ч. 1 ст. 182 ЖК РФ региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта, и финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, за счет средств, полученных за счет платежей собственников помещений в других многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, за счет субсидий, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета, за счет иных не запрещенных законом средств.

Обязанности регионального оператора в целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме предусмотрены ч. 2 ст. 182 ЖК РФ. 

В силу п. 5 ч. 2 ст. 182 ЖК РФ региональный оператор в целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обязан, в том числе осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе обеспечить создание соответствующих комиссий с участием представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации, и (или) органов местного самоуправления, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и представителей собственников помещений в многоквартирном доме. 

Согласно ч. 6 ст. 182 ЖК РФ региональный оператор перед собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным оператором.

На основании ч. 2 ст. 188 ЖК РФ субъект Российской Федерации несет субсидиарную ответственность за исполнение региональным оператором обязательств перед собственниками помещений в многоквартирных домах, указанными в части 1 настоящей статьи.

Согласно ч. 2 ст. 190 ЖК РФ основанием для перечисления региональным оператором средств по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме является акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением случая, указанного в части 3 настоящей статьи). Такой акт приемки должен быть подписан, в том числе органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме). Порядок и сроки подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядок взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с положениями ст. 21 Закона Пермского края от 11.03.2014 года № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края» (далее по тексту - Закон от 11.03.2014 года № 304-ПК) региональным оператором на территории Пермского края является некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

Согласно положениям ст. 22 Закона от 11.03.2014 года № 304-ПК предметом деятельности регионального оператора является обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта, в том числе финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Основными целями деятельности регионального оператора являются организация и своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края.

Функциями регионального оператора являются, в том числе осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; контроль за целевым использованием средств фонда капитального ремонта, приостановление финансирования в случае выявления нецелевого использования средств фонда капитального ремонта.

Согласно положениям ст. 24 Закона от 11.03.2014 года № 304-ПК региональный оператор в целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обязан контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации.

Постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014 года №288-п утверждена региональная Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы.

Судом установлено и следует из материалов дела, что между ООО «Жилищная компания» (исполнитель) и собственниками жилых помещений многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Красноармейская, д. 95 г. Чернушка, 18.09.2017 заключен договор № 95/17 на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (л.д. 68-71).

В соответствии с п. 3.2.1 вышеуказанного договора исполнитель обязан обеспечить выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома из средств и в пределах собранных средств собственников помещений в многоквартирном доме. 

Постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014 года №288-п утверждена региональная Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, определены следующие плановые периоды проведения капитального ремонта в многоквартирном доме: 2021-2023 годы – комплексное обследование технического состояния многоквартирного дома в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме; ремонт крыши, фасада, ВИС (Эл.).

Согласно технического отчета ООО «Промэнерго-Аудит» № 462 от 24.01.2019 по результатам визуального технического обследования строительных конструкций здания, расположенного по адресу: 

<

...> в рамках капитального ремонта рекомендуется выполнить в том числе ремонт крыши (период проведения 2019), ремонт фасада (период проведения 2019) (л.д. 83-153). 

В 2020 некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» обратилось к главе администрации Чернушинского городского округа с просьбой принять меры по организации общего собрания собственников помещения в многоквартирных домах для принятия решений о переносе сроков проведения работ на более поздний срок, в том числе по дому 

<

...> (л.д. 34, 35). 

02.06.2020 ООО «ЖК «Гранд» обратилось в Фонд с просьбой о предоставлении информации по срокам начала работ по капитальному ремонту, указав, что на 2020 год запланированы работы по ул. Красноармейская, 95, ремонт кровли на сумму 551 843,01 руб. (л.д. 31, 201).

Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 15.06.2020 №СЭД-24-03-23-ПР-7 утвержден краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края на 2021-2023 годы. Согласно указанному плану плановая дата завершения работ по капитальному ремонту крыши и фасада многоквартирного дома № 95 по ул. Красноармейская г. Чернушка установлена соответственно на 4 квартал 2021 года и 4 квартал 2022 года.

29.06.2020 Фонд на запрос от 02.06.2020 ООО «ЖК «Гранд» сообщил, что решение о проведении капитального ремонта поступило 29.05.2020, до этого времени у регионального оператора отсутствовали основания для выполнения мероприятий по капитальному ремонту (л.д. 188-189).

В феврале 2021 года ООО «ЖК «Гранд» направило в адрес Фонда письмо с приложением протокола общего собрания собственников помещений МКД 

<

...> произвести работы по капитальному ремонту кровли в 2021 году (л.д. 33, 211).

09.12.2021 ООО «ЖК «Гранд» обратилось в Фонд с просьбой сообщить дату о сроках начала работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: 

<

...> (л.д. 28, 207).

20.12.2021 Фонд на письмо ООО «ЖК «Гранд» сообщил, что запланировано проведение капитального ремонта крыши 

<

...> с плановым завершением работ в 4 квартале 2021 года, решение о проведении капитального ремонта крыши вышеуказанного многоквартирного дома в адрес регионального оператора не поступало (л.д. 204-205) 

27.12.2021 ООО «ЖК «Гранд» направило в Фонд письмо, с указанием, что пакет необходимых документов направлялся, просят сообщить дату о сроках начала работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: 

<

...> (л.д. 27, 206).

21.01.2022 Фонд сообщил ООО «ЖК «Гранд», что необходимо оформить протокол общего собрания в соответствии с требованиями жилищного законодательства и направить в адрес регионального оператора (л.д. 25, 202-203). 

08.02.2022 ООО «ЖК «Гранд» направило Фонду протокол общего собрания собственников многоквартирного дома № 95 по ул. Красноармейская о проведении капитального ремонта общего имущества (л.д. 208).

18.03.2022 из обращения Фонда к главам городских округов, следует, что многоквартирный дом по ул. Красноармейская, д. 95 г. Чернушка включен в перечень домов, в которых запланировано проведение мероприятий по капитальному ремонту на 2021 и 2022 годы, просят принять решение о проведении капитального ремонта согласно предложениям регионального оператора и краткосрочному плану (л.д. 21,22, 194-195, 196)

23.03.2022 ООО «ЖК «Гранд» направило в Фонд письмо, с просьбой сообщить дату о сроках начала работ по капитальному ремонту общего имущества в том числе многоквартирного дома по ул. Красноармейская, д. 95 г. Чернушка (л.д. 24, 193). 

31.03.2022 ООО «ЖК «Гранд» направило в Фонд письмо, указав, что протокол общего собрания был направлен ранее, исх. № 42 от 08.02.2022 (л.д. 23, 192).

11.05.2022 ООО «ЖК «Гранд» повторно направило в Фонд письмо, с требованием сообщить дату о сроках начала работ по капитальному ремонту общего имущества в том числе многоквартирного дома по ул. Красноармейская, д. 95 г. Чернушка (л.д. 20, 191).

10.06.2022 Фонд сообщил ООО «ЖК «Гранд», что по адресу: 

<

...> решается вопрос подготовки документации на проведение электронного аукциона по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (л.д. 19, 190). 

Согласно письму НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» по ул. Красноармейская, д. 95 г. Чернушка плановая дата завершения работ 4 кв. 2021 года (л.д. 17-18, 184-186)

23.08.2022 ООО «ЖК «Гранд» направило в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» письмо, с просьбой сообщить результат проведения электронного аукциона по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 95 по ул. Красноармейская г. Чернушка (л.д. 16). 

30.09.2022 Фонд сообщил ООО «ЖК «Гранд», что готовится пакет документов на проведение электронного аукциона по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации, срок размещения до 30.11.2022 (л.д. 15, 183).

08.12.2022 ООО «ЖК «Гранд» обратилось в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» с письмом, сообщить результат проведения электронного аукциона по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего имущества, в том числе многоквартирного дома по ул. Красноармейская, д. 95 (л.д. 14, 182).

29.12.2022 Фонд сообщил ООО «ЖК «Гранд», что срок рассмотрения обращения продлен на 30 дней (л.д. 13, 181).

25.01.2023 в ответ на письмо от 08.12.2022 Фонд сообщил, что в том числе в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Красноармейская, д. 95, в Министерство было направлено письмо о перерасчете предельных стоимостей и внесении изменений в региональные краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта на 2018-2022 годы, на 2021-2023 годы (л.д. 12, 180). 

20.03.2023 ООО «ЖК «Гранд» обратилось в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» с письмом, в котором просило сообщить о дальнейших действиях в отношении в том числе, многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (л.д. 11, 179).

14.04.2023 Фонд сообщил ООО «ЖК «Гранд», что срок рассмотрения обращения продлен на 30 дней (л.д. 10, 178)

20.04.2023 прокурором Чернушинского района в адрес НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» внесено представление № 2-21-2023 об устранении нарушений жилищного законодательства и жилищно-коммунального хозяйства, поскольку действенных мероприятий по проведению работ по капитальному ремонту, в том числе дома 95 по ул. Красноармейская г. Чернушка, не проводится, что влечет нарушение прав граждан (л.д. 56-59). 

12.05.2023 от собственников многоквартирного дома № 95 по ул. Красноармейская г. Чернушка в адрес прокурора Чернушинского района поступило обращение о выполнении работ по ремонту кровли дома (л.д. 9). 

12.05.2023 Фонд в ответ на письмо ООО «ЖК «Гранд», сообщил, что в связи с поступлением жалоб УФАС по Пермскому краю по вопросам несоответствия договоров на аукционы, необходимо проведение анализа (л.д. 176-177).

01.06.2023 Фондом направлен ответ на представление прокурора, указав, что решение о проведении капитального ремонта по адресу: 

<

...> (ЭЛ, РФа) в адрес регионального оператора до настоящего времени не поступило (л.д. 60-62).

09.06.2023 ООО «ЖК «Гранд» направило в Фонд письмо, с просьбой сообщить результаты аукциона, размещенного до 30.11.2022 по капитальному ремонту кровли, фасада, внутридомовых инженерных сетей по адресу: 

<

...> (л.д. 175).

Однако, до настоящего времени НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» свои обязательства по проведению капитального ремонта фасада и крыши многоквартирного дома № 95, расположенного в г. Чернушка на ул. Красноармейская не выполнил, что подтверждается материалами дела, и ответчиком не оспаривается, доказательств обратного суду не представлено.

Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о нарушении прав и законных интересов жителей многоквартирного дома и о наличии угрозы жизни и здоровью неопределенного круга лиц. 

Сроки, установленные Программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края для проведения капитального ремонта фасада и крыши многоквартирного дома по адресу: 

<

...> нарушены. 

Обязанность по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме законодательством возложена на НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных прокурором исковых требований и наличии оснований для возложения на НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» обязанности по капитальному ремонту крыши и фасада многоквартирного дома № 95 по ул. Красноармейская г. Чернушка, обязанности осуществлять контроль качества и сроков оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, обязанности обеспечить приемку оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 95, расположенного в г. Чернушка на ул. Красноармейская посредством создания соответствующих комиссий с участием представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта краткосрочных планов их реализации, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и представителей собственников помещений в многоквартирном доме.

Суд находит, несостоятельными доводы ответчика НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», указавшего что плановая дата завершения работ по проведению капитального ремонта у Фонда, как исполнителя региональной программы капитального ремонта в настоящее время не наступила, со ссылкой на приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 02.06.2023, которым плановая дата завершения работ установлена на 31.12.2023, поскольку в приказе не указаны виды работ, кроме того ответчиком не представлено доказательств наличия соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период. При этом согласно письму ООО «ЖК «Гранд» от 21.07.2023, повторных комплексных обследований технического состояния МКД, проведенных региональным оператором не проводилось, общим собранием собственников МКД, расположенного по адресу: Красноармейская, д. 95 г. Чернушка не было принято решение о переносе сроков по капитальному ремонту кровли и фасада на более поздний срок, учитывая, сто согласно письму НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» от 27.11.2020 необходимо проведение общего собрания собственников.

Разрешая вопрос о длительности срока, который необходимо предоставить ответчику НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» для выполнения возложенной на него обязанности, учитывая сложность и объем работ по капитальному ремонту крыши и фасада многоквартирного дома, учитывая возражения ответчика, суд считает необходимым и достаточным предоставить ответчику срок продолжительностью шесть месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. 

В целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме региональный оператор обязан, в частности, привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядные организации и заключить с ними от своего имени соответствующие договоры; контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации; осуществить приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ (пункты 3, 4, 5 ч. 2 ст.182 ЖК РФ).

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным оператором перед собственниками своих обязательств, предусмотренных законом, установлена ч. 5 ст. 178 и ч. 1 ст. 188 ЖК РФ. Частью 6 ст. 182 ЖК РФ установлена ответственность регионального оператора за действия привлеченного им для осуществления капитального ремонта подрядчика. В соответствии с положениями данной нормы региональный оператор перед собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным оператором.

Ненадлежащее состояние общего имущества в многоквартирном доме (крыши, фасада) приводит к нарушению жилищных прав неопределенного круга лиц, проживающих в многоквартирном доме, и создает препятствия управляющей организации в осуществлении обязательств по договору на оказание услуг и/или выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

Судом установлено, что на протяжении нескольких лет НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» меры по обеспечению капитального ремонта капитального ремонта фасада и крыши многоквартирного дома № 95, расположенного в г. Чернушка на ул. Красноармейская своевременно не принимал, работы до настоящего времени не выполнены.

Доводы ответчика и третьего лица о том, что требование о соблюдении законодательства не является способом защиты, обеспечивающим восстановление нарушенного права, так как соблюдение закона является обязанностью всех граждан и организаций Российской Федерации, суд находит не состоятельными. 

В силу абз. 8 ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты нарушенных гражданских прав является присуждение к исполнению обязанности в натуре. 

Заявленные в интересах неопределенного круга лиц требования прокурора направлены на понуждение ответчика в судебном порядке исполнить возложенные на него законом обязанности по проведению капитального ремонта фасада и крыши многоквартирного дома № 95, расположенного в г. Чернушка на ул. Красноармейская, по выполнению в установленные сроки необходимых действий и по восстановлению прав граждан – жителей вышеуказанного многоквартирного дома и граждан, посещающих указанный многоквартирный дом. 

Прокурором избран предусмотренный законом способ защиты прав и интересов неопределенного круга лиц. Непринятие данных мер нарушает права граждан на проживание в жилом помещении, соответствующем нормативным требованиям, на благоприятные безопасные условия жизни. 

Суд считает не состоятельным довод третьего лица о превышении судом полномочий в части определения состава комиссии, создаваемой для приемки работ по капитальному ремонту. 

Исполнителями программы являются: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края, НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», органы местного самоуправления муниципальных образований, собственники помещений в многоквартирных домах, управляющие организации и др. 

Обеспечение участия в принятии выполненных работ представителя органа исполнительной власти субъекта РФ, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта и (или) краткосрочных планов, необходимо с целью исключения фактов приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома ненадлежащего качества и, как следствие, возмещения убытков, причиненных в результате некачественного оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту. 

ООО ««ЖК «Гранд»» и администрация Чернушинского городского округа в удовлетворении исковых требований не возражали.

Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора Чернушинского района Пермского края в полном объеме. 

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования прокурора Чернушинского района Пермского края удовлетворить.

Возложить обязанность на некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить проведение работ по капитальному ремонту фасада и крыши многоквартирного дома № 95, расположенного в г. Чернушка на ул. Красноармейская путем привлечения для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту подрядных организаций, заключения с подрядными организациями от своего имени договоров, предусматривающих установление гарантийного срока на оказанные услуги и выполненные работы продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг или выполненных работ. 

Возложить обязанность на некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» осуществлять контроль качества и сроков оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту фасада и крыши многоквартирного дома № 95, расположенного в г. Чернушка на ул. Красноармейская подрядными организациями и соответствия таких услуг и работ требованиям проектной документации. 

Возложить обязанность на некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» обеспечить приемку оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту фасада и крыши многоквартирного дома № 95, расположенного в г. Чернушка на ул. Красноармейская посредством создания соответствующих комиссий с участием представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта краткосрочных планов их реализации, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и представителей собственников помещений в многоквартирном доме.

Возложить обязанность на администрацию Чернушинского городского округа обеспечить участие в приемке оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту фасада и крыши многоквартирного дома № 95, расположенного в г. Чернушка на ул. Красноармейская в составе комиссии, созданной некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Чернушинский районный суд Пермского края в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме 28.07.2023.

Председательствующий: подпись Е.И. Клепилина

Решение не вступило в законную силу.

Подлинный документ подшит в деле № 2-562/2023

УИД № 59RS0042-01-2023-000668-35

Дело находится в производстве 

Чернушинского районного суда Пермского края