Дело № 2-2588/2024

УИД 76RS0014-01-2024-001553-07

Изготовлено 05.08.2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

город Ярославль 29 июля 2024 года

Кировский районный суд города Ярославля в составе:

председательствующего судьи Воробьевой В.В.,

при секретаре Ананьевой А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Центр» о взыскании неустойки, штрафа, судебных расходов,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Центр» о взыскании неустойки за просрочку добровольного исполнения требования потребителя в размере 53 089 руб., компенсацию морального вреда – 20 000 руб., штрафа, расходов на оплату юридических услуг – 48 000 руб.

В обоснование иска (с учетом уточнения правовой позиции по делу) указано, что 2 февраля 2023 года ФИО1 заключил с ПАО «Россети Центр» договор технологического присоединения №, согласно которому срок исполнения обязательств по технологическому присоединению 6 месяцев со дня заключения договора, то есть до 2 августа 2023 года. Стоимость услуг по договору составила 53 089 руб., и была оплачена в полном объеме. По истечении срока договора услуги предоставлены не были, то есть срок оказания услуг по договору был нарушен. 25 августа 2023 года истец обратился к ответчику с заявлением (обращением) о расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств, приложив свои банковские реквизиты. Причина расторжения договора - финансовые трудности, передача земельного участка в аренду третьему лицу. Факт нарушения сроков оказания услуг по Договору очевиден, подтвержден документально, в полном объеме, и в этом вопросе действующее законодательство Российской Федерации регламентирует четкую правовую позицию. Срок исполнения заявления (обращения) о расторжении договора и возврате денежных средств истцу наступил 4 сентября 2023 года. 24 октября 2023 года между сторонами было подписано соглашение о расторжении договора, акт компенсации фактических затрат, согласно которому ответчик рассчитал и удержал свои фактически понесенные затраты, указав сумму к возврату. Однако денежные средства не были возвращены истцу ответчиком. Отсюда следует, что ответчик нарушил сроки возврата денежных средств по требованию истца. 12 марта 2024 года в порядке досудебного урегулирования спора ФИО1 обратился с письменной претензией к ответчику о возврате денежных средств, уплаченных за услуги, предусмотренные договором, с оплатой компенсации морального вреда, неустойки. Ответчик перевел денежные средства истцу в размере 44 153, 87 руб., удержав фактически понесенные затраты. Другие требования, изложенные в указанной претензии, ответчик оставил без исполнения, без мотивированного отказа в исполнении. ФИО1 в обоснование иска ссылается на положения ст.ст. 22, 23, ч. 5 ст. 25, ст.ст. 28, 31 Закона РФ от 07.09.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». Закона РФ от 07.09.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17, Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, в частности Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Истец ФИО1 и его представитель ФИО2 исковое заявление поддержала по доводам изложенным в нем с учетом уточнения правовой позиции по делу. 

Доводы сводились к нарушению ответчиком прав истца как потребителя ввиду не исполнения в установленные сроки договора технологического присоединения, просрочки добровольного исполнения требования потребителя о расторжении договора и возврате денежных средств. Сам ответчик не исполнил технические условия. Истец технические условия не получал. Даже если технические условия разработаны, они не были реализованы. Подключение не осуществлено. Истец выполнил свою часть технических условий. 

Ответчик представил отзыв на иск с дополнениями, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, о рассмотрении дела извещен. ПАО «Россети Центр» указывало на то, что договор технологического присоединения не исполнялся в виду отсутствия у истца интереса в подключении и не выполнение им мероприятий по договору (п. 11 технических условий). ФИО1 вправе требовать взыскания неустойки по ст. 395 ГК РФ. Технические условия размещены в личном кабинете истца. Счет на оплату, оплаченный истцом, был размещен в личном кабинете вместе с техническими условиями. 

Заслушав лиц, участвовавших в деле, исследовав письменные материалы дела, суд усматривает основания для частичного удовлетворения иска.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами – п. 1 ст. 310 ГК РФ.

Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами – ч. 1 ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".

В силу ч.ч. 1, 4, 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Согласно ч. 1 и ч. 3 ст. 31 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

Суд учитывает, что ч. 1 ст. 31 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 не предусматривает срока рассмотрения требования потребителя о расторжении договора. 

Суд установил, что 2 февраля 2023 года между сторонами по делу заключен договор № об осуществлении технологического присоединения. 

Согласно п.п. 1-5 договора Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение) малоэтажной жилой застройки (индивидуального жилого дома/садового/дачного дома), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности: третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор). Сетевая организация и заявитель являются сторонами договора (далее -стороны).

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (индивидуального жилого дома/садового/дачного дома), расположенной (которая будет располагаться) по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер земельного участка: №).

Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не далее 15 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Технические условия являются неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения настоящего договора.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения договора.

Учитывая предмет договора, ссылка истца на положения ст. 22, 23 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" ошибочна, данные нормы регламентируют вопросы, связанные с защитой прав потребителей при продаже товара, не при выполнении работ (оказании услуг). 

В силу п. 6, 8 договора сетевая организация обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);

не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).

Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже -рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям; и т.д.

Согласно п. 10, п. 11 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Департамента регулирования тарифов ЯО от 29.11.2022г. №363-стс и составляет: 53 089 (Пятьдесят три тысячи восемьдесят девять) руб. 00 коп. в т.ч. НДС 20% - 8 848 (Восемь тысяч восемьсот сорок восемь) руб. 17 коп.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

В силу п. 14-18 договора настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.

Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств, - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению по договору, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу п. 4, 5 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Оплата по договору ФИО1 осуществлена 2 февраля 2023 года в сумме 53 089 руб. При этом скриншотов личного кабинета ФИО1, представленных сторонами по делу следует, что в личном кабинете размещены технические условия и файл ЭП «Технические условия» со стороны сетевой организации. Технические условия размещены вместе со счетом №, на основании которого осуществлена оплата по договору истцом, т.е. истец получил технические условия. У суда нет оснований полагать обратное, учитывая изложенное и что в последствии истец подписал соглашение о расторжении договора, в котором учтены фактические затраты ответчика: подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ), стоимость которых 8 935, 13 руб.

28 августа 2023 года ФИО1 обратился в ПАО «Россетти Центр» с заявлением, в котором просил аннулировать ТП 42325841 и вернуть ранее оплаченную сумму 53 089 руб. от 2 февраля 2023 года в связи с финансовыми трудностями и дальнейшей передачей земельного участка другому лицу через договор аренды. Иные причины расторжения договора не указаны в обращении.

13 декабря 2023 года между сторонами по делу подписано соглашение о расторжении договора № об осуществлении технологического присоединения от 2 февраля 2023 года, согласно которого сетевая организация обязалась осуществить возврат денежных средств, полученных по договору, за вычетом фактически понесенных со стороны сетевой организацией расходов. Сетевая организация при исполнении договора понесла следующие фактические затраты: подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ), стоимость которых 8 935, 13 руб., что следует из п. 2 и 4 соглашения Сетевая организация возвращает по договору 44 153, 87 руб. (п. 6 соглашения, 53089-8935,13). Денежные средства с учетом п. 7 подлежат перечислению на банковский счет ФИО1 С момента заключения соглашения обязательства сторон по договору прекращаются за исключением обязательств, предусмотренных настоящим соглашением и п. 17 договора (п. 11 соглашения).

Соглашение о расторжении договора по технологическому присоединению направлено в адрес истца письмом от 24 октября 2023 года. 

Учитывая изложенное выше, а также положения ст.ст. 314, 450, 450.1, 452, 453 ГК РФ, у ПАО «Россетти Центр» возникла обязанность по возврату денежных средств ФИО1 в сумме 44 153,87 руб. после расторжения договора. Денежные средства должны были быть возвращены истцу в указанном размере до 20 декабря 2023 года включительно. Обязанность по возврату денежных средств исполнена не была. 

12 марта 2024 года сумма 44 153,87 руб. возвращена ФИО1, т.е. с нарушением срока 7 дней (ст. 314 ГК РФ). Просрочка исполнения соглашения о расторжении договора № об осуществлении технологического присоединения со стороны ответчика составила с 21 декабря 2023 года по 12 марта 2024 года.

ФИО1 подал претензию об уплате неустойки и компенсации морального вреда в связи с ненадлежащим исполнением договора в адрес ПАО «Россетти Центр» 12 марта 2024 года, которая оставлена без удовлетворения.

Таким образом, ФИО1 в праве требовать уплату неустойки/процентов за нарушение срока возврата денежных средств в связи с ненадлежащим исполнением соглашения о расторжении договора № об осуществлении технологического присоединения от 2 февраля 2023 года. В данном случае неустойка подлежит исчислению согласно ст. 395 ГК РФ, поскольку договор № расторгнут, а сам отказ ФИО1 от договора не связан с нарушением его прав как потребителя. Доводы стороны истца об обратном не нашли подтверждения. 

Является ошибочной ссылка истца на положения ч.ч. 1 и 3 чт. 31, ч. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей". В своем обращении к ответчику о расторжении договора № об осуществлении технологического присоединения от 2 февраля 2023 года истец не ссылался на нарушение ответчиком срока оказания услуги, а также некачественное оказание услуги.

В день получения ответчиком претензии от истца договор № об осуществлении технологического присоединения от 2 февраля 2023 года был расторгнут в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ в связи с отказом потребителя от исполнения договора, вследствие чего у истца возникло право требования процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ.

Применительно доводов стороны истца относительно ненадлежащего исполнения договора № об осуществлении технологического присоединения от 2 февраля 2023 года (нарушение срока его исполнения), суд с учетом собранных по делу доказательств, в частности условий указанного договора, технических условия, скриншотов, обращения, полагает недоказанным нарушение прав потребителя при исполнении ПАО «Россетти Центр» договора № об осуществлении технологического присоединения от 2 февраля 2023 года (недоказанным отказ истца от договора по причине нарушения ответчиком срока его исполнения). В частности суду не представлены доказательства того, что со стороны истца осуществлялись мероприятия, предусмотренные п. 11 Технических условий, направлялось уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов, т.е. у него имелся интерес в исполнении договора № об осуществлении технологического присоединения от 2 февраля 2023 года.

При этом суд, делая указанные выше выводы, принимает во внимание следующее.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Согласно п. 18, п. 85, 87, 88 Правил Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором, а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором и со смежными сетевыми организациями;

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем) (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

д) проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил;

д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем;

д(2)) выполнение мероприятий по обеспечению возможности вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой организации, в случае технологического присоединения вновь сооружаемого (реконструируемого) объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя к электрическим сетям той же сетевой организации в целях замещения им такого объекта по производству электрической энергии (мощности).

Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:

а) техническая документация (технические паспорта) на линии электропередачи, основное энергетическое и электротехническое оборудование, разъединители, измерительные трансформаторы, ВЧ-заградители, токоограничивающие реакторы;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

Сетевая организация рассматривает представленные заявителем документы, предусмотренные пунктом 85 настоящих Правил, и осуществляет осмотр электроустановок заявителя.

По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий сетевая организация в 3-дневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению N 15 (далее - акт о выполнении технических условий).

Кроме того, в силу п. 105 Правил в отношении заявителя, указанного в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает в личном кабинете заявителя:

условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям согласно приложению N 17;

счет на оплату технологического присоединения по договору;

подписанные со стороны сетевой организации технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с пунктами 25(1), 25(6) и 25(7) настоящих Правил, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации;

инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности.

Размещенные в личном кабинете заявителя условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технические условия признаются офертой, а оплата заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору - акцептом договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий. В случае несогласия с размещенными сетевой организацией в личном кабинете заявителя документами, предусмотренными абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, и (или) несоответствия их настоящим Правилам заявитель вправе в течение 5 рабочих дней со дня размещения сетевой организацией таких документов направить сетевой организации мотивированный отказ от заключения договора с предложением об изменении размещенных документов и требованием о приведении их в соответствие с настоящими Правилами. Размещение сетевой организацией указанных документов, приведенных в соответствие с настоящими Правилами, осуществляется с использованием личного кабинета заявителя в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования.

Таким образом, с ПАО «Россетти Центр» подлежат взысканию проценты на основании ст. 395 ГК РФ, в остальной части исковые требования ФИО1 удовлетворению не подлежат, в том числе исковые требования о взыскании штрафа и компенсации морального вреда, заявленные истцом и вытекающие из основного требования истца о взыскании неустойки на основании ч.ч. 1 и 3 ст. 31, ч. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".

Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Сумма процентов, подлежащая взысканию с ПАО «Россетти Центр» составит 1 602,67 руб. (44153,87*11*16%/365=212,91 руб., 44153,87*72*16%/366=1 389,76 руб.).

С учетом положений ст. 98, 100 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы на оплату юридических услуг. Истцом заявлено к взысканию 48 000 руб. Вместе с тем, учитывая сложность настоящего дела, объем оказанных услуг, частичное удовлетворение иска (3,02%), принцип разумности и справедливости, с ПАО «Россетти Центр» подлежат взысканию расходы на оплату юридических услуг – 1 449,60 руб. (48 000*3,02%).

С учетом ст. 103 ГПК РФ с ПАО «Россети Центр» в доход бюджета муниципального образования города Ярославля подлежит взысканию госпошлина в сумме 400 руб..

руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

решил:

Исковые требования ФИО1 к ПАО «Россетти Центр» удовлетворить частично.

Взыскать в пользу ФИО1 (паспорт №) с ПАО «Россети Центр» (ИНН №) неустойку в сумме 1 602 рубля 67 копеек, расходы на оплату юридических услуг – 1 449 рублей 60 копеек.

Взыскать с ПАО «Россети Центр» (ИНН №) в доход бюджета муниципального образования города Ярославля госпошлину в сумме 400 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Ярославский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Кировский районный суд города Ярославля.

Судья В.В. Воробьева