Гражданское дело № 2-386/2025

УИД 19RS0005-01-2025-000752-60

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

с. Белый Яр 07 августа 2025 года 

Алтайский районный суд Республики Хакасия 

в составе председательствующего судьи Хорошкиной А.А., 

при секретаре Рыбачковой Д.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 ФИО5 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратилась в суд с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее – ПАО «Россети Сибирь») об обязании исполнить условия договора от 30 июня 2023 года № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, взыскании компенсации морального вреда в размере в размере 100 000 руб. 00 коп., неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки в размере 39 482 руб. 58 коп.

Требования мотивированы тем, что 30 июня 2023 года ФИО2 заключила с ПАО «Россети Сибирь» договор № (далее – договор) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №. Согласно п. 3 договора точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям. Технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении к договору. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора (п. 4 договора). В силу п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. В силу п. 17 договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку равную 0,25 процента, указанного общего размера платы, за каждый день просрочки. Обязанность по оплате стоимости услуги технологического присоединения ФИО2 исполнила в полном объеме, оплатив сумму в размере 47 880 руб. 00 коп. частями, дата последнего платежа 22 декабря 2023 года. Условия по договору не исполнены, технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: 

<

адрес>, не осуществлено. 

В судебном заседании истец ФИО1 исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» в судебном заседании не присутствовал, надлежащим образом извещен о дате, времени и месте проведения судебного заседания.

Представителем ответчика ПАО «Россети Сибирь» ФИО3, действующей на основании доверенности, направлен письменный отзыв на исковое заявление, в котором, не оспаривая доводы истца и подтверждая не исполнение обязательств по договору со стороны ответчика, ссылалась, в том числе, на тяжелое финансовое положение ПАО «Россети Сибирь». В случае удовлетворения требований истца об обязании осуществить технологическое присоединение, просила установить срок для исполнения решения суда 5 месяцев со дня его вступления в законную силу. При рассмотрении требований о взыскании компенсации морального вреда, просила учесть отсутствие доказательств перенесенных истцом нравственных страданий, в случае признания судом данного требования обоснованным, просила снизить размер компенсации морального вреда до 500 руб. 00 коп., к договорной и судебной неустойке применить положения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, снизив договорную неустойку до 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося представителя ответчика.

Заслушав пояснения истца, оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

В силу п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих, сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее – Правила), определяют порядок и процедуру технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче технических условий.

В соответствии с п. 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.

В перечень существенных условий договора, установленный пунктом 16 Правил, входит, в том числе, указание срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который составляет 30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров.

В судебном заседании установлено, что 30 июня 2023 года между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и ФИО2 (заявитель) заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно п. 1 договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, «Жилой дом», в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, класс напряжения электрических сетей 0,40 кВ.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка № (п. 2 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п. 5 договора).

Абзацем 1 п. 6 договора предусмотрено, что сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. 

Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях (п. 8 договора).

В технических условиях № указаны обязанности, которые должна осуществить сетевая организация (п. 10), а также указаны обязанности, которые должен осуществить заявитель (п. 11).

Пунктом 10 договора предусмотрено, что размер платы за технологическое присоединение составляет 47 880 руб. 00 коп.

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета (п. 21 договора).

Из материалов дела усматривается, что оплата по договору производилась истцом частями, последний платеж произведен 22 декабря 2023 года, что подтверждается чеками по операциям ПАО Сбербанк от 29 июня 2023 года на сумму 7 200 руб. 00 коп., от 02 августа 2023 года на сумму 7 200 руб. 00 коп., от 12 сентября 2023 года на сумму 10 800 руб. 00 коп., от 12 ноября 2023 года на сумму 10 000 руб. 00 коп., от 22 декабря 2023 года на сумму 12 680 руб. 00 коп.

Датой заключения договора, с учетом его условий и фактической оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору, является 22 декабря 2023 года.

С учетом условий п. 5 договора срок исполнения договора приходится на 22 июня 2024 года, который является выходным днем.

Следовательно, по правилам ст. 193 ГК РФ, предусматривающей, что если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день, окончание срока исполнения договора ПАО «Россети Сибирь» приходится на 24 июня 2024 года.

Доказательств, свидетельствующих о неисполнении указанных обязанностей, предусмотренных договором, по вине ФИО2 либо форс-мажорных обстоятельств суду не представлено.

Таким образом, судом установлено, что ПАО «Россети Сибирь» принятые на себя обязательства по технологическому присоединению перед истцом ФИО2 не исполнены, при этом доказательств, которые свидетельствовали бы об отсутствии вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств по договору, в силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

На момент рассмотрения дела указанный договор действует, в установленном законом порядке не расторгнут, стороны от исполнения обязательств по договору не отказались.

При таких обстоятельствах, суд считает требования истца о возложении на ПАО «Россети Сибирь» обязанности по осуществлению технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств истца по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской федерации при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.

Представитель ответчика просил установить срок для исполнения решения суда 5 месяцев.

Суд учитывает, что заключая договор технологического присоединения, сетевая организация обладала сведениями, необходимыми для реализации обязанностей по данному договору, и самостоятельно согласовала технические условия.

С учетом установленных обстоятельств, длительности неисполнения обязанностей со стороны ответчика ПАО «Россети Сибирь» по договору, объема работ, необходимых для технологического присоединения, суд полагает возможным установить срок для исполнения возложенных на ответчика ПАО «Россети Сибирь» обязанностей, в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

В соответствии с положениями п. 17 договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки (пени), определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Истец просил взыскать с ответчика неустойку, за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки в размере 39 482 руб. 58 коп., из расчета 47 880 руб. х 536 дн. х 1/130 х 20% = 39 482 руб. 58 коп.

Согласно устным пояснениям истца, данным в ходе судебного заседания, количество дней просрочки (536 дней) ею рассчитано приблизительно с учетом длительности рассмотрения спора в суде. Истец просила взыскать неустойку с даты, нарушения ответчиком обязательства, до момента вынесения решения суда.

Проверив представленный расчет, суд, находит его неверным, поскольку при заключении договора стороны согласовали условия, согласно которым за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, предусмотрена неустойка, равная 0,25% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (п. 17), следовательно, неустойка составляет 119 руб. 70 коп. (47 880 руб. 00 коп. х 0,25%) за каждый день просрочки. 

Определяя дату, с которой подлежит исчислению неустойка, суд исходит из условий п.п. 5 и 21 договора, которыми определены дата заключения договора и срок выполнения обязательств сетевой организации по указанному договору, в соответствии с которым срок исполнения договора ПАО «Россети Сибирь» приходится на 24 июня 2024 года. 

Следовательно, неустойка подлежит исчислению с 25 июня 2024 года по 07 августа 2025 года (день вынесения решения суда) включительно (409 дней).

Таким образом, сумма неустойки за период, определенный истцом, составляет, исходя из расчета: 47 880 руб. 00 коп. х 409 дн. х 0,25% = 48 957 руб. 30 коп. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.

Учитывая, что истцом заявлено требование о взыскании неустойки 39 482 руб. 58 коп., суд считает возможным удовлетворить требование истца в заявленной размере.

Ответчиком в ходе рассмотрения дела заявлено ходатайство о применении судом положений ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с явной несоразмерностью требуемой неустойки последствиям нарушения обязательств, и снижении ее размера до 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, а также изменения периода ее взыскания.

В силу п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», применение ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки (п. 73).

Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков, но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.) (п. 74).

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (п.п. 3, 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из приведенных правовых норм и разъяснений постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, что уменьшение неустойки производится судом исходя из оценки ее соразмерности последствиям нарушения обязательства, однако такое снижение не может быть произвольным и не допускается без представления ответчиком доказательств, подтверждающих такую несоразмерность, а также без указания судом мотивов, по которым он пришел к выводу об указанной несоразмерности.

В ходе рассмотрения дела обстоятельства, которые могли бы быть признаны основанием для освобождения ответчика от ответственности за ненадлежащее исполнение заключенного с истцом договора либо снижения размера неустойки, установлены не были. 

Поскольку судом установлено, что обязательства по договору ответчиком до настоящего времени не исполнены, принимая во внимание общий период уклонения от исполнения обязательств, оснований для снижения суммы неустойки суд не находит.

На основании изложенного с ПАО «Россеети Сибирь» в пользу ФИО2 подлежит взысканию неустойка за нарушение условий договора за период с 25 июня 2024 года по 07 августа 2025 года включительно в размере 39 482 руб. 58 коп.

В соответствии со ст. 15 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В судебном заседании материалами дела установлен факт нарушения ответчиком прав истца как потребителя по заключенному 30 июня 2023 года с ПАО «Россети Сибирь» договору № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В соответствии с ч. 1 ст. 15 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», с учетом срока и характера нарушения прав истца, суд определяет размер компенсации морального вреда в сумме 1 000 руб. 00 коп., которая подлежит взысканию с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО2, отказав в удовлетворении остальной части данных требований.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

На основании вышеизложенного суд считает необходимым взыскать с ответчика ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО2 штраф в размере 20 241 руб. 29 коп., исходя из следующего расчета: (39 482 руб. 58 коп. + 1 000 руб. 00 коп.) / 2.

Поскольку в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика ПАО «Россети Сибирь» в доход местного бюджета в размере 7 000 руб. 00 коп. (4 000 руб. 00 коп. по материальному требованию о взыскании неустойки + 3 000 руб. 00 коп. по требованию о взыскании морального вреда).

Оснований к пропорциональному распределению судебных расходов не имеется, поскольку частичное удовлетворение требования о компенсации морального вреда, не является основанием для пропорционального распределения судебных расходов.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования ФИО2 ФИО6 (паспорт серии №) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (№) о защите прав потребителей удовлетворить частично.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» исполнить условия договора от 30 июня 2023 года № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, и осуществить технологическое присоединение принадлежащего ФИО2 ФИО7 энергопринимающего устройства в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу ФИО2 ФИО8 неустойку за нарушение обязательств по договору за период с 25 июня 2024 года по 07 августа 2025 года включительно в размере 39 482 рубля 58 копеек, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей 00 копеек, штраф в размере 20 241 рубль 29 копеек.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 7 000 рублей 00 копеек.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке через Алтайский районный суд Республики Хакасия в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья А.А. Хорошкина

Мотивированное решение изготовлено 14 августа 2025 года.