Дело № 2 – 35/2024

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

с. Богородское 07 марта 2024 года

Ульчский районный суд Хабаровского края в составе: 

председательствующего судьи Дрюпина А.В., 

с участием помощника прокурора Шиловского Д.В.,

представителя ответчика ФИО1,

при секретаре судебного заседания Сухар Н.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Ульчского района Хабаровского края в интересах неопределенного круга лиц к Краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Ульчская районная больница» и Министерству здравоохранения Хабаровского края о возложения обязанности обеспечить финансирование и выполнение мероприятий по устранению дефектов и повреждений поликлиники-стационара КГБУЗ «Ульчская районная больница» (лит. А), расположенного по адресу: 

<

...>-

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Ульчского района Хабаровского края в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обратился в суд с настоящим иском в интересах неопределенного круга лиц к Краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Ульчская районная больница» и Министерству здравоохранения Хабаровского края о возложения обязанности обеспечить финансирование и выполнение мероприятий по устранению дефектов и повреждений, указанных в техническом отчете по результатам инженерно-технического обследования состояния строительных конструкций здания поликлиники-стационара КГБУЗ «Ульчская районная больница» (лит а), расположенного по адресу: ул. Строительная, д. 1а в п. Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края, подготовленном ООО «Комплекс эксперт проект строй» в 2022 году, в течение 9 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. В обосновании требований указал, что прокуратурой Ульчского района по поручению прокуратуры Хабаровского края от 29.09.2023 проведен анализ состояния законности в сфере здравоохранения на территории Ульчского района. При проверки установлено, что здание поликлиники-стационара КГБУЗ «Ульчская районная больница», расположенное по адресу: ул. Строительная, д. 1а, п. Де-Кастри, имеет многочисленные дефекты и повреждения. Указанные обстоятельства подтверждаются результатом инженерно-технического обследования состояния строительных конструкций здания от 2022 г., проведенного ООО «Комплекс эксперт проект строй», состоявшая в СРО Ассоциация «Саморегулируемая организация архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» (per. номер члена СРО П-097-002703097367-0303). Для устранения данных нарушений 10.10.2023 в адрес КГБУЗ «Ульчская районная больница» внесено представление, по результатам рассмотрения которого меры по устранению нарушений закона не приняты. Согласно ответу КГБУЗ «Ульчская районная больница » от 09.11.2023 выполнение рассматриваемых ремонтно-восстановительных работ не представляется возможным ввиду отсутствия достаточного финансирования указанных мероприятий, о чем было сообщено в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя -Министерство здравоохранения Хабаровского края. Данное бездействие, выразившееся в непринятии мер по приведению здания медицинского учреждения в надлежащее состояние, нарушает права неопределенного круга лиц из числа посетителей, медицинского и технического персонала поликлиники-стационара на качественное оказание медицинской помощи и безопасные условия пребывания на объекте. Просят удовлетворить требования и возложить обязанности обеспечить финансирование и выполнение мероприятий по устранению дефектов и повреждений поликлиники-стационара КГБУЗ «Ульчская районная больница» (лит. А), расположенного по адресу: 

<

...>

В судебном заседании представитель истца на удовлетворении исковых требований настаивал по основаниям, указанным в иске. 

Представитель ответчика – министерство здравоохранения Хабаровского края, в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, предоставили в суд отзыв, согласно которому в удовлетворении требований просят отказать, так как в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 09 октября 2019 г. N 1304 "Об утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения экспертизы проектов региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения» утверждена программа Хабаровского края "Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края". Финансирование данной программы осуществляется за счет средств федерального и краевого бюджетов. На 2024 год запланирована разработка проектно-сметной документации в размере 3 000 000 руб. за счет средств краевого бюджета, после получения положительного заключения государственной экспертизы состоится конкурентная закупка на определение подрядной организации для выполнения капитального ремонта стационарного отделения в п. Де-Кастри. Согласно утвержденной программы выполнение капитального ремонта будет произведено в два этапа в 2024 и 2025 годах, планируемая стоимость работ 70 000 000 руб.

Представитель ответчика – КГБУЗ «Ульчская районная больница» в судебном заседание пояснил, что просит в удовлетворении требований отказать. Представили письменный отзыв, из которого видно, что в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» финансовое обеспечение учреждения производится в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Хабаровского края (далее Территориальная программа). В соответствии с территориальной программой источниками финансового обеспечения учреждения являются средства краевого бюджета и средства обязательного медицинского страхования по определенным видам медицинской помощи. В рамках Территориальной программы ОМС утверждаются нормативы объема медицинской помощи и тарифы на оплату (в расчете на одно застрахованное лицо). Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи устанавливаются в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» тарифным соглашением между уполномоченным органом исполнительной власти, Хабаровским краевым фондом ОМС и медицинскими учреждениями. В соответствии со статьей 35 ФЗ № 326 от 29.11.2010 г. структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу. За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи, которая не входит в Территориальную программу ОМС, а финансируется за счет субсидии на выполнение государственного задания, в части оказания паллиативной медицинской помощи (в амбулаторных и стационарных условиях), оказание первичной медицинской помощи в части психиатрии, наркологии и медицинского освидетельствования и льготное зубное протезирование. За счет указанного финансирования учреждение не имеет права приобретать дорогостоящее оборудование или осуществлять расходы на капитальный ремонт или проектно-сметные расходы. Изготовление проектно-сметной документации, осуществление капитального ремонта осуществляется только за счет целевых краевых субсидий. В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 09 октября 2019 г. N 1304 "Об утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения экспертизы проектов региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения» утверждена программа Хабаровского края "Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края". Финансирование данной программы осуществляется за счет средств федерального и краевого бюджетов. КГБУЗ «Ульчская районная больница» принимает участие в данной программе с целью модернизации лечебных подразделений учреждения, в том числе проведения капитальных ремонтов. В 2022 г. выделены средства на организацию, в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, процедур по составлению проектно-сметной документации. На данный момент выполнено техническое обследование и обмерные работы по капитальному ремонту здания стационарного отделения расположенного по адресу: п. Де - Кастри, ул. Строительная, 1 А. На 2024 год запланирована разработка проектно-сметной документации в размере 3 000 000 руб. за счет средств краевого бюджета, после получения положительного заключения государственной экспертизы состоится конкурентная закупка на определение подрядной организации для выполнения капитального ремонта стационарного отделения в п. Де-Кастри. Согласно утвержденной программы выполнение капитального ремонта будет произведено в два этапа в 2024 и 2025 годах, планируемая стоимость работ 70 000 000 руб.

Суд, на основании положений ст. ст. 113, 117 Гражданского процессуального кодека Российской Федерации, не находит оснований для отложения судебного разбирательства дела, и считает возможным рассмотреть его в отсутствие не явившихся лиц.

Заслушав представителя истца, представителя ответчика, изучив и оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.

Согласно ст.ст. 18, 45, 55 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются государством. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» медицинская организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, предоставленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. 

Согласно ч. 2 ст. 18 Закона № 323-ФЗ право на охрану здоровья обеспечивается созданием безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, а также оказанием доступной и качественной медицинской помощи.

Согласно п.п. «а» п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852, к лицензионному требованию, предъявляемому к соискателю лицензии на осуществление медицинской деятельности, относится наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг).

На основании ст. 7 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу в результате: разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей; разрушения всего здания, сооружения или их части; деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории; повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности.

Как видно из технического отчета по результатам инженерно-технического обследования состояния строительных конструкций здания поликлиники-стационара КГБУЗ «Ульчская районная больница» (лит А), расположенного по адресу: ул. Строительная, д. 1а в п. Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края, подготовленном ООО «Комплекс эксперт проект строй» имеет следующие дефекты и повреждения: цоколь здания (почти повсеместно на поверхности стен наблюдаются следы от намокания и морозной деструкции (размораживания) в виде сколов, грибка, шелушения и отслаивание отделочного штукатурного слоя с выпадением отдельных кусков, шелушения и отслаивание лакокрасочного покрытия); 

- фундамент (трещины, шелушение, растрескивание, вспучивание или отслаивание отдельных участков отделочного штукатурного слоя и лакокрасочного покрытия, с растрескиванием и выпадением отдельных кусков; сколы, тёмно-серые пятна и разводы на внутренней поверхности стен; в зонах размещения приборов санитарно-технического оборудования, труб и стояков внутренних инженерных сетей на поверхности стен наблюдается отслаивание отделочного штукатурного слоя и лакокрасочного покрытия; в местах прохождения труб сквозь стены нарушение целостности материала стен и внутренней их отделки в виде сколов, не заделанных сквозных дыр; вдоль линий примыкания деревянных дверных и оконных блоков к внутренним откосам стен имеются трещины с отслоением и выпадением отдельных кусков отделочного штукатурного слоя);

- наружные и внутренние стены (на поверхности наружных откосов дверных, оконных проёмов, цоколя наружных стен наблюдается: шелушение, растрескивание, вспучивание и отслаивание покрасочного покрытия, растрескивание штукатурного покрытия с сеткой мелких трещин с раскрытием W-l-0,2 мм.; на внутренней поверхности стен на участках под окнами, на отдельных участках в вдоль линии примыкания стен к железобетонным плитам чердачного перекрытия, практически по всей площади в границах внутренних лестничных клеток наблюдается отслаивание отделочного штукатурного слоя и лакокрасочного покрытия; в зонах размещения санитарно-технического оборудования, стояков внутренних инженерных сетей, батарей отопления на поверхности стен наблюдаются следы отслаивания отделочного лакокрасочного покрытия; вдоль линий примыкания внутренней отделки стояков внутренних инженерных сетей и вентиляционных коробов к стенам наблюдаются нитевидные трещины с шириной раскрытия до 0,5 мм; вдоль линий примыкания деревянных дверных и оконных блоков к внутренним откосам стен имеются трещины с растрескиванием, отслоением и выпадением отдельных кусков отделочного штукатурного слоя);

- перегородки в подвале (повсеместно на поверхности перегородок, вдоль откосов деревянных дверных блоков наблюдаются: шелушение, растрескивание и отслаивание отделочного штукатурного и покрасочного покрытия с сеткой мелких трещин с раскрытием 0,1-0,5 мм; в подсобном помещении перегородка, ограждающая стояки внутренних инженерных сетей здания, деформировалась, вдоль линий её примыкания к перегородке и плитам перекрытия образовались трещины шириной раскрытия более 10 мм; на поверхности перегородок повсеместно наблюдаются следы шелушения и отслаивание отделочного штукатурного слоя и лакокрасочного покрытия; в местах прохождения труб, размещения приборов санитарнотехнического оборудования, стояков внутренних инженерных сетей, на поверхности перегородок наблюдаются следы шелушения и отслаивание отделочного покрытия; в местах прохождения труб сквозь перегородки наблюдается нарушение целостности материала перегородок и внутренней их отделки в виде сколов, не заделанных сквозных дыр);

- перегородки 1 и 2 этажей (на отдельных участках на поверхности перегородок, вдоль откосов деревянных дверных и оконных блоков наблюдаются: шелушение, растрескивание и отслаивание покрасочного покрытия, растрескивание штукатурного покрытия с сеткой мелких трещин с раскрытием 0,1-0,2 мм; на втором этаже вдоль линии примыкания перегородок к железобетонным плитам чердачного перекрытия местами наблюдаются следы шелушения и отслаивание отделочного штукатурного слоя и лакокрасочного покрытия; в зонах размещения санитарно-технического оборудования, стояков внутренних инженерных сетей, на поверхности перегородок наблюдаются следы шелушения и отслаивание отделочного лакокрасочного покрытия; в местах прохождения труб внутренней системы отопления сквозь перегородки наблюдается нарушение целостности материала перегородок и внутренней их отделки в виде сколов, не заделанных сквозных дыр; вдоль линий примыкания внутренней отделки стояков внутренних инженерных сетей и вентиляционных коробов к перегородкам наблюдаются нитевидные трещины с шириной раскрытия до 0,5 мм);

- перекрытия подвала (на поверхности плит перекрытия наблюдаются следы шелушения и отслаивание отделочного слоя побелки и штукатурного слоя; повсеместное растрескивание монтажных швов между плитами перекрытия с выпадением из швов кусков цементного раствора на отдельных участках; в местах прохождения сквозь перекрытие стояков внутренних инженерных сетей на поверхности плит наблюдаются следы шелушения и отслаивание отделочного штукатурного слоя, а также нарушение целостности материала плит перекрытия в виде сколов, не заделанных углублений; на отдельных участках перекрытия, выполненных из монолитного бетона, почти полностью разрушен защитный слой бетона, наблюдается обнажённая арматура со следами коррозии в виде ржавчины);

- перекрытия 1 и 2 этажей (местами наблюдается растрескивание монтажных швов между плитами перекрытия; на поверхности плит перекрытия 2 этажа (чердачного перекрытия) в некоторых местах наблюдаются следы шелушения и отслаивание отделочного слоя побелки и штукатурного слоя; в местах прохождения сквозь перекрытие стояков внутренних инженерных сетей на поверхности плит наблюдаются следы шелушения и отслаивание отделочного штукатурного слоя, а также нарушение целостности материала плит перекрытия в виде сколов, не заделанных углублений);

- внутренние лестницы (подвал на 1 этаж: сколы, потёртости, раковины на поверхности ступеней и площадок; отсутствие поручней; растрескивание и отслоение антикоррозионного лакокрасочного покрытия на поверхности элементов ограждения лестниц);

- кровля (недостаточный вынос от наружных стен карнизных свесов; на поверхности мауэлатов наблюдаются многочисленные продольные усушенные трещины; недостаточное сечение обрешётки с учётом шага обрешётки и шага стропильных балок; по верху стропильных балок отсутствует антиконденсатная плёнка; практически отсутствует обработка древесины огнебиозащитными составами; отсутствуют ходовые мостики; отсутствуют стремянки для выхода на кровлю через слуховые окна; металлическое ограждение кровли повреждено, часть секций отсутствует; деформированы и отсутствуют элементы наружной водосточной системы (лотки, трубы); нет зашиты фронтоны карнизных свесов;

- инженерные сети (отопление и теплоснабжение: в подвале трубопроводы отопления имеют значительные следы повреждения антикоррозионного покрытия в виде потёков, ржавчины, шелушения и отслоений лакокрасочного покрытия; на трубопроводах системы теплоснабжения приточных установок отсутствует тепловая изоляция; на стояках отопления частично отсутствует запорная арматура; на поверхности трубопроводов в районе расположения радиаторов отопления видны следы от протечек в виде коррозии (потёки ржавчины); на трубопроводах теплоснабжения и арматуре в местах подключения санитарных приборов наблюдаются следы коррозии и ржавчины; канализация: большинство санитарных приборов находятся либо в изношенном, либо в нерабочем состоянии; вытяжная часть канализационных стояков выведена на чердак в подстропильное пространство; электроснабжение: вентиляционное оборудование частично разобрано, имеет следы значительного износа и отсутствия эксплуатации; воздуховоды частично разрушены и негерметичны; на всем вентиляционном оборудовании наблюдается наличие ржавчины и отсутствие антикоррозионного покрытия; на поверхности вентиляционных коробов в помещениях 1, 2 этажей наблюдаются следы от потёков в виде тёмно-серых, бурых пятен и разводов;

- отмостка (на поверхности наблюдаются механические повреждения (сколы, трещины); деформации (провалы, трещины, просадки, разрушение материала отмостки, нарушения уклона); коррозия (мох, грибок, проросшая трава).

При этом, в данном отчете указаны конкретные действия для устранения данных дефектов и повреждений.

На основании поручения 712-12-2023 прокуратуры Хабаровского края прокуратурой Ульчского района проведен анализ состояния законности в сфере здравоохранения КГБУЗ «Ульчская районная больница», по результатам которого направлено представление в КГБУЗ «Ульчская районная больница» об устранении нарушений требований законодательства в сфере здравоохранения.

Из ответа КГБУЗ «Ульчская районная больница» на предписание видно, что изготовление проектно-сметной документации, осуществление капитального ремонта осуществляется только за счет целевых краевых субсидий. В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 09 октября 2019 г. N 1304 "Об утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения экспертизы проектов региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения» утверждена программа Хабаровского края "Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края". Финансирование данной программы осуществляется за счет средств федерального и краевого бюджетов. КГБУЗ «Ульчская районная больница» принимает участие в данной программе с целью модернизации лечебных подразделений учреждения, в том числе проведения капитальных ремонтов. В 2022 г. выделены средства на организацию, в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, процедур по составлению проектно-сметной документации, однако выделенных средств оказалось недостаточно для проектной документации, о чем сообщено в министерство здравоохранения Хабаровского края. 

Непринятии мер по приведению здания медицинского учреждения в надлежащее состояние, нарушает права неопределенного круга лиц из числа посетителей, медицинского и технического персонала поликлиники-стационара на качественное оказание медицинской помощи и безопасные условия пребывания на объекте.

Как видно из выписки из Единого государственного реестра недвижимости КГБУЗ «Ульчская районная больница» принадлежит на праве оперативного управления здание поликлиники-стационара КГБУЗ «Ульчская районная больница» (лит А), расположенного по адресу: ул. Строительная, д. 1а в п. Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края. 

В соответствии с пунктами 7, 8 Положения о Министерстве здравоохранения Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 26.07.2007 № 149-пр, установлено, что Министерство планирует развитие и материально-техническое обеспечение подведомственных организаций здравоохранения края; осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и подведомственных ему организаций, в связи с чем распределением средств бюджета на устранение указанных выше нарушений лежит на Министерстве здравоохранении Хабаровского края.

При таких обстоятельствах, указанные в исковом заявлении подлежащие исполнению требования, исходя из вышеперечисленных положений нормативных правовых актов, основаны на законе и подлежат удовлетворению. 

Доводы ответчиков о том, что КГБУЗ «Ульчская районная больница» принимает участие в программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края" с целью модернизации лечебных подразделений учреждения, в том числе проведения капитальных ремонтов, не является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований прокурора.

В соответствии с действующим законодательством, в случае, если действия, к совершению которых ответчик обязан решением суда, могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Учитывая, что для исполнения обязанности по устранению нарушения требований к охране жизни и здоровья требуется проведение дополнительных мероприятий, а также значимость и необходимость скорейшего обеспечения безопасности лиц, пребывающих в медицинском учреждении, суд считает необходимым установить срок для исполнения настоящего решения по требованию прокурора установить девять месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд,-

РЕШИЛ:

Возложить на Министерство здравоохранения Хабаровского края, КГБУЗ «Ульчская районная больница» обязанность обеспечить финансирование и выполнение мероприятий по устранению дефектов и повреждений, указанных в техническом отчёте по результатам инженерно-технического обследования состояния строительных конструкций здания поликлиники-стационара КГБУЗ «Ульчская районная больница» (Лит а), расположенного по адресу: ул. Строительная, д. 1а в п. Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края, подготовленном ООО «Комплекс эксперт проект строй» в 2022 году, в течение девяти месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Ульчский районный суд Хабаровского края в течение месяца со дня его вынесения.

Мотивированное решение изготовлено 14 марта 2024 года

Судья: А.В. Дрюпин